2023년도 수시분 공유재산 관리계획안

의안 번호	3456		제출년월일	2023. 11. 10.
			제 출 자	진 주 시 장

Ⅰ. 제안이유

공유재산 및 물품 관리법 제10조의2 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에

의거 2023년도 제3회 추경예산안 관련, 취득 예정인 중요한 공유재산에 대하여 수시분 공유재산 관리계획을 수립하여 시의회의 의결을 받아 시행하고자 함.

Ⅱ. 주요내용

❏ 수시분 공유재산 관리계획 수립 대상 : 취득 2건

1. 진주시 내동공영차고지 전기충전소 설치사업

❍ 취득재산 : 공작물 3개 462.3㎡ / 사업비 1,541백만원(기부채납)

2. 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업

❍ 취득재산 : 건물 신축 1동 5,832㎡ / 사업비 33,870백만원

Ⅲ. 사업현황

1. 진주시 내동공영차고지 전기충전소 설치사업

가. 사업개요

❍ 사 업 명 : 진주시 내동공영차고지 전기충전소 설치사업

❍ 위    치 : 진주시 내동면 내동로 170 내동공영차고지 내

❍ 취득재산

- 공작물(충전소 캐노피) 조성 3개 462.3㎡

❍ 취득방법 : 기부채납   ※준공 후 진주시로 기부채납

❍ 사 업 비 : 1,541백만원

- 건축비 305, 시설물 조성비 1,236

❍ 연도별 사업비 내역

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자현황		비고
		2022년	2023년
계	1,541	606	935
부산교통㈜	453	453	0
삼성교통㈜	935	0	935
진주시민버스㈜	153	153	0

❍ 사업규모 및 주요시설

- 부지면적 : 609.2㎡

- 건축물 연면적 : 462.3㎡(충전소 캐노피 3개동)

- 수배전반(990kW급), 파워뱅크 및 디스펜서, 캐노피 일체

(단위 : ㎡, 백만원)

신청인	기부물건	연면적	재산가액	비 고
합 계		609.2	1,541
부산교통㈜ (대표자 조옥환)	소 계	194.5	453
	수배전반	38.5	160	공작물
	파워뱅크, 디스펜서		208	공작물
	캐 노 피	156.0	85	건축물
삼성교통㈜ (대표자 김성래)	소 계	382.0	935
	수배전반	70.0	323	공작물
	파워뱅크, 디스펜서		392	공작물
	캐 노 피	312.0	220	건축물
진주시민버스㈜ (대표자 이강태)	소 계	32.7	153
	디스펜서(증설)		153	공작물
	캐노피(태양열발전)	32.7		공작물

❍ 사업기간 : 2022년 7월 ~ 2023년 11월

❍ 사업부서 : 교통환경국 교통행정과

나. 사업목적

❍ 전기저상버스의 원활한 전기 충전을 위하여 공영차고지 박차시 충전할 수 있도록 충전공간 마련

❍ 전기저상버스 심야 박차시 충전이 가능한 충전시설 조성, 우천시 안전 확보를 위한 비가림용 캐노피 설치

다. 추진상황

❍ 2022년 6월 : 진주시 공유재산심의회 심의

❍ 2022년 7월 : 전기버스 충전소 착공

❍ 2023년 9월 : 면적 추가에 따른 진주시 공유재산심의회 변경 심의

라. 향후계획

❍ 2023년 11월 : 충전시설 조성사업 완공

❍ 2023년 12월 : 기부채납 진행

2. 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성

가. 사업개요

❍ 사 업 명 : 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성

❍ 위    치 : 진주시 문산읍 삼곡리 1033번지 / (재)진주바이오산업진흥원 내

❍ 취득재산

- 건물 신축 1동 5,832㎡

(단위 : ㎡, 백만원)

건물용도	구조	연면적	기준가격	사업비	취득시기	비고
교육연구시설	철근콘크리트	5,832	33,870	33,870	2026년

❍ 사 업 비 : 33,870백만 원(국비 16,170, 도비 2,079, 시비 15,621)

- 건축공사비 24,720, 설계비 등 용역비 3,356, 장비구입비 4,000, 예비비 1,794

❍ 연도별 사업비 내역

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자현황			비고
			2024년	2025년	2026년
계	33,870	1,350	2,638	18,609	11,273
국 비	16,170	700	2,394	8,869	4,207
도 비	2,079		244	1,330	505
시 비	15,621	650	-	8,410	6,561

❍ 사업규모 : 건물 신축 1동(캠퍼스관) 및 부대시설 조성

- 부지면적 11,750㎡, 건물 연면적 5,832㎡

❍ 주요시설

- (건물신축) 그린바이오 벤처 캠퍼스관

층별	세부시설 설치계획	면적(㎡)
합 계		5,832
지상 5층	입주공간(연구용), 입주기업제품 공용창고, 게스트룸	972
지상 4층	입주공간(제조실용, 사무실용, 연구용)	972
지상 3층	입주공간(제조실용, 사무실용)	972
지상 2층	표준화공정실(Pilot 생산시설),입주공간(사무실)	972
지상 1층	운영지원실, 비즈니스지원실, 유효성분분석실, 마케팅‧홍보시설 등	972
지하 1층	기자재실, 창고, 기계실, 전기실 등	972

- (부대시설) 주차장, 운동시설, 숲길, 휴게쉼터

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

❍ 사업부서 : 농업기술센터 농산물유통과

나. 사업목적

❍ 고부가가치 천연물 기반 그린바이오 산업의 글로벌 거점 육성

❍ 그린바이오 산업 육성과 연계한 신산업 성장동력 구축

다. 추진상황

❍ 2023년 6월 : 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성 공모사업 최종 선정(6.19)

❍ 2023년 7월 : 기본계획 수립

❍ 2023년 10월 : 공공건축 사업계획 사전검토

❍ 2023년 11월 : 지방재정 투자심사 중앙심사 승인

라. 향후계획

❍ 2023년 11월 : 설계공모 준비(설계공모 과업 및 지침 작성)

❍ 2023년 12월 : 공공건축 심의, 설계공모

❍ 2024년  2월 : 실시설계 착수

❍ 2024년 12월 ~ 2026년 6월 : 공사 착공 및 준공

Ⅳ. 2023년도 수시분 공유재산 관리계획안 목록

❍ 공유재산 관리계획 총괄표   ----------------------   9P

❍ 공유재산 취득재산 목록     ----------------------  10P

❍ 위치도 및 전경사진         ----------------------  11P

공유재산 관리계획 총괄표

(단위 : ㎡, 백만원)

구 분			2023년			2024년 이후			합 계			비고
			건수	면적	금액	건수	면적	금액	건수	면적	금액
취득	계	토지
		건물				1	5,832	33,870
		기타	3	462.3	1,541
	매입 (신축)	토지
		건물				1	5,832	33,870				2026년
		기타
	교환 으로 취득	토지
		건물
		기타
	기타 취득	토지
		건물
		기타	3	462.3	1,541							기부채납
처분	계	토지
		건물
		기타
	매각	토지
		건물
		기타
	양여	토지
		건물
		기타
	교환 으로 처분	토지
		건물
		기타
	기타 처분	토지
		건물
		기타
무상사용 및 대부허가		계
		토지
		건물
		기타

공유재산 취득재산 목록

❏ 진주시 내동공영차고지 전기충전소 설치사업

(단위 : ㎡, 백만원)

사 업 명	취 득 재 산 표 시					소요 사업비	취득 시기	취득 방법	비고 (소관부서)
	구분	소 재 지	지목	(연)면적	기준가격
계		3개소		462.3		1,541
진주시 내동공영 차고지 전기충전소 설치사업	공작물 (캐노피)	내동면 신율리 490-3 (진주시 공영차고지)		462.3		1,541	2023년	기부 채납	교통행정과

❏ 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업

(단위 : ㎡, 백만원)

사 업 명	취 득 재 산 표 시					소요 사업비	취득 시기	취득 방법	비고 (소관부서)
	구분	소 재 지	지목	(연)면적	기준가격
계		건물 1동		5,382		33,870
그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업	건물	진주시 문산읍 삼곡리 1033		5,832		33,870	2026년	신축	농산물 유통과

진주시 내동공영차고지 전기충전소 설치 부지 위치도

진주시 내동공영차고지 전기충전소 설치 현황사진

그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업 부지 위치도

그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업 부지 현황사진