	부강한 진주 행복한 시민	제239회 진주시의회(임시회)

2022년도

시정 주요업무 보고서

진   주   시

(맑은물사업소)

보  고  순  서

□ 수    도    과

□ 정    수    과

□ 하 수 시 설 과

□ 하 수 운 영 과

수   도   과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 주요업무계획

1. 예산사업

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황	(단위 : 명)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	31	1	1	6	7	8	8
현 원	27	1	1	6	11	2	6
증 감	△4	-	-	-	4	△6	△2

※ 기타직 : 11명〔청원경찰 4명(상대배수지), 공무직 5명, 시간선택제임기제 1명〕

□ 상수도시설 현황

취수용량	정수용량	가 압 장	배 수 지
220,000㎥/일	200,000㎥/일 ·1정수장 : 60,000㎥/일 ·2정수장 : 140,000㎥/일	68개소	31개소

상수도관(㎞)					노후관 (%)
계	도수관	송수관	배수관	급수관
2,260	3	62	765	1,430	890㎞ (39.4)

□ 소규모 급수시설 현황(간이상수도)

구 분	계	이반성	비 고
개소	1	1
세대	8	8
인 구(명)	12	12

□ 급수현황	(2021. 12. 31. 기준)

행정구역내 인 구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	연 간 생산량 (천㎥)	1일평균 생산량 (천㎥)	1인1일 급수량 (ℓ)	연 간 조정량 (천㎥)	유수율 (%)
351,595	351,558	99.9	55,612	152	433	40,810	73.6

Ⅱ. 주요업무계획

1. 예산사업

- 지방상수도 현대화 사업(정수장 통합 및 개량) -

진주시 노후 정수장 정비사업

❍ 이원화된 제1·2정수장의 통합 및 시설현대화로 비효율적인 구조를 개선함으로써 깨끗하고 안전한      수돗물 생산·공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 판문·평거동(제1·2정수장)

❍ 사 업 량 : 시설용량 175,000㎥/일(정수장 통합 및 시설현대화)

❍ 사 업 비 : 85,377백만원(국비 50%, 지방비 50%)

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.(5년간)

□ 추진상황

❍ 2020. 11. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2022.  4. : 환경부 사전기술검토 승인

❍ 2022.  6. : 설계의 경제성 검토(VE) 용역 완료

□ 2022년 추진계획

❍ 2022.  8. : 경상남도 건설기술심의

❍ 2022. 10. : 공사 착공

❍ 2024. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자 계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년
계	85,377	4,500	14,016	20,000	46,861
국 비	42,689	3,000	13,016	10,000	16,673
지방비(시)	42,688	1,500	1,000	10,000	30,188

□ 기대효과

❍ 정수장 노후화·이원화에 따른 비효율성 개선으로 재정 건전성 확보

❍ 수돗물 품질 향상과 정수 기술 확보로 지방상수도 운영 효율성 제고

노후수도관 교체사업(계속)

❍누수가 잦고 내용연수가 경과한 수도관을 정비하여 시민불편 최소화 및 유수율 증대

❍ 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 상수도 공급지역

❍ 사 업 량 : 441㎞ [237㎞(기술진단) + 204㎞(20년 이상 노후관 전면교체 등)]

❍ 사 업 비 : 114,000백만원(국비 16,024, 시비 97,976)

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2026년(9년간)

□ 추진상황

❍ 2020. 12. : 노후수도관 교체 완료(L=180.5㎞)

❍ 2022.  2. ~ 5. : 2022년 당초예산 노후수도관 교체사업 착･준공(7건, L=16.2km)

❍ 2022.  6. : 2022년 추경예산 노후수도관 교체사업 착공(5건, L=57.8km)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
노후율(%)	46.2	46.0	44.7	42.3	39.4
유수율(%)	67.5	72.0	72.2	72.7	73.6

□ 2022년 추진계획

❍ 2022. 12. : 2022년 노후수도관 교체사업 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : ㎞, 백만원)

구 분		계	기시행	2022년	2023년 이후
사 업 량		441	180.5	74	186.5
사업비	계	114,000	50,352	20,000	43,648
	국 비	16,024	5,022	4,361	6,641
	시 비	97,976	45,330	15,639	37,007

□ 기대효과

❍ 노후 수도관 정비를 통한 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

❍ 유수율 제고를 통한 경영효율화 도모

지방상수도 현대화사업(노후상수관망)

❍ 광역계통 급수구역 내 노후 상수관망 정비로 유수율(85%) 증대

❍ 블록 및 유지관리시스템 구축으로 운영 및 관리 효율성 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 금곡·진성·일반성·이반성·사봉·지수면 일원

❍ 사 업 량

- 노후상수관로 정비 L=52.3㎞

- 블록 및 유지관리 시스템 구축 1식

❍ 사 업 비 : 32,048백만원(국비 16,024, 시비 16,024)

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2024년(5년간)

□ 추진상황

❍ 2020. 12. ~ 2022. 11. : 기본 및 실시설계용역

❍ 2022.  4. : 사전기술검토 승인(환경부)

❍ 2022.  6. : 블록시스템 구축공사 착공

❍ 2022.  7. : 유지관리시스템 구축공사 착공

□ 2022년 추진계획

❍ 2023.  1. : 노후상수관로 정비공사 착공

❍ 2024.  6. : 성과검증(목표 유수율 85% 이상)

❍ 2024. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기시행	2022년	2023년	2024년
계	32,048	7,433	8,722	12,612	3,281
국 비	16,024	5,022	4,361	5,000	1,641
시 비	16,024	2,411	4,361	7,612	1,640

□ 기대효과

❍ 누수저감 및 유수율 제고를 통한 수도사업의 경영개선 도모

❍ 녹물 발생, 이물질 유입 예방 등 깨끗하고 안정적인 수돗물

스마트 검침 시스템 구축사업(계속)

❍ 정부의 스마트 관망 인프라 구축사업의 한 분야인 스마트 검침 시스템을 구축하여 상수도 유수율      제고 및 상수도 행정 대민서비스 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 전역

❍ 사 업 량 : 디지털 계량기 교체(57,000전, 2022년 5월 기준) 및 서버 구축 1식

❍ 사 업 비 : 17,000백만원(국비 1,692, 시비 15,308)

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2028년(8년간)

□ 추진상황

❍ 2021. 2. ~ 12. : 14,400전 교체(문산읍, 사봉면 등 14개 읍면동)

□ 2022년 추진계획

❍ 2022. 2. ~  8. : 8,000전 교체 중(충무공·천전·상평동, 수곡·미천면 등)

□ 연도별 투자계획	(단위 : 전, 백만원)

구분		계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
사업량		57,000	14,400	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000	5,000	1,600
사업비	계	17,000	3,892	2,408	2,100	2,100	2,100	2,100	1,700	600
	국비	1,692	1,692
	시비	15,308	2,200	2,408	2,100	2,100	2,100	2,100	1,700	600

□ 기대효과

❍ 난검침 지역 해소 및 스마트 검침 시스템 구축으로 상수도 유수율 제고

❍ IoT 기술을 활용한 정부의 그린뉴딜 정책 실현

정   수   과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 주요업무계획

1. 시책사업

2. 예산사업

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황	(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	연구사	비 고
정 원	30	1	5	7	8	7	2
현 원	29	1	7	17	1	1	2
증 감	△1	-	2	10	△7	△6	-

※ 청원경찰 : 12명(취수장, 1정수장, 2정수장 각 4명), 공무직 : 1명(조리사)

□ 시설물 현황

구 분	취 수 장	1정수장	2정수장
위 치	남강로1번길 105-38	남강로1번길 38	진양호로125번길 22-35
시설용량	220,000㎥/일	60,000㎥/일	140,000㎥/일
시설연혁	1992. 5.	·정 수 시 설 : 1977. ~ 1982. ·슬러지시설 : 1995. 10.	·정 수 시 설 : 1987. ~ 1990. ·슬러지시설 : 1996. 10.
부 지	2,086㎡(631평)	34,915㎡(10,562평)	86,956㎡(26,304평)
건 물	3,300㎡	2,392㎡	4,190㎡

※ 1992. 5. 취수탑 이설

□ 위원회	(단위 : 명, 2022. 6. 30. 현재)

구 분 위원회명	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여 성 위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
수돗물평가위원회	10	-	10	4	40	6	60	5	50

□ 정수처리 현황

구 분	년도	취수유량(㎥)	배수유량(㎥)			비고
			계	1정수장	2정수장
연간총생산량	2021	46,046,230	45,122,270	12,312,837	32,809,433
	2022	22,794,164	22,199,264	5,816,263	16,383,001	6.30.기준
일평균생산량	2021	126,154	123,623	33,734	89,889
	2022	125,934	122,647	32,134	90,513	6.30.기준

※ 연평균 정수처리 수질(탁도 기준) : 0.05NTU(법정기준 0.5NTU 이하)

Ⅱ. 주요업무계획

1. 시책사업

믿고 마실 수 있는 수돗물 생산 공급

❍ 안정적 수돗물 생산 및 운영체계 정립으로 수돗물의 품질 신뢰성 제고

❍ 효율적 공정관리체계 구축으로 저비용 고품질 수돗물 생산 실현

□ 사업개요

❍ 사업목표 : 수질 목표값(탁도 0.1NTU 이하) 설정으로 고품질 수돗물 생산 실현

❍ 추진방향 : 정비이력관리제, 정비주기 설정 관리제, 기술진단 분석 활용으로  효율적 공정관리

□ 추진계획

❍ 최적의 수질관리를 통한 고품질 수돗물 생산·공급

- 수질 목표값 탁도 0.1NTU(법정기준 : 0.5NTU) 이하 유지

- ｢찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제｣ 시행으로 신뢰받는 수도행정 구현

❍ 효율적 공정관리를 위한 유지관리체계 확립

- 정비이력관리제의 제도적 정착과 정비주기 설정관리제 시행

❍ 체계적인 정비·관리와 선제적 교육·훈련으로 위험요인 사전 차단

- 기술진단 및 안전진단 보고서, 이력카드 등에 기반을 둔 정비·수립 시행

- 시설 안전 점검, 안전교육, 위기 대응훈련 등의 정기적 시행

□ 기대효과

❍ 선제적 시설 정비와 체계적인 공정관리로 수돗물 수질사고 미연에 방지

❍ 법정 수질기준 이상 최상의 수돗물 생산으로 음용수로서의 신뢰성 제고

신뢰 증진을 위한 수질검사 체계 확립

❍ 다양한 첨단 장비와 전문 인력의 기술력을 활용한 체계적 정수공정 관리

❍ 찾아가는 민원서비스와 검사 결과 공표를 통한 수돗물 신뢰 증진

□ 사업개요

❍ 깨끗한 수돗물 생산을 위한 수질검사 체계 확립

❍ 수돗물 민원 발생 시 찾아가는 민원 서비스로 수돗물 신뢰 증진

□ 추진계획

❍ 조류 등 특이 수질 대비 수돗물 특별관리 대책 기간 운영 : 6~10월(5개월간)

❍ 진양호 원수 및 상류수계 수질에 대한 정기적 검사 실시

- 진양호 원수 수질검사

∙ 탁도 등 7항목/매일, pH 등 18항목/매주, 카드뮴 등 38항목/매월

- 상류 수계 수질검사 : 매월 10개소(BOD 등 11항목)

❍ 공정관리 및 급수계통 수질관리를 위한 수질검사

- 수질 변화에 따른 자(jar)테스트 실시 : 주 2회 이상(수질 이상 시 수시)

- 정수공정 관리 수질검사 : 9항목/매일, 8항목/매주, 60항목/매월

- 수도꼭지 및 노후 급수관 수질검사 : 10항목/매주(16개소-일반 12, 노후 4)

- 중점관리지역 노후급수관 수질검사 : 11항목/월(40개소)

❍ 가정 수도꼭지 수질 이상 민원 및 수돗물 안심확인제 신속･정확한 민원처리

❍ 수도행정에 대한 시민 신뢰도 증진 프로그램 운영

- 수돗물 수질검사 결과 전광판 표출 : 월 1회(종합사회복지관 전광판)

- 수돗물 수질검사 결과 공표 : 월 1회(홈페이지, 일간지, 게시판 등)

- 정기적 민·관 합동 수질확인 검사 실시 : 월 1회(시민단체 회원 참여)

- 수돗물평가위원회 개최 : 연 2회(상·하반기)

□ 기대효과

❍ 수질검사 체계화를 통한 깨끗한 수돗물 공급으로 시민 신뢰도 증진

취·정수장 염소투입설비 공정 안전관리

❍염소투입설비 공정 안전관리 강화로 사업장 내 중대산업사고 예방

❍액체염소가스 누출사고 대비 비상 대응훈련 실시로 원활한 수돗물 공급

□ 시설개요

구 분	취수장	1정수장	2정수장
위 치	남강로1번길 105-38(판문동)	남강로1번길 38 (판문동)	진양호로125번길 22-35(평거동)
Cl2	9톤	6톤	8톤
NaOH	8㎥	8㎥	8㎥
허가 일자 (낙동강유역환경청)	2018. 2. 14.	2018. 2. 14.	2018. 2. 14.

□ 추진상황

❍ 2022.  2. ~  6. : 안전교육 4회 실시(안전관리 전문기관 의뢰 추진)

□ 추진계획

❍ 2022.  3. ~ 10. : 공정안전관리(PSM) 및 안전운전 교육 2회(상·하반기)

❍ 2022. 11.      : 액체염소가스 누출사고 대비 비상 대응훈련

□ 현실태 및 문제점

❍ 유해화학물질(염소)을 취급하는 사업장으로 중대 산업사고 발생 우려

❍ 염소가스 저장실의 재난 발생 시 수돗물 공급 중단 사태 우려

□ 기대효과

❍ 종사자의 공정안전보고서에 대한 이해와 산업재해 예방

❍ 식·용수 분야 현장조치 행동매뉴얼에 따른 훈련으로 안전사고 미연 방지

2. 예산사업

취·정수장 시설 보완 및 정비사업 시행

❍진양호 수질 악화 및 이상 수질 발생에 대비한 정수 처리시설 보완 및 지속적 개량

❍ 안정적인 수돗물 생산을 위한 정수 처리시설 노후설비 교체 및 정비

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 취·정수장 일원

❍ 사 업 량 : 노후시설 보완 및 정비 24건

❍ 사 업 비 : 1,360백만원

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

❍ 사업내역	(단위 : 건, 백만원)

대상시설	사업량	사업비	비 고
계	24	1,360
취수장	9	175
1·2정수장	15	1,185

□ 추진상황

❍ 2022. 1. ~  3. : 설계 착수 및 완료

❍ 취·정수장 도수관로 정비공사 외 18건 완료

□ 2022년 추진계획

❍ 2022. 1. ~ 12. : 사업 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급으로 시민 불편 최소화

❍ 노후 시설물의 적기 정비를 통한 안정적인 수돗물 생산

취수장 취수펌프(1호기) 인버터 설치사업

❍ 2022년도 지자체 온실가스 감축설비 지원사업 국비 지원

❍ 고효율에너지 기자재 사용으로 전력사용량 절감

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 취수장 일원

❍ 사 업 량 : 인버터 설치 1식

❍ 사 업 비 : 400백만원(국비 180, 시비 220)

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 6.

❍ 사업내역

- 인버터(6.6㎸, 1,000KVA) 1대 설치

- 전기공사 및 수질계측기 이설 1식

□ 추진상황

❍ 2022. 5. 30. : 수질계측기 이설공사 완료

❍ 2022. 6. 20. : 인버터설치 완료(운전 중)

□ 기대효과

❍ 취수펌프의 효율적 운전으로 에너지 사용량 절감

❍ 부하 변동에 따른 유량조절로 안정적인 수돗물 생산

하 수 시 설 과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 주요업무계획

1. 예산사업

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	16	1	4	5	4	2
현 원	15	1	5	4	1	4
증 감	△1	-	1	△1	△3	2

※ 공무직 : 10명

□ 하수도 현황

시설용량 (㎥/일)	면 적(㎢)		관 로(㎞)		보 급 률(%)
	배수구역	처리구역	계 획 (A)	실 적 (B)	관 로 (B/A)	하수도
202,300	63.56	33.54	1,707.4	1,614.6	94.6	94.0

□ 하수시설물 현황

구 역	관 로 (㎞)	맨 홀 (개)	오수받이 (개)	맨홀펌프장 (개소)	우수토실 (개소)
하수처리 구역 내	1,614.6	31,953	71,255	73	70

□ 공중화장실 현황

❍ 전체 현황

(단위 : 개소)

계	공공용 시 설	관광․체육 시 설	교통시설 (역,터미널)	상업시설 (시장,상가)	주유소	공 원	기 타 (둔치 등)
423	138	56	7	26	119	44	33

❍ 부서별 관리(지도·점검) 현황

(단위 : 개소)

계	하수시설과 (23개 읍면동)	공원관리과	산림과	체육진흥과	진주성 관리사업소	기 타 (민간 등)
423	51	34	10	22	6	300

❍ 하수시설과 관리 현황

(단위 : 개소)

계	공 원	둔 치	등산로	시 장	주차장	가로변
51	10	19	2	3	5	12

Ⅱ. 주요업무계획

1. 예산사업

대곡 공공하수처리시설 증설사업(계속)

❍ 신축 건물의 증가 추세와 진주교도소의 생활하수 등의 원활한 처리

❍ 공공하수처리장 유입 하수의 처리효율 제고 및 공공수역 수질 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 대곡면 가정리 일원

❍ 사 업 량 : 처리장증설 950㎥/일(기존 1,900㎥/일 ⇒ 변경 2,850㎥/일)
관로정비 L=17.4㎞, 배수설비 608개소

❍ 사 업 비 : 31,272백만원(국비 70%, 도비 10.5%, 시비 10.5%, 기금 9%)

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2024년(6년)

□ 추진상황

❍ 2019.  9. : 하수도정비 기본계획 수립(변경)

❍ 2019.  4. ~ 11. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2020.  6. ~ 10. : 설계경제성(VE) 용역 및 경남도 지방건설기술심의

❍ 2020. 11. ~ 12. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2021.  6. : 공사 착공(1차)

❍ 2022.  2. : 공사 착공(2차)

□ 2022년 추진계획

❍ 2022.  9. : 공사 준공(1차)

❍ 2024.  6. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 공공하수처리시설 증설을 통한 하수처리 효율 제고 및 공공수역 수질보전

❍ 하수관로 정비로 대곡면 주민들의 생활 불편 해소

초전동 외 8개 지구 하수관로 정비사업(계속)

❍ 주거지역 생활하수 등으로 인한 수질오염 예방 및 생활불편 해소

❍ 공공하수처리장 유입 하수의 처리효율 제고 및 공공수역 수질 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 상대,하대,장재,초전,판문,내동,정촌,금산,집현,명석일부지역

❍ 사 업 량 : 관로정비 L=26.1㎞, 배수설비 784개소
맨홀펌프장 22개소

❍ 사 업 비 : 28,321백만원(국비 70%, 시비 21%, 기금 9%)

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2025년(6년)

□ 추진상황

❍ 2019.  9. : 하수도정비 기본계획 수립(변경)

❍ 2020.  4. ~ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2021.  6. : 선시공분 장재1지구 및 판문지구 착공

❍ 2021.  8. : 설계경제성(VE) 용역 및 경남도 지방건설기술심의

❍ 2021. 11. : 선시공분 판문지구 준공

❍ 2021. 10. ~ 12. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2022.  3. : 선시공분 장재1지구 준공

❍ 2022.  6. : 공사 착공(1차)

□ 2022년 추진계획

❍ 2022.  7. : 공공하수도설치 인가

❍ 2025.  6. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 우·오수 분류식 하수관로 정비로 쾌적한 도시환경 조성

❍ 공공하수처리시설 하수처리 효율 및 남강 방류수질 개선

진주 물 재이용(빗물+중수도)시설 설치사업(계속)

❍ 물 재이용을 촉진하여 물 자원의 지속 가능한 이용을 도모

❍ 수돗물을 재사용하여 생산량 절감 및 정부의 물 정책에 부응

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주종합경기장, 진주실내수영장, 한국세라믹기술원

❍ 사 업 량 : 중수도설치 220㎥/일, 빗물이용시설 1,130㎥/일(기존활용)

❍ 사 업 비 : 4,438백만원(국비 70%, 시비 30%)

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2022년(3년)

□ 추진상황

❍ 2020.  3. : 지방재정투자사업 심사(경남도)

❍ 2020.  6. ~ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2021.  3. : 중수도 처리공법 선정

❍ 2021.  4. : 사업대상지 변경(4개소 → 3개소)

❍ 2021.  8. : 한국세라믹기술원 업무협약 체결

❍ 2021. 10. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2021. 11. : 공사 착공

□ 2022년 추진계획

❍ 2022. 11. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 물 재이용 시설 설치로 가뭄 해소 등 물 부족에 대응

❍ 물을 재이용하여 수돗물 생산량 절감 및 공공수역의 수질 보전 능력 향상에 기여

강주 소규모 공공하수처리시설 증설사업(신규)

❍ 주거지역 생활하수 등으로 인한 수질오염 예방 및 생활불편 해소

❍ 공공하수처리장 유입 하수의 처리효율 제고 및 공공수역 수질 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 정촌면(강주, 목과마을) 일원

❍ 사 업 량 : 처리장증설 130㎥/일(기존 110㎥/일 ⇒ 변경 240㎥/일)
관로정비 L=3.2㎞, 배수설비 356개소

❍ 사 업 비 : 5,692백만원(국비 70%, 도비 10.5%, 시비 10.5%, 기금 9%)

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년(3년)

□ 추진상황

❍ 2021. 11. : 신규 국고보조사업 선정

❍ 2022.  5. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2022.  6. : 처리장부지 공유재산심의회

□ 2022년 추진계획

❍ 2022.  7. : 처리장부지 보상협의

❍ 2022.  8. ~ 9. : 공법선정위원회

❍ 2023.  3. : 공사 착공

❍ 2024. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 공공하수처리시설 증설을 통한 공공수역의 수질보전

❍ 하수관로 정비로 정촌면 주민들의 생활불편 해소

KSPO 스포츠 가치센터 하수관로 설치공사

❍ KSPO 스포츠 가치센터에서 발생하는 오수를 공공하수처리장으로 유입하여 처리함으로써             공공수역 수질 개선 및 주변환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 내동면 삼계리 일원

❍ 사 업 량 : 관로정비 L=3.7㎞, 맨홀펌프장 2개소

❍ 사 업 비 : 1,684백만원(원인자부담금 : 국민체육진흥공단)

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2022년(2년)

□ 추진상황

❍ 2021.  3. : 실시설계 용역 착수(용역비 : 200백만원)

❍ 2021.  8. : 실시설계 용역 준공

❍ 2021. 12. : 사업비 납부 통보(진주시 → 국민체육진흥공단)

- 납부금액 : 1,484백만원(2022. 2. 25.)

❍ 2022.  2. : 일상감사 및 계약심사

❍ 2022.  4. : 공사 착공

□ 2022년 추진계획

❍ 2022. 10. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ KSPO 스포츠 가치센터에서 발생하는 오수를 공공하수처리장으로 유입하여 처리함으로써 공공수역 및 주변 환경 개선

진주시 노후하수관로 정비사업(1차-1단계)(계속)

❍ 지반침하 개연성이 높은 하수관로에 대한 정밀조사 결과, 파손 등 결함이 심한 하수관로를 우선        교체·개보수하여 지반 침하를 미연에 방지하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 관내 일원

❍ 사 업 량 : 노후 하수관로 L=12.9㎞

❍ 사 업 비 : 26,329백만원(국비 50%, 시비 35%, 기금 15%)

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2022년(6년)

□ 추진상황

❍ 2015.  8. ~ 2016.  5. : 노후하수관로 정밀조사 용역 완료(1차)

❍ 2017.  6. ~ 2019. 11. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2019.  6. : 경상남도 지방건설기술심의

❍ 2019.  7. ~ 12. : 재원협의(환경부) 및 행정절차 이행

❍ 2020.  5. : 공사 착공

□ 2022년 추진계획

❍ 2022. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 파손된 노후 하수관로 교체 및 개보수 추진으로 지반침하를 사전에 방지하여  재난 예방 및 시민 안전 확보

진주시 노후하수관로 정비사업(1차-2단계)(계속)

❍ 지반침하 개연성이 높은 하수관로에 대한 정밀조사 결과, 파손 등 결함이 심한 하수관로를 우선        교체·개보수하여 지반 침하를 미연에 방지하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 관내 일원

❍ 사 업 량 : 노후 하수관로 L=16.7㎞

❍ 사 업 비 : 28,911백만원(국비 50%, 시비 35%, 기금 15%)

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2024년(5년)

□ 추진상황

❍ 2015.  8. ~ 2016.  5. : 노후하수관로 정밀조사 용역 완료(1차)

❍ 2020.  5. ~ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2021. 10. ~ 12. : 경상남도 지방건설기술심의

□ 2022년 추진계획

❍ 2022.  1. ~ 7. : 재원협의(환경부) 및 행정절차 이행

❍ 2022.  8. : 공사 착공

❍ 2024. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 파손된 노후 하수관로 교체 및 개보수 추진으로 지반침하를 사전에 방지하여 재난 예방 및 시민 안전 확보

상평산업단지 노후 폐수관로 정비사업

❍ 상평산업단지 폐수관로가 30년 이상 노후화로 잦은 지반침하(싱크홀) 발생으로 교통사고 위험 등       시민의 안전을 위협

❍ 환경부에 상평산업단지 노후 폐수관로 정비 건의로 사업 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주 상평일반산업단지

❍ 사 업 량 : 노후 폐수관로 정비 L=20.9㎞

❍ 사 업 비 : 43,256백만원(국비 70%, 시비 30%)

❍ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2026.  2.

□ 추진상황

❍ 2020.  8. : 조사 및 기본계획 수립 역무대행계약 체결(환경부 ↔ 한국환경공단)

❍ 2021.  6. : 노후 폐수관로 조사 및 기본계획 수립 용역

❍ 2021. 11. : 상평산업단지 노후 폐수관로 정비사업 3자 협약 체결
[환경부 ↔ 진주시 ↔ 한국환경공단(공사시행)]

❍ 2022.  3. : 설계 및 시공 일괄 입찰(턴키방식)

❍ 2022.  6. : 낙찰자 결정 및 기본설계 실시

□ 2022년 추진계획

❍ 2022. 12. : 우선시공분 계약 및 착공

❍ 2023.  7. : 본공사 계약

❍ 2026.  2. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 노후 폐수관로 정비로 시민의 안전 확보 및 산업단지 환경개선

공중화장실 비상벨 및 블랙박스 설치사업

❍ 여성, 어린이 등 치안 약자 보호와 범죄 사각지대에 대한 안전 확보를 위해 여성공중화장실           비상벨 및 블랙박스 설치사업 시행

□ 사업개요

❍ 설치대상 : 금호지생태공원 외 14개 공중화장실

❍ 사 업 량 : 비상벨 및 블랙박스형 CCTV 설치 15개소

❍ 사 업 비 : 45백만원(도비 13, 시비 32)

❍ 사업기간 : 2022. 7. ~ 12.

□ 설치현황 (2021. 12. 31. 기준)	(단위 : 개소)

구 분	비상벨	블랙박스	비 고
계	92	50
2021년	15	12	범죄예방환경 도시조성사업
2020년	17	17
2019년	29	21
2018년 이전	31	-	환경개선사업 등

□ 2022년 추진계획

❍ 2022.  7. : 설치대상지 선정 협의(진주경찰서)

❍ 2022. 10. : 2회 추경예산(시비) 확보

❍ 2022. 11. : 입찰 및 착공

❍ 2022. 12. : 준공

□ 기대효과

❍ 폭력 등 위급상황 시 사회적 약자 보호 및 공중화장실 안전성 강화

하 수 운 영 과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 주요업무계획

1. 시책사업

1. 예산사업

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황	(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	연구직	비고
정 원	43	1	8	9	8	16	1
현 원	40	1	15	16	5	2	1	휴직자 1명 포함
증 감	△3	-	7	7	△3	△14	-

□ 공공하수처리시설 현황

구 분	계	진 주	문 산	사 봉	대 곡	진 성
처리용량 (톤/일)	202,300	190,000	7,100	2,400	1,900	900
처리구역		시가지 금산･집현･명석면	문산읍	일반성면	대곡면	진성면· 사봉면 일원
부지면적 (㎡)	206,477	153,275	19,482	18,067	8,605	7,048
중계펌프장 (개소)	23	11	1	6	5	-

※ 소규모 공공하수처리시설 : 38개소(2,289톤) 및 중계펌프장 37개소

□ 하수슬러지처리(탄화)시설 현황

위 치	시설용량	부지면적	건축연면적	운영방법	운영업체
남강로 1607	100톤/일	4,230㎡	1,943㎡ (지하2, 지상3)	민간위탁	환경시설관리(주)

□ 하수·분뇨처리 및 수질현황

❍ 하수·분뇨처리	(2022. 6. 30. 기준)

구 분	시설용량 (㎥/일)	하수량(㎥/일)		분뇨량 (㎘/일)	슬러지 케익 발생량 (톤/일)
		유입량	방류량	처리량	소화시설	총인시설
계	202,300	140,689	124,788	89	73.54	16.18
진주공공 하수처리시설	190,000	133,338	118,131	89	73.54	11.68
문산공공 하수처리시설	7,100	3,886	3,765	-	-	2.46
사봉공공 하수처리시설	2,400	1,176	972	-	-	0.24
대곡공공 하수처리시설	1,900	1,769	1,441	-	-	1.43
진성공공 하수처리시설	900	520	479	-	-	0.37

❍ 수질현황	(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

항 목 구 분		BOD (생물학적산소요구량)	TOC (총 유기탄소량)	SS (부유물질)	T-N (총 질소)	T-P (총 인)	총대장균 군 수
방류 수질기준		4.5이하	15이하	10이하	20이하	0.27이하	3,000이하
진주공공 하수처리시설	유입수	144.6	71.0	169.5	29.909	4.316	420,000
	방류수	2.2	5.3	2.0	8.916	0.063	70
문산공공 하수처리시설	유입수	119.0	54.5	122.5	20.785	2.512	320,000
	방류수	0.6	5.0	2.0	5.708	0.048	12
사봉공공 하수처리시설	유입수	28.8	7.9	109.1	7.766	0.876	12,000
	방류수	0.5	2.3	2.6	7.766	0.054	7
대곡공공 하수처리시설	유입수	118.7	44.9	121.2	12.686	1.332	140,000
	방류수	0.6	3.7	4.2	3.353	0.044	9
진성공공 하수처리시설	유입수	235.8	143.4	260.3	46.880	10.807	90,000
	방류수	2.1	5.1	3.0	4.360	0.063	4

Ⅱ. 주요업무계획

1. 시책사업

하수처리 안정화를 통한 방류수질 개선

❍ 안정적 하수처리와 운영체계 정립으로 방류수질의 안정성 확보

❍ 효율적 공정관리체계 구축으로 시설운영의 합리성 제고

□ 시설용량 및 하수처리량	(2022. 6. 30. 기준)

구 분	합 계	진 주	문 산	사 봉	대 곡	진 성
시설 용량(㎥/일)	202,300	190,000	7,100	2,400	1,900	900
평균처리량(㎥/일)	140,689	133,338	3,886	1,176	1,769	520

□ 추진계획

❍ 수질운영기기(TMS) 관리기준 강화 등에 대응한 안정적 운영체계 확립

- 수질검사 자료 등 공정관리 데이터 분석·활용체계 도입

- 합리적 공정관리 방안 도출을 위한 공정회의 정례적 시행

❍ 체계적 공정관리 기법과 효과적 유지관리체계 정립

- 공정 개선방안 발굴과 전문성 제고를 위한 직무연찬회 정례화

- 정비이력관리제의 제도적 정착과 정비주기 설정 관리제 시행

❍ 선제적 시설 투자를 통한 처리공정 안정화 실현

- 노후설비의 적기 정비를 통한 공정 신뢰도 최적화 추진

- 소화조 및 탄화설비 등 하수슬러지 처리 계통의 운영효율 극대화 추진

□ 기대효과

❍ 안정적 하수처리로 쾌적한 도시환경 조성 및 남강 수질 개선

2. 예산사업

진주공공하수처리시설 내진보강사업

❍ 노후(20년 이상 경과)된 건축물의 내진성능평가 결과에 따라 시설물 내진보강사업을 실시하여        시설물 안전성 확보(지진·화산 재해대책법 제15조)

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주공공하수처리시설 송풍기동

❍ 사 업 량 : 송풍기동 내진보강(1,689.75㎡) 공사

❍ 사 업 비 : 560백만원

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 10.

❍ 연도별 추진계획	(단위 : 백만원, ㎡)

구 분	합 계	2022	2023	2024	2025
대 상 지		송풍기동	방류펌프동	분뇨처리동	소화조 기계동 등
예 산 액	1,360	560	400	250	150
사 업 량	3,717.58	1,689.75	472.85	600	954.98

□ 추진상황

❍ 2018. 10. ~ 2020. 5. : 내진성능평가 실시(소화조 기계동 등 7개소)

❍ 2020.  6. ~ 12. : 탈수기동 내진보강공사 완료

❍ 2021.  1. ~  6. : 유입펌프동 내진보강공사 구조설계 및 안정성 검토 용역
⇒ 내진보강 불필요

❍ 2021.  6. ~ 12. : 송풍기동 내진보강공사 구조설계 및 안정성 검토 용역

❍ 2022.  3.      : 송풍기동 내진보강공사 착공

□ 2022년 추진계획

❍ 2022. 10. : 공사 완료

□ 기대효과

❍ 건축물 및 구조물의 내력 증진을 통한 시설물 안정성 유지로 대형 안전사고 예방

진주시 하수슬러지처리(탄화)시설 민간위탁 용역

❍ 진주시 하수슬러지처리(탄화)시설의 효율적 운영을 위하여 전문성과 인력 운영의 탄력성을 겸비한      전문업체 위탁 운영으로 안정적 운영체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주공공하수처리시설 내

❍ 사 업 량 : 100㎥/일(50㎥/일×2기)

❍ 사 업 비 : 3,323백만원(1,107백만원/년)

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.(3년간)

❍ 대상시설 : 진주시 하수슬러지처리(탄화)시설

시설명	시설규모	위 치	자원화 방식	시설준공
하수슬러지 처리(탄화)시설	100㎥/일 (50㎥/일×2기)	남강로 1607 (진주공공하수처리 시설 내)	열분해 탄화	2010. 12.

□ 추진상황

❍ 2021. 11. : 입찰공고

❍ 2021. 11. : 제안서 평가위원 모집

❍ 2021. 12. : 제안서 접수 및 평가위원회 평가

❍ 2021. 12. : 인계·인수, 계약체결

❍ 2022.  1. ~ 2024. 12. : 민간위탁 시행

□ 기대효과

❍ 전문업체 위탁 운영으로 안정적이고 효율적인 시설관리와 관리체계 개선을 통한 효율적인      공정관리 체계 구축

칠암 중계펌프장 악취저감시설 설치사업

❍ 분류식 하수관거 정비사업으로 분뇨 등 오수 직접유입에 따른 악취 발생 문제점을                    발굴·정비함으로써 쾌적한 주변 환경조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 칠암 중계펌프장

❍ 사 업 량 : 악취 저감 탈취설비 1식 설치

❍ 사 업 비 : 650백만원

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 10.

❍ 사업내용 : 음압환기량 조절 악취 확산방지, 오염공기 광화학적 분해처리

□ 추진상황

❍ 2021.  5. : 망경 중계펌프장 악취저감시설 설치 완료

❍ 2021.  8. : 칠암 중계펌프장 시설물 점검

❍ 2022.  1. ~  3. : 실시설계용역

❍ 2022.  6. : 공사 착공

□ 2022년 추진계획

❍ 2022. 10. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 악취로 인한 인근 주민 민원 해소 및 쾌적한 생활 환경 조성

진성 및 소규모 공공하수처리시설 관리대행 용역

❍ 진성 및 소규모 공공하수처리시설의 효율적 운영을 위하여 전문성과 인력 운영의 탄력성을            겸비한 전문업체 관리대행으로 수질의 안정성 제고와 효율적인 공정관리 체계 구축

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 6.(3년간)

❍ 사 업 비 : 3,865백만원(1,288백만원/년)

❍ 대상시설 : 진성 공공하수처리시설, 소규모 공공하수처리시설

시설명	용량 (㎥/일)	처리구역	위 치	설치년도	공 법
진 성	900	진성, 사봉면 일원	진성면진마대로 1463-49	2017	ESSA +인처리+소독
덕의마을 외37개소	2,289	금산 덕의 외 37개소	진주시 관내	2005 ~2017	Bio-Mat 외 9개 공법

□ 추진상황

❍ 2021. 12. : 관리대행 용역비 원가산정 용역 완료

❍ 2022.  1. : 관리대행계획서(안) 확정

❍ 2022.  3. : 계약심사 및 입찰공고

❍ 2022.  4. : 관리대행업자 선정위원회 구성 및 기술제안서 평가

❍ 2022.  5. : 협약체결

❍ 2022.  6. : 계약체결 및 인계·인수

□ 2022년 추진계획

❍ 2022.  7. ~ 2025. 6. : 관리대행 개시

□ 기대효과

❍ 전문업체 위탁 운영으로 안정적이고 효율적인 시설관리로 수질의 안전성 제고와 효율적인      공정관리 체계 구축

진주공공하수처리시설 소화조 D지 구조물 보수공사

❍ 사고로 파손된 소화조 D지 상부시설 보수공사 및 노후화된 슬러지 교반기 교체 공사로 슬러지         처리의 안정성 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 남강로 1607(진주공공하수처리시설 내 소화조)

❍ 사 업 량 : 소화조 상부 센터 돔 314㎡, 슬러지교반기 1식

❍ 사 업 비 : 660백만원

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

□ 추진상황

❍ 2021.  8. : 소화조(A, B, C) 시설물 정밀안전용역 ⇒ 토목 및 건축물 양호

❍ 2021.  8. : 소화조 D지 준설 및 가스라인 복구

❍ 2021.  8. : 구조안전진단 용역 실시 ⇒ 보수공사 가능 판정

❍ 2022.  4. : 실시설계용역 착수

□ 2022년 추진계획

❍ 2022. 10. : 실시설계용역 완료

❍ 2022. 10. : 공사 착공

❍ 2023.  3. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 소화조 설비 개선을 통하여 최적 운전조건으로 운영효율을 증대시키고 슬러지 발생량 감소와 대체 에너지원 활용 증대