	부강한 진주 행복한 시민	제243회 진주시의회(제2차 정례회)

시정 주요업무 보고

(2022년 실적 및 2023년 계획)

진   주   시

(맑은물사업소)

보  고  순  서

□ 수    도    과

□ 정    수    과

□ 하 수 시 설 과

□ 하 수 운 영 과

수  도  과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2022년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2023년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원 현황	(단위 : 명)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	31	1	1	6	7	8	8
현 원	28	1	1	6	11	2	7
증 감	△3	-	-	-	4	△6	△1

※ 기타직 : 11명〔청원경찰 4명(상대배수지), 공무직 5명, 시간선택제 임기제 1명〕

□ 상수도 관로 현황

(2021. 12. 31. 기준)

상수도관(㎞)					노후관 (%)	유수율 (%)
계	도수관	송수관	배수관	급수관
2,260	3	62	765	1,430	890km (39.4)	73.6

□ 상하수도 요금 현황

(2022. 10. 31. 기준, 단위 : 백만원)

합 계		가정용		업무용		영업용		대중탕용
전수	금액	전수	금액	전수	금액	전수	금액	전수	금액
56,865	37,813	40,816	18,060	1,097	6,476	14,863	12,387	89	890

Ⅱ. 2022년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	33	27	9	-	-
예산사업	33	27	9	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

【완료 사업】……… 27건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주 요 성 과
문산읍 상이마을 가압장 설치공사	❍ 위 치 : 문산읍 상문리 ❍ 사업량 : 부스트펌프(3kw) 설치 2대 ❍ 사업비 : 64백만원	❍ 착 공 : 2022. 2. ❍ 준 공 : 2022. 3.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
문산 안전마을 앞 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 문산읍 안전리 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=0.85km ❍ 사업비 : 319백만원	❍ 착 공 : 2022. 3. ❍ 준 공 : 2022. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
문산읍 코아루아파트인근 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 문산읍 소문리 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=0.25km ❍ 사업비 : 123백만원	❍ 착 공 : 2022. 2. ❍ 준 공 : 2022. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
문산 갈곡마을 급수관 인입공사	❍ 위 치 : 문산읍 갈곡리 ❍ 사업량 : 급수관 매설 L=0.3km ❍ 사업비 : 52백만원	❍ 착 공 : 2022. 2. ❍ 준 공 : 2022. 3.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
문산 새동네~신진주역 일원 급수관 신설공사	❍ 위 치 : 가좌동 일원 ❍ 사업량 : 급수관 매설 L=0.7km ❍ 사업비 : 221백만원	❍ 착 공 : 2022. 3. ❍ 준 공 : 2022. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
내동 유동마을 내 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 내동면 유수리 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=0.56km ❍ 사업비 : 84백만원	❍ 착 공 : 2022. 3. ❍ 준 공 : 2022. 4.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
정촌 화개 1062번지 일원 노후상수관로 정비공사 (이월사업)	❍ 위 치 : 정촌면 화개리 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=0.23km ❍ 사업비 : 74백만원	❍ 착 공 : 2021. 11. ❍ 준 공 : 2022. 1.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
진성면 진동마을 ~ 가좌마을 배수관 정비공사	❍ 위 치 : 진성면 가진리 ❍ 사업량 : 배수관 매설 L=1.0km ❍ 사업비 : 357백만원	❍ 착 공 : 2022. 2. ❍ 준 공 : 2022. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
대곡배수지 정비공사	❍ 위 치 : 대곡면 유곡리 ❍ 사업량 : 물탱크(1,500톤) 설치 1식 ❍ 사업비 : 595백만원	❍ 착 공 : 2022. 3. ❍ 준 공 : 2022. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
대곡면 유곡마을 일원 급수관 신설공사	❍ 위 치 : 대곡면 유곡리 ❍ 사업량 : 급수관 매설 L=0.2km ❍ 사업비 : 61백만원	❍ 착 공 : 2022. 3. ❍ 준 공 : 2022. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
대곡면 한실마을 급수관로 인입공사	❍ 위 치 : 대곡면 대곡리 ❍ 사업량 : 급수관 매설 L=0.86km ❍ 사업비 : 92백만원	❍ 착 공 : 2022. 5. ❍ 준 공 : 2022. 7.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
집현면 덕성마을 급수관 인입공사	❍ 위 치 : 집현면 덕오리 ❍ 사업량 : 급수관 매설 L=0.58km ❍ 사업비 : 98백만원	❍ 착 공 : 2021. 10. ❍ 준 공 : 2022. 1.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
집현면 오동마을 급수관 정비공사	❍ 위 치 : 집현면 덕오리 ❍ 사업량 : 급수관 매설 L=0.67km ❍ 사업비 : 194백만원	❍ 착 공 : 2022. 3. ❍ 준 공 : 2022. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
명석면 천수탕 주변 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 명석면 우수리 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=1.2km ❍ 사업비 : 265백만원	❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 준 공 : 2022. 8.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
명석~집현 간 우회 도로 일원 급수관 인입공사	❍ 위 치 : 집현면 사촌리 ❍ 사업량 : 급수관 매설 L=0.13km ❍ 사업비 : 18백만원	❍ 착 공 : 2022. 5. ❍ 준 공 : 2022. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
명석면 삭평마을 일원 급수관 정비공사	❍ 위 치 : 명석면 관지리 ❍ 사업량 : 급수관 매설 L=0.45km ❍ 사업비 : 52백만원	❍ 착 공 : 2022. 8. ❍ 준 공 : 2022. 8.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
부산교통~구)보건소 간 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 인사동 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=0.40km ❍ 사업비 : 200백만원	❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 준 공 : 2022. 8.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
나불천 복개도로~ 부산교통 간 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 인사동 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=0.22km ❍ 사업비 : 85백만원	❍ 착 공 : 2022. 2. ❍ 준 공 : 2022. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
11블록(진주중 일원) 노후상수관로 정비공사 (이월사업)	❍ 위 치 : 상봉･중앙동 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=3.5km ❍ 사업비 : 3,778백만원	❍ 착 공 : 2021. 6. ❍ 준 공 : 2022. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
시청사거리~진양교간 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 상대동 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=1.2km ❍ 사업비 : 367백만원	❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 준 공 : 2022. 10.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
상대동 대림맨션 서측 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 상대동 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=0.37km ❍ 사업비 : 154백만원	❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 준 공 : 2022. 9.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
연암도서관~청락원 간 노후상수관로 정비공사 (이월사업)	❍ 위 치 : 상대동 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=0.52km ❍ 사업비 : 141백만원	❍ 착 공 : 2021. 11. ❍ 준 공 : 2022. 4.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
상평동 동국2차아파트 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 상평동 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=0.77km ❍ 사업비 : 377백만원	❍ 착 공 : 2022. 3. ❍ 준 공 : 2022. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
초전 대림아파트~ 오일뱅크 간 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 초전동 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=0.65km ❍ 사업비 : 215백만원	❍ 착 공 : 2022. 3. ❍ 준 공 : 2022. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
명신고등학교 부흥교 간 상수도관 신설공사	❍ 위 치 : 초전동 일원 ❍ 사업량 : 상수관로 매설 L=0.17km ❍ 사업비 : 50백만원	❍ 착 공 : 2022. 3. ❍ 준 공 : 2022. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
신안동 신안초교 옆 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 신안동 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=0.20km ❍ 사업비 : 119백만원	❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 준 공 : 2022. 8.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
가좌동 하이로드빌라 옆 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 가좌동 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=0.17km ❍ 사업비 : 72백만원	❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 준 공 : 2022. 8.	❍ 맑은물의 안정적인 공급

【추진중 사업】……… 9건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
칠암동 포시즌 인근 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 칠암동 일원 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=2.6km ❍ 사업비 : 874백만원 ❍ 기 간 : 2022.6.~2023.2.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 공 정 : 78% □ 향후계획 ❍ 준공(예정) : 2022. 12.	❍ 정상추진
인사동 이마트 인근 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 인사동 일원 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=4.8km ❍ 사업비 : 2,422백만원 ❍ 기 간 : 2022.6.~2023.6.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 공 정 : 10% □ 향후계획 ❍ 준공(예정) : 2023. 6.	❍ 정상추진
상봉동 대룡골 내 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 상봉동 일원 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=4.6km ❍ 사업비 : 1,513백만원 ❍ 기 간 : 2022.6.~2023.2.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 공 정 : 20% □ 향후계획 ❍ 준공(예정) : 2023. 2.	❍ 정상추진
봉곡 로타리~ 상봉아파트 간 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 상봉동 일원 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=4.9km ❍ 사업비 : 2,358백만원 ❍ 기 간 : 2022.6.~2023.2.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 공 정 : 67% □ 향후계획 ❍ 준공(예정) : 2023. 2.	❍ 정상추진
이현동 이현상가 인근 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 이현동 일원 ❍ 사업량 : 노후관 정비 L=4.8km ❍ 사업비 : 1,623백만원 ❍ 기 간 : 2022.6.~2023.2.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 공 정 : 35% □ 향후계획 ❍ 준공(예정) : 2023. 2.	❍ 정상추진
경상대~내동 도로 확포장 사업 구간 내 상수관로 이설공사 (이월사업)	❍ 위 치 : 가호동, 내동면 ❍ 사업량 : 수도관 이설 L=2.6km ❍ 사업비 : 560백만원 ❍ 기 간 : 2021.10.~2022.12.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2021. 10. ❍ 공 정 : 70% □ 향후계획 ❍ 준공(예정) : 2022. 12.	❍ 정상추진
스마트 관망관리 인프라 구축사업 (이월사업)	❍ 위 치 : 진주시 전역 ❍ 사업량 - 재염소설비, 수질측정장치 소규모 유량·수압 감시 원격검침, 실시간 수압계, 스마트관로인식체계 구축 등 ❍ 사업비 : 4,648백만원 ❍ 기 간 : 2021.3.~2022.12.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2021. 3. ❍ 공 정 : 90% - 완료(5개소), 시행 중(1개소) □ 향후계획 ❍ 준 공 : 2022. 12.	❍ 정상추진
진주시 지방 상수도현대화사업 (노후상수관망)	❍ 위 치 : 진성･일반성･ 이반성･사봉･ 지수면 일원 ❍ 사업량 - 노후관 정비 L=52.3km - 블록시스템 구축 1식 - 유지관리시스템 구축 1식 ❍ 사업비 : 32,048백만원 ❍ 기 간 : 2020.1.~2024.12.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 공 정 : 18% □ 향후계획 ❍ 준 공 : 2024. 12.	❍ 정상추진
스마트 검침 시스템 구축사업	❍ 디지털 계량기 교체 ❍ 사업량 : 57,000여전 ❍ 사업비 : 17,000백만원 ❍ 기 간 : 2021. ~ 2028.	□ 추진사항 ❍ 2021년 : 13,500전 교체 완료 ❍ 2022년 : 8,000전 교체 완료 □ 향후계획 ❍ 2028년까지 준공 예정	❍ 정상추진

Ⅲ. 2023년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 지방상수도 현대화사업 추진

❍ 정수장 통합 및 시설 현대화로 수돗물 품질 향상과 운영효율성 제고

❍ 안전한 수돗물 공급을 위한 노후 상수관망 정비사업 지속적 추진

❍ 배수지, 가압장 등 수도시설 확충으로 수돗물 공급 안정성 확보

□ 유수율 제고를 위한 블록별 노후수도관 정비

❍ 노후수도관의 체계적인 정비로 누수저감 및 유수율 제고

❍ 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급

□ 스마트검침 시스템 구축

❍ 디지털 계량기 교체로 신속·정확한 검침 및 상수도 행정 대민서비스 질적 향상

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	5	68,056	4	1	-	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	5	68,056	4	1	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

- 지방상수도 현대화사업(정수장 개량 및 통합) -

진주시 노후 정수장 정비사업

이원화된 1･2정수장의 통합 및 시설 현대화로 비효율적인 구조를 개선함으로써 깨끗하고 안전한 수돗물 생산·공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 판문·평거동(1･2정수장)

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.(5년간)

❍ 사 업 량 : 정수장 통합 및 개량 175,000㎥/일

❍ 사 업 비 : 85,377백만원(국비 42,689, 시비 42,688)

□ 추진상황

❍ 2015. 12. : 지방상수도시설 노후도 실태평가 및 정비사업 타당성조사 완료(환경부)

❍ 2020.  6. : 진주시 수도정비기본계획(변경) 승인(환경부)

❍ 2020. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2022.  4. : 사전기술검토 승인(환경부)

❍ 2022.  9. : 일반수도사업(변경) 인가 신청(환경부)

□ 추진계획

❍ 2022. 12. : 공사 착공

❍ 2024. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	85,377	4,500	5,254	40,258	35,365
국 비	42,689	3,000	5,254	25,258	9,177
시 비	42,688	1,500		15,000	26,188

□ 기대효과

❍ 정수장 노후 및 이원화에 따른 비효율성 개선으로 재정 건전성 확보

❍ 수돗물 품질 향상과 정수 기술 확보로 지방상수도 운영 효율성 제고

진주정수장 고도정수처리시설 설치사업

기후변화에 따른 수질 악화로 물관리 취약성이 증가하여 기존의 정수처리 공정으로 제거가 어려운 맛·냄새 물질 등을 처리할 수 있는 고도정수처리 공정을 도입하여 시민에게 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 평거동 산65-1(2정수장)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.(4년간)

❍ 사 업 량 : 고도정수처리시설 설치 175,000㎥/일

❍ 사 업 비 : 60,000백만원(균특전환 42,000, 도비 5,400, 시비 12,600)

□ 추진상황

❍ 2022.  8. : 2023년 지방전환(균특전환) 사업 신청(경상남도)

□ 추진계획

❍ 2023.  3. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2024.  5. : 사전기술검토(환경부) 및 행정절차 이행

❍ 2024. 10. : 공사 착공

❍ 2026. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	60,000			3,000	57,000
균특전환	42,000			2,100	39,900
도 비	5,400			270	5,130
시 비	12,600			630	11,970

□ 기대효과

❍ 기존의 정수처리 공정으로 제거가 어려운 맛·냄새 물질 등을 처리할 수 있는 고도정수처리 공정을 도입하여 시민에게 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급

노후수도관 교체사업(계속)

누수가 잦고 내용 연수가 경과한 수도관을 정비하여 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하고 유수율 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 상수도 공급지역

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2026년(9년간)

❍ 사 업 량 : 441㎞ {237㎞(기술진단) + 204㎞(경년관 등)}

❍ 사 업 비 : 114,000백만원(국비 16,024, 시비 97,976)

□ 추진상황

❍ 2021. 12. : 노후수도관 교체 완료(L=180.5㎞)

❍ 2022. 10. : 2021년 노후수도관 교체사업 시공 중(준공 15건, 공사 중 6건)

※ 2022년 계획된 L=74㎞ 중 L=16.2㎞ 준공, 시공 중 L=57.8㎞는 2022년 12월 준공

예정

□ 추진계획

❍ 2023.  1. ~ 3. : 실시설계 용역

❍ 2023.  4.     : 공사 착공

❍ 2023. 12.     : 공사 준공

※ 시설비 100억원, 실시설계 후 추경에 편성 시행

□ 연도별 투자계획	(단위 : ㎞, 백만원)

구 분		계	기시행	2022년	2023년	2024년 이후
사 업 량		441	180.5	74	75	111.5
사업비	계	114,000	50,352	20,000	16,349	27,299
	국 비	16,024	5,022	4,361	3,175	3,466
	시 비	97,976	45,330	15,639	13,174	23,833

□ 기대효과

❍ 노후수도관 정비를 통한 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

❍ 유수율 제고를 통한 경영효율화 도모

진주시 지방상수도 현대화사업(노후상수관망)

광역계통 급수구역 내 노후상수관망 정비로 유수율(85%) 증대

블록 및 유지관리시스템 구축으로 운영 및 관리 효율성 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진성·사봉·일반성·이반성·지수면 일원(광역계통 급수구역)

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)

❍ 사 업 량

- 노후상수관로 정비 L=52.3㎞

- 블록시스템 구축 1식

- 유지관리 시스템 구축 1식

❍ 사 업 비 : 32,048백만원(국비 16,024, 시비 16,024)

□ 추진상황 및 계획

❍ 2020.  6. : 진주시 수도정비기본계획(변경) 승인

❍ 2020. 12. ~ 2022. 11. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2022.  4. : 사전기술검토 승인(환경부)

❍ 2022.  6. : 공사 착공

❍ 2024.  6. : 성과 검증(목표 유수율 85% 이상 달성 여부 판단)

❍ 2024. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	32,048	4,821	2,612	8,722	6,349	9,544
국 비	16,024	2,410	2,612	4,361	3,175	3,466
시 비	16,024	2,411		4,361	3,174	6,078

□ 기대효과

❍ 누수 저감 및 유수율 제고를 통한 수도사업의 경영개선 도모

❍ 녹물 발생, 이물질 유입 예방 등 깨끗하고 안전한 수돗물 공급

스마트 검침 시스템 구축사업

정부의 스마트 관망 인프라 구축사업의 한 분야인 스마트 검침 시스템을 구축하여 상수도 유수율 제고 및 상수도 행정 대민서비스 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 전역

❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2028년(8년간)

❍ 사 업 량 : 디지털 계량기 교체(57,000여전) 및 서버 구축 1식

❍ 사 업 비 : 17,000백만원(국비 1,692, 시비 15,308)

□ 추진상황 (누적 진도율 39%)

❍ 2021. 2. ~ 12. : 13,500전 교체

❍ 2022. 2. ~ 12. :  8,000전 교체

□ 추진계획

❍ 사업량 : 7,000전

❍ 2023. 2. : 공사 착공

❍ 2023. 5. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구분	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계	17,000	3,892	2,408	2,100	2,100	2,100	2,100	1,700	600
국 비	1,692	1,692
시 비	15,308	2,200	2,408	2,100	2,100	2,100	2,100	1,700	600

※ 매년 시행 중에 있는 노후(검정)계량기 교체사업비(1,000백만원/연) 포함

□ 기대효과

❍ 난검침 지역 해소 및 스마트 검침 시스템 구축으로 상수도 유수율 제고

❍ IoT 기술을 활용한 정부의 그린뉴딜 정책 실현

정 수  과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2022년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2023년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원 현황	(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	연구사	비고
정 원	30	1	5	7	8	7	2
현 원	29	1	7	17	1	1	2
증 감	△1	-	2	10	△7	△6	-

※ 청원경찰 12명(취수장, 1정수장, 2정수장 각 4명), 공무직 1명(조리사)

□ 시설물 현황

구 분	취수장	1정수장	2정수장
위 치	남강로1번길 105-38	남강로1번길 38	진양호로125번길 22-35
시설용량	220,000㎥/일	60,000㎥/일	140,000㎥/일
시설연혁	1992. 5.	·정 수 시 설 : 1977.~1982. ·슬러지시설 : 1995. 10.	·정 수 시 설 : 1987.~2000. ·슬러지시설 : 1996. 10.
부 지	2,086㎡(631평)	34,915㎡(10,562평)	86,956㎡(26,304평)
건 물	3,300㎡	2,392㎡	4,190㎡

□ 정수처리 현황

【2021년도】

구 분	취수유량(㎥)	배수유량(㎥)
		계	1정수장	2정수장
연간총생산량	46,046,230	45,122,270	12,312,837	32,809,433
일평균생산량	126,154	123,623	33,734	89,889

【2022년도】	(10. 31.기준)

구 분	취수유량(㎥)	배수유량(㎥)
		계	1정수장	2정수장
연간총생산량 (1월~10월)	38,925,311	38,025,741	9,921,333	28,104,408
일평균생산량	128,044	125,085	32,636	92,449

※ 연간 평균 정수처리 수질(탁도 기준) : 0.05 NTU(법정기준 0.5 NTU 이하)

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완료	추진중	시기 미도래	미착공	비 고
계	7	3	4	-	-
예산사업	7	3	4	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

【완료 사업】……… 3건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주 요 성 과
취수장 시설 보완 및 정비	❍ 위 치 : 취수장 ❍ 사업량 - 조류 차단막 정비 - 활성탄 투입설비 수선 - 취수장 구내급수 공급배관 정비 - 외부경계 울타리 보수 등 ❍ 사업비 : 80백만원	❍ 설계 : 2022. 2. ❍ 착공 : 2022. 2. ❍ 준공 : 2022. 6.	❍ 취수장 시설 보호 및 처리효율 개선
취수장 취수펌프 (1호기) 인버터 설치공사	❍ 위 치 : 취수장 ❍ 사업량 : 인버터 1000kva 1대 ❍ 사업비 : 400백만원	❍ 설계 : 2021. 12. ❍ 착공 : 2022. 2. ❍ 준공 : 2022. 6.	❍취수유량의 효율적 조정 및 빈번한 기동, 정지에 따른 설비보호 및 전력절감
1･2정수장 시설 보 완 및 정 비	❍ 위 치 : 1·2정수장 ❍ 사업량 - 1･2정수장 기계 및 전기설비 수선 - 1정수장 잔류염소측정기 구입 - 1･2정수장 안전난간 보강 및 설치 - 2정수장 외부경계 순찰로 정비 - 2정수장 침전지 밸브 수선 - 2정수장 응집제 약품투입펌프 교체 - 2정수장 배니지 대차 수선 - 1･2정수장 수산화나트륨 탱크수선 - 1정수장 농축슬러지 이송펌프 수선 - 1･2정수장 침전지, 배수지 청소 등 ❍ 사업비 : 1,009백만원	❍ 설계 : 2022. 2. ❍ 착공 : 2022. 2. ❍ 준공 : 2022. 10.	❍1･2정수장 노후 설비 적기 정비 및 청소로 처리효율 개선

【추진중 사업】……… 4건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
취수장 생물 감시장치 유지관리 용역	❍ 위 치 : 취수장 ❍ 사업량 - 생물감시장치 유지용역 1식 ❍ 사업비 : 12백만원 ❍ 기 간 : 2022. 1. ~ 12.(연간)	□ 추진사항 ❍ 용역착수 : 2022. 1. □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2022. 12.	❍ 정상추진
1･2정수장 슬러지 탈수케이크 처리 용역 (단가계약)	❍ 위 치 : 1·2정수장 ❍ 사업량 - 탈수케이크 처리 1식 - 계약물량 : 4,270톤 ❍ 사업비 : 308백만원 ❍ 기 간 : 2022. 1.~ 12.(연간)	□ 추진사항 ❍ 용역착수 : 2022. 1. □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2022. 12.	❍ 정상추진
2022년 취·정수장 공정안전관리(PSM) 유지관리 용역	❍ 위 치 : 취수장, 1·2정수장 ❍ 사업량 - 공정안전보고서 이행 ❍ 사업비 : 21백만원 ❍ 기 간 : 2022. 2. ~ 12.(11개월)	□ 추진사항 ❍ 용역착수 : 2022. 2. □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2022. 12.	❍ 정상추진
망간계측기 유지관리 용역	❍ 위 치 : 취수장 ❍ 사업량 - 망간계측기 유지용역 1식 ❍ 사업비 : 13백만원 ❍ 기 간 : 2022. 1. ~ 12.(연간)	□ 추진사항 ❍ 용역착수 : 2022. 1. □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2022. 12.	❍ 정상추진

Ⅲ. 2023년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 고품질 수돗물 생산·공급

❍ 취·정수장 정수처리 시설물 개선 및 개량으로 안정적인 수돗물 공급

❍신뢰 증진을 위한 수질검사 체계 확립 및 찾아가는 수도꼭지 수질검사   서비스 강화

□ 효율적 공정관리를 위한 유지관리 체계 확립

❍ 공정 개선과 전문성 제고를 위한 주기적 교육 시행

❍ 정비이력관리제 정착과 공정별 정비주기 설정 관리 및 위생관리 강화

□ 체계적인 정비·관리와 교육·훈련으로 위해요인 사전 차단

❍ 진단보고서 및 이력카드에 기반한 노후시설 정비계획 수립

❍ 정기적인 시설 점검 및 안전교육·위기 대응 훈련 등 시행

□ 진주정수장 취수원 수질개선사업

❍ 수질 악화 및 유충 차단에 적극 대응

❍ 시민에게 안전하고 깨끗한 수돗물 생산공급

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	6	3,602	6	-	-	-
일반시책사업	2	-	2	-	-	-
주요예산사업	4	3,602	4	-	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

정성을 담은 고품질 수돗물 생산 공급

안정적 수돗물 생산 및 운영체계 정립으로 수돗물의 품질 신뢰성 제고

효율적 공정관리체계 구축으로 저비용 고품질 수돗물 생산 실현

□ 사업개요

❍ 사업목표 : 수질 목표값(탁도 0.1 NTU 이하) 설정으로 고품질 수돗물 생산 실현

❍ 추진방향 : 정비이력관리제, 정비주기 설정 관리제, 기술진단 분석 활용으로  효율적 공정관리

□ 추진계획

❍ 최적의 수질관리를 통한 고품질 수돗물 생산·공급

- 수질 목표값 탁도 0.1 NTU(법정기준 : 0.5 NTU) 이하 유지

- ｢찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제｣ 시행으로 신뢰받는 수도행정 구현

❍ 효율적 공정관리를 위한 유지관리체계 확립

- 정비이력관리제의 제도적 정착과 정비주기 설정관리제 시행

❍ 체계적인 정비·관리와 선제적 교육·훈련으로 위험요인 사전 차단

- 기술진단 및 안전진단 보고서, 이력카드 등에 기반을 둔 정비·수립 시행

- 시설 안전 점검, 안전교육, 위기 대응훈련 등의 정기적 시행

❍ 악성 녹조 및 유충 유입 차단을 통한 신뢰성 있는 정수처리시스템 구축

- 녹조 발생 경보 및 생물감시장치 보완 설치

- 조류방지막 확대 설치

□ 기대효과

❍ 완벽한 정수처리로 깨끗하고 안전한 수돗물 생산

신뢰 증진을 위한 수질검사 체계 확립

다양한 첨단 장비와 전문 인력의 기술력을 활용한 체계적 정수공정 관리

찾아가는 민원서비스와 검사 결과 공표를 통한 수돗물 신뢰 증진

□ 사업개요

❍ 깨끗한 수돗물 생산을 위한 수질검사 체계 확립

❍ 수돗물 민원 발생 시 찾아가는 민원 서비스로 수돗물 신뢰 증진

□ 추진계획

❍ 조류 등 특이 수질 대비 수돗물 특별관리 대책기간 운영 : 6~10월(5개월간)

❍ 진양호 원수 및 상류수계 수질에 대한 정기적 검사 실시

- 진양호 원수 수질검사

∙ 탁도 등 7항목/매일, pH 등 18항목/매주, 카드뮴 등 38항목/매월

- 상류 수계 수질검사 : 매월 10개소(BOD 등 11항목)

❍ 공정관리 및 급수계통 수질관리를 위한 수질검사

- 수질 변화에 따른 자(jar)테스트 실시 : 주 2회 이상(수질 이상 시 수시)

- 정수공정 관리 수질검사 : 9항목/매일, 8항목/매주, 60항목/매월

- 수도꼭지 및 노후급수관 수질검사 : 10항목/매주(16개소-일반 12, 노후 4)

- 중점관리지역 노후급수관 수질검사 : 11항목/월(40개소)

❍ 가정 수도꼭지 수질 이상 민원 및 수돗물 안심확인제 신속·정확한 민원처리

❍ 수도행정에 대한 시민 신뢰도 증진 프로그램 운영

- 수돗물 수질검사 결과 전광판 표출 : 월 1회(종합사회복지관 전광판)

- 수돗물 수질검사 결과 공표 : 월 1회(홈페이지, 일간지, SNS, 게시판 등)

- 정기적 민·관 합동 수질확인 검사 실시 : 월 1회(시민단체 회원 참여)

- 수돗물평가위원회 개최 : 연 2회(상·하반기)

□ 기대효과

❍ 수질검사 체계화를 통한 깨끗한 수돗물 공급으로 시민 신뢰도 증진

취·정수장 시설 보완 및 정비사업 시행

진양호 수질 악화 및 이상 수질 발생에 대비한 정수 처리시설 보완 및 지속적 개량

안정적인 수돗물 생산을 위한 정수 처리시설 노후설비 교체 및 정비

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 취·정수장 일원

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

❍ 사 업 량 : 노후시설 보완 및 정비 30건

❍ 사 업 비 : 1,952백만원

❍ 사업내역	(단위 : 건, 백만원)

구 분	사업내용	사업량	사업비	비 고
계		30	1,952
취수장	◦기계·전기 설비 유지관리 ◦약품투입설비 유지관리 ◦건축물, 구조물 유지관리	12	291
1·2정수장		18	1,661

□ 추진계획

❍ 2023.  1. ~  3. : 설계 착수 및 완료

❍ 2023.  3. ~ 12. : 사업 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 노후시설물 정비로 안정적인 수돗물 생산공급

취수원 수질개선사업

진양호 수질 악화 및 유충 차단에 적극 대응하고 시민에게 안전하고 깨끗한 수돗물을 생산 공급하기 위하여 취수원 수질 개선

□ 시설개요

❍ 위    치 : 진주 취수시설 내(진주시 남강로1번길 105-38)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 6.

❍ 사 업 량

- 조류차단막 개량 및 설치 1식(H=2m, L=100m)

- 물순환시스템 1식, 산기(살수)시스템 1식

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(시비 100%)

□ 사업배경

❍ 조류발생 현황

2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
관심□경계 (155일)	관심□경계 (51일)	관심 (21일)	없음	관심 (105일)	관심 (63일)

❍ 조류경보제 발령단계 및 기준

- 관심(1천 세포수 이상) ⇒ 경계(1만 이상) ⇒ 대발생(1백만 이상)

❍기후변화에 따른 조류 발생 빈도가 높아지고 있으며 2026년 이후 고도정수 처리시설 도입 때까지 수질 악화 대응을 위한 취수원 수질개선 사업 필요

□ 추진계획

❍ 2023. 1. ~ 6. : 설계 착수 및 완료

□ 기대효과

❍ 취수원인 진양호의 조류 발생 심화에 따른 적극적인 대응으로 수질 개선

❍ 양질의 취수원 확보로 수돗물 공급과 정수약품비 절약 도모

2정수장 건축물 내진보강 및 안전시설물 설치

정수장 안전난간 노후로 미관저해와 사고 발생 우려로 안전성 확보를 위해 시설 개선

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 2정수장(진주시 진양호로125번길 22-35)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 8.

❍ 사 업 량 : 약품실 철골브레이스 보강 6개소, 안전난간 시설개선 12개소

❍ 사 업 비 : 350백만원

□ 추진계획

❍ 2022. 12. ~ 2023. 1. : 보수보강시설물 조사

❍ 2023.  2. ~ 3.      : 실시설계

❍ 2023.  4.           : 사업 착공

❍ 2023.  8.           : 사업 준공

□ 기대효과

❍ 지진에 대한 안전성 확보 및 구조물 내구성 증대

❍ 노후 시설물 개선을 통해 안전성 확보와 정수장 환경 개선

취수장 생물감시장치 교체 및 조류감시장치 설치

취수장의 원수 수질관리를 위한 생물 및 조류 감시 장치 설치로 수질의 상시 모니터링을 실시하여 안전하고 깨끗한 수돗물 생산 공급

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 취수장(진주시 남강로1번길 105-38)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

❍ 사 업 량 : 취수장 생물감시장치 교체 1식, 취수장 조류감시장치 설치 1식

❍ 사 업 비 : 300백만원

□ 추진계획

❍ 2022. 12.	: 특정제품선정위원회 개최

❍ 2023.  1. ~  2.	: 실시설계 준공

❍ 2023.  3. ~  5.	: 제품 제작 및 검수

❍ 2023.  6.	: 납품 및 설치

❍ 2023.  7. ~ 12.	: 제품 성능도 평가 및 수집자료 활용도 분석

□ 기대효과

❍ 하절기 이상고온 등 기후변화에 따른 수질 데이터 상시 모니터링 구축 및 활용

❍ 실시간 수질 감시를 통한 정수장 최적 운영으로 운영비용 절감

하 수 시 설 과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2022년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2023년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원 현황	(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	16	1	4	5	4	2
현 원	15	1	5	4	1	4
증 감	△1	-	1	△1	△3	2

※ 공무직 : 10명

□ 하수도 현황

시설용량 (㎥/일)	면 적(㎢)		관 로(㎞)		보 급 률(%)
	배수구역	처리구역	계 획 (A)	실 적 (B)	관 로 (B/A)	하수도
202,300	63.56	33.54	1,707.4	1,616.4	94.7	94.0

□ 시설물 현황

구 역	관 로 (㎞)	맨 홀 (개)	오수받이 (개)	맨홀펌프장 (개소)	우수토실 (개소)
하수처리 구역 내	1,616.4	31,953	71,255	73	70

□ 공중화장실 현황

❍ 전체 현황	(단위 : 개소)

계	공공용 시 설	관광･체육 시 설	교통시설 (역,터미널)	상업시설 (시장,상가)	주유소	공 원	기 타 (둔치 등)
427	138	56	7	26	119	44	37

❍ 부서별 관리(지도·점검) 현황	(단위 : 개소)

계	하수시설과 (23개 읍면동)	공원관리과	산림과	체육진흥과	진주성 관리사업소	기 타 (민간 등)
427	55	34	10	22	6	300

❍ 하수시설과 관리 현황	(단위 : 개소)

계	공 원	둔치	등산로	시장	주차장	가로변
55	10	21	2	3	5	14

Ⅱ. 2022년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	11	4	7	-	-
예산사업	11	4	7	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

【완료 사업】……… 4건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주 요 성 과
금산면 관방･남성마을 하수관로 정비사업	❍ 위 치 : 금산면 관방, 남성마을 일원 ❍ 사업량 - 관로정비 L=2.8km - 배수설비 189개소 ❍ 사업비 : 1,666백만원 ❍ 기 간 : 2021. ~ 2022.	❍ 2021. 5. : 공사 착공 ❍ 2022. 8. : 공사 준공	❍ 하수관로 정비로 쾌적한 환경 조성
KSPO 스포츠 가치센터 하수관로 정비사업	❍ 위 치 : 내동면 일원 ❍ 사업량 - 관로신설 L=3.7km - 맨홀펌프장 2개소 ❍ 사업비 : 1,684백만원 ※ 원인자부담금 : 국민체육진흥공단 ❍ 기 간 : 2021. ~ 2022.	❍ 2021. 4. : 공사 착공 ❍ 2022. 11. : 공사 준공	❍ KSPO 스포츠 가치센터에서 발생하는 오수를 공공하수처리시설로 유입하여 이용객들의 불편 해소
초전동 외 8개지구(장재1지구) 하수관로 정비사업	❍ 위 치 : 장재동 일원 ❍ 사업량 - 관로신설 L=3.7km - 맨홀펌프장 2개소 ❍ 사업비 : 865백만원 ❍ 기 간 : 2021. ~ 2022.	❍ 2021. 6. : 공사 착공 ❍ 2022. 3. : 공사 준공	❍ 하수관로 정비로 쾌적한 도시환경 조성
공중화장실 비상벨 및 블랙박스 설치사업	❍ 위 치 : 공중화장실 24개소 ❍ 사업량 - 비 상 벨 24개소 - 블랙박스 12개소 ❍ 사업비 : 45백만원 ❍ 기 간 : 2022.	❍ 2022. 8. : 대상지 선정 ❍ 2022. 10. : 입찰 및 착공 ❍ 2022. 11. : 준공	❍ 위급상황 대응 및 공중화장실 안전성 강화

【추진중 사업】……… 7건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
진주시 노후하수관로 정비사업 (1차-1단계)	❍ 위 치 : 관내 일원 ❍ 사업량 - 노후하수관로 정비 L=12.9km ❍ 사업비 : 23,719백만원 ❍ 기 간 : 2017. ~ 2022.	□ 추진사항 ❍ 2016. 5. : 정밀조사 용역 완료 ❍ 2017. 6. ~ 2019. 11. : 기본 및 실시설계 용역 ❍ 2019. 6. ~ 12. : 기술심의 및 행정절차 이행 ❍ 2020. 5. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 12. : 공사 준공	❍ 정상 추진
진주시 노후하수관로 정비사업 (1차-2단계)	❍ 위 치 : 관내 일원 ❍ 사업량 - 노후하수관로 정비 L=10.8km ❍ 사업비 : 28,911백만원 ❍ 기 간 : 2020. ~ 2025.	□ 추진사항 ❍ 2016. 5. : 정밀조사 용역 완료 ❍ 2020. 5. : 기본 및 실시설계 착수 ❍ 2021. 7. ~ 11. : 경제성 검토 및 기술심의 ❍ 2021. 12. : 기본 및 실시설계 완료 ❍ 2022. 4. : 재원협의 완료 ❍ 2022. 10. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2025. 5. : 공사 준공	❍ 정상 추진
대곡 공공 하수처리시설 증설사업	❍ 위 치 : 대곡면 일원 ❍ 사업량 - 증설 950㎥/일(2,850㎥/일) - 관로정비 L=17.4km - 배수설비 608개소 ❍ 사업비 : 31,272백만원 ❍ 기 간 : 2019. ~ 2024.	□ 추진사항 ❍ 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영 ❍ 2019. 4. ~ 2020. 11. : 기본 및 실시설계 용역 ❍ 2020. 10. ~ 12. : 재원협의 및 행정절차 이행 ❍ 2021. 6. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2024. 6. : 공사 준공	❍ 정상 추진
초전동 외 8개 지구 하수관로 정비사업	❍ 위 치 : 상대,하대,장재,초전,판문,내동,정촌,금산,집현,명석일부지역 ❍ 사업량 - 관로정비 L=26.1km - 배수설비 784개소 ❍ 사업비 : 28,321백만원 ❍ 기 간 : 2020. ~ 2025.	□ 추진사항 ❍ 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 ❍ 2020. 4. ~ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역 ❍ 2021. 10. ~ 12. : 재원협의 및 행정절차 이행 ❍ 2022. 6. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2025. 6. : 공사 준공	❍ 정상 추진
진주 물재이용 (빗물+중수도)시설 설치사업	❍ 위 치 : 종합경기장, 실내수영장, 한국세라믹기술원 ❍ 사업량 - 중수도설치 3개소 Q=220㎥/일 ❍ 사업비 : 5,263백만원 ❍ 기 간 : 2020. ~ 2023.	□ 추진사항 ❍ 2019. 5. : 타당성조사 용역 완료 ❍ 2020. 6. ~ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역 ❍ 2021. 10. : 재원 협의 ❍ 2021. 11. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 2. : 공사 준공	❍ 정상 추진
강주 소규모 공공하수 처리시설 증설사업	❍ 위 치 : 정촌면 강주, 목과마을 ❍ 사업량 - 증설 130㎥/일(240㎥/일) - 관로정비 L=3.2km - 배수설비 356개소 ❍ 사업비 : 5,692백만원 ❍ 기 간 : 2022. ~ 2025.	□ 추진사항 ❍ 2021. 11. : 신규 국고보조사업 선정 ❍ 2022. 5. : 용역 착수 ❍ 2022. 7. : 처리장부지 공유재산 심의완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 5. : 용역 준공 ❍ 2023. 10. : 공사 착공 ❍ 2025. 10. : 공사 준공	❍ 정상 추진
사봉지역 하수관로 정비사업	❍ 위 치 : 사봉면, 일반성면 일원 ❍ 사업량 - 관로정비 L=21.38km - 배수설비 1,301개소 ❍ 사업비 : 22,387백만원 ❍ 기 간 : 2022. ~ 2027.	□ 추진사항 ❍ 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영 ❍ 2022. 12. : 용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2024. 6. : 용역 준공 ❍ 2024. 10. : 공사 착공 ❍ 2027. 10. : 공사 준공	❍ 정상 추진

Ⅲ. 2023년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 시민의 삶의 질 향상을 위한 농촌지역 하수처리시설 확충

❍	대곡 공공하수처리시설 증설사업, 정촌 강주 소규모 공공하수처리시설 증설사업의 차질 없는 추진

❍ 수곡 서촌 소규모 공공하수처리시설 설치사업 추진

□ 하수관로의 체계적인 점검과 정비로 지속 가능한 도시기반 유지

❍ 노후하수관로 정밀조사 및 정비사업 추진으로 부실 관로의 지속적 정비

❍	하수도정비기본계획에 따른 처리구역 확대를 위한 초전동 외 8개 지구 하수관로 정비사업 추진

❍ 사봉지역 하수관로 정비사업 추진

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공 기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	11	27,539	5	2	-	4
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	11	27,539	5	2	-	4

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

대곡 공공하수처리시설 증설사업(계속)

신축 건물의 증가 추세와 진주교도소 생활하수 등의 원활한 처리

공공하수처리장 유입 하수의 처리효율 제고 및 공공수역 수질 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 대곡면 가정리 일원

❍ 사 업 량 : 처리장증설 950㎥/일(기존 1,900㎥/일⇒변경 2,850㎥/일)
관로정비 L=17.4㎞, 배수설비 608개소

❍ 사 업 비 : 31,272백만원(국비 70%, 도비 10.5%, 시비 10.5%, 기금 9%)

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년(6년간)

□ 추진상황

❍ 2019.  4. ~ 11. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2020.  6. ~ 10. : 설계경제성(VE) 용역 및 경남도 지방건설기술심의

❍ 2020. 10. ~ 12. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2021.  6. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2024.  6. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	31,272	1,090	714	12,102	4,510	9,544	3,312
국 비	21,626		500	8,875	2,773	6,325	3,153
도 비	3,376		107	1,373	382	1,355	159
시 비	3,376	1,090	107	1,129	1,050
기 금	2,894			725	305	1,864

□ 기대효과

❍ 공공하수처리시설 증설을 통한 하수처리 효율 제고 및 공공수역 수질개선

❍ 하수관로 정비로 대곡면 주민들의 생활 불편 해소

초전동 외 8개 지구 하수관로 정비사업(계속)

주거지역 생활하수 등으로 인한 수질오염 예방 및 생활불편 해소

공공하수처리장 유입 하수의 처리효율 제고 및 공공수역 수질 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 상대,하대,장재,초전,판문,내동,정촌,금산,집현,명석일부지역

❍ 사 업 량 : 관로정비 L=26.1㎞, 배수설비 784개소, 맨홀펌프장 22개소

❍ 사 업 비 : 28,321백만원(국비 70%, 도비 10.5%, 시비 10.5%, 기금 9%)

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년(6년간)

□ 추진상황

❍ 2020.  4. ~ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2021.  8. : 설계경제성(VE) 용역 및 경남도 지방건설기술심의

❍ 2021. 10. ~ 12. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2022.  6. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2025.  6. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	28,321	1,250	1,350	8,797	3,688	13,236
국 비	19,825		1,250	5,979	2,058	10,538
도 비	2,973			1,161	441	1,371
시 비	2,974	1,250	100	1,416	208
기 금	2,549			241	981	1,327

□ 기대효과

❍ 우·오수 분류식 하수관로 정비로 쾌적한 도시환경 조성

❍ 공공하수처리시설 하수처리 효율 및 남강 방류수질 개선

진주 물 재이용(빗물+중수도)시설 설치사업(계속)

물 재이용을 촉진하여 물 자원의 지속 가능한 이용을 도모

수돗물을 재사용하여 생산량 절감 및 정부의 물 정책에 부응

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주종합경기장, 진주실내수영장, 한국세라믹기술원

❍ 사 업 량 : 중수도설치 220㎥/일, 빗물이용시설 1,130㎥/일(기존활용)

❍ 사 업 비 : 5,263백만원(국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)

□ 추진상황

❍ 2020.  6. ~ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2021.  3. : 중수도 처리공법 선정

❍ 2021.  8. : 한국세라믹기술원 업무협약 체결

❍ 2021. 10. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2021. 11. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2023.  2. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	2020년	2021년	2022년	2023년
계	5,263	425	1,478	2,536	824
국 비	3,107	400	1,478	498	731
도 비	157			64	93
시 비	1,999	25		1,974

□ 기대효과

❍물 재이용 시설 설치로 가뭄 해소 등 물 부족에 대응

❍물을 재이용하여 수돗물 생산량 절감 및 공공수역의 수질보전 능력 향상에 기여

강주 소규모 공공하수처리시설 증설사업(계속)

주거지역 생활하수 등으로 인한 수질오염 예방 및 생활불편 해소

공공하수처리장 유입 하수의 처리효율 제고 및 공공수역 수질 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 정촌면(강주, 목과마을) 일원

❍ 사 업 량 : 처리장증설 130㎥/일(기존 110㎥/일 ⇒ 변경 240㎥/일)
관로정비 L=3.2㎞, 배수설비 356개소

❍ 사 업 비 : 5,692백만원(국비 70%, 도비 10.5%, 시비 10.5%, 기금 9%)

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4년간)

□ 추진상황

❍ 2022.  5. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2022.  7. : 처리장부지 공유재산심의 완료

□ 추진계획

❍ 2023.  1. ~ 2. : 공법선정위원회

❍ 2023.  3. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2023.  5. : 용역 준공

❍ 2023. 10. ~ 2025. 10. : 공사 착공 및 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년
계	5,692	645	396	3,450	1,201
국 비	3,984	300	162	2,700	822
도 비	598	45	34	400	119
시 비	598	300	200	49	49
기 금	512			301	211

□ 기대효과

❍ 공공하수처리시설 증설을 통한 공공수역의 수질개선

서촌 소규모 공공하수처리시설 설치사업(신규)

주거지역 생활하수 등으로 인한 수질오염 예방 및 생활불편 해소

공공하수처리장 유입 하수의 처리효율 제고 및 공공수역 수질 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 수곡면 원외리, 원내리 일원

❍ 사 업 량 : 처리장신설 60㎥/일, 관로정비 L=3.1㎞, 배수설비 136개소

❍ 사 업 비 : 4,428백만원(국비 60%, 도비 14%, 시비 14%, 기금 12%)

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)

□ 추진상황

❍ 2022.  9. : 신규 국고보조사업 선정

❍ 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영

□ 추진계획

❍ 2023.  3. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2023.  5. : 처리장부지 공유재산심의회

❍ 2023. 12. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2024.  3. : 용역 준공

❍ 2024. 10. ~ 2025. 10. : 공사 착공 및 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2023년	2024년	2025년
계	4,428		600	2,240	1,588
국 비	2,657		300	1,500	857
도 비	620		100	360	160
시 비	620		200	110	310
기 금	531			270	261

□ 기대효과

❍ 공공하수처리시설 신설을 통한 공공수역의 수질 개선

사봉지역 하수관로 정비사업(신규)

주거지역 생활하수 등으로 인한 수질오염 예방 및 생활불편 해소

공공하수처리장 유입 하수의 처리효율 제고 및 공공수역 수질 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 사봉면, 일반성면 일원

❍ 사 업 량 : 관로정비 L=21.4㎞, 배수설비 1,301개소

❍ 사 업 비 : 22,387백만원(국비 60%, 도비 14%, 시비 14%, 기금 12%)

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2027년(6년간)

□ 추진상황

❍ 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영

❍ 2022. 12. : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 추진계획

❍ 2023. 10. : 설계경제성(VE) 용역

❍ 2023. 12. : 경남도 지방건설기술심의

❍ 2024.  2. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2024.  6. : 용역 준공

❍ 2024. 10. ~ 2027. 10. : 공사 착공 및 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	22,387	999	400	3,117	10,161	7,710
국 비	13,432			1,432	7,000	5,000
도 비	3,134			380	1,544	1,210
시 비	3,134	999	400	735	500	500
기 금	2,687			570	1,117	1,000

□ 기대효과

❍ 하수관로 정비로 사봉면, 일반성면 주민들의 생활불편 해소

진주시 하수도정비 기본계획(변경) 및

노후화 실태평가 개선 타당성 조사 용역

공공하수도의 보급률 향상 및 생활여건 변화를 반영하고 하수도 시설의 계획적·체계적인 정비를 도모하기 위함

□ 법적근거

❍ 하수도법 제6조(하수도정비기본계획의 수립 등)

❍ 하수도정비기본계획 수립지침[환경부 생활하수과-1366(2020.5.18.)]

- 5년마다 하수도정비 기본계획의 타당성을 검토하여 수립

- 진주시 하수도정비 기본계획 변경(2019.9. 환경부 승인)

□ 용역개요

❍ 위    치 : 진주시 일원

❍ 용역기간 : 2023년 ~ 2026년

❍ 용역개요 : 하수도정비 기본계획(변경) 1식
노후화 실태평가 개선 타당성 조사 및
노후하수처리시설 정밀안전진단 용역 1식

❍ 용 역 비 : 3,000백만원(시비)

＊ 기본계획 및 노후화 실태평가 용역 등 2,700백만원, 정밀안전진단 300백만원

□ 추진계획

❍ 2023.  5. : 용역 착수

❍ 2024. 10. : 낙동강유역환경청 및 환경부 사전 협의

❍ 2025.  5. : 기본계획 승인 신청(환경부)

❍ 2026.  5. : 용역 준공

□ 기대효과

❍ 공중위생 및 생활환경의 개선과 환경정책기본법에서 정한 수질환경 기준 준수

❍ 하수처리에 대한 계획적·체계적인 정비로 쾌적한 도시환경 조성

진주시 노후하수관로 정비(1차-2단계)사업(계속)

지반침하 개연성이 높은 하수관로에 대한 정밀조사 결과, 파손 등 결함이 심한 하수관로를 우선 교체·개보수하여 지반 침하를 미연에 방지하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 관내 일원

❍ 사 업 량 : 노후하수관로 L=10.8㎞

❍ 사 업 비 : 28,911백만원(국비 50%, 도비 16%, 시비 19%, 기금 15%)

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년(6년간)

□ 추진상황

❍ 2016.  5. : 노후하수관로 정밀조사 용역 완료(1차)

❍ 2020.  5. ~ 2021. 12. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2021. 10. ~ 12. : 경상남도 지방건설기술심의

❍ 2022.  1. ~  9. : 재원협의(환경부) 및 행정절차 이행

❍ 2022. 10. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2025.  5. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 이후
계	28,911	1,170	885	4,498	4,699	17,659
국 비	14,383	750	500	2,249	2,172	8,712
도 비	4,567			957	1,086	2,524
시 비	5,646	420	324	1,292	1,091	2,519
기 금	4,315		61		350	3,904

□ 기대효과

❍ 파손된 노후하수관로 교체 및 개보수 추진으로 지반침하를 사전에 방지하여 재난 예방 및 시민 안전 확보

진주시 노후하수관로 정비(2차)사업(신규)

지반침하 개연성이 높은 하수관로에 대한 정밀조사 결과, 파손 등 결함이 심한 하수관로를 우선 교체·개보수하여 지반 침하를 미연에 방지하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 관내 일원

❍ 사 업 량 : 노후하수관로 L=21.2㎞

❍ 사 업 비 : 28,868백만원(국비 60%, 도비 14%, 시비 14%, 기금 12%)

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)

□ 추진상황

❍ 2021.  5. : 노후하수관로 정밀조사 용역 완료(2차)

□ 추진계획

❍ 2023.  1. ~ 12. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2024.  1. ~  6. : 재원협의(환경부) 및 행정절차 이행

❍ 2024.  7. : 공사 착공

❍ 2026. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년
계	28,868		1,800	7,120	9,974	9,974
국 비	17,320		500	4,820	6,000	6,000
도 비	4,042		166	1,134	1,371	1,371
시 비	4,042		1,134	166	1,371	1,371
기 금	3,464			1,000	1,232	1,232

□ 기대효과

❍ 파손된 노후하수관로 교체 및 개보수 추진으로 지반침하를 사전에 방지하여 재난 예방 및 시민 안전 확보

상평산업단지 노후폐수관로 정비사업(환경부)

상평산업단지 폐수관로가 30년 이상 노후화로 잦은 지반침하(싱크홀) 발생으로 교통사고 위험 등 시민의 안전을 위협

환경부에 상평산업단지 노후 폐수관로 정비 건의로 사업 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주 상평일반산업단지

❍ 사 업 량 : 노후폐수관로 개량 L=20.9km

❍ 사 업 비 : 43,256백만원(국비 70%, 시비 30%)

❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2026년(6년간)

□ 추진상황

❍ 2020.  8. : 조사 및 기본계획 수립 업무대행계약 체결(환경부↔한국환경공단)

❍ 2021.  6. : 노후폐수관로 조사 및 기본계획 수립 용역

❍ 2021. 11. : 상평산업단지 노후폐수관로 정비사업 3자 협약 체결

【환경부↔진주시↔한국환경공단(공사시행)】

❍ 2022.  3. : 설계, 시공 일괄 입찰

❍ 2022.  6. : 낙찰자 결정 및 기본설계 실시

□ 추진계획

❍ 2022. 12. : 우선시공분 계약 및 착공

❍ 2023.  7. : 본공사 계약

❍ 2026.  2. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년
계	43,256	4,008	2,143	13,552	13,298	10,255
국 비	30,279	3,545	1,500	9,240	9,062	6,932
시 비	12,977	463	643	4,312	4,236	3,323

□ 기대효과

❍ 노후폐수관로 정비로 시민의 안전 확보 및 산업단지 환경개선

노후하수관로 기술진단 용역

｢하수도법｣ 제20조에 따라 공공하수관로에 대한 주기적인(5년) 기술진단을 통해 문제점을 파악하고 관로 시설개선 방안을 마련

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 전역(진주, 대곡, 사봉, 진성처리구역)

❍ 사 업 량 : 하수관로 기술진단 L=112.8km

❍ 사 업 비 : 445백만원

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 3.

□ 추진실적

❍ 2018. : 평거1지구 외 4개소(L=45㎞)

❍ 2019. ~ 2020. : 평거3지구 외 4개소(L=36㎞)

❍ 2021. : 혁신도시 외 3개소(L=64.3㎞)

❍ 2022. : 이현·신안지구 외 2개소(L=41.4㎞)

□ 추진계획

❍ 2023. 1. ~ 2. : 사업수행능력평가 기준안 의견수렴 및 확정

❍ 2023. 3. : 사업수행능력평가 제출 안내 공고

❍ 2023. 4. : 사업수행능력 평가(평가위원회)

❍ 2023. 5. : 업체 선정 및 용역 착수

❍ 2024. 3. : 기술진단 용역 완료

□ 기대효과

❍ 하수관로 기술진단을 통해 문제점을 진단하고 관로 시설개선 등으로 하수처리 효율증대

하 수 운 영 과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2022년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2023년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅳ. 특수시책

Ⅰ. 기본현황

□ 직원 현황	(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	연구사	비 고
정 원	43	1	8	9	8	16	1
현 원	40	1	15	16	5	2	1	휴직자 1명 포함
증 감	△3	-	7	7	△3	△14	-

□ 공공하수처리시설 현황

구 분	계	진 주	문 산	사 봉	대 곡	진 성
시설용량 (톤/일)	202,300	190,000	7,100	2,400	1,900	900
처리구역	진주시 전역	시가지 금산·집현· 명석면	문산읍	일반성면	대곡면	진성면 사봉면
부지면적 (㎡)	206,477	153,275	19,482	18,067	8,605	7,048
중계펌프장 (개소)	23	11	1	6	5	-
운영방법	-	직영	직영	직영	직영	관리대행 환경시설관리 ㈜

※ 진성 및 소규모 공공하수처리시설(38개소 2,289톤) 관리대행 : 2022.7.~2025.6.(3년간)

□ 하수슬러지처리(탄화)시설 현황

위 치	시설용량	부지면적	건축연면적	운영방법	운영업체
남강로 1607	100톤/일	4,230㎡	1,943㎡ (지하2, 지상3)	민간위탁	환경시설관리(주)

※ 계약기간 : 2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(3년간)

□ 하수·분뇨처리 및 수질현황

❍ 하수·분뇨처리	(2022. 9. 30. 기준)

구 분	시설용량 (㎥/일)	하수량(㎥/일)		분뇨량 (㎘/일)	슬러지 케익 발생량 (톤/일)
		유입량	방류량	처리량	소화시설	총인시설
계	202,300	142,530	132,165	85.2	76.47	16.09
진주공공 하수처리시설	190,000	135,080	125,353	85.2	76.47	12.00
문산공공 하수처리시설	7,100	3,894	3,782			2.21
사봉공공 하수처리시설	2,400	1,169	992			0.23
대곡공공 하수처리시설	1,900	1,831	1,513			1.30
진성공공 하수처리시설	900	556	525			0.35

❍ 수질현황	(2022. 9. 30. 기준, 단위 : ㎎/L, 개/mL)

항 목 구 분		BOD (생물학적산소요구량)	TOC (화학적산소요구량)	SS (부유물질)	T-N (총 질소)	T-P (총 인)	총대장균 군 수
방류 수질기준		4.5이하	15이하	10이하	20이하	0.27이하	3,000이하
진주공공 하수처리시설	유입수	134.0	69.6	170.6	34.6	4.174	529,740
	방류수	2.1	6.3	1.9	9.6	0.072	69
문산공공 하수처리시설	유입수	111.6	53.1	125.5	18.205	2.023	404,728
	방류수	0.5	5.5	1.7	4.470	0.017	6
사봉공공 하수처리시설	유입수	23.4	9.6	64.5	8.294	0.858	18,047
	방류수	0.3	3.3	2.7	8.104	0.060	5
대곡공공 하수처리시설	유입수	127.8	51.6	130.9	13.575	1.439	274,899
	방류수	0.8	4.6	5.1	3.444	0.038	13
진성공공 하수처리시설	유입수	178.4	99.3	183.6	44.295	6.966	109,282
	방류수	2.3	6.1	2.4	5.060	0.045	8

Ⅱ. 2022년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	15	6	9	-	-
예산사업	15	6	9	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

【완료 사업】……… 6건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
공공하수처리시설 내부반송 유량계 교체공사	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 내 ❍ 사업내용 - 내부반송 유량계 교체 1식 ❍ 사업비 : 121백만원 ❍ 기 간 : 2022. 5. ~ 8.	❍ 계 약 : 2022. 5. ❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 공사완료 : 2022. 8.	❍ 노후 유량계 교체로 정확한 유량 측정 및 신뢰성 향상
진주공공하수 처리시설 내부반송배관(1단계) 개선공사	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 내 ❍ 사업내용 - 내부반송배관 개선공사 15개소 ❍ 사업비 : 188백만원 ❍ 기 간 : 2022. 6. ~ 10.	❍ 계 약 : 2022. 6. ❍ 착 공 : 2022. 7. ❍ 공사완료 : 2022. 10.	❍ 배관구조를 만수위 구조로 개선하여 생물반응조 효율적 공정관리
진주공공하수처리시설 송풍기동 내진보강공사	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 송풍기동 ❍ 사업내용 - 송풍기동 내진보강공사 1식 ❍ 사업비 : 368백만원 ❍ 기 간 : 2022. 3. ~ 9.	❍ 계 약 : 2022. 3. ❍ 착 공 : 2022. 4. ❍ 공사완료 : 2022. 9.	❍ 건축물 및 구조물의 내력 증진을 통한 시설물 안정성 유지로 대형 안전사고 예방
칠암중계 펌프장 악취저감시설 구매 설치	❍ 사업대상 - 칠암중계펌프장 내 ❍ 사업내용 - 악취저감시설 구매 설치 1식 ❍ 사업비 : 600백만원 ❍ 기 간 : 2022. 6. ~ 9.	❍ 계 약 : 2022. 6. ❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 공사완료 : 2022. 9.	❍ 악취로 인한 인근 주민 민원해소 및 쾌적한 생활 환경 조성
망경중계 펌프장 수배전반교체	❍ 사업대상 - 망경중계펌프장 전기실 ❍ 사업내용 - 수배전반교체 1식 ❍ 사업비 : 186백만원 ❍ 기 간 : 2021. 5. ~ 11.	❍ 계 약 : 2021. 5. ❍ 착 공 : 2021. 5. ❍ 공사완료 : 2022. 11.	❍ 수배전반의 수전전압을 저압화 하여 전기설비 및 운영자의 안전사고예방
칠암중계 펌프장 협잡물 처리설비 구매 교체	❍ 사업대상 - 칠암중계펌프장 내 ❍ 사업내용 - 협잡물처리설비 구매 교체 1식 ❍ 사업비 : 617백만원 ❍ 기 간 : 2022. 6. ~ 11.	❍ 계 약 : 2022. 6. ❍ 착 공 : 2022. 7. ❍ 공사완료 : 2022. 11.	❍ 펌프장 유입되는 협잡물의 처리 효율 증대 ❍ 하수처리 후단 공정설비 보호와 내구성 향상

【추진중 사업】……… 9건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
진주하수 슬러지(탄화) 시설민간위탁 용역	❍ 사업대상 - 진주하수슬러지(탄화)시설 ❍ 사업내용 - 시설의 운전 및 유지관리 업무 ❍ 사업비 : 3,323백만원 ❍ 기 간 : 2022.1.~2024.12. (3년)	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2021. 12. ❍ 용역착수 : 2022. 1. ❍ 용역업체 : 환경시설관리㈜ □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2024. 12.	❍ 정상 추진
공공하수처리 시설 협잡물 대행처리용역	❍ 사업대상 - 진주 공공하수처리시설 ❍ 사업내용 - 공공하수처리시설 협잡물 폐기물 처리 용역 ❍ 사업비 : 430백만원 - 운반 및 처리단가 : 430천원/톤 - 계약물량 : 1,000톤 ❍ 기 간 : 2022. 1. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2022. 1. ❍ 용역착수 : 2022. 1. ❍ 용역업체 : ㈜인선이엔티 외 1개 업체 ※ 협잡물처리량 : 242톤 (2022. 9. 30. 기준) □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2022. 12.	❍ 정상 추진
공공하수처리 시설 하수처리오니 대행처리용역	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 ❍ 사업내용 - 공공하수처리설 하수처리 오니 폐기물처리 용역 ❍ 사업비 : 1,045백만원 - 운반 및 처리단가 : 116천원/톤 - 계약물량 : 9,000톤 ❍ 기 간 : 2022. 2. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2022. 2. ❍ 용역착수 : 2022. 2. ❍ 용역업체 : ㈜수향 외 4개 업체 ※ 하수처리오니 처리량 : 7,856톤(2022. 9. 30. 기준) □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2022. 12.	❍ 정상 추진
진성 및 소규모 공공하수처리시설관리대행용역	❍ 사업대상 -진성 및 소규모하수처리 시설 38개소 ❍ 사업내용 - 시설의 운전 및 유지관리 업무 ❍ 사업비 : 3,865백만원 ❍ 기 간 : 2022.7.~2025.6.(3년)	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2022. 7. ❍ 용역착수 : 2022. 7. ❍ 용역업체 : 환경시설관리㈜ ㈜우진 ㈜성일엔텍 □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2025. 6.	❍ 정상 추진
공공하수처리 시설 수질TMS유지관리용역	❍ 사업대상 - 진주, 문산, 사봉, 대곡, 진성공공하수처리시설 ❍ 사업내용 - 수질 TMS 시설 유지관리 ·검･교정 및 수시점검 ❍ 사업비 : 260백만원 ❍ 기 간 : 2022. 1. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2021. 12. ❍ 용역착수 : 2022. 1. ❍ 용역업체 : ㈜미래환경연구원 □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2022. 12.	❍ 정상 추진
공공하수처리 시설 소화조 D지 구조물 보수공사	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 소화조 D지 ❍ 사업내용 - 소화조 상부 센터 돔 : 314㎡ ❍ 사업비 : 660백만원 ❍ 기 간 : 2022.4.~2023.3.	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2022. 4. ❍ 용역착수 : 2022. 4. ❍ 용역업체 : ㈜금성기술 □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2022. 10. ❍ 공사계약 : 2022. 10. ❍ 공사준공 : 2023. 3.	❍ 정상 추진
진주공공하수처리시설 시설물 이력 관리시스템 구축공사	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 ❍ 사업내용 - 이력관리시스템 구축 1식 ❍ 사업비 : 61백만원 ❍ 기 간 : 2022. 6. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 계 약 : 2022. 6. ❍ 착 공 : 2022. 7. □ 향후계획 ❍ 공사완료 : 2022. 12.	❍ 정상 추진
진주공공하수처리시설 유입펌프 고압인버터 설치공사	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 유입펌프동 ❍ 사업내용 - 고압인버터(135KW)×2대 ❍ 사업비 : 610백만원 ❍ 기 간 : 2022. 6. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 계 약 : 2022. 6. ❍ 착 공 : 2022. 6. □ 향후계획 ❍ 공사완료 : 2022. 12.	❍ 정상 추진
진주공공하수처리시설 자외선 소독설비 소모품 구입	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 UV 소독설비동 ❍ 사업내용 - UV램프 24개 - 석영관 17개 ❍ 사업비 : 99백만원 ❍ 기 간 : 2022. 8. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 계 약 : 2022. 8. □ 향후계획 ❍ 납품예정 : 2022. 12.	❍ 정상 추진

Ⅲ. 2023년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 효율적 공정관리를 위한 유지관리 체계 정립

❍ 정비이력관리제 정착과 공정별 정비주기 설정 관리

□ 노후설비의 적기 정비와 하수처리 공정개선을 통한 효율적 시설 운영

❍ 기술진단보고서 등을 기반으로 노후시설물 정비사업 지속 추진

❍ 노후설비 배전반 교체를 통한 원활한 전력공급으로 시설 운영

□ 시설물 안전점검 및 시설 개선을 통한 위해요인 사전 차단

❍ 지진 등 재해발생을 대비하여 시설물 안전점검 주기적 시행

❍균열 및 누수 발생 건축물 및 토목구조물에 대한 개선공사 시행으로 시설물 안정성 제고

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	6	1,755	1	4	1
일반시책사업	1	-	1	-	-	-
주요예산사업	5	1,755	-	4	1	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

하수처리 안정화를 통한 방류수질 개선

안정적 하수처리와 운영체계 정립으로 방류수질의 안정성 확보

효율적 공정관리체계 구축으로 시설운영의 합리성 제고

□ 시설용량 및 하수처리량	(2022. 9. 30. 기준)

구 분	합 계	진 주	문 산	사 봉	대 곡	진 성
시설 용량(㎥/일)	202,300	190,000	7,100	2,400	1,900	900
평균처리량(㎥/일)	142,530	135,080	3,894	1,169	1,831	556

□ 추진계획

❍ 수질운영기기(TMS) 관리기준 강화 등에 대응한 안정적 운영체계 확립

- 수질검사 자료 등 공정관리 데이터 분석·활용체계 도입

- 합리적 공정관리 방안 도출을 위한 공정회의 정례적 시행

❍ 체계적 공정관리 기법과 효과적 유지관리체계 정립

- 공정 개선방안 발굴과 전문성 제고를 위한 직무연찬회 정례화

- 정비이력관리제의 제도적 정착과 정비주기 설정 관리제 시행

❍ 선제적 시설 투자를 통한 처리공정 안정화 실현

- 노후설비의 적기 정비를 통한 공정 신뢰도 최적화 추진

- 소화조 및 탄화설비 등 하수슬러지 처리 계통의 운영효율 극대화 추진

□ 기대효과

❍ 안정적 하수처리로 쾌적한 도시환경 조성 및 남강수질 개선

진주공공하수처리시설 내진보강사업

노후(20년 이상 경과)된 건축물의 내진성능평가 결과에 따라 시설물 내진 보강 사업을 실시하여 시설물 안전성 확보(지진·화산 재해대책법 제15조)

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주공공하수처리시설 방류펌프동

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 11.

❍ 사 업 비 : 400백만원

❍ 사 업 량 : 방류펌프동 472.85㎡

❍ 연도별 추진계획	(단위 : 백만원, ㎡)

구 분	합 계	2023년	2024년	2025년
대 상 지		방류펌프동	분뇨처리동	소화조 기계동
예 산 액	800	400	250	150
사 업 량	2,027.83	472.85	600	954.98

□ 추진계획

❍ 2023.  1. ~  3. : 구조 설계 용역

❍ 2023.  3. ~  6. : 건축 설계 용역

❍ 2023.  6. : 공사 착공

❍ 2023. 11. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 건축물 및 구조물의 내력 증진을 통한 시설물 안정성 유지로 대형 안전사고 예방

진주공공하수처리시설 전기실 화재 감시설비 설치

주전기실 및 지역전기실의 화재 감시설비 설치로 화재에 발 빠르게 대처함으로써 전기실 화재예방 피해 최소화함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주공공하수처리시설 전기실

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 7.

❍ 사 업 비 : 154백만원

❍ 사업내용

- 간선설비 1식, 경보설비 1식, 소방설계 1식, 소방감리 1식 등

□ 추진상황

❍ 2022. 3. : 송풍기, 농축기, 가용화설비 인버터 제어반 화재감지기 설치

□ 추진계획

❍ 2023. 1. ~ 3. : 실시설계 용역

❍ 2023. 4. : 설치 공사 착공

❍ 2023. 7. : 설치 공사 준공

□ 기대효과

❍ 주전기실 및 지역전기실의 화재 감시설비 설치하여 화재에 대한 빠른 대처로 전기실 화재예방 및 화재피해 최소화

진주공공하수처리시설 2단계 최초침전지 스컴스키머 교체

2단계 최초침전지 스컴스키머가 노후화(24년 경과)됨에 따라 하수찌꺼기 수집효율이 낮고 부식이 진행되어 교체하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주공공하수처리시설 2단계 최초침전지

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 11.

❍ 사 업 비 : 396백만원

❍ 사 업 량 : 스컴스키머 6대 교체

※ 스컴스키머(scum skimmer) : 부상된 슬러지를 걷어내는 장치

□ 추진상황

❍ 2020. 10. : 진주공공하수 및 분뇨처리시설 기술진단

- 진단대행기관 : 한국환경공단

□ 추진계획

❍ 2023.  1. ~  3. : 실시 설계 용역

❍ 2023.  4. : 공사 착공

❍ 2023. 11. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 스컴 및 슬러지 원활한 제거로 펌프등 후단 기기 보호 및 하수의 처리 효율 개선

혁신1·2 중계펌프장 악취저감시설 설치사업

분류식 하수관거 정비사업으로 분뇨 등 오수 직접유입에 따른 악취 발생 문제점을 발굴·정비함으로써 쾌적한 주변 환경 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 혁신1·2 중계펌프장

❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 10.

❍ 사 업 비 : 690백만원

❍ 사 업 량 : 탈취설비(광산화처리방식) 2식 설치	(단위 : 백만원)

정 비 대 상	계	혁신1	혁신2	비 고
계	690	320	370
탈취 닥트, 환기 및 배기 설비	220	100	120
탈취설비(광산화처리방식) 설치	470	220	250

□ 추진상황

❍ 2021.  5. : 망경 중계펌프장 악취저감시설 설치 완료

❍ 2022.  9. : 칠암 중계펌프장 악취저감시설 설치 완료

❍ 2022.  9. : 혁신1·2 중계펌프장 시설물 점검

□ 추진계획

❍ 2023.  1. ~  3. : 실시설계용역

❍ 2023.  4. ~  9. : 악취저감시설 설치 공사

❍ 2023. 10.      : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 악취로 인한 인근주민 민원해소 및 쾌적한 생활환경 조성

문산·사봉공공하수처리시설 기술진단 용역

하수도법 제20조에 따른 공공하수처리시설의 운영·유지 및 시설 전반에 대한 기술진단을 통하여 시설개선 및 효율적인 관리방안을 제시하여 방류수역 수질환경 보호에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 문산·사봉공공하수처리시설

❍ 사업기간 : 2023. 7. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 115백만원

※ 환경부 고시 제2021-44호(2021.2.26.) 공공하수도의 기술진단 비용

❍ 사 업 량 : 2건

시설명	소재지	시설용량	처리공법	비고
문산공공하수 처리시설	문산읍 월아산로 1117번길 154	7,100㎥/일	MS-BNR공법 +가압부상(DAF)
사봉공공하수 처리시설	일반성면 동부로 1960번길 44-25	2,400㎥/일	MS-BNR공법 +가압부상(DAF)

□ 추진계획

❍ 2023.  7. ~  8. : 입찰공고 및 계약

❍ 2023.  8. ~ 12. : 기술진단 용역 실시

❍ 2023. 12. : 기술진단 결과 보고

□ 기대효과

❍ 설비고장 예방, 처리효율 개선방안 마련으로 방류수역 수질환경 보호

Ⅳ. 특수시책

올바른 생활하수 배출요령 홍보

변기와 하수구에 버려지는 일회용 물티슈나 폐식용유로 중계펌프장 수중 펌프 막힘 현상이 잦아 하수처리시설 유지관리에 어려움

□ 사업개요

❍ 대    상 : 전 시민

❍ 기    간 : 연중

❍ 홍보방법 : 다양한 언론매체 및 전단지 배부 등

❍ 홍보내용

- 물티슈, 여성용품, 행주, 걸레용품 변기 속 투입 금지

- 폐식용유·동물성기름 키친타월에 흡수시켜 일반쓰레기로 배출

- 음식물 쓰레기 거름망 이용 분리 배출

□ 추진계획

❍ 시설물 활용 지속적 홍보

- 대    상 : 버스정보 안내시스템, 옥외전광판, 시 홈페이지 등

❍ 홍보물·스티커 등 제작 배부

- 소요예산 : 10백만원

- 배 부 처 : 전 읍면동 아파트관리사무소, 다중이용시설 등

❍ 캠페인을 통한 홍보

- 장    소 : 아파트 앞, 다중이용시설 등

□ 기대효과

❍ 다양한 매체를 통한 지속적 홍보로 시민들의 관심과 실천유도

❍ 하수처리 운영비용 절감 및 기계 수명 연장 도모