	부강한 진주 행복한 시민	제244회 진주시의회(임시회)

2024년도

시 정  주 요 업 무  보 고

진   주   시

(건설도시국)

보  고  순  서

□ 도 시 정 책 과

□ 건 설 하 천 과

□ 도    로    과

□ 시 민 안 전 과

□ 건    축    과

□ 주 택 경 관 과

□ 공공시설추진단

도 시 정 책 과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 주요업무계획

1. 예산사업

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	1	6	8	7
현 원	23	1	1	6	9	3	3
증 감					1	△4	3

□ 국토이용계획

(단위 : ㎢)

총 면 적	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경 보전지역
712.840 (100%)	275.869 (38.70%)	149.502 (20.97%)	283.689 (39.80%)	3.780 (0.53%)

□ 도시지역

(단위 : ㎢)

총 면 적	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역
275.869 (100%)	19.280 (6.99%)	3.240 (1.17%)	6.453 (2.34%)	246.896 (89.50%)

□ 도시기본계획 지표

목표년도	계획인구 (명)	가구수 (호)	가구당 인 구 (명)	주 택 보급률 (%)	토지이용계획(㎢)
					계	시가화 용 지	시 가 화 예정용지	보전용지
2030	520,000	208,000	2.5	107	712.840 (100%)	37.536 (5.27%)	20.127 (2.82%)	655.177 (91.91%)

□ 위원회

(2023. 12. 31. 현재)

구분 위원회명	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여성위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
진주시 도시계획위원회	22	-	22	2	9.1	20	90.9	7	31.8

Ⅱ. 주요업무계획

1. 예산사업

문산지구 도시개발사업

(서부경남 G-city 건설)

서민 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하여 쾌적한 주거환경 제공

우주항공산업 기업유치 및 공공기관 2차 이전에 대비하여 부족한 공공‧
업무시설 용지 확보

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 진주문산 공공주택지구 조성사업

❍ 사업위치 : 문산읍 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2030년

❍ 사 업 비 : 미확정  ※지구계획 수립 시 사업비 확정 계획

❍ 사업내용 : 1,407,912㎡(주거용지, 공공‧업무용지, 도시기반시설 등)

□ 추진상황

❍ 2022.  9.	: 공공주택지구 지정 제안(LH→국토교통부)

❍ 2022. 10.	: 공공주택지구 관련 사전협의(진주시↔국토교통부)

❍ 2023.  6. 15.	: 지구 지정 및 사업인정 의제에 관한 주민열람‧공고

❍ 2023.  6. 21.	: 토지거래허가구역 지정(국토교통부)

❍ 2023.  7.	: 관계기관(부서) 의견 조회

❍ 2023.  8.	: 재해영향성 검토 및 전략환경영향평가 용역 착수(LH)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024. 12. : 공공주택지구 지정

❍ 2025. 12. : 지구계획 승인

❍ 2026.  1. : 보상 및 착공준비

❍ 2026. 12. : 조성공사 착공

❍ 2030. 12. : 조성공사 준공

□ 기대효과

❍ 혁신도시와 연계한 지역의 균형발전 도모

❍ 주거‧공공업무 시설 확충을 통해 젊고 활력이 넘치는 남중부권 중심도시로 도약

서부경남 KTX 조기 개통 추진

침체된 서부경남 경제 활성화와 국가 균형발전을 위한 혁신 동력으로 남중부권 100만 생활권 중심도시로 성장하기 위한 발판 마련

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 남부내륙철도 건설 사업

❍ 사업위치 : 김천~합천~진주~고성~통영~거제

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2030년 [2019 국가균형발전 프로젝트]

❍ 사 업 비 : 6,866,400백만원  ※기정 4,943,800백만원

❍ 사업내용 : 연장 177.9km(단선), 설계속도 250km/h
※서울~진주 간 25회/일 운행, 2시간 25분 소요

□ 추진상황

❍ 2019. 11. ~ 2021. 12.	: 타당성조사 및 기본계획 용역 완료(국토교통부)

❍ 2022.  1. 13.	: 남부내륙철도 건설 기본계획 고시 확정

❍ 2022.  6.  3.	: 노반 기본 및 실시설계용역(기타공사) 낙찰자 선정
- 6공구(합천군 삼가면~진주시 이현동), 7공구(진주시 이현동~고성군 영오면)

❍ 2022.  6. ~ 2024.  6.	: 남부내륙철도 노반 기본 및 실시설계 용역

❍ 2023.  2.	: 진주역사 증축 설계 공모 ⁕선정:㈜서한종합건축사사무소

❍ 2023.  3.	: 진주역사 증축 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2023.  2. ~  3.	: 기본설계(안) 협의(KR↔우리 시)

❍ 2023.  9.	: 사업계획 적정성 재검토 착수(KDI)

❍ 2023. 11. ~ 12.	: 노반 기본 및 실시설계 구조물(교량) 계획(안) 협의

□ 2024년 추진계획

❍ 2024. 상.: 노반 기본 및 실시설계 구조물(터널 등) 계획(안) 협의

❍ 2024.  9.: 사업계획 적정성 재검토 결과 협의

❍ 2025.  3.: 영향평가(교통, 환경, 재해 등) 관련 공람 및 주민설명회

❍ 2025.  6.: 기본 및 실시설계 용역 준공

❍ 2025. 12.: 실시계획 승인 고시, 보상착수 및 공사착공(진주역사 증축 포함)

❍ 2030. 12.: 공사준공

□ 기대효과

❍ 서부 경남 경제 활성화와 국가 균형발전 도모 및 도시 성장 미래 혁신 동력 확보

초전 신도심 개발사업

｢미래 50년 전략사업｣ 관련 경남도에서 지역균형발전을 위한 초전 신도심 개발사업을 시행하여 체계적인 도시 발전을 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 초전동 360-1 일원(경상남도 농업기술원)

❍ 사업기간 : 2014 ~ 2031년

❍ 사 업 량 : A=415,300㎡(1단계 67,853, 2단계 347,447)

❍ 사 업 비 : 526,285백만원(도비 42,300, 민자 483,985)

⁕보상비 336,869, 조성비 84,202, 금융비용 24,877, 기타 80,337

❍ 시행방식 : 도시개발사업(수용‧사용), 시행자(경남개발공사)

□ 추진상황

❍ 2022.  4. : 도시개발구역(1단계) 지정 요청(진주시→경상남도)

❍ 2022. 12. : 도시개발구역(1단계) 지정

❍ 2023. 10. : 개발계획(변경) 수립 및 실시계획인가(1단계)

□ 2024년 추진계획

❍ 2021.  8. ~ 2024. 12. : 초전신도심 전체 개발계획 수립 용역

❍ 2024.  1. ~ 2025. 12. : 1단계사업 착공 및 준공

❍ 2026.  1. ~ 2028. 12. : 2단계사업 구역지정 및 실시계획 수립

❍ 2029.  1. ~ 2031. 12. : 2단계사업 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 낙후된 서부 경남의 균형개발을 위한 중심 거점축 육성

❍ 경남 농업기술원 이전에 따른 유휴부지 활용과 경상남도 서부청사와 연계한 업무‧행정 및 자족기능 확충

국립진주박물관 이전 건립 지원

구. 진주역 철도부지 재생프로젝트와 연계한 문화‧예술의 거점 공간 조성 지원

□ 사업개요

❍ 위    치 : 천전동 구. 진주역 철도부지 일원

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2027년 ⁕국가시행사업(국립중앙박물관)

❍ 사 업 량 : 박물관 연면적 15,185㎡(지하 1, 지상 3)

❍ 사 업 비 : 85,509백만원(건축 65,509-국비, 보상비 20,000-시비)

□ 추진상황

❍ 2019.  6. : 진주시-국립중앙박물관 업무협약 체결

❍ 2020. 12. : 국립진주박물관 이전 기본계획 수립 연구용역 완료

❍ 2022.  6. : 타당성 재조사 최종 승인(기재부→국립중앙박물관)

❍ 2022. 10. : 총사업비 조정 등록 완료(기재부→국립중앙박물관)

❍ 2023.  7. : 국제설계공모 당선작 선정

❍ 2023.  8. : 중앙투자심사 완료(진주시)

❍ 2023. 10. : 기본 및 실시설계 용역 착수(국립진주박물관)

❍ 2023. 12. : 지구단위계획 변경 결정(박물관 부지 확정)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  2. : 보상 협의(진주시) ⁕국가철도공단, 한국철도공사 부지

❍ 2024. 11. : 기본 및 실시설계 완료(국립중앙박물관)

❍ 2025. 상. : 공사 착공(국립중앙박물관)

❍ 2027. 10. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 문화, 학습, 교육, 체험공간 조성으로 원도심 문화예술 기반 마련

진주 여객자동차터미널 개발사업

남부권 중심도시로 성장 발전 토대 마련 및 인구 50만 교통 인프라 구축

현안 문제 해소 방안 마련을 위한 터미널 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 가좌‧호탄동 일원

❍ 사업기간 : 2012 ~ 2025년

❍ 사 업 량 : A=86,728㎡(진주복합터미널, 주상복합용지, 일반상업용지 등)

❍ 사 업 비 : 229,600백만원(민간자본)

□ 추진상황

❍ 2017.  7. : 도시개발구역 지정 신청(진주시→경남도)

❍ 2019. 10. : 경남도 도시계획위원회 심의

❍ 2019. 12. : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시

❍ 2022.  2. : 도시개발구역(변경) 지정, 개발계획(변경) 수립 및 실시계획인가 고시

❍ 2022.  6. : 부지조성사업 착공

❍ 2022. 10. : 복합터미널 건축허가 완료

❍ 2022. 12. : 기초소하천관리위원회 심의회 개최(소하천정비종합계획 변경)

❍ 2023.  1. : 지구 외 사업 실시계획인가(대로 1-2, 1-8호선 확장)

❍ 2023.  3. : 연약지반 개량 압성토 시공 완료

❍ 2023.  9. : 진주시 소하천정비종합계획(부분변경) 완료

❍ 2023. 12. : 이전합의서 체결을 위한 회의(10회) 및 터미널 이전 협의체 구성

□ 2024년 추진계획

❍ 2024. 상.	: 터미널 이전에 따른 중간정류장 및 기존시설물 활용방안 검토 용역 시행

❍ 2025. 12.	: 사업 완료(도시개발 사업)

□ 기대효과

❍ 통합터미널 조성으로 이용객 편의 제공

❍ KTX 개통에 따른 미래교통기반시설 확충으로 지역경제 활성화

소망‧희망광장 조성사업

철도부지 재생프로젝트와 유등테마공원, 남강변을 연결하는 명품 쉼터 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 망경동 76-4(구. 망경지하차도 옆), 망경동 55-3(지식산업센터 옆)

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

❍ 사 업 량 : 소망 A=1,035㎡ 희망 A=1,006㎡ 소망진산 입구쉼터 A=451㎡

❍ 사 업 비 : 6,400백만원(보상비 5,300, 공사비 1,100)

□ 추진상황

❍ 2021.  6.	: 소망‧희망광장 조성사업 실시설계 용역 완료

❍ 2021. 10.	: 도시관리계획(시설) 결정 및 지형도면 고시

❍ 2021. 12.	: 소망‧희망광장 실시계획 인가 고시

❍ 2022. 10.	: 실시계획인가(변경) 고시

❍ 2023.  2.	: 수용재결 공탁금 지급

❍ 2023.  2.	: 지정폐기물(석면) 해체 공사 착공

❍ 2023.  4. ~ 6.	: 공사(토목‧조경‧전기) 착공

❍ 2023. 11.	: 부지 보상 완료(소망진산 입구쉼터)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  3. : 소망‧희망광장 공사 준공

❍ 2024.  6. : 소망진산 입구쉼터 완료(공원관리과)

□ 기대효과

❍ 폐선부지 주변 생활환경 개선을 통해 지역주민을 위한 여가 및 휴식 공간 제공과 주요 사업의 연속성 확보

구. 진주역 문화거리 조성사업

문화‧예술의 거점인 철도부지 재생프로젝트와 강남지구 도시재생 및 다목적 문화센터를 연결하는 문화거리 조성

문화거리를 통해 문화‧예술인들이 다양한 예술활동을 할 수 있는 기반 마련

□ 사업개요

❍ 위    치 : 천전동 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 사 업 량 : 문화거리 L=852m, B=20m, 접속도로 개설, 주차장 등

❍ 사 업 비 : 29,325백만원(보상비 18,000, 공사비 11,000, 각종 용역비 325)

□ 추진상황

❍ 2022.  3. : 지방재정투자사업 심사 완료

❍ 2022.  6. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2022. 12. : 실시계획인가 신청 및 관련기관 협의, 주민공람 공고

❍ 2023.  1. : 실시계획인가 고시

❍ 2023.  4. : 보상계획 공고 및 감정평가

❍ 2023.  5. : 보상 협의(국가철도공단, 한국철도공사)

❍ 2023. 11. : 보상 협의(사유지)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  4. : 도로공사 착공

❍ 2025. 12. : 도로공사 준공

❍ 2026. 12. : 문화거리 부대시설 설치 완료

□ 기대효과

❍ 철도부지 재생프로젝트와 남강변 다목적 문화센터를 연결하는 문화거리 조성을 통해 소통의 문화 기반 조성

시(市) 관문지역 도시조형물 설치 사업

고도 1,300년 역사와 임진왜란 등 충절의 도시에 걸맞은 조형물, 분수 및 주민편의시설 등을 설치하여 환경개선을 통한 도시 이미지 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 가좌동 68-12(진주역 앞)

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2025년

❍ 사 업 량 : 조형물 설치 1식(조형물, 분수, 휴게쉼터, 경관조명 등)

❍ 사 업 비 : 1,580백만원(용역비 80, 공사 1,500)

□ 추진상황

❍ 2022.  9. : 시 관문지역 도시조형물 설치 구상 용역 완료

❍ 2023.  3. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2023.  4. : 1차 설문조사 실시(온라인 및 대면조사)

❍ 2023.  5. : 전문가 의견 수렴(지역 역사문화 원로 및 지도층)

❍ 2023.  6. : 2차 설문조사 실시 및 기본설계

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  5. : 실시설계 완료

❍ 2024. 10. : 공사 착공

❍ 2025.  6. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 핵심 교통요충지에 역사문화 도시 진주만의 고유 조형물 설치로 관광자원 인프라 구축

건 설 하 천 과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 주요업무계획

1. 시책사업

2. 예산사업

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	18	1	5	6	4	2	공무직 2
현 원	18	1	4	7	1	5
증 감			△1	1	△3	3

□ 하천현황

(단위 : ㎞)

구 분	개 소	연 장	축제연장	기개수 연 장	미개수 연 장	개수율 (％)	배수문	비 고
계	240	690.44	829.41	347.72	481.69	52	89
국가하천	3	159.54	136.22	119.78	16.44	87.9	36
지방하천	55	311.80	440.19	142.88	297.31	32.5	53
소 하 천	182	219.10	253.00	85.06	167.94	33.6	-

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2023년	2024년	증 감	비 고
총 계	17,897	76,607	58,710
일반회계	13,410	75,305	61,895
특별회계	4,487	1,302	△3,185

Ⅱ. 주요업무계획

1. 시책사업

경남 항공(진주지구) 국가산업단지 조성사업

대한민국 항공산업 G7 도약을 위한 동북아 항공산업 생산거점 육성 및
경남의 새로운 미래 50년을 주도할 성장동력 산업 기반시설 확충

□ 사업개요

❍ 위    치 : 정촌면 예하‧대축‧화개리 일원

❍ 사업기간 : 2011 ~ 2024년(14년 간)

❍ 사 업 량 : 산업단지 조성 A=834,870㎡

❍ 사 업 비 : 219,800백만원(용지비 136,500, 조성비 83,300)

□ 추진상황

❍ 2017.  5. : 산업단지계획 승인 고시(국토부)

❍ 2017. 11. : 사업시행 협약 체결(LH, 경남도, 진주시)

❍ 2018.  6. : 편입부지 및 지장물 보상협의

❍ 2019.  9. : 공사 착공

❍ 2021.  2. : 서부경남 공공병원 입지 선정

❍ 2022. 11. : 산업시설용지 분양 공고(A4블록, 10필지)

❍ 2023.  1. : 산업단지계획 4차 변경 신청(서부경남 공공병원 용지 변경)

❍ 2023. 10. : 산업시설용지 2차 분양 공고[16필지(A4 10필지, A14 4필지, A15 2필지)]

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  2. : 산업단지계획(4차) 변경 승인(서부경남 공공병원 용지 변경)

❍ 2024.  3. : 산업단지계획(5차) 변경 신청(우주환경시험시설 허용용도 변경)

❍ 2024. 10. : 사업 준공

□ 기대효과

❍ 항공산업 생산거점 육성으로 일자리 창출 등 지역경제 활성화

2. 예산사업

경남항공 국가산단 완충저류지 설치사업

경남항공 국가산업단지 내 사고‧화재 등으로 인한 사고 유출수 및 초기 우수 유출수를 적정 처리하여 산업단지 환경개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 정촌면 예하리 825 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2025년(4년 간)

❍ 사 업 량 : 완충저류지 설치 Q=2,831㎥/일

❍ 사 업 비 : 9,155백만원(국비 6,408, 도비 824, 시비 1,923)

□ 추진상황

❍ 2021.  3. : 완충저류시설 설치사업 국비지원 건의

❍ 2021.  5. : 완충저류시설 설치‧운영계획 협의(낙동강유역환경청)

❍ 2022.  1. : 완충저류시설 설치‧운영계획 승인(낙동강유역환경청)

❍ 2023.  2. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2023.  6. : 기본계획 협의 완료(낙동강유역청)

❍ 2023.  7. : 소규모지하안전영향평가 용역 착수

❍ 2023. 10. : 기본설계 협의 완료(환경부)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1. : 소규모지하안전영향평가 용역 완료

❍ 2024.  2. : 설계 경제성 검토(VE) 용역 완료

❍ 2024.  3. : 경상남도 건설기술심의

❍ 2024.  4. : 환경부 실시설계 협의(재원협의)

❍ 2024.  5. : 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2024.  7. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 산업단지 내 사고 발생에 따른 유출수를 적정처리하여 토양 및 수질
오염을 예방

제2바이오 지역특화 농공단지 조성사업

성장 유망기업의 지역 유치를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출과
미래 지역주력사업을 위한 바이오산업 인프라 구축 및 집적화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 문산읍 삼곡리 915 일원

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2027년(7년 간)

❍ 사 업 량 : 농공단지 조성 A=37,582㎡

❍ 사 업 비 : 14,800백만원

□ 추진상황

❍ 2021.  3. ~ 2022. 3.	: 기본계획 수립 용역

❍ 2021. 12. ~ 2022. 8.	: 타당성조사 용역

❍ 2022.  8.	: 중앙 지방재정 투자심사(1차)

❍ 2022. 11. ~ 2023. 4.	: 산업단지 입주수요 조사 및 경제성검토 용역

❍ 2023.  6.	: 중앙 지방재정 투자심사(2차)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  6. : 지방재정투자심사(진주시)

❍ 2024.  9. : 농공단지계획(개발계획 및 실시계획) 수립 용역 착수

❍ 2024. 10. : 도비 확보를 위한 지방재정투자심사(경상남도)

❍ 2025. 10. : 농공단지계획(개발계획 및 실시계획) 승인 고시(경상남도)

❍ 2025. 11. ~ 2027. 10. : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 바이오산업단지 부지 조성을 통한 성장기업 유치 및 지역경제 활성화

진성 중촌 자연재해위험개선지구 정비사업

진성면 중촌천 하류 지역의 미정비된 제방으로 인해 가옥 및 농경지가
상습 침수되어 정비사업을 시행하여 지역주민의 생명과 재산을 보호

□ 사업개요

❍ 위    치:진성면 동산리 911-11 일원

❍ 사업기간:2019 ~ 2026년(8년 간)

❍ 사 업 량:하천정비 L=1km, 교량 2개소, 가동보 1개소, 배수펌프장 및 유수지 설치 1식

❍ 사 업 비:18,250백만원(국비 9,125, 도비 9,125)  ※경남도 재배정 사업

□ 추진상황

❍ 2017.  4. : 진주시 풍수해저감종합계획수립(중촌지구 하천재해위험지구 지정)

❍ 2020.  3. : 자연재해위험개선지구 지정 및 지형도면고시(중촌지구)

❍ 2022.  6. : 중촌천 하천기본계획(변경)(기본계획 및 하천구역 고시) [경상남도]

❍ 2023.  1. : 행정안전부 사전설계검토 조치계획서 협의[98억→182.5억]

❍ 2023.  4. : 경상남도 지방건설기술 심의

❍ 2023.  8. : 일상감사 및 조달청 원가검토 및 계약의뢰

❍ 2023. 12. : 낙찰자 선정

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1. : 공사 착공

❍ 2026.  8. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 상습 침수구역 정비로 재해를 사전에 예방하고 지역주민의 생명과 재산을 보호

소하천정비 종합계획 재수립

｢소하천 정비법｣제6조에 따른 관내 소하천정비 계획 재수립(10년) 시기 도래와
각종 개발사업에 따른 지형과 기후변화 대응을 위한｢소하천정비 종합 계획(변경)｣을
수립하여 재해예방

□ 사업개요

❍ 위    치 : 소하천 182개소 중 21개소 L=25km

❍ 용역기간 : 2024 ~ 2025년(2년 간)

❍ 과 업 량 : 소하천정비 종합계획 재수립 1식

❍ 용 역 비 : 1,500백만원

□ 소하천정비 종합계획 수립 현황

❍ 2016.  6. : 소하천정비 종합계획(1차) 고시 [21개소/L=25km]

❍ 2018.  4. : 소하천정비 종합계획(2차) 고시 [36개소/L=64km]

소하천정비 종합계획(3차) 고시 [43개소/L=55km]

❍ 2022.  6. : 소하천정비 종합계획(4차) 고시 [82개소/L=75km]

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  3. : 사업수행능력평가(PQ) 계획 수립 및 공고

❍ 2024.  5. : 용역 입찰 및 착수

❍ 2025. 12. : 용역 완료

□ 기대효과

❍ 각종 개발사업으로 인해 변화된 토지 이용계획을 반영한 종합계획을
재수립하여 지역주민의 생명과 재산을 보호

남강(진주성~동방호텔) 하천시설 정비사업

남강(진주성~동방호텔) 구간에 하천시설 정비를 통한 남강의 조망권 확보 및
수변공간의 확충으로 침체된 원도심 경제 활성화와 남강의 공간적 재배치를
통해 시민들의 편의와 문화공간 제공

□ 사업개요

❍ 위    치 : 장대동 일원

❍ 사업기간 : 2024 ~ 2026년(3년 간)

❍ 사 업 량 : 하천시설 정비 L=700m, 친수공간 조성, 도로 확‧포장

❍ 사 업 비 : 7,000백만원

□ 추진상황

❍ 2021.  2. : 남강(진주성~동방호텔) 하천시설 정비사업 실시설계 용역 착수

❍ 2021.  6. : 하천관리청 협의(1차~4차)

❍ 2023. 11. : 남강(진주성~동방호텔) 하천시설 정비사업 실시설계 용역 준공

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  2. : 남강 하천기본계획(변경) 반영 요청 [진주시→낙동강유역환경청]

❍ 2024.  6. : 남강 하천기본계획(변경) 고시 [낙동강유역환경청]

❍ 2024.  9. : 기본 및 실시설계 완료

❍ 2024. 12. : 비관리청공사(낙동강유역환경청) 허가 완료

❍ 2025.  5. : 사업착공→사업비(2025년 예산 확보)

❍ 2026. 12. : 사업 준공

□ 기대효과

❍ 하천시설 정비를 통해 조망권 확보하고 남강의 공간적 재배치 및 다양한 복합문화공간 조성을 통해 시민들에게 다양한 문화공간 제공

하천 정비 및 유지관리 사업

하천의 효율적인 이용과 체계적 정비를 통하여 재해예방 및 환경보전

수해 방지를 통한 시민 안전 확보와 시민들의 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 관내 하천

❍ 사 업 비 : 3,973백만원

❍ 사업내용

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사업 기간	사 업 비				비고
			소 계	국 비	도 비	시 비
계			3,973	639	272	3,062
국가하천 유지보수	남강 배수문, 제방보수 1식 친수시설관리 (와룡, 송백) 1식	매년	639	639	-	-
지방하천 유지관리	문산천 외 54개소	매년	200	-	100	100
노후 배수문 정비	하천배수문 89개소	매년	36	-	18	18
지방하천 준설사업	문산천 외 54개소	매년	300	-	150	150
하천표지판 정비	문산천 외 54개소	매년	8	-	4	4
하천둔치 관리	와룡, 송백지구, 남강습지원 등	매년	895	-	-	895
하천제방 유지관리	하천제방 풀베기, 지장목 제거 등	매년	470	-	-	470
소하천(세천) 정비 및 유지관리	소하천, 세천, 구거 등 정비	매년	1,425	-	-	1,425

도   로   과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 주요업무계획

1. 예산사업

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	6	8	4	4
현 원	23	1	7	4	10	1
증 감			1	△4	6	△3

※공무직 12, 임기제공무원 10

□ 도로 현황

(단위 : 노선, km)

계	고속국도	국 도	국가지원 지방도	지방도	시 도	농어촌 도 로	도시계획 도 로	비고
2,347 (2,261)	2 (55)	3 (120)	1 (11)	10 (195)	28 (228)	314 (688)	1,989 (964)

⁕도시계획도로는 ｢도로법｣ 상 준용도로로서 도로과 관리 대상 도로임

⁕도시계획도로 현황 : 시도, 지방도 중복 노선 및 도시계획도로 미집행 노선 포함

□ 시특법 대상 도로시설물현황

(단위 : 개)

계	1종			2종				3종						비고
	계	교량	복개도로	계	교량	옹벽	절토사면	계	교량	지하차도	육교	터널	절토사면
203	9	8	1	23	14	7	2	171	157	1	9	2	2

□ 예산규모

(단위 : 억원)

구 분	2024년	2023년	증 감	비 고
일반회계	17,213	42,590	△25,377

Ⅱ. 주요업무계획

1. 예산사업

말티고개~장재 도로 확‧포장

초장지구 도심개발로 인한 통행량 증가에 따라 교통체증이 유발되어 도시계획도로(대로3-11호선) 확‧포장으로 교통난 해소는 물론 지역균형 발전 도모 및 지역 주민숙원 해소

□ 사업개요

❍ 위    치 : 초장동 일원

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2024년

❍ 사 업 량 : 도로 확‧포장 L=1.65㎞, B=12m→25m(4차선)

❍ 사 업 비 : 25,300백만원(시비)

⁕공사비 15,500, 설계비 100, 부대비 100, 보상비 9,600

□ 추진상황

❍ 2018.  8.~12.	: 지방재정투자심사 및 중기지방재정계획 반영

❍ 2019.  3.	: 설계의 경제성 등 검토(VE), 교통시설 안전진단 용역 완료

❍ 2019.  6. 17.	: 보상 협의

❍ 2019.  7.	: 경상남도 지방건설기술심의

❍ 2020.  3.	: 공사 착공

❍ 2021. 12.	: 말티고개 삼거리~하촌교차로 구간 부분 개통

❍ 2022.  1.	: 토지 미보상분 수용재결 신청(지방토지수용위원회)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  2. : 공사 준공

남강변 다목적 문화센터 주변 도시계획도로 개설

남강변 다목적 문화센터 건립, 진주지식산업센터의 건립, 구. 진주역 지구 단위계획구역 개발, 강남지구 도시재생 뉴딜사업 등에 따른 교통량 증가 대비 및 개발사업 이용활성화를 위한 도시계획도로를 개설하여 노후된
도심생활환경 개선과 지역균형발전 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 망경동 일원

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2026년

❍ 사 업 량 : 도로 개설 L=445m, B=8~20m

❍ 사 업 비 : 17,000백만원(시비)
⁕공사비 1,500, 설계비 100, 부대비 100, 보상비 15,300

□ 추진상황

❍ 2021.  4. : 지방재정 투자심사(자체)

❍ 2021.  5. : 보상업무 위수탁 협약 체결(한국부동산원)

❍ 2021.  7. : 도시계획시설 결정

❍ 2021.  9. : 보상계획 공고(1차)

❍ 2021. 12. : 도시계획시설 실시계획인가

❍ 2023.  5. : 공사 착공(중로1-154호)

❍ 2023.  6. : 토지수용 공탁 완료(중로1-154호)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  5. : 공사 준공(중로1-154호)

❍ 2025.  3. : 공사 착공(중로2-163호, 소로남강2-49호)

❍ 2026.  2. : 공사 준공(중로2-163호, 소로남강2-49호)

하촌교차로~하촌마을 간 도로 확‧포장

하촌교차로~하촌마을 간 도로를 확장하여 말티고개~장재도로 확장 및 하촌 회전교차로 설치로 인해 증가하는 교통량을 집현면 사촌 방향으로 분산하고 보도가 없어 생활불편을 겪고 있는 하촌마을 간 보행환경 개선 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 초장동(하촌동) 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 사 업 량 : 도로 개설 L=1.05㎞, B=8m→20m(4차선)

❍ 사 업 비 : 11,800백만원(시비)

⁕공사비 8,000, 설계비 100, 부대비 100, 보상비 3,600

□ 추진상황

❍ 2021. 11. : 지방재정 투자심사

❍ 2021. 12. : 중기 지방재정계획 반영

❍ 2022.  2. : 실시설계 용역 착수

❍ 2022.  9. : 문화재 지표조사, 소규모 환경영향평가 용역 완료

❍ 2023.  3. : 실시설계 용역 완료

❍ 2023.  4. : 도시관리계획 결정(경미한 변경) 및 실시계획인가 고시

❍ 2023.  6. : 보상 협의

❍ 2023.  7. : 공사 착공

□ 2024년 추진계획

❍ 2026. 12. : 공사 준공

신진주역세권~국도2호선 간 연결도로 개설

신진주역세권과 국도2호선 간 연결도로 개설로 교통량 분산 및 역세권 이용객의
편의 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 가호동, 정촌면 화개리 일원

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2027년

❍ 사 업 량 : 도로 개설 L=1.8㎞, B=9.5m

❍ 사 업 비 : 45,000백만원(시비)

⁕공사비 33,200, 설계‧감리비 5,200, 부대비 600, 보상비 6,000

□ 추진상황

❍ 2018.  5. : 기본계획 용역 완료

❍ 2018. 10. : 도시계획시설(도로) 결정(중로 1-155)

❍ 2019.  4. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2020. 12. : 철도 입체교차시설 심의(국가철도공단)

❍ 2023.  7. : 도로구역 결정 고시

❍ 2023. 11. : 공사 착공

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1. : 보상계획 열람공고

❍ 2024.  5. : 보상 협의(1차분)

❍ 2027. 12. : 공사 준공

제2금산교 건설

하대동과 금산면을 연결하는 제2금산교를 통하여 동부지역의 균형있는
지역발전을 위한 교통체계를 구축하여 도시교통난을 해소

□ 사업개요

❍ 위    치 : 하대동, 금산면 송백리 일원

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2027년

❍ 사 업 량 : 교량 신설 L=570m, B=20m

❍ 사 업 비 : 118,165백만원(시비)

⁕공사비 97,220, 설계□감리비 4,620, 부대비 16,247, 보상비 78

□ 추진상황

❍ 2021. 11. : 진주시 도시관리계획 타당성 검토 및 기본구상 용역 착수

❍ 2022. 12. : 진주시 도시관리계획 타당성 검토 및 기본구상 용역 완료

❍ 2023.  2. : 기본계획 수립 용역 착수

❍ 2023.  7. : 타당성조사 신청(진주시→경상남도→행정안전부)

❍ 2023.  9. : 타당성조사 약정체결(LIMAC)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  5. : 타당성조사 완료 및 투자심사(자체)

❍ 2024.  6. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2025.  6. : 공사착공

❍ 2027. 12. : 공사준공

선학산 터널 조성

옥봉동과 하대동을 연결하는 선학산 터널을 통하여 동부지역의 균형있는 지역 발전을 위한 교통체계를 구축하여 도시교통난 해소

□ 사업개요

❍ 위    치 : 옥봉동, 초장동 일원

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2028년

❍ 사 업 량 : 도로 개설 L=1.82km(터널 2개소 L=810m)

❍ 사 업 비 : 105,000백만원(시비)

⁕공사비 86,000, 설계비 3,400, 부대비 11,800, 보상비 3,800

□ 추진상황

❍ 2021. 11. : 진주시 도시관리계획 타당성 조사 및 기본구상 용역 착수

❍ 2022. 12. : 진주시 도시관리계획 타당성 조사 및 기본구상 용역 완료

❍ 2023.  3. : 기본계획 수립 용역 착수(~2024. 1.)

❍ 2023. 12. : 기본계획 수립 용역 일시 중지

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  7. : 타당성조사 신청(진주시→경상남도→행정안전부)

❍ 2025.  4. ~ 2025.  5. : 투자심사(자체)

❍ 2025.  9. ~ 2026.  8. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2027.  1. : 공사 착공

❍ 2028. 12. : 공사 준공

혁신도시~제2금산교 도로 확‧포장

금산지역 도시팽창 및 혁신도시 완성에 따라 교통량은 증가하였으나, 연결
도로망이 협소하고 굴곡이 심하여 이를 해소코자 확‧포장 사업을 시행하여
도심 내 교통난 해소

□ 사업개요

❍ 위    치 : 충무공동~금산면 송백리 일원

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2027년

❍ 사 업 량 : 도로 확‧포장 L=2.4km, B=25m(교량 2개소)

❍ 사 업 비 : 58,460백만원(시비)

⁕공사비 37,600, 설계비 216 부대비 3,284, 보상비 14,860, 예비비 2,500

□ 추진상황

❍ 2019.  1. : 자체 타당성조사 용역(~2020. 5.)

❍ 2019.  9. : 타당성조사 의뢰(LIMAC)

❍ 2020.  5. : 타당성조사 결과(사업 필요성 인정:B/C 0.63)

❍ 2022.  9. : 중기지방재정계획 반영

❍ 2022. 11. : 지방재정투자심사(자체)

❍ 2023.  2. : 실시설계 보완 용역 착수

❍ 2023. 12. : 소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 용역 착수

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  5. : 도로구역 결정 및 고시

❍ 2024.  6. : 보상업무 착수

❍ 2025.  6. : 공사 착공

❍ 2027. 12. : 공사 준공

장재동 도시계획도로(대로3-11호) 개설공사

말티고개~장재도로 확장 공사로 증가하는 교통량을 분산하여 교통체증을 해소하고 안전사고 예방 및 보행환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 장재동 일원

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2024년

❍ 사 업 량 : 도로 확‧포장 L=675m, B=12→25m(4차선)

❍ 사 업 비 : 8,000백만원(시비)

⁕공사비 3,300, 설계비 100, 보상비 4,600

□ 추진상황

❍ 2022.  2. : 실시설계 용역 착수 및 보상협의

❍ 2022. 10. : 주민설명회 개최

❍ 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영

❍ 2023.  2. : 실시설계 용역 완료

❍ 2023.  7. : 도시계획시설 실시계획인가

❍ 2023.  7. : 공사 착공

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  7. : 공사 준공

도시계획도로 개설

도시계획도로 개설로 시가지 주거환경 개선

차량 및 주민 통행 불편 해소로 주민생활 편익 증진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시 관내

❍ 사 업 량

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사업비	기투자	2024	2025이후	비고
계	17개소	66,800	20,710	21,500	24,590
대로1-4호선 도시계획도로 개설	L=484m B=35m	10,000	6,660	-	3,340
구. 진주역 도시계획도로 (대로3-64, 중로2-165) 개설	L=250m B=15m	7,600	150	-	7,450
대로3-11호선 도시계획도로 개설	L=700m B=20m	8,000	4,300	3,700	-
판문 중로2-7호선 도시계획도로 개설	L=600m B=15m	8,800	4,200	4,600	-
중로1-56호선 (여중오거리~숯골교차로) 도시계획도로 개설	L=440m B=20m	11,000	-	200	10,800
소로가호2-2호선 도시계획도로 개설	L=280m B=8m	4,000	-	4,000	-
소로남강3-4호선 도시계획도로 개설	L=102m B=8m	2,050	1,350	700	-
소로남강2-9호선 도시계획도로 개설	L=135.5m B=8m	2,000	-	1,200	800
소로남강2-19호선 도시계획도로 개설	L=48m B=8m	1,200	-	1,200	-
소로남강3-21호선 도시계획도로 개설	L=250m B=6m	1,700	-	1,400	300
소로상평3-16호선 도시계획도로 개설	L=187m B=6m	1,600	-	1,200	400
소로상평3-9호선 도시계획도로 개설	L=145m B=6m	3,050	1,700	1,350	-
소로평거2-85호선 도시계획도로 개설	L=58m B=8m	1,800	1,000	800	-
소로상평2-29호선 도시계획도로 개설	L=63.6m B=8m	1,700	200	-	1,500
소로금산3-4호선 도시계획도로 개설	L=262m B=6~8m	2,000	1,000	1,000	-
소로집현2-1호선 도시계획도로 개설	L=64m B=8m	200	150	50	-
소로지수2-16호선 도시계획도로 개설	L=95m B=8m	100	-	100	-

□ 2024년 추진계획

❍ 연차별, 단계별 사업추진

❍ 편입부지 보상 및 공사 추진

장기미집행 도시계획시설(도로) 단계별 시행 추진

2020. 7. 1. ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제48조에 따른 장기미집행 도시계획시설 결정의 실효에 따른 존치시설(도로)의 단계별 시행계획 수립

□ 주요내용

❍ (관련근거) 장기미집행 도시계획시설 실효 일몰제
- ｢국토계획법｣제48조(도시‧군계획시설의 실효 등) 제1항

❍ 시설결정 실효 시기(실효 기산일)
- 2000년 7월 1일 이전 결정 고시 : 2020년 7월 1일
※2000년 7월 2일 이후 결정 고시 : 고시일로부터 20년 되는 다음날
▷｢국토계획법｣법률안 일부개정 : 2019. 8. 20.[2020. 1. 1. 시행]
→장기미집행시설은 실시계획 고시일로부터 5년 이후 실효
→시행자가 토지면적의 2/3 이상을 확보한 경우 7년 이후 실효
→시행자가 모든 토지 및 물건을 확보한 경우 효력유지

□ 추진현황 및 추진계획

❍ 2019.  3.	: 장기미집행 도시계획시설 정비 및 관리방안 수립 용역(도시계획과)

❍ 2019.  4.~ 9.	: 미집행 도시계획시설 전수 조사 및 존치여부 결정

❍ 2019. 10.	: 존치결정 시설 실시계획 인가 용역 발주

❍ 2020.  3.~ 6.	: 존치결정 장기미집행시설 실시계획 인가 신청

❍ 2020.  6.	: 장기미집행 실효고시 및 존치결정시설 실시계획인가고시 완료

❍ 2020.  7.~ 2025.  6.	: 보상협의 통지 및 사업시행

□ 장기미집행 도시계획도로 현황

(단위 : 억원)

합 계		기완료		추진중		미집행		비 고
개 소	사업비	개 소	사업비	개 소	사업비	개 소	사업비
58	1,842	30	314	20	1,308	8	220

□ 미집행시설 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2023년	2024년		2025년 이 후
				본예산	추 경
시 비	50,000	28,000	6,000	500	12,500	3,000

□ 추진방안

❍ 장기미집행시설 28개소에 대해서는 인가일(2020.6.30.)로부터 5년간 실효가 유예됨에 따라 2025.6월까지 소유권 확보 필요

❍ 총사업비 500억 원 중 2024년 예산 130억 원 확보 후 2025년까지 연차적으로 사업비를 확보하여 장기미집행시설 해제 대비

읍‧면지역 도로망 확충

❍ 시도, 농어촌도로 확‧포장 사업으로 지역주민들의 교통 불편 해소

❍ 차량 및 주민 통행 불편해소로 주민생활 편익 증진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시 관내

❍ 사업기간 : 2024년

❍ 사 업 량

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
계		2,115
금산 석교마을 안길정비공사	L= 26m B= 5m	80
장재동 대승선원주변 안길정비공사	L=100m B=5.5m	160
농어촌도로 유지관리		200
주민불편해소사업(재배정)	16개소	595
주민참여예산사업(재배정)	2개소	50
소규모시설 긴급 유지관리		1,000
새마을시설물 유지관리		30

□ 2024년 추진계획

❍ 2024. 1.	: 실시설계 용역

❍ 2024. 3. ~ 12.	: 착공 및 준공

도로유지관리사업

관내 도로의 보수 및 시설개선을 위한 유지관리 사업을 시행하여 시민에

쾌적하고 안전한 도로환경 제공

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시 관내

❍ 사업기간 : 2024년

❍ 사 업 비 : 6,990백만원

❍ 사 업 량

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요		비 고
	사 업 량	사 업 비
3개 사업		6,990
도로보수 및 유지 관리	∘위치:관내 일원(연중) ∘내용:도로 배수 개선, 인도정비, 긴급 보수, 풀베기, 표지판 외	3,770
도로덧씌우기 사업	∘위치:이현동 이현웰가~유곡한보아파트 외 17개소 ∘내용:덧씌우기 18개소	2,970
위험도로개선 (교통 사고 잦은 곳 개선)	∘위치:인사동 골동품거리 교차로 개선 ∘내용:교차로 개선 1개소	250

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1.~  2. : 실시설계

❍ 2024.  3.~ 12. : 착공 및 준공

어린이‧노인 보호구역 개선사업

어린이‧노인 보호구역 내 안전시설물을 설치‧정비하여 사고 없는 안전한 보행환경을 조성코자 함

□ 사업개요

❍ 위    치	: 어린이‧노인 보호구역 77개소

❍ 사 업 량	: 도로 재포장, 차선 등 노면표시 정비, 보행자 방호펜스 정비 등

❍ 총사업비	: 1,220백만원(시비 910, 도비 310)

❍ 사업기간	: 연중

□ 추진상황

❍ 2023. 9. ~ 12. : 사업대상지 건의사항 접수(학교, 경찰서, 읍‧면‧동)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1. ~ 2. : 대상지 검토‧선정

❍ 2024.  3. ~ 4. : 실시설계

❍ 2024.  5.      : 착공

❍ 2024. 12.      : 준공

□ 기대효과

❍ 어린이‧노인 보호구역 내 시설정비를 통해 어린이 및 노인 등 교통약자들이
안전하게 통행할 수 있는 환경을 조성하여 교통사고 예방

도로안전시설물 유지관리

위험도로 및 사고예상 구간에 도로안전시설물을 설치‧정비하여 안전한 도로
통행환경 조성

□ 사업개요

❍ 위    치	: 시 관내

❍ 사 업 량	: 가드레일, 차선분리대, 미끄럼방지시설, 낙석방지시설, 반사경,	도로난간, 과속방지턱 등 정비‧설치

❍ 총사업비	: 1,500백만원

❍ 사업기간	: 연중

□ 추진상황

❍ 2023.  9. : 읍‧면‧동 2024년 당초예산 사업대상지 건의

❍ 2023. 12. : 2024년 당초예산 사업대상지 현장조사 및 사업결정

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1. ~ 2.	: 읍‧면‧동 합동설계 및 사업비 재배정

❍ 2024.  3.	: 유지관리 상시사업 착공

❍ 2024. 12.	: 준공

□ 기대효과

❍ 도로안전시설물 설치 및 유지보수를 통해 안전한 도로 통행환경 조성

도로시설물(교량, 옹벽 등) 유지관리

｢시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법｣에 따른 시설물을 점검‧진단하고 필요 시 보수‧보강하여 안전한 시설 유지관리

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시 관내

❍ 사업대상

(단위 : 개)

계	1종			2종				3종						비고
	계	교량	복개도로	계	교량	옹벽	절토사면	계	교량	지하차도	육교	터널	절토사면
203	9	8	1	23	14	7	2	171	157	1	9	2	2

❍ 총사업비 : 1,900백만원

❍ 사업기간 : 연중

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1. : 안전점검 도래 1, 2종 시설물 점검용역 발주

❍ 2024.  4. : 안전점검 도래 1, 2종 시설물 점검용역 완료

❍ 2024.  5. : 우수기 대비 정기안전점검 실시

❍ 2024. 10. : 안전점검에 따른 시설물 보수보강공사 시행

❍ 2024. 11. : 동절기 대비 정기안전점검 실시

❍ 2024. 12. : 보수‧보강공사 준공

□ 기대효과

❍ ｢시설물안전법｣대상 시설물을 점검하고 보수‧보강하여 안전한 도로 통행 환경 조성

은하수초등학교 앞 보도 육교 개설

신진주 역세권 내 은하수초등학교 앞 보도 육교 개설로 어린이들의 안전한
통학로 확보

□ 사업개요

❍ 위    치 : 가좌동 1959 일원

❍ 사 업 량 : 육교 설치 L=30m, B=3m, H=5m

❍ 총사업비 : 2,000백만원(특교세 1,000 시비 1,000)

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

□ 추진사항

❍ 2022.  5.	: 아파트 입주자(시티프라디움 2차) 건의

❍ 2022.  9. ~ 11.	: 타당성조사 용역(B/C:0.9264)

❍ 2023.  2.	: 아파트 입주자(시티프라디움 2차) 건의(2차)

❍ 2023.  4.  7.	: 주민설명회

❍ 2023.  9.	: 예산편성(특교세, 2회 추경)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1. ~ 4.	: 실시설계용역

❍ 2024.  5. ~ 7.	: 부족예산 추경 확보(시비 1,000백만원)

❍ 2024.  9.	: 착공

❍ 2024. 12.	: 준공

□ 기대효과

❍ 어린이 등 도로이용자들의 안전한 보행 환경조성으로 교통사고 예방

수곡 효자교 재가설

정밀안전진단 결과(E등급)에 따른 교량 재가설로 통행안전 확보 및 안전사고
예방

□ 사업개요

❍ 위    치 : 수곡면 원내리 830 일원

❍ 사 업 량 : 교량 재가설 L=46m, B=9m

❍ 총사업비 : 2,500백만원(특교세 1,000, 시비 1,500)

❍ 사업기간 : 2023. 10. ~ 2025. 12.

□ 추진사항

❍ 2023.  9. : 예산편성(특교세, 2회 추경)

❍ 2023. 10. : 실시설계용역 착수

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  3.	: 실시설계용역 완료

❍ 2024.  5. ~ 7.	: 부족예산 추경 확보(시비 1,500백만원)

❍ 2024.  9.	: 착공

❍ 2025. 12.	: 준공

□ 기대효과

❍ 마을주민 등 도로이용자의 교통불편 해소 및 재해 예방

뒤벼리 급경사지 정비

뒤벼리 급경사지 정비를 통한 낙석위험 제거로 대형사고 예방 및 안전한 도로환경 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 상대동 883~옥봉동 산20-1 일원

❍ 사 업 량 : 낙석 위험구간 정비 L=620m, H=15~35m

❍ 총사업비 : 1,000백만원(특교세)

❍ 사업기간 : 2023. 12. ~ 2024. 9.

□ 추진사항

❍ 2023. 12. : 예산편성(특교세, 간주예산)

정밀안전점검용역 착수

□ 2024년 추진계획

❍ 2024. 1.	: 정밀안전점검용역 완료

❍ 2024. 2. ~ 3.	: 실시설계용역

❍ 2024. 5.	: 착공

❍ 2024. 9.	: 준공

□ 기대효과

❍ 급경사지 정비를 통한 안전한 통행환경 조성 및 도시미관 개선

시 민 안 전 과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 주요업무계획

1. 시책사업

2. 예산사업

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	29	1	6	10	8	4	공무직 10 임기제 3
현 원	27	1	9	6	8	3
증 감	△2		3	△4		△1

□ 민방위대 현황

(단위 : 대, 명)

총 계		통‧리대		직장대		지원대
대수	대원수	대수	대원수	대수	대원수	대수	대원수
853	19,428	817	17,714	35	1,663	1	51

□ 민방위 시설‧장비 현황

시 설 현 황		장 비 현 황
비상급수시설	비상대피시설	민방위장비	화생방장비	방독면장비
54개소/9,571톤	145개소/1,151㎢	6종/2,209개	5종/ 528개	1종/17,610개

□ 민방위 교육장 현황

위 치	규 모	준 공	조 성 비
상봉대룡길 42	건 물:720㎡ 주 차 장:1,020㎡ 수용인원:350명	2010. 6. 28.	사업비:959백만원 -국비 150 -도비 105 -시비 704

□ 배수장 및 우수저류시설 관리 현황

구분	시 설 명	위 치		규 모				시설물관리자
		읍면	동리
	합 계			배수장 10개소 우수저류시설 1개소
1	삼곡배수장	문산	삼곡	-전동기 -원동기 -펌 프	350마력 320마력 1,200mm	× × ×	2대 3대 5대	김양호
2	가방배수장	금산	가방	-전동기 -펌 프	75마력 500mm	× ×	3대 3대	이재오
3	월평배수장	집현	장흥	-원동기 -펌 프	320마력 150마력 850mm 1,200mm	× × × ×	1대 1대 1대 1대	김상도
4	향양배수장	집현	덕오	-전동기 -펌 프	175마력 700mm	× ×	3대 3대	이창수
5	삭평배수장	명석	관지	-원동기 -펌 프	400마력 450마력 1,200mm 900mm	× × × ×	2대 2대 2대 2대	김남헌
6	덕천강배수장	수곡	원내	-전동기 -펌 프	100마력 60마력 800mm 600mm	× × × ×	2대 1대 2대 1대	정우재
7	나불천배수장	진주시	성북 (인사)	-전동기 -펌 프	500마력 1,200mm	× ×	7대 7대	전재만
8	장대배수장	진주시	중앙 (옥봉)	-전동기 -원동기 -펌 프	60마력 320마력 500mm 1,200mm	× × × ×	1대 2대 1대 2대	정효윤
9	상대배수장	진주시	상평	-전동기 -펌 프	330마력 1,200mm	× ×	3대 3대	박창민
10	상평배수장	진주시	초장	-전동기 -원동기 -펌 프	300마력 320마력 1,200mm	× × ×	3대 4대 7대	구상훈
11	상평우수 저류시설	진주시	상평	-전동기 -펌 프	250마력 120마력 800mm 500mm	× × × ×	1대 1대 1대 1대	정효윤

□ 재난안전실 장비 현황

품 명	단 위	수 량	비 고
기상관측장비	식	1	강우량 9개소, AWS 15개소, 수위계 7개소, 적설계 2개소
강우상황 표출기	식	2	기상관측 현황 및 남강댐 방류현황 표출
모사전송기(FAX)	대	1	자연재난팀 내 전용 전송기(749-2834)
전화기	대	39	행정전화 14대, 위성전화 6대, 재난안전통신망단말기 19대
상황용 PC	대	15	컴퓨터 15대
배수장 가동 모니터링	대	9	나불천, 상평, 삼곡, 가방, 상대, 덕천강, 장대, 향양배수펌프장 및 상평우수저류시설
영상회의 시스템	식	1	대형LED모니터, 월 컨트롤러 1식, 음향장비 1식, 영상회의시스템 1식
CCTV	대	72	재난상황모니터링
지진가속도계측기	식	1	시청사

Ⅱ. 주요업무계획

1. 시책사업

재난대응 안전한국훈련 실시

재난관리책임기관의 재난 대응체계 확립과 재난 대비 대응능력을 점검하고 시민의 안전 문화 확산을 위한 훈련 실시

□ 훈련개요

❍ 근    거 : ｢재난 및 안전관리기본법｣ 제35조(재난대비훈련 실시)

❍ 기    간 : 2024년 하반기

❍ 참여기관 : 진주시, 진주소방서, 진주경찰서, 유관기관, 민간단체

❍ 훈련목적

- 현장조치 행동 매뉴얼 기반 종합훈련을 통한 현장 대응능력 강화

- 다양한 상황 속에 발생하는 다중 재난 대응능력 향상

□ 2024년 추진계획

❍ 중점훈련

- 훈련유형 : 지진, 다중밀집시설 대형 화재, 유해화학물질 유출 사고

- 토론훈련 : 상황 판단 회의 및 재난안전대책본부 운영

- 현장훈련 : 실제 재난 유사 상황 설계 및 현장 대응 훈련

❍ 기타훈련 : 안전취약계층 이용시설, 다중이용시설 화재 대피 훈련 및
국민행동요령 교육 등

❍ 훈련일정

계획 수립	⇨	역량교육‧컨설팅	⇨	훈련 실시	⇨	평가 및 환류
주관 : 행정안전부 ▶기본계획 수립 ▶시행계획 수립		주관 : 행정안전부 ▶훈련담당자, 민간 전문가 역량교육 ▶기관별 민간 전문가 컨설팅 지원		주관 : 훈련 주관기관 ▶‵24년 안전한국훈련 토론, 현장훈련		주관 : 행정안전부 ▶안전한국훈련 평가 ▶인센티브 ⁕포상
컨설팅‧평가		▶훈련 全 과정에 대하여 매뉴얼을 바탕으로 민간 전문가가 컨설팅 및 평가‧환류

□ 기대효과

❍ 재난대비 훈련을 통한 시민들의 재난대응 역량 강화

제3종 시설물 지정을 위한 실태조사

재난 발생 위험이 높거나 지속적인 관리가 필요한 시설물을 제3종 시설물로 신규 지정‧고시하여 체계적으로 관리하기 위한 실태조사 실시

□ 사업개요

❍ 근    거

- ｢시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법｣제8조(제3종 시설물의 지정 등)

- ｢시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침｣제100조(실태조사)

❍ 계획수립 : 2024. 6. 30. 한

❍ 조사기간 : 2025. 1 .1. ~ 11. 30.

❍ 대상시설

- 토목분야(2015. 1. 1. 이전 준공된 교량, 터널 등)

- 건축분야(2010. 1. 1. 이전 사용승인된 공동주택 및 다중시설 등)

❍ 조사방법 : □제3종 시설물 지정을 위한 실태조사 매뉴얼□에 의거 실시

❍ 조사주체 : 소관부서(해당 시설물 관리부서)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  6.	: 실태조사 기본계획 수립(총괄부서–시민안전과)

❍ 2024.  6.	: 실태조사 시행계획 수립(소관부서)

❍ 2025.  1. ~ 10.	: 실태조사 및 지정고시(소관부서)

❍ 2025. 10. ~	: 시설물통합정보시스템 등록 및 체계적인 관리

□ 기대효과

❍ 재난 발생 위험이 높은 시설의 체계적 관리로 재난 발생 사전 예방

지역안전관리단 상시 안전점검 실시

시민이 안전하고 행복한 진주 건설을 위해 재난 취약시설에 대한 현장 중심의 상시적이고 체계적인 안전점검을 수행하는 지역안전관리단 운영

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 16,400천원(시비)

❍ 주요업무

- 재난 취약시설 상시 안전점검 계획 수립‧시행 및 긴급 안전점검

- 상시 안전점검 결과에 다른 조치사항 이행실태 점검

- 재난‧재해 사전 예방을 위해 유관기관과의 공조 체계 강화

□ 추진상황 및 계획

❍ 추진상황

- 2022. 1. ~ 12.:106개소 안전점검 실시(상시 67개소, 이행실태 39개소)

- 2023. 1. ~ 12.:152개소 안전점검 실시(상시 74개소, 이행실태 78개소)

❍ 추진계획

월	점검 대상	월	점검대상
1	설 연휴 대비 다중이용시설 등	7	집중호우 대비 다중이용시설 등
2	해빙기 대비 옹벽 및 절토 사면	8	어린이집 안전점검
3	재난 취약 시설물	9	추석 연휴 대비 다중이용시설
4	봄 행락철 다중이용시설 등	10	행락철 대비 야영장
5	재난 취약 시설물	11	안전취약계층 재난예방 시설물
6	숙박시설, 의료시설 등	12	동절기 사회복지시설

□ 기대효과

❍ 연중 상시 안전점검으로 각종 재난 취약 시설의 재난 발생 사전예방

지역축제 및 행사 안전관리

지역축제 및 행사 개최 시 안전에 관한 계획을 심의하고 축제장 및 행사장의

안전에 관한 사항을 사전에 점검하여 해당 축제 및 행사가 안전하게 진행되도록 하기 위함

□ 사업개요

❍ 근    거 : ｢재난 및 안전관리 기본법｣ 제66조의 11, ｢공연법｣ 제11조,
｢진주시 옥외행사의 안전관리에 관한 조례｣ 제5조

❍ 기    간 : 지역축제 및 행사 개최 21일 전~종료 시

❍ 점검위원 : 안전관리자문단 중 건축, 전기, 가스, 소방 분야 위원

□ 2024년 추진계획

❍ 안전관리계획 및 재해대처계획 수립 대상 축제 또는 행사

❍ 지역축제 및 옥외행사 안전관리 절차

지역축제	안전관리계획 수립 (지역축제 주최‧주관자)	심의요청	안전관리계획 심의 (시 안전관리 실무위원회)	제 출	안전관리계획 검토 (도 사회재난과)	통 보	안전점검 (안전관리자문단)
	모든 지역축제 의견수렴(시민안전과, 소방서, 경찰서)	소관부서 ↓ 시민안전과	순간참여인원 1,000명 이상 고위험 축제	시민안전과 ↓ 도 사회재난과, 행안부	검토 및 보완	도 사회재난과 ↓ 시민안전과, 도 주관부서	현장 안전점검 (도 표본점검 병행)
옥외행사	안전관리계획 수립 (옥외행사 주최‧주관자)	심의요청	안전관리계획 심의 (시 안전관리 실무위원회)	제 출	안전관리계획 검토 (도 사회재난과)	통 보	안전점검 (안전관리자문단)
	순간참여인원 500명 이상 의견수렴(시민안전과, 소방서, 경찰서)	읍면동, 실과소 ↓ 시민안전과	순간참여인원 1,000명 이상	시민안전과 ↓ 도 사회재난과	검토 및 보완	도 사회재난과 ↓ 시민안전과, 도 주관부서	현장 안전점검 (도 표본점검 병행)

□ 주요 추진내용

❍ 지역축제 및 행사 안전관리계획 심의

❍ 지역 축제장 또는 행사장 안전관리자문단 합동 안전 점검 추진

❍ 유관기관 협조체계 유지 등 신속 상황 대응 체계 마련

□ 기대효과

❍ 축제장 및 주변지역 사전점검으로 안전사고 예방

❍ 안전사고 발생 시 즉각적인 대응으로 사고 확산 방지

민간 다중이용시설 위기상황 매뉴얼 지도⸱점검

민간 다중이용시설에 대한 안전관리를 강화하고 재난에 대비한 선제적 예방 조치 활동의 상시화 도모

□ 사업개요

❍ 근    거 : ｢재난 및 안전관리 기본법｣ 제34조의6 제3항
- 다중이용시설 등의 위기상황 매뉴얼 작성‧관리 및 훈련

❍ 점검대상 : ｢건축법 시행령｣ 제2조 제17호 가목에 따른 판매‧문화 등 시설로
사용하는 바닥면적 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축물(15개소)

❍ 점검시기 : 상‧하반기 전수 지도‧점검

❍ 점검내용
- 매뉴얼 작성 여부, 매뉴얼 구성 적정성
- 훈련계획서 및 결과보고서 등을 확인하여 실제 훈련내용 적정성 여부 등

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  5. : 민간다중이용시설 관리 대상 재정비

❍ 2024.  6. : 상반기 민간다중이용시설 매뉴얼 작성 및 훈련 실적 점검

❍ 2024.  6. : 민간전문가 현장 맞춤형 컨설팅 참여(희망시설)

❍ 2024. 11. : 하반기 현장 지도‧점검 실시

□ 기대효과

❍ 위기상황 매뉴얼 작성 및 훈련을 통한 민간 다중이용시설의 안전관리 및

위기관리 능력 강화

민방위 비상대비 역량 강화

민방위 사태 발생 시 즉각 대처할 수 있는 능력 함양 및 비상대비 위기관리 역량 강화를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호

□ 민방위 교육‧훈련 실시 계획

❍ 민방위 기본교육(집합교육)
- 교육대상 : 민방위대원 1~2년차(교육시간:4시간)
- 교육장소 : 진주시 민방위체험센터

❍ 민방위 사이버교육

- 교육대상 : 민방위대원 3~4년차(교육시간:2시간)

민방위대원 5년차 이상(교육시간:1시간)
- 교육방법 : 사이버교육(PC 또는 모바일)

❍ 민방위 훈련
- 훈련대상 : 민방위대원 포함 전 시민
- 훈련목표 : 비상사태 및 각종 재난 대비를 위한 실전 훈련 실시
- 훈련장소 : 관내 공공기관 및 다중이용시설 등
- 훈련일정 : 연 6회(전국 단위 3, 5, 9, 10월/지역 단위 4, 7월)

□ 2024년 을지연습 실시 계획

❍ 연습일자 : 2024. 8.

❍ 연습방법 : 전시 전환절차 연습, 도상연습, 전시 현안과제 토의, 실제훈련 병행

❍ 주요내용
- 민‧관‧군 합동 국가총력전 연습을 통한 완벽한 비상대비 태세 확립
- 실제 전쟁 상황을 고려한 실질적 전시 전환 절차 훈련 실시
- 지역별 주민참여 맞춤형 실제 훈련 확대 실시
- 최근 테러 양상에 따른 대응훈련 강화

□ 기대효과

❍ 안보‧안전의식 고취 및 재난 예방‧복구를 위한 능력 향상

중대재해예방 추진

중대재해예방을 위한 안전‧보건 관리체계구축 및 의무 이행 사항 점검을 통하여 종사자의 생명과 신체를 보호하는 등 중대재해 예방

□ 법적근거

❍ 법적근거
- ｢중대재해처벌법｣ 제4조 및 제9조
- ｢산업안전보건법｣ 제29조(교육), 제36조(위험성평가), 제125조(작업환경측정),
｢산업안전보건법 시행령｣ 제29조(산업보건의의 선임), 규칙 제210조(사후관리) 등

❍ 주요내용
- 위험성 평가, 근골격계 유해요인 조사, 작업환경 측정 등을 통해 잠재된	재해요인 발굴 및 안전‧보건관리체계 구축

□ 2024년 추진계획

❍ 반기 1회 이상 사업장 순회점검으로 지속적인 안전‧보건 관리

❍ ｢산업안전보건법｣ 상 안전보건 의무교육 이수 여부 수시 점검

❍ 위험성평가 실시
- 대 상 : ｢위험성평가에 관한 지침｣ 해당 사업장
- 내 용 : 각 사업장별 특성에 따른 유해 위험 요인 확인 및 개선

❍ 작업환경 측정
- 대 상 : ｢산업안전보건법 시행규칙｣ 에 따른 유해물질 사용 사업장
- 내 용 : 연 2회 사업장 작업환경 유해요인 제거 및 감소

❍ 산업안전보건 관리
- 대 상 : 진주시 소속 현업종사자
- 내 용 : 현업종사자 등의 건강관리 및 안전한 업무환경 조성

□ 기대효과

❍ 사업 또는 사업장, 공중이용시설 관리‧운영과 관련하여 인명피해 등

중대재해를 예방하고 시민의 생명과 신체를 보호

2. 예산사업

장재‧장흥 자연재해위험지구 정비사업

자연재해위험지구에 대한 근원적 예방대책 수립 추진

저지대 상습침수 피해지역 정비로 지역주민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

❍ 위    치 : 장재동, 집현면 장흥리 일원

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2025년

❍ 사 업 량 : 배수펌프장 및 유수지 설치 1식, 서원못 준설 및 정비 L=2.3km

교량 5개소, 가동보 1개소 등

❍ 사 업 비 : 33,573백만원(국비 16,787, 도비 7,268, 시비 9,518)

⁕공사비 22,753, 폐기물처리비 220, 설계‧감리비 2,700, 보상비 7,900

□ 추진상황

❍ 2021.  6. : 행정안전부 사전 설계검토 완료

⁕행정안전부 협의하여 총사업비 변경(당초 105억원→변경 336억원)

❍ 2022.  2. : 공사 착공

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  2. : 잔여분 시행(배수펌프장 신설, 서원못 정비 등/155억원)

❍ 2025. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 자연재해위험지구 정비로 주민의 생명과 재산 보호

건   축   과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 주요업무계획

1. 시책사업

2. 비예산사업

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	22	1	4	7	7	3
현 원	22	1	6	5	3	7
증 감			2	△2	△4	4

□ 위원회

(2024. 1. 1.현재)

구분 위원회명	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여성위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
건축위원회	30	6	24	0	0	24	100	10	42

□ 예산규모

(단위 : 억원)

구 분	2024년	2023년	증 감	비 고
일반회계	9	13	△4

Ⅱ. 주요업무계획

1. 시책사업

소규모 공동주택 지원사업

20세대 미만의 소규모 공동주택을 대상으로 노후된 공용 부분의 보수비를 지원하여 입주민의 경제적 부담을 줄이고 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

❍ 지원대상 : 준공 후 10년이 경과된 20세대 미만의 공동주택

(아파트, 연립주택, 다세대주택)

❍ 지원기준 : 총 사업비의 80% 범위 내(2천만원 한도)

❍ 지원사업 : 보안등, 상‧하수도시설, 단지 내 도로, 주차장 등의
공동주택 공용 부분 및 부대‧복리시설의 유지보수

❍ 사 업 비 : 140백만원(시비)

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

□ 연도별 추진상황

추진년도	추진실적(개소)	집행액(백만원)	비 고
2020년	16	200
2021년	15	200
2022년	22	374
2023년	20	288

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1.	: 지원대상 및 지원절차 공고(홈페이지 및 읍면동 게시판)

❍ 2024.  1. ~ 2.	: 보조금 지원신청(입주자대표가 신청)

❍ 2024.  2.	: 현장조사 실시 및 공동주택지원심의위원회 심의, 대상자 선정

❍ 2024.  3. ~ 12.	: 지원대상 선정 통보 및 사업 시행

□ 기대효과

❍ 생활환경 개선으로 시민들의 삶의 질 향상

농촌 주택개량사업

농촌 지역의 노후‧불량주택 개량으로 농촌 주거환경 개선

주택개량‧신축에 소요되는 비용을 대출기관(농협)에서 저금리로 융자 지원

□ 사업개요

❍ 사 업 량 : 23동(수요조사 예정)

❍ 대출한도 : 신축‧개축‧대수선 최대 2억 원, 증축‧리모델링 최대 1억 원

❍ 건축규모 : 세대당 연면적 150㎡ 이하(부속창고 포함)

❍ 대 상 자

- 농촌지역에서 본인소유 노후‧불량주택을 개량하고 있는 세대주 또는 배우자

- 농촌지역에서 거주하고 있는 무주택자로서 세대주 또는 배우자

- 도시지역에서 농촌지역으로 이주하려는 자

※1가구 2주택 소유자 및 사업완료 후 2주택 이상이 되는 자는 신청 불가

(근로자 숙소 신축하는 경우, 농촌빈집개량 시 1가구 2주택 허용)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024. 1. ~  2.	: 도 추진계획 하달 및 자체 추진계획 수립

❍ 2024. 2. ~  3.	: 물량배정(경남도) 및 사업 신청 접수

❍ 2024. 3. ~  4.	: 사업대상자 선정 및 통보(시→읍‧면‧동)

❍ 2024. 4. ~ 12.	: 사업추진

❍ 2024. 12월 말	: 사업완료 및 추진결과 보고(시→도)

□ 기대효과

❍ 도시민의 농촌유입을 촉진하여 농촌지역 활성화 도모

❍ 농촌 지역의 주거환경 개선 및 삶의 질 향상

건축지도원 운영 활성화

민간전문가를 건축지도원으로 지정하여 건축물 유지관리 확인 및 위반건축물
단속 업무 등 건축 관련 점검‧조사가 필요한 경우 주기적 또는 수시 운영하여
건축행정의 전문성 강화

□ 사업개요

❍ 근거법령 : ｢건축법｣ 제37조 및 ｢진주시 건축조례｣ 제29조

❍ 구성인원 : 20명(건축사 19, 건축관련기술사 1)

❍ 임    기 : 2023. 4. 6. ~ 2025. 4. 6.(2년)

❍ 사 업 비 : 16백만원/년

❍ 주요업무
- 건축허가(신고) 후 건축 중인 건축물의 관리
- 기존 건축물이 건축법 등에 적합하게 유지 관리되고 있는지 확인
- 허가나 신고 없이 건축하거나 용도 변경한 건축물의 단속

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  2. : 해빙기 옹벽 및 절개지 긴급점검

❍ 2024.  4. : 2024년 상반기 건축행정건실화 점검

❍ 2024.  6. : 2024년 위반건축물 기획점검

❍ 2024.  7. : 우수기 옹벽 및 절개지 긴급 점검

❍ 2024. 11. : 2024년 하반기 건축행정건실화 점검

□ 기대효과

❍ 지속적 운영으로 건축행정 질서확립 및 건전하고 안전한 건축문화 정착

농촌 빈집정비 사업(도비보조)

농촌 지역의 노후‧불량주택을 정비하여 미관 향상 및 범죄 발생 예방

환경부 슬레이트처리 지원사업과 연계하여 정주여건 개선

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 1년 이상 방치된 농촌 빈집

❍ 사업내용 : 빈집 철거 시 철거비용 일부 지원

❍ 사 업 량 : 5동

❍ 사 업 비 : 3백만원(도비 30%, 시비 70%)
- 슬레이트지붕	: 동당 0.6백만원
- 일반지붕	: 동당 1.2백만원

□ 추진상황

❍ 2023.  7. : 농촌빈집정비 사업 수요조사 제출 [시→경남도]

❍ 2023. 11. : 2024년 농촌빈집정비 사업 가내시(안) 통보 [경남도→시]

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1.	: 추진계획 및 지침 수립(경남도)

❍ 2024.  3.	: 물량배정(경남도) 및 사업공고, 대상자 선정

❍ 2024.  4. ~ 12.	: 사업시행 및 완료

□ 기대효과

❍ 농촌 빈집으로 인한 사회문제 해결 및 정주환경 개선

빈집정비 사업(자체사업)

매년 증가하는 빈집의 신속한 정비를 위하여 철거‧안전조치 비용 지원 및 활용사업 추진

빈집의 체계적인 관리로 다양한 사회문제 예방 및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

❍ 사업내용 : 빈집의 철거, 안전조치(보수) 등 정비 비용 지원(도시,농촌)

❍ 사 업 비 : 243백만원(보조금 200, 시설비 43)

❍ 사 업 량 : 빈집 15개동 정도
- 철       거	: 13동 195백만원(동당 15백만원)
- 안 전 조 치	:  1동   5백만원(동당  5백만원)
- 철거 및 활용사업	:  1동  40백만원
- 빈집철거 활용사업지 유지관리	:  1식   3백만원

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1. : 사업계획 수립 및 신청 공고

❍ 2024.  3. : 신청서 접수 및 현장조사 실시

❍ 2024.  4. : 지원대상 선정 및 사업 시행

❍ 2024. 12. : 사업 완료

□ 기대효과

❍ 빈집 등 노후주택의 사회적 문제 해소 및 정주환경 개선

❍ 빈집정비‧관리에 요구되는 행정, 협력체계 등 종합적 대책 마련

도시 및 농촌 빈집 실태조사

진주시 빈집정비계획 수립(2026~2030년)을 위하여 빈집 실태조사 실시

□ 사업개요

❍ 관련법령

- ｢빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법｣ 제5조(빈집 등 실태조사)

- ｢농어촌정비법｣ 제64조의2(빈집실태조사)

- ｢진주시 빈집 정비를 위한 지원조례｣

❍ 조사대상	: 1년 이상 거주‧사용하지 않고 방치되어 있는 주택

❍ 실태조사 주기	: 5년마다 실시(필요 시 수시)  ※빈집정비계획 수립 : 5년마다

❍ 사 업 비	: 80백만원 정도(시비), 44백만원(국비 가내시)

□ 추진상황

❍ 2020년 : 진주시 빈집 실태조사 용역 시행(빈집 3,033호)

❍ 2021년 : 진주시 빈집 정비계획 수립 용역 시행

❍ 2022년 : 진주시 빈집 정비계획 수립 고시(도시지역, 농촌지역)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1. : 빈집 실태조사계획 수립

❍ 2024.  3. : 빈집 실태조사 시행(전문기관에 위탁)

❍ 2024. 10. : 빈집 실태조사 완료

❍ 2024. 12. : 빈집 정비계획 수립 용역비 예산 편성

❍ 2025.  2. : 빈집 정비계획 수립 용역 시행

□ 기대효과

❍ 빈집의 제반 실태‧현황을 조사하여 빈집정비계획 수립 및 정비사업

시행을 위한 기초자료로 활용

노후 굴뚝 정비지원사업

도심에 위치하여 붕괴사고 등 대형재난 발생 우려가 있는 노후 목욕탕 굴뚝에 대하여 철거 시 비용 일부를 지원하는 정비지원사업 추진

□ 사업개요

❍ 근거법령
- ｢건축물관리법｣ 제15조(소규모 노후 건축물 등 점검의 실시)
- ｢진주시 건축물관리조례｣ 제6조(소규모 노후 건축물 등 점검의 대상)

❍ 사업대상 : 관내 20년 이상 경과된 노후 위험 굴뚝

❍ 사업내용 : 점검 결과 정비가 필요한 굴뚝에 대하여 철거비용 일부 지원

❍ 사 업 비 : 100백만원(보조금 50%, 자부담 50%)

❍ 사 업 량 : 5개소(1개소당 최대 20백만원)

□ 추진상황

❍ 2023.  6. : 노후 굴뚝 안전점검 시행계획 수립

❍ 2023.  7. : 노후 굴뚝 안전점검 용역 시행

❍ 2023. 10. : 점검 완료

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1. : 노후 굴뚝 정비지원계획 수립

사업 대상자 공고 및 홍보(홈페이지, 신문 등)

❍ 2024.  3. : 사업 대상자 선정 및 사업 시행

❍ 2024.  7. : 사업 완료

□ 기대효과

❍ 안전사각지대에 놓인 노후 굴뚝을 정비하여 시민 안전과 재산 보호

❍ 재난 발생이 높은 위험시설을 조기 정비하여 재난 안전 대응체계 구축

2. 비예산사업

건축물 유지관리 점검 시행

다중이용 건축물 등의 정기적인 점검을 통하여 건축물의 안전성 확보

건축물 생애이력 정보 플랫폼 구축으로 체계적인 유지‧관리 지도 및 건축물의 효율적 관리

□ 사업개요

❍ 근거법령 : ｢건축물관리법｣ 제13조(정기점검의 실시)

❍ 점검대상 : 총 277개소(다중이용건축물, 연면적 3,000㎡ 이상 집합건축물 등)

❍ 점검시기 : 사용승인 후 5년 내 최초 실시, 이후 매 3년마다 실시

❍ 점검주체 : 건축물 관리자(소유자 또는 관리계약 등에 따른 관리자)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  2. : 2024년 정기점검 대상 선정 후 민간관리자에게 통보

❍ 2024.  7. : 정기점검 촉구 계도 및 행정지도

❍ 2024. 12. : 정기점검 대상 건축물 점검 완료

□ 기대효과

❍ 건축물 생애 이력 정보 축적으로 건축물 유지‧관리 기초자료 활용

❍ 노후 건축물 점검 결과에 따른 보수‧보강 등 실시로 안전사고 예방

주 택 경 관 과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 주요업무계획

1. 예산사업

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	27	1	7	10	7	2	일반임기제 포함
현 원	28	1	10	8	4	5
증 감			3	△2	△3	3

※공무직 4, 시간선택제임기제 1

□ 주거급여 현황

❍ 일반현황

(단위 : 가구/명)

총 계		일반수급자								시 설 수급자
가 구	수급권자	소 계		자 가		임 차		기 타
		가구	인원	가구	인원	가구	인원	가구	인원
11,908	16,235	11,609	15,936	726	969	9,300	12,810	1,583	2,157	299

※기타 : 주택조사 중, 장기입원 등 급여 미지급 대상

❍ 주거유형별 현황

(단위 : 가구)

총계	자 가				임 차								기타
가구	소계	전체	부분	기타	소계	영구	국민	매입	전세	민간임대	사용대차	민간 시설입소
11,908	726	455	23	248	9,300	812	609	1,100	1,005	3,696	2,024	54	1,882

※자가 기타(248가구) : 사실상 소유자(미등기 등), 기타(1,882가구) : 시설수급자+장기입원 등

❍ 연도별 대상자 현황

(단위 : 가구/명)

구 분	가 구	가구원	비 고
2022년	10,999	15,191
2023년	11,908	16,235

□ 공동주택 사업계획 승인 현황

구 분	건	동	세 대	연면적(㎡)	비 고
2022년	2	12	1,872	374,162
2023년	0

□ 주택보급률                                               (단위 : 가구/%)

구 분	일반가구	주 택 수					주 택 보급률	비고
		합 계	아파트	연립	다세대	단독
2022년	151,916	163,808	83,867	1,309	2,236	76,396	107.83
2023년	154,544	163,687	83,867	1,309	2,236	76,275	105.92

□ 가로등‧보안등 시설 현황                                                 (단위 : 개소)

총 계				동 지 역			읍‧면 지역			터널등외
계	가로등	보안등	터널등외	소계	가로등	보안등	소계	가로등	보안등
33,855	16,252	15,980	1,623	19,974	12,713	7,261	12,258	3,539	8,719	1,623

□ 시 지정 현수막 게시대 현황                                              (단위 : 개소)

계	읍‧면	동	비 고
192	69	123	1단 행정용 88

※게시기간 : 7일, 게시수수료 : 1매당 3,000원, 매주 화요일 시 홈페이지 통합예약시스템에서 추첨

□ 시 지정 벽보 게시판 현황                                                (단위 : 개소)

계	조명식	비조명식	비 고
69	34	35

□ 광고업 등록 현황                                                        (단위 : 개소)

계	개인업체	법인업체	비 고
178	159	19

□ 대형 옥상간판 현황                                                     (단위 : 개소)

계	동성동	대안동	칠암동	강남동	상대동	장대동
12	5	1	3	1	1	1

Ⅱ. 주요업무계획

1. 예산사업

저소득층 주거급여 지원사업

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 국민기초생활보장수급자 중 주거급여 수급자

❍ 사업기간 : 연중

❍ 사업내용 : 임차가구 임차료 및 자가가구 수선유지급여 지원

❍ 사 업 비 : 17,009백만원(국비 15,308, 도비 1,191, 시비 510)

□ 추진상황

❍ 임차급여 지급(매월 20일)

- 2024. 1월 정기급여 지급액	: 1,290백만원(8,854가구)

□ 2024년 추진계획

❍ 임차급여(현금) 지원

- 임차가구/사업비	: 8,900여가구/16,115백만원

- 지원내용	: 지원금액 이내 임차료 지원	(단위 : 원/월)

가구원수	1인	2인	3인	4인	5인	6인
지급금액	178,000	201,000	239,000	278,000	287,000	340,000

❍ 수선유지급여(현물) 지원

- 한국토지주택공사 협약 체결	: 2024. 2 ~ 3월 중

- 자가가구/사업비	: 101가구/894백만원

- 지원내용	: 자가소유 주택 보수

구 분	경보수	중보수	대보수
수선비용	457만원 이내	849만원 이내	1,241만원 이내
수선주기	3년	5년	7년
수선예시	도배, 장판 등	오‧급수, 난방 등	지붕, 기둥 등

□ 기대효과

❍ 저소득 취약계층의 주거비 부담완화 및 양질의 주거수준 확보

장애인 주택개조사업

□ 사업개요

❍ 사업대상 : ｢장애인복지법｣에 해당하는 등록장애인으로 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득액 이하인 자

※전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득(2023년 기준)

구 분	1인 가구	2인 가구	3인 가구	4인 가구
월평균 소득(원)	3,353,884	5,005,376	6,718,198	7,622,056

❍ 지원규모 : 가구당 3,800천원 이내

❍ 사업기간 : 2024. 3. ~ 12.

❍ 사 업 량 : 6가구

❍ 지원내용 : 화장실 개조, 보조 손잡이 설치, 문턱 낮추기, 경사로 설치 등

❍ 사 업 비 : 23백만원(국비 11, 도비 4, 시비 8)

□ 추진상황

(단위 : 가구, 백만원)

구 분	2020		2021		2022		2023
지원가구수	6		5		4		10
사 업 비	23		19		15		26
세 부 지원내역	화장실 개조 문턱낮추기 경사로 설치 기타	2 1 1 2	화장실 개조 문턱낮추기 경사로 설치 씽크대 설치	2 1 3 1	화장실 개조 문턱낮추기 경사로 설치 기타	2 1 1 5	화장실 개조 안전바 설치 경사로 설치 기타	3 5 2 2

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  3.	: 국토부 시행지침 확정 통지, 사업계획 수립

❍ 2024.  4.	: 위탁업체 및 사업 대상자 선정

❍ 2024.  5. ~ 10.	: 사업 시행

❍ 2024. 11. ~ 12.	: 사업 완료 및 정산

□ 기대효과

❍ 저소득 장애인의 주택 개‧보수 지원으로 장애인의 주거 안정 도모

신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원사업

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 진주시 거주 혼인신고 7년 이내, 기준중위소득 180% 이하인

무주택 신혼부부

※기준중위소득 180%(2024년 기준)

구 분	소득기준(원)	건강보험료 본인부담금(원)
		직장가입자	지역가입자	혼 합
2인	6,629,000	235,283	190,636	239,074
3인	8,487,000	304,986	271,091	314,423
4인	10,314,000	377,299	351,294	397,093

❍ 사업기간 : 2024. 6. ~ 8.

❍ 사 업 량 : 350가구

❍ 사업내용 : 주택 전세자금 대출 잔액의 1.5% 지원(연 1회, 최대 100만원)
※단, 자녀가 있는 가정은 지원금에서 자녀 1인당 20% 가산 지원(최대 150만원)

❍ 사 업 비 : 400백만원

□ 추진상황

(단위 : 가구, 백만원)

구 분	2020	2021	2022	2023
지원 가구수	205	286	380	367
사 업 비	200	295	400	400

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  6. : 사업공고 및 홍보

❍ 2024.  7. : 신청‧접수

❍ 2024.  8. : 대상자 확정 및 사업비 지급

□ 기대효과

❍ 신혼부부의 안정된 정주 여건 조성으로 결혼 장려 및 출산율 제고

❍ 집 걱정 없이 일하고 아이를 키울 수 있는 기반 마련

신혼부부 주택 구입 대출이자 지원사업

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 진주시 거주 신혼부부 중 혼인신고 5년 이내,

부부합산 연소득 8천만원 이하,

주택가격 4억 이하(전용면적 85m²이하)인 1주택 신혼부부

❍ 사업기간 : 2024. 4.~11.
❍ 사 업 량 : 200가구

❍ 사업내용 : 주택구입 대출잔액(5천만원 한도)의 3%지원(연 최대 150만원)

❍ 사 업 비 : 120백만원(도비 36, 시비 84)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  4. ~  6. : 상반기 사업접수 및 사업비 지급

❍ 2024.  9. ~ 11. : 하반기 사업접수 및 사업비 지급

□ 기대효과

❍ 신혼부부의 안정된 정주 여건 조성으로 결혼 장려 및 출산율 제고

❍ 집 걱정 없이 일하고 아이를 키울 수 있는 기반 마련

저소득계층 임대보증금 지원사업

□ 사업개요

❍ 사업대상 :	기초생활수급자 및 최저주거기준 미달 주택에 거주하는
차상위계층 중 장기임대주택 예비 입주자

❍ 사업기간 :	2024. 1. ~. 12.

❍ 사 업 량 :	3가구

❍ 사업내용 :	장기공공임대(영구, 국민, 행복)주택 임대보증금 무이자 지원

❍ 사 업 비 :	30백만원(도비 9, 시비 21)  ※도비는 도에서 직접 지원

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1.	: 사업 공고 및 홍보

❍ 2024.  2. ~ 예산소진시	: 신청‧접수

❍ 2024.  2. ~ 12.	: 대상자 확정 및 사업비 지급

□ 기대효과

❍ 장기임대주택에 입주하는 저소득계층의 주거비 부담 완화로 주거 안정 도모 및 자립 기반 마련

청년월세 한시 특별지원 사업(국토부)

□ 사업개요

❍ 사업대상 : ｢청년기본법｣상 청년(19~34세 이하)으로 부모님과 별도 거주하고,	임차보증금 5천만원 및 월세 70만원 이하 주택에 거주하는 무주택자

❍ 사업기간 : 2022. 8. ~ 2024. 12.

❍ 지원조건 : (청년가구)	기준 중위소득  60% 이하, 재산가액 122백만원 이하

(원가구)	기준 중위소득 100% 이하, 재산가액 470백만원 이하

❍ 지원내용 : 월 최대 20만원 임차료 지원(최대 12개월)

❍ 지원방법 : 청년 본인 계좌로 현금 지급

❍ 사 업 비 : 1,989백만원(국비 995, 도비 298, 시비 696)

□ 추진상황

❍ 2022.  8. ~ 2023.  8. : 1차 대상자 모집

❍ 2022. 11. ~ 2023. 12. : 1차 대상자 선정 및 지원금 지급

□ 2024년 추진계획

❍ 2024. 1. ~ 12. : 1차 대상자 지원금 지급

❍ 2024. 2. ~ 12. : 2차 대상자 모집

❍ 2024. 3. ~ 12. : 2차 대상자 선정 및 지원금 지급

□ 기대효과

❍ 경기침체 장기화로 경제적 어려움을 겪는 청년층의 주거비 부담 경감을

통해 안정적인 사회진입 지원

청년월세 지원사업(경상남도)

□ 사업개요

❍ 사업대상	: 진주시에 거주하는 18세~39세 이하 청년이 세대주인 가구

❍ 사업기간	: 2024. 5. ~ 12.

❍ 지원조건(모든 항목 충족)
-기준 중위소득 150% 이하(건강보험료 본인부담금 기준)
-보증금 1억원 이하 및 월 임차료 60만원 이하 주택 거주자
-진주시내 주택에 본인 명의로 임대차 계약이 체결되어있는 청년

❍ 지원내용	: 가구당 최대 150만원 지원(월 최대 15만원/10개월)

❍ 지원방법	: 청년 월세 이체 확인 후 개인별 계좌 지급

❍ 사 업 비	: 216백만원(도비 108, 시비 108)

□ 추진상황

구 분	신청인원	지원인원	지원액	비 고
2021년	597명	166명	237백만원
2022년	582명	136명	214백만원
2023년	157명	105명	141백만원

□ 2024년 추진계획

❍ 2024. 5. ~  6.	: 사업홍보 및 대상자 모집

❍ 2024. 7.	: 자격심사 및 대상자 선정

❍ 2024. 8. ~ 12.	: 월세 지원금 지급 및 대상자 관리

□ 기대효과

❍ 진주시에 거주하는 청년들의 주거비 부담 경감으로 청년들의 주거 독립을

지원하고 지역에서의 정주 유도

다자녀 가정 주택 전세자금 대출이자 지원사업

□ 사업개요

❍ 사업대상	: 진주시 거주 무주택 다자녀 가구

❍ 사업기간	: 2024. 1. ~ 3.

❍ 지원조건	: 두 자녀 이상 양육(막내가 18세 이하), 주택전세자금 대출을 받은
기준중위소득 180% 이하 가구

❍ 지원내용	: 주택 전세자금 대출잔액의 1.5% 지원(최대 100만원)

❍ 지원방법	: 신청인 본인 계좌로 현금 지급(연 1회)

❍ 사 업 비	: 50백만원

□ 추진상황

❍ 2023년 최초 시행(51가구 50백만원 지급)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1. : 사업공고 및 홍보

❍ 2024.  2. : 신청‧접수

❍ 2024.  3. : 대상자 확정 및 사업비 지급

□ 기대효과

❍ 무주택 다자녀 가정의 주거비 부담을 완화하고 안정된 정주 요건을 조성하여 출산율 제고

청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 전세보증금 3억원 이하 임대차계약 체결한 무주택 청년

❍ 사업기간 : 2024. 2. ~ 12.

❍ 지원조건 : 연소득 5천만원(신혼부부 7천만원) 이하

❍ 지원내용 : 전세보증금반환보증 가입 시 납부한 보증료(최대 30만원)

❍ 지원방법 : 청년 본인 계좌로 현금 입금

❍ 사 업 량 : 449가구

❍ 사 업 비 : 70백만원

□ 추진상황

❍ 2023년 최초 시행

❍ 총 77가구 16백만원 지급

□ 2024년 추진계획

❍ 2024. 2. ~ 12. : 사업 홍보 및 대상자 모집

❍ 2024. 3. ~ 12. : 대상자 선정 및 지원금 지급

□ 기대효과

❍ 청년 임차인의 전세보증금반환보증 가입유도 및 전세보증금 보증사고
피해 예방

고령자 복지주택 건설사업

□ 사업개요

❍ 시 행 자 : 진주시 [부지매입 및 조성, 복지시설 운영]
LH [임대주택 건설 및 운영]

❍ 사업위치 : 평거동 359 일원(평거 벽산동신A 옆)

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2024년

❍ 사 업 량 : 임대주택 140호(청년주택 18호 포함)
복지시설 1,986.41㎡(국‧공립 어린이집 533.66㎡ 포함)

❍ 사 업 비 : 20,398백만원(국비 9,950, 도비 225, 시비 6,273, LH 3,942)

□ 추진상황 및 계획

❍ 2019.  4. : 사업 공모 선정(국토부)

❍ 2019.  6. : 지방재정 투자심사 승인(경상남도)

❍ 2020.  2. : 부지매입 완료(진주시)

❍ 2021.  4. : 착공

❍ 2021.  4. : 사업계획 변경승인(국‧공립어린이집(533㎡)설치 및 청년주택(18호) 공급)

❍ 2021.  9. : 사업계획 변경승인(관습로 설치에 따른 사업부지면적 조정)

❍ 2023.  7. : 입주자모집공고 [LH]

❍ 2024.  1. : 입주자모집 재공고

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  2. : 준공 및 입주예정 [LH]

□ 기대효과

❍ 소셜믹스로 지역에 특화된 임대주택 공급으로 주민 만족도 향상

❍ 맞춤형 복지시설 공급으로 지역 주민의 삶의 질 향상

공동주택관리 지원사업

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 20세대 이상, 10년 이상 경과된 공동주택

(지원받은 후 3년 이내 재지원 불가)

❍ 사업기간 : 연중

❍ 사 업 량 : 32개소(예산범위 내 유지‧보수 비용의 50% 지원)

❍ 사업내용
- 동주택관리 지원사업 : 20세대 이상 10년 이상 경과된 공동주택의 공용 부분 및          부대‧복리시설 유지‧보수
※기준 : 공동주택 단지의 규모에 따라 차등 지원(전체공사비 50% 이내)

(단위 : 세대, 백만원)

단지 규모	20~149	150~299	300~499	500~999	1,000이상
최대지원금	20	30	40	45	50

- 영구임대주택 공용전기료 등 지원 : 3개소(가좌주공1차, 평거주공2차, 혁신LH3단지)

❍ 사 업 비 : 840백만원(노후시설 보수 800, 공용전기료 지원 40)

□ 추진상황

구 분	2021	2022	2023	비 고
지원대상	대곡한양APT외 37개소	집현현대APT외 36개소	금산흥한골든빌외 33개소
지원사업비 (공용전기료)	875백만원 (40백만원)	850백만원 (40백만원)	850백만원 (40백만원)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  2.	: 지원대상 선정 통보 및 사업 시행

❍ 2024.  2. ~ 12.	: 사업 완료 및 정산

□ 기대효과

❍ 쾌적하고 살기 좋은 공동주택 정주환경 조성

❍ 공동주택 단지의 환경개선 및 입주민 삶의 질 향상

공동주택 공동체 활성화 사업 추진

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 관내 150세대 이상 공동주택

❍ 사업기간 : 2024. 2. ~ 12.

❍ 사 업 량 : 3개소

❍ 사업내용 : 공동주택의 주민참여 프로그램 공모사업 추진

- 공동주택 입주민들의 긴밀한 접촉과 지속적인 참여를 통해 유대감을 형성	하고 함께 살기 좋은 마을 만들기 프로그램 발굴 및 지원

- 주민 소통‧화합, 여가‧취미‧교양, 사회봉사활동, 친환경‧재활용‧에너지 절약	행사, 공동체 역량강화 프로그램 등

❍ 사 업 비 : 15백만원

□ 추진상황

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	2023	비 고
지원대상자	평거엠코외 1개소	상봉한주외 3개소	신진주포레나외 2개소
사 업 비	10	15	15

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  2.	: 지원대상 선정 통보 및 사업 시행

❍ 2024.  2. ~ 12.	: 사업 완료 및 정산

□ 기대효과

❍ 공동주택 입주민들의 긴밀한 접촉과 지속적인 참여를 통한 유대감 형성

❍ 함께 살기 좋은 마을 만들기 프로그램 발굴 및 지원

제3종 시설물 지정을 위한 실태조사

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 준공 후 15년이 경과된 15층 이하 아파트 및 연립주택

※관내 공동주택 7개 단지 20개 동

❍ 사업기간 : 2024. 3.~ 8.

❍ 사업내용 : 실태조사 용역 시행(안전진단 전문기관)

- 재난발생 위험이 높거나 지속적인 관리가 필요한 시설물을 실태조사

- 실태조사 결과에 따라 제3종 시설물로 지정‧고시하여 체계적인 안전관리

❍ 사 업 비 : 14백만원

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  3. : 제3종 시설물 실태조사 용역 시행

❍ 2024.  6. : 제3종 시설물 실태조사 용역 완료

❍ 2024.  7. : 제3종 시설물 지정‧고시 및 관리주체 통보

❍ 2024.  8. : 제3종 시설물 FMS 입력 완료

□ 기대효과

❍ 재난발생 위험이 높거나 지속적인 관리가 필요한 시설물은 제3종 시설물로	지정‧고시하여 공공의 안전을 확보

진주시 경관 기본계획 재정비 및

공공디자인 가이드라인 수립 용역 시행

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시 전역

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 7.

❍ 사업내용

- 진주시 경관 기본계획 재정비 및 공공디자인 가이드라인 수립 용역

(｢경관법｣제15조, 5년기준 재정비, 2013. 9월 수립, 2018. 3월 정비)

❍ 사 업 량

- 경관 기본계획 재정비 및 공공디자인 가이드라인 수립 1식

❍ 사 업 비 : 340백만원

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1. ~ 3.	: 시행품의, 계약심사 및 조달청 의뢰

❍ 2024.  4.	: 용역 착수

❍ 2024. 12.	: 주민공청회 및 의회 의견 청취

❍ 2025.  2.	: 환경부 등 관계 행정기관 협의

❍ 2025.  5.	: 경관위원회 심의

❍ 2025.  7.	: 용역 준공

□ 기대효과

❍ 체계적이고 통일성 있는 경관 조성‧관리를 위해 경관 기본계획 및 공공디자인 가이드라인을 재정비하여 시의 정체성 및 품격 제고

❍ 장기적이고 체계적인 경관정책 강화 및 도시이미지 질적 향상 추진

제12기 진주시 공공디자인 자율봉사단 운영

□ 사업개요

❍ 위    치	: 미정(자율봉사단과 협의 선정)

❍ 사업기간	: 2024. 5. ~ 10.

❍ 사업내용

- 참가대상	: 진주시에 주소를 둔 19세 이상의 대학생 등 성인

- 공공디자인 자율봉사단 공개모집(20명)

- 공공공간 및 시설물을 대상으로 도시경관 개선을 위한 디자인 사업 추진

- 운영결과 보고서 제작 및 보고회 개최

❍ 사 업 비	: 18백만원

□ 추진상황

❍ 2013. ~ 2023.	: 제1기~제11기 진주시 공공디자인 자율봉사단 운영

❍ 사업  완료지	: 진양교 하부(구 법원방면, 칠암동 방면), 정촌산단 생태교량 등 14개소

□ 2024년 추진계획

❍ 2024. 5. ~  6. : 자율봉사단 공개모집

❍ 2024. 6. ~  7. : 자율봉사단 발대식, 사업대상지 및 디자인 확정

❍ 2024. 7. ~  8. : 사업 실시

❍ 2024. 9. ~ 10. : 운영결과 보고서 제작 및 보고회 개최

□ 기대효과

❍ 시민의 도시경관 개선 사업 직접 참여를 통한 주인의식 고취 및 문화
향유 기회 증대

제9회 진주시 도시‧공공디자인 작품 공모전 개최

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2024. 2. ~ 10.

❍ 사업내용

- 공 모 명	: ｢제9회 진주시 도시‧공공디자인 작품 공모전｣

- 참가대상	: 제한없음(진주시 도시‧공공디자인에 관심있는 누구나)

- 공모부문	: 공공공간, 공공시설물‧공공미술

- 시상/전시	: 17개 작품 시상/전 출품작 전시(대상 1, 금상 1, 은상 2, 동상 3, 입선 10)

❍ 사 업 비 : 29백만원

□ 추진상황

❍ 2012. ~ 2016. : 제1회~제5회 작품공모전 개최(매년 시행)

❍ 2018. ~ 2022. : 제6회~제8회 작품공모전 개최(17년 미개최, 격년 시행)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  2. ~  7.	: 공모전 계획 수립, 공고 및 홍보

❍ 2024.  8.	: 작품 접수

❍ 2024.  9.	: 작품 심사 및 시상식 개최

❍ 2024. 10.	: 작품 전시 및 작품집 발간‧배포

□ 기대효과

❍ 다양하고 창의적인 공공디자인 아이디어를 발굴하여 시의 경관 향상을 위한 방안 모색에 기여

❍ 지자체의 공공디자인 진흥 책무의 효율적 추진에 기여

가로등, 보안등 설치 및 정비공사

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시 일원

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사업내용

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사 업 내 용		비고
		사 업 량	사업비
계	3개 사업		1,437
1	가로등 및 보안등 신규설치	가로등 설치 50등 보안등 설치 250등	610	연간
2	가로등 유지관리 단가계약	유지보수 단가계약 1식	320	연간
3	노후 가로등(보안등) 교체 및 유지관리	가로등 교체 및 유지관리 225개소 노후점멸기 395개소 교체	507	연간

□ 2024년 추진계획

❍ 2024. 1. ~ 12. : 취약지역 민원 해소 및 노후 시설 교체사업 시행

□ 기대효과

❍ 도로 및 주거지역 조도 개선으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

❍ 노후 시설 개선으로 안전사고 예방 및 시민 편의 증대

옥외광고물 정비사업

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 시 관내

❍ 사업기간 : 2024. 2. ~ 11.

❍ 사 업 비 : 80백만원
- 불법광고물 수거보상제	: 50백만원
- 무연고 간판 정비	: 20백만원
- 풍수해 대비 광고물 안전점검	: 10백만원

□ 2024년 추진계획

❍ 불법광고물 야간 단속
- 월 2회(19:00~22:00)

❍ 불법광고물 수거보상제
- 2024. 2.	: 보상기준 마련(벽보, 전단지 대상 보상금액 등)
- 2024. 3. ~ 11.	: 사업 시행(읍면동 주민센터 접수 및 보상금 지급)

❍ 무연고 간판 정비
- 2024. 6. ~  7.	: 신청‧접수, 현장 조사 및 대상 선정
- 2024. 8.	: 사업 시행

❍ 옥외광고물 안전점검
- 2024. 5.	: 계획 수립
- 2024. 6.	: 사업 시행

□ 기대효과

❍ 불법광고물 야간 단속 및 수거를 통한 깨끗한 도시 거리 조성

❍ 무연고 노후‧위험 간판을 철거하고 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검을 실시하여 안전한 생활환경 조성

공공시설추진단

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 주요업무계획

1. 시책사업

2. 예산사업

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	14	1	3	6	4
현 원	16	1	7	3	2	3
증 감	2		4	△3	△2	3

□ 위원회

(2024. 1. 1.현재)

구분 위원회명	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여성위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
공공건축 심의위원회	7	1	6	2	33.3	4	66.7	2	33

□ 공공건축가 현황

(단위 : 명)

구 분	계	대학교수	건축사	조경기술사
계	32	11	20	1
총괄계획가	1	-	1	-
공공건축가	31	11	19	1

Ⅱ. 주요업무계획

1. 시책사업

공공건축가 제도 운영

공공건축 사업의 기획‧설계 단계에서 민간전문가를 참여시켜 사업의 효율적
운영과 디자인 관리 체계 개선

□ 사업개요

❍ 근거법령	: ｢건축기본법｣ 제23조(민간전문가의 참여)

❍ 구    성	: 총괄계획가 1명 및 공공건축가 31명(교수 11, 건축사 19, 조경기술사 1)

❍ 소요예산	: 169백만원

❍ 근무형태	: 비상근(총괄계획가:격주 2일, 공공건축가:필요시)

❍ 역    할	: 공간환경 및 공공건축 사업의 기획, 설계 및 시공에 대한 자문

□ 추진상황

❍ 2019.  5. 30.	: 국토교통부 공모사업 선정(국비 256백만 원 지원)

❍ 2019.  6.  5.	: 총괄‧공공건축가 1기 위촉

❍ 2020.  3. 24.	: 국토교통부 2차 공모사업 선정(국비 60백만 원 지원)

❍ 2021.  7.  8.	: 공공건축가 2기 발대식 및 1기 성과보고회 개최

❍ 2023.  6. 12.	: 공공건축가 3기 위촉

❍ 2023.  8. 25.	~  9. 5.	: 제2회 진주 건축문화제 개최

❍ 2023. 11.  1.	~ 11. 5.	: 2023 경남건축문화제 개최

❍ 2019.  7.	~  현재	: 총괄‧공공건축가 자문(66건)

□ 2024년 추진계획

❍ 공공 건축 발주사업에 대한 총괄‧공공건축가 자문 지속 시행	: 연중

❍ 관련 공무원‧민간전문가(총괄‧공공건축가) 간담회 등	: 연 2회

□ 기대효과

❍ 품격 높은 공공건축 건립을 통해 지역 활성화 및 주민 삶의 질 개선

2. 예산사업

진주 건축문화제 개최

우리 시 도시건축문화 기반 조성을 위한 건축문화제를 개최하여 문화예술도시로서의 위상 제고와 시민 자부심 고취

□ 사업개요

❍ 위    치 : 구. 진주역 차량정비고 일원

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 98백만원

❍ 사업내용

구 분	내 용
전 시	⋅공공건축물 사진 및 모형 전시 ⋅진주시 친환경 건축에 대한 전시
참 여	시 민	진주시 대표 공공건축물 건축투어
	대학생	대학생 참여 프로그램 운영
	어린이	어린이와 함께하는 프로그램 운영

□ 추진상황

❍ 2022. 10.	: 제1회 진주 건축문화제 개최(주제:탄소중립시대의 건축)

❍ 2023.  8. ~ 9.	: 제2회 진주 건축문화제 개최(주제:도시재생)

❍ 2023. 11.	: 제13회 경남건축문화제 연계 전시(주제:경계의 재구성)

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1.	: 건축문화제 계획 수립

❍ 2024.  2. ~ 3.	: 행사 용역 발주

❍ 2024.  4. ~ 9.	: 프로그램 준비 및 참여기관 모집 등 세부 운영 계획 수립

❍ 2024. 10.	: 제3회 진주 건축문화제 개최

□ 기대효과

❍ 우리 시 공공건축물의 우수성 홍보로 도시경쟁력 강화 및 건축문화 진흥 도모

진주대첩광장 조성사업

진주대첩의 역사성 제고 및 호국 충절의 고장 진주의 얼 고취

국난극복의 역사 현장 관광 자원화로 관광객 증대 및 원도심 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 본성동 8-1 일원(진주성 촉석문 앞)

❍ 사업기간 : 2007 ~ 2024년

❍ 사 업 량 : 19,870㎡ [역사공원, 공원지원시설, 지하 주차장(149면) 등]

❍ 사 업 비 : 94,000백만원(균특전환 4,000, 도비 1,200, 시비 88,800)

□ 추진상황

❍ 2007.  5.	: 타당성조사 및 기본계획 수립

❍ 2017.  7.	: 보상 및 건물철거 완료(부지 108필지 13,000㎡, 건물 81동)

❍ 2018.  4. ~ 2019. 8.	: 문화재 정밀 발굴조사

❍ 2020.  9. ~ 2021. 7.	: 문화재 보존방안 및 현상변경 허가심의 완료

❍ 2021.  8. ~ 11.	: 지방재정투자 2단계 심사 완료(행안부)

❍ 2022.  2.	: 공사 착공

❍ 2022.  3. ~ 2023. 3.	: 북측 보도부 문화재 시・발굴조사

❍ 2022.  4.	: 유구 보존 및 정비 공사 착공

❍ 2023.  6.	: 문화재 현상변경 변경 허가 최종 완료(문화재청)

❍ 2023.  8.	: 지하주차장 터파기 및 북측보도부 한전지중화 완료

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  6.	: 공사 준공

□ 기대효과

❍ 국난극복 역사 현장 관광 자원화로 관광객 증대 및 원도심 활성화 도모

❍ 진주의 랜드마크 공간 조성으로 시민의 자긍심 고취

성북동 아동‧복지센터 건립

원도심 내 부족한 육아‧돌봄 시설을 구. 영남백화점 부지에 건립하여 균형있는 지역별 아동복지 지원 체계 구축

성북동 청사 이전과 주차 공간 제공으로 효율적인 행정업무 수행 및 지역민
편의 도모・원도심 활성화 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 인사동 9-1 일원(구. 영남백화점)

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2025년

❍ 사 업 량 : 부지 2,914.7㎡, 건축연면적 7,710㎡/1동(지하 2층~지상 5층)

[아동・복지시설, 성북동행정복지센터, 지하주차장(75면) 등]

❍ 사 업 비 : 42,500백만원(국비 5,000, 도비 1,000, 시비 36,500)

□ 추진상황

❍ 2020.  2. ~ 2021. 3.	: 타당성조사, 도시계획시설 실시계획 인가

❍ 2021.  4.	: 도시재생 인정사업(위험건축물 재생사업) 선정
⁕국‧도비 60억 확보

❍ 2021. 10. ~ 2023. 1.	: 부지보상 완료(1차 : 구, 영남백화점/2차 : 원룸 3동) 및 철거

❍ 2022. 12.	: 경제성 검토(VE) 완료, 도시관리계획 결정(변경)

❍ 2023.  2. ~ 6.	: 경상남도 지방건설 기술심의, 조달청 원가검토 및 계약 의뢰

❍ 2023. 10.	: 공사 착공

❍ 2023. 12.	: 주민설명회 개최, 가설울타리 설치, 공사장 주변 일방통행로 지정

❍ 2024.  1.	: 기존 지하(1층) 구조물 철거 및 지하주차장 가시설 작업 시행

□ 2024년 추진계획

❍ 2025. 10.	: 공사 준공

□ 기대효과

❍ 원도심 내 위험건축물 철거 및 정주 여건 개선과 원도심 활성화 기여

❍ 더 나은 복지 기능과 행정 서비스 제공

안락공원 현대화 사업

화장 중심의 장사시설 수요 대비와 기존 안락공원의 노후화된 화장시설 개선

부족한 봉안시설 확보 및 친환경적 현대화 추모공원 조성을 통한 시민복지 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 장재동 245 일원(안락공원 주변)

❍ 사업기간 : 2012 ~ 2025년

❍ 사 업 량 : 131,156㎡ [화장로, 봉안당, 자연장지, 주차장(176면) 등]

❍ 사 업 비 : 63,347백만원(국비 15,886, 도비 1,736, 시비 45,725)

□ 추진상황

❍ 2013.  3. ~ 9.	: 기본계획수립 용역

❍ 2013.  6. ~ 2022. 6.	: 편입부지 보상(67필지 131,156㎡)

❍ 2019.  4.	: 지방재정투자 중앙 재심사 승인(조건부)→민원최소화, 633억

❍ 2020.  5.	: 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2020.  9. ~ 12.	: 총괄‧공공건축가 자문(1~6차) 및 한국장례문화진흥원 자문

❍ 2021.  8. ~ 10.	: 도시계획시설(장사시설) 결정 및 주민설명회 개최

❍ 2022.  1. ~  6.	: 공사 착공 및 건축협의

❍ 2022. 10.	: ｢안락공원 현대화 올바른 추진위원회｣현장 설명회 개최

❍ 2023.  3. ~  5.	: 건축변경협의 및 2차분 공사 발주

❍ 2023. 12.	: 건축(1차분) 준공

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  5.	: 신설화장로 관련 시설 설치

❍ 2025.  2.	: 공사 준공

□ 기대효과

❍ 기존 안락공원의 노후화된 화장시설 개선과 부족한 봉안시설 확보

❍ 친환경적 현대화 추모공원 조성으로 시민 복지 제고

진주시 복합문화공간 조성사업

복합 문화 공간 조성으로 문화, 향토 민속 등 천년고도 진주의 유네스코 창의도시 이미지 제고

문화・예술에 대한 시민들의 다양한 욕구 충족

□ 사업개요

❍ 위    치 : 본성동 7-1 일원(청소년수련관 앞)

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2027년

❍ 사 업 량 : 부지 3,170㎡, 건축연면적 5,450㎡

[문화원, 청년문화교실, 공연장, 지하주차장(70면) 등]

❍ 사 업 비 : 40,050백만원(시비)

□ 추진상황

❍ 2021.  3.	: 타당성 조사 및 기본계획수립 용역

❍ 2021.  6.	: 지방재정 투자사업 심사→조건부(실시설계 완료 후 재심사)

❍ 2021.  7.	: 도시관리계획(문화시설) 결정 및 지형도면 고시

❍ 2022.  6. ~ 9.	: 진주시 공유재산 심의, 진주시의회 승인

❍ 2022.  9.	: 편입부지 보상관리 용역 착수 및 주민설명회 개최

❍ 2023.  7.	: 복합문화공간조성사업(부지조성) 실시계획 인가고시,
수용재결신청

❍ 2023. 11.	: 토지 수용 개시, 소유권 이전 등기

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  3.	: 부지 안전펜스 설치

❍ 2025.  1.	: 건물철거 및 문화재 표본조사, 설계공모 관리용역, 공공건축 심의

❍ 2025.  5. ~ 2026.  5.	: 설계공모, 실시설계 변경 인가, 기본 및 실시설계,

설계VE, 건설기술김의, 조달청 원가검토 및 계약

❍ 2026.  6. ~ 2027. 12.	: 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 천년고도 진주의 문화도시 위상 제고

❍ 문화・예술에 대한 시민들의 다양한 욕구 충족

진주실크박물관 건립

국내 유일의 실크 산업 가치를 보존하는 기념비적인 공간으로 대한민국 실크의 랜드마크로 건립

진주실크의 역사성과 우수성을 알리는 복합문화공간 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 문산읍 삼곡리 1672-2(실크전문단지 내)

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2025년

❍ 사 업 량 : 부지 4,477㎡, 건축연면적 2,932.31㎡/1동(지하 1층~지상 3층)

[상설‧기획 전시실, 체험교육실, 카페‧아트샵, 파노라마 영상실, 주차장(30면) 등]

❍ 사 업 비 : 21,500백만원(국비 500, 도비 3,861, 시비 17,139)

□ 추진상황

❍ 2019.  3. ~ 11.	: 실크박물관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립

❍ 2021.  3.	: 지방재정투자 심사 완료

❍ 2021.  5.	: 공립박물관 설립 타당성 사전평가 완료

❍ 2021.  7.	: 건축 설계공모 및 실시설계 용역 시행(2023. 5. 완료)

❍ 2023.  2.	: 조달청 원가검토 및 계약의뢰

❍ 2023.  6.	: 지방재정 중앙투자심사 완료

❍ 2023.  7.	: 공사 착공

□ 2024년 추진계획

❍ 2024. 12.	: 공사 준공

❍ 2025.  1. ~ 2.	: 전시공사 및 개관(기업통상과)

□ 기대효과

❍ 우리나라 전통산업으로서의 가치 보존과 세계 5대 실크 명산지 명성 부각

❍ 실크 산업의 비전을 제시하는 역할로 지역 향토산업 및 경제발전에 기여

행복드림센터 건립

정촌산단, 뿌리산단, 국가항공산단의 집적에 따라 지역 내 근로자와 지역주민이 함께 할 수 있는 복합문화시설 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 정촌면 예하리 1369(뿌리일반산단 내 지원시설 4 용지)

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2024년

❍ 사 업 량 : 부지 7,031㎡, 건축연면적 2,933.09㎡/1동(지하 1층~지상 2층)

[다목적체육관, 주민자율공간, 북카페, 주차장(82면) 등]

❍ 사 업 비 : 23,260백만원(국비 4,500, 도비 1,350, 시비 17,410)

□ 추진상황

❍ 2020.  8. : 2021년 지역사회활성화 기반 조성 사업 선정(행안부)

❍ 2021.  6. : 지방재정투자심사 완료

❍ 2021.  9. : 사업부지 매입

❍ 2021. 10. : 건축 설계공모 및 실시설계 용역 완료

❍ 2023.  2. : 조달청 원가검토 및 계약의뢰

❍ 2023.  4. : 공사 착공

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  6. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 산단 내 입주기업, 노동자 및 지역주민을 아우르는 복합문화공간의 조성으로

진주 남부권 정주 여건 및 근로환경 개선

중안지구 공영주차타워 조성

구. 도심지 내 만성적인 주차난 해소로 시민들의 주차편의 제고 및 지역경제 활성화 도모를 위한 공영주차타워를 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 중안동 14-1 외 1필지

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

❍ 사 업 량 : 부지 2,109.8㎡, 건축연면적 5,250.62㎡/주차타워 3층 4단

[주차면수 218면, 자전거주차 88대, 주민카페, 공중화장실 등]

❍ 사 업 비 : 16,500백만원(시비)

□ 추진상황

❍ 2022. 10. ~ 2023. 3.	: 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역

❍ 2023.  4. ~  6.	: 설계공모

❍ 2023.  6.	: 기본 및 실시설계 착수

❍ 2023. 10.	: 건축 협의

❍ 2023. 12.	: 공사 계약 의뢰

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  1. ~  11.	: 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 도심지 내 주차공간 확보를 통한 주차난 해소와 지역경제 활성화 도모

❍ 주차공간 조성을 통한 시민 주차편의 제고 및 주거환경 개선 기여

보건소 신청사 건립

포스트 코로나 시대에 맞는 보건소 역할과 기능을 새롭게 정립하고 감염병 대응에 효율적인 단독 청사 건립

□ 사업개요

❍ 위    치 : 초전동 360-1 일원(초전신도심 1단계 개발사업 부지 내)

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2026년

❍ 사 업 량 : 부지 8,400㎡, 건축연면적 12,245㎡/지하 1층~지상 4층

[보건소, 치매안심센터, 주차장(156면) 등]

❍ 사 업 비 : 67,300백만원(국비 4,907, 도비 1,252, 시비 61,141)

□ 추진상황

❍ 2021. 12. ~ 2022. 12.	: 기본구상 및 건축기획 용역

❍ 2023.  2. ~ 6.	: 설계 공모

❍ 2023.  3.	: 부지 계약

❍ 2023.  7.	: 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2023. 12.	: 설계 경제성 검토 용역 착수

□ 2024년 추진계획

❍ 2024.  7. ~ 11.	: 도 건설기술심의, 조달청 원가 검토, 계약 의뢰 등

❍ 2024. 12. ~ 2026.  7.	: 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 지역보건의료기관 시설 개선으로 감염병 대응 등 효율적인 보건 사업 수행 및 보건의료서비스 향상