2021. 10. 18(월)

도시환경위원회

시의회 현장방문 자료

월아산 숲속의 진주

산  림  과

월아산 자연휴양림 조성공사

진성면 월아산 시유림의 자원을 활용하여 쾌적한 산림휴양 시설을 시민들에게

제공하여 시민들의 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화 도모

		사업개요

❍ 위    치 : 진주시 진성면 동산리 산116-34번지 일원

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2021년

❍ 총사업비 : 금9,350백만원

❍ 사 업 량

- 사 업 량 : 숙박시설(133인/일) 및 편익시설 등 7개동, 기반시설 조성

- 현공정률 : 65%

건축(40%) : 숙소 5개동 구조체 완료, 방문자 안내소 2층 구조체 타설

토목(80%) : 토공 완료 및 상하수도, 교량 설치 완료,

		추진사항 및 계획

❍ 2017.  4. : 자연휴양림 지정(산림청 고시 제2017-42호)

❍ 2019.  5. : 자연휴양림 기본계획 및 실시설계 용역 완료

❍ 2019. 11. : 사전재해영향 및 환경영향성검토 협의 완료

❍ 2020.  3. : 자연휴양림 조성 계획 승인 완료(경상남도)

❍ 2020.  5. : 사업 착공

❍ 2021. 12. : 사업 준공

월아산 산림레포츠단지 조성사업

생활권에서 접근성이 뛰어난 월아산 일원에 산림휴양과 함께 건전한 야외 활동을 즐길 수 있는 특색 있는 산림레포츠 단지를 조성하여 다양한 산림복지 제공 및 산림자원을 활용한 명소 부각

		사업개요

❍ 위    치 : 진주시 진성면 동산리 산134번지 일원

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

❍ 총사업비 : 금10,395백만원(공사 7,195, 보상 3,200)

❍ 사 업 량 : 산림레포츠시설 4종, 산림체험안내소 1동

- 현공정률 : 35%

건축(50%) : 구조체 완료, 습식공사 중

레포츠 시설(10%) : 자재 국내 반입 완료(기초 완료 후 조립 공정 계획)

		추진사항 및 계획

❍ 2019.  7. : 산림레포츠단지 타당성조사 용역 완료

❍ 2019. 12. : 기본계획 및 실시설계 용역 착수

❍ 2020.  5. : 제품선정심사위원회 및 계약심의위원회(물품구입) 의결

❍ 2021.  4. : 조성계획 승인 완료 및 건축 사업 착공

❍ 2021. 12. : 사업 준공

월아산 우드랜드 주차장 개선 및 지중화 사업

기존 20면에 불과한 우드랜드 주차장을 개선하여 92면으로 주차 대수 확장

숲속의 진주 구역 내 전선을 지중화하여 경관 개선 및 쾌적한 휴양환경 조성

		월아산 주차장 개선

❍ 위    치 : 진주시 진성면 동산리 산134번지 일원

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2021년

❍ 총사업비 : 금1,600백만원

❍ 사 업 량 : 주차타워 조성 1식(92면, 1동)

❍ 추진사항

- 2020. 5 : 실시설계 완료

- 2020. 7 : 사업 착공

- 2021. 7 : 사업 완료

		우드랜드 전선 지중화

❍ 위    치 : 진주시 진성면 동산리 산134번지 일원

❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년

❍ 총사업비 : 금484백만원

❍ 사 업 량 : 전선 지중화 L=700m

❍ 추진사항

- 2021.  5. : 공사비 납부(진주시→한국전력)

- 2021.  8. : 입찰 완료(한국전력)

- 2021.  9. : 사업 착공

- 2021. 10. : 전선 자재 입찰(한국전력)

- 2021. 11. : 전선 배관 완료 후 도로 복구

- 2021. 12. : 전선 입선 및 전주 제거

월아산 진성 동산지구 공영주차장 조성 등

월아산 산림휴양, 산림레포츠, 목공체험 등 체류형 산림문화 체험 공간을 방문하는

방문객의 안전 및 편의를 위한 공영주차장 기반 구축

		사업개요

❍ 위    치 : 진주시 진성면 동산리 1236번지 일원

❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년

❍ 총사업비 : 금5,910백만원

❍ 사 업 량 : 공영주차장 303면, 진입도로 등 조성

		추진사항 및 계획

❍ 2020.  4. : 타당성조사 용역 착수

❍ 2020.  7. : 타당성조사 용역 완료

❍ 2021.  1. : 보상비 확보 및 토지/지장물 보상

❍ 2021.  1. : 실시설계 용역 및 행정절차 이행

❍ 2021. 10. : 실시설계 완료

❍ 2021. 11. : 사전재해 및 환경영향성평가 협의 완료

❍ 2022.  2. : 공사 착공

❍ 2022. 12. : 사업 준공