	부강한 진주 행복한 시민	제234회 진주시의회(제2차 정례회)

시정 주요업무 보고서

(2021년 실적 및 2022년 계획)

진   주  시

(도시건설국)

보 고 순 서

□	도 시 계 획 과

□	균 형 개 발 과

□	건 설 과

□	시 민 안 전 과

□	건 축 과

□	주 택 경 관 과

도 시 계 획 과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	1	6	8	7	-
현 원	21	1	1	6	8	4	1
증 감	△2	-	-	-	-	△3	1

□ 국토이용계획

(단위 : ㎢, %)

총 면 적	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경 보전지역
712.840 (100)	275.746 (38.68)	149.373 (20.96)	283.941 (39.83)	3.780 (0.53)

□ 도시지역

(단위 : ㎢, %)

총 면 적	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역
275.746 (100)	19.425 (7.05)	3.156 (1.14)	5.661 (2.05)	247.504 (89.76)

□ 도시기본계획 지표

목표연도	계획인구 (명)	가구수 (호)	가구당 인 구 (명)	토지이용계획(㎢)
				계 (%)	시가화 용 지	시 가 화 예정용지	보전용지
2030	520,000	208,000	2.5	712.840 (100)	37.536 (5.27)	20.127 (2.82)	655.177 (91.91)

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진중	시기 미도래	미착공	비 고
계	7	2	5	-	-
예 산 사 업	7	2	5	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업 --- 2건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
구)진주역 사거리 광장 조성	❍ 위 치 : 천전동 일원 ❍ 사 업 량 : 11,502㎡ - 도로선형 개선 - 주차장 설치 ❍ 사 업 비 : 314억원 ❍ 사업기간 : 2019 ~2021년	❍ 2019.11. : 보상계획 통보 ❍ 2019.12. : 편입토지 보상 협의 ❍ 2020. 6. : 실시계획인가 고시 ❍ 2020.10. : 착공(1차분) ❍ 2020.12. : 도시계획시설(광장) 내 가설건축물 철거 완료 ❍ 2021. 1. : 착공(2차분) ❍ 2021. 7.~10. : 임시개통 ❍ 2022. 1. : 준공(총괄) ※ 연내 준공 목표로 추진
소망의 거리 조성	❍ 위 치 : 망경동 일원 ❍ 사 업 량 : L=450.0m - 유등전시 시설 - 휴게시설 등 ❍ 사 업 비 : 45억원 ❍ 사업기간 : 2019~2021년 ※ 경관 조명 설치공사 (3회 추경) - 사업비 : 4.5억원	❍ 2020. 6. : 편입부지 보상 완료 ❍ 2020. 8. : 기본 및 실시설계 완료 ❍ 2020. 9. : 제2회 추경예산 편성 * 공사비 15억원 ❍ 2020.11. : 착공 ❍ 2021. 3. : 경관조명 마스터플랜 수립 ❍ 2021. 9. : 경관조명 공사비 편성 (3회 추경) ❍ 2021.11. : 준공 및 경관조명 설치 착공 ❍ 2022. 2. : 경관조명 설치 준공

□ 추진중 사업 --- 5건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
신진주역세권~국도2호선간 연결도로 개설사업	❍ 위 치 : 가호동, 정촌면, 화개리 일원 ❍ 사 업 량 : 도로개설 L=1.1㎞, B=10~20m ❍ 사 업 비 : 390억원 ❍ 사업기간 : 2017 ~ 2024년	□ 추진사항 ❍ 2017. 8. : 지방재정투자 심사 ❍ 2018. 5. : 타당성평가 및 기본계획 용역 완료 ❍ 2019. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수 ❍ 2020.12. : 철도횡단 심의 완료 ❍ 2021. 4. : 문화재지표조사 완료 ❍ 2021. 8. : 소규모환경영향평가 완료 ❍ 2021. 9. : 제5차 국도국지도 5개년 계획 미 반영 ❍ 2021.10. : 종점부 연결방안 협의 (부산지방국토관리청) □ 향후계획 ❍ 2022. 3. : 건설기술심의 ❍ 2022. 5. : 기본 및 실시설계 용역 완료 ❍ 2022. 6. : 착공 ❍ 2024. 6. : 준공
진주 도시관리계획 재정비	❍ 과 업 명 : 진주도시관 리계획(용도지역․경관 지구 등 재정비) 용역 ❍ 과업내용 - 도시관리계획(재정비) - 토지적성평가 및 재해 취약성 분석 - 경관지구 기본구상 등 ❍ 과업기간 : 2021.6.7.~2023.11.23. ❍ 용 역 비 : 1,437백만원	□ 추진사항 ❍ 2021. 6. : 계약 및 착수 보고 ❍ 2021. 7.~ : 기초조사 및 과업수행 ❍ 2021.10. : 경관지구 초안 검토 □ 향후계획 ❍ 2022. 3. : 경관지구 기본구상(안) 중간보고 ❍ 2022.12. : 도시관리계획 입안 ❍ 2023.11. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
구)진주역 복합문화공원 조성	❍ 위 치 : 구)진주역사 부지 일원 ❍ 면 적 : 42,077㎡ ❍ 사 업 비 : 480억원 ❍사업기간 : 2019~2022년	□ 추진사항 ❍ 2018.10. : 구)진주역 지구단위계획 구역 결정 ❍ 2020. 3. : 지구단위계획구역 결정 (변경) 및 지형도면 고시 ❍ 2020. 7. : 기본 및 실시설계용역 착수 ❍ 2021. 5. : 실시계획인가 고시 ❍ 2021. 7. : 기본 및 실시설계용역 완료 ❍ 2021. 7. : 구)진주역사 리모델링 및 전시설계 착수 ❍ 2021.10. : 문화재 표본조사 시행 □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 시굴조사 시행 및 문화재청 협의 ❍ 2022. 1. : 구)진주역사 리모델링 및 전시설계 완료 ❍ 2022. 2. : 착공(전체) ❍ 2022.12. : 준공(전체)
소망․희망 광장조성사업	❍위 치 - 소망광장(구.망경지하 차도 옆) - 희망광장(지식산업센 터 옆) ❍사 업 량 : 2,052㎡ - 광장 조성 1식 ❍사 업 비 : 45억원 ❍사업기간 : 2022~2023년	□ 추진사항 ❍ 2021. 6. : 소망․희망광장 조성사 업 실시설계 용역 완료 ❍ 2021.10. : 도시관리계획(시설)결정 및 지형도면고시 □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 인가 고시 ❍ 2022. 1. : 보상계획 수립 및 보상 협의 ❍ 2023. 1. : 착공 ❍ 2023.12. : 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
신진주역세권 도시개발사업	❍ 위 치 : 가좌동 409-2 일원 ❍ 면 적 : 961,207㎡ - 1지구 561,770㎡ - 2지구 399,500㎡ ❍ 수용인구 : 20,427명 ❍ 사 업 비 : 4,333억원 ❍사업기간 : 2009~2020년 ❍ 시 행 자 : 진주시	□ 추진사항 ❍ 2009. 3. : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립․고시 ❍ 2013. 7. : 개발계획(변경) 및 실시계획(변경) 인가 ❍ 2014. 4. : 부지조성공사 착공 (1지구) ❍ 2017.12. : 부지조성공사 착공 (2지구) ❍ 2018.12. : 부지조성공사 준공 (1지구) ❍ 2019. 3. : 공사완료 공고(1지구) ❍ 2020. 9. : 부지조성공사 준공 (2지구) ❍ 2020.12. : 공사완료 공고 및 구역해제 ❍ 2021. 2. : 사후환경영향평가 용역 시행 ❍ 2021. 6. : 건설공사 사후평가 용역 시행 □ 향후계획 ❍ 2022. 2. : 건설공사 사후평가 용역 준공 ❍ 2024. 2. : 사후환경영향평가 용역 준공

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

❍ 진주 도시관리계획 재정비 선제적 추진

- 2030 도시기본계획에 따른 도시관리계획 수립으로 체계적이고 계획적인 도시관리 및      도시성장 발전 축 마련

❍ 신진주역세권~국도2호선간 연결도로 확충

- 신진주역세권~국도2호선 연결도로 선제적 추진으로 진주~사천 간 국도3․33호선 노      선 분리 및 도로 신설 사업 추진 동력 확보

❍ 구)진주역사 부지 및 폐선부지의 체계적 개발 추진

- 구)진주역사 부지 및 폐선부지를 활용하여 철도역사 전시관, 미술관, 소망․희망광장       등 복합문화타운 조성으로 도심 속의 휴식공간 조성

❍ 여객자동차터미널 개발 및 남부내륙고속철도 착공 추진

- 여객자동차터미널 개발 및 남부내륙고속철도 착공을 위한 행정력 집중으로 남중부       100만 생활권 중심도시 발전 토대 마련

⇒ 도시의 성장기반 확충 및 미래지향적인 도시개발사업 추진으로 남중부 100만 생활권       중심도시로 성장

2. 총    괄

(단위 : 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	9	564,637	4	1	-	4
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	9	564,637	4	1	-	4

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

신진주역세권~국도2호선 간 연결도로 개설사업

신진주 역세권과 국도2호선 간 연결도로 개설로 교통량 분산 및 역세권 이용객의 편의 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 가호동, 정촌면 화개리 일원

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=1.1㎞, B=10~20m

❍ 사 업 비 : 390억원(공사비 315 용역비 13 감리비 13 보상비 등 49)

❍ 사업기간 : 2017~2024년(8년간)

□ 추진상황

❍ 2017.  8. : 지방재정투자 심사

❍ 2017. 12.~2018.  5. : 타당성평가 및 기본계획 용역

❍ 2019.  4. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2019. 11. : 국토교통부 방문(국도2호선 접속교차로 협의)

- □진주 정촌~사천 축동 도로건설 사업□ 제5차 국도․국지도 5개년 계획에 반영될 경우 가장육교에 접속교차 협의 가능

❍ 2020. 12. : 철도횡단 심의 완료(국가철도공단)

❍ 2021.  4. : 문화재지표조사 완료(문화재청)

❍ 2021.  8. : 소규모 환경영향평가 완료(낙동강유역환경청)

❍ 2021.  9. : 제5차 국도․국지도 5개년 계획 미 반영

❍ 2021. 10. : 종점부 연결방안 협의(부산지방국토관리청)

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 경관위원회 심의(진주시)

❍ 2022.  3. : 소규모 환경영향평가 변경(낙동강유역환경청),
건설기술심의(경남도), 경제성검토(VE)

❍ 2022.  4. : 설계안전성검토(한국시설안전공단), 실시계획인가

❍ 2022.  5. : 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2022.  6. : 착공

❍ 2024.  6. : 준공

진주 도시관리계획 재정비

2030년 진주 도시기본계획에서 제시된 진주시의 장기적인 발전 방향을 공간에 구체화하고 실현시키는 중기계획으로, 지역 특성에 부합하고 지속 가능한 도시발전 도모(5년 단위 법정 재검토, 목표연도:2025년)

□ 사업개요

❍ 과 업 명 : 진주도시관리계획(용도지역․경관지구 등 재정비) 용역

❍ 과업내용

- 도시관리계획(재정비)

- 토지적성평가 및 재해취약성분석

- 경관지구 기본구상 등

❍ 과업기간 : 2021. 6. 7.~2023. 11. 23.(30개월)

❍ 용 역 비 : 1,437백만원

□ 추진상황

❍ 2021.  6. : 계약 및 착수 보고

❍ 2021.  7.~ : 기초조사 및 과업수행

❍ 2021. 10. : 경관지구 초안 검토

□ 추진계획

❍ 2022.  3. : 경관지구 기본구상(안) 중간보고

❍ 2022. 12. : 도시관리계획 입안

❍ 2023. 11. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시

구)진주역 복합 문화공원 조성

❍ 구)진주역사 및 폐선부지를 활용하여 철도역사 전시관, 생태공원 등 복합문화공원

조성으로 누구나 찾고 즐기며 머무는 문화예술공원 조성

❍ 지역특색을 살린 도시재생으로 낙후된 원도심 주거지 활성화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 강남동 구)진주역사 부지 일원

❍ 사 업 량 : 문화공원 42,077㎡(전시관, 생태공원, 기타 부대시설 1식)

❍ 사 업 비 : 480억원(부지매입비 356억 각종 용역비 24억 공사비 100억)

❍ 사업기간 : 2019~2022년(4년간)

□ 추진상황

❍ 2018. 10. : 구)진주역 지구단위계획구역 결정

❍ 2019.  9. : 구)진주역 철도부지 재생프로젝트 시민설명회 개최

❍ 2020.  3. : 구)진주역 지구단위계획구역 결정(변경) 및 지형도면 고시

❍ 2020.  7. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2020.  8. : 도시재생뉴딜(인정사업) 공모 신청  * 국토부

❍ 2020. 12. : 도시재생 특위 심의 및 공모 선정  * 국․도비 60억원 확보

❍ 2021.  5. : 실시계획인가 고시

❍ 2021.  7. : 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2021.  7. : 철도역사 전시관 전시설계 및 전시물 제작‧설치 착수

❍ 2021.  8. : 구)진주역사 리모델링 공사 착공

❍ 2021.  9. : 멸종위기Ⅱ급 생물 맹꽁이 포획 및 이전 완료

❍ 2021. 10. : 문화재 표본조사(2단계:맹꽁이서식지 구간) 시행

□ 추진계획

❍ 2021. 11. : 문화재 시굴조사 시행 및 문화재청 협의

❍ 2022.  1. : 구)진주역사 리모델링 및 철도역사 전시설계 완료

❍ 2022.  2. : 착공(전체)

❍ 2022. 12. : 준공(전체)

소망․희망광장 조성사업

❍ 망경동 일원 주거지 내 폐선부지로 인한 열악한 생활환경 개선 시급

❍ 소망의 거리와 연결되는 철도부지 재생프로젝트, 유등테마공원의 연속성 확보,

생활환경 개선과 지역주민을 위한 여가 및 휴식공간 제공

□ 사업개요

❍ 위    치 : 소망광장(구.망경지하차도 옆), 희망광장(지식산업센터 옆)

❍ 사 업 량 : 소망광장 A=1,027㎡ 희망광장 A=1,025㎡

❍ 총사업비 : 45억원(보상비 38 공사비 7)

❍ 사업기간 : 2022~2023년

□ 추진상황

❍ 2021.  6. : 소망‧희망광장 조성사업 실시설계 용역 완료

❍ 2021.  7. : 도시계획시설 결정 주민 공람‧공고

❍ 2021.  7. : 관련부서 협의 및 조치계획 수립

❍ 2021.  8. : 도시계획위원회 및 공동위원회 심의

❍ 2021. 10. : 도시관리계획(시설) 결정 및 지형도면 고시

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 소망․희망광장 실시계획 인가 고시

❍ 2022.  1. : 보상계획 수립 및 보상 협의

❍ 2023.  1. : 공사 착공

❍ 2023. 12. : 공사 준공

진주 여객자동차터미널 개발사업

❍ 남부권 중심도시로 성장 발전 토대 마련 및 인구 50만 교통 인프라 구축

❍ 터미널 개발로 인한 도심 공동화, 교통 문제 등 현안문제 해소 모색

□ 사업개요

❍ 위    치 : 가좌․호탄동 일원

❍ 사 업 량 : 86,728㎡(진주복합터미널, 준주거시설, 일반상업시설 등)

❍ 사 업 비 : 2,296억원(민간자본)

❍ 사업기간 : 2012~2022년(11년간)

□ 추진상황

❍ 2005.  2. : 도시계획시설 결정

❍ 2012. 12. : 도시계획시설 결정(변경)
⇒ 여객자동차터미널(71,435㎡), 화물자동차 공영차고지(50,702㎡)

❍ 2015. 12. : 사업제안서 접수(1개사 제안서 제출)

❍ 2016.  5. : 협약서 체결(에스티에스개발(주):김현석)

❍ 2016.  6. : 시민공청회 개최

❍ 2017.  1. : 도시개발구역 지정 주민 공람공고 및 의견청취

❍ 2017.  3.~4. : 시 도시계획위원회 자문

❍ 2017.  7. : 도시개발구역 지정 신청(진주시→경남도)

❍ 2017.  8.~2018. 12. : 관련실과 및 기관 협의, 경남도 보완사항 이행
- 사업시행자 변경(진주시장→진주시장, STS)에 따른 행정절차 재이행

❍ 2019.  4. : 중앙토지수용위원회 사전의견 청취 신청⇒보완
(보완내용 : 개발사업 사유지의 토지 사용․수용 동의서 제출 요구)

❍ 2019.  9. : 중앙토지수용위원회 재심의⇒조건부 동의

❍ 2019. 10. : 경남도 도시계획위원회 심의⇒조건부 승인

❍ 2019. 12. : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시

❍ 2020.  1.~12. : 보상계획 열람 공고 및 감정 평가(보상계획 통지), 보상 협의

❍ 2020.  8. : 버스터미널 활용 주변지역 발전방안 용역 시행

❍ 2020. 10. : 사업시행자 지정 신청(진주시→경남도) 및 지정(경남도→진주시)

❍ 2021.  4. : 문화재 발굴조사 시행

□ 추진계획

❍ 2021. 11.~2022.  2. : 실시계획 인가 신청 및 고시

❍ 2022.  3. : 부지조성사업 착공

❍ 2022. 12. : 부지조성사업 준공

신진주 역세권 도시개발사업

❍ 신진주 역세권 개발을 통한 이용객 편의 등 다목적 복합 신도시 조성

❍ 지역경제 활성화 및 도시의 건전한 발전과 공공복리 증진에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 가좌동 409-2번지 일원

❍사업량 : 961,270㎡【1지구 561,770㎡(58.4%)  2지구 399,500㎡(41.6%)】

❍ 사 업 비 : 4,333억원【1지구 2,672  2지구 1,661】

❍ 사업기간 : 2009~2020년(12년간)

❍ 수용인구 : 20,427명(7,295가구)

❍ 시 행 자 : 진주시장(수용방식)

□ 추진상황

❍ 2009.  3. : 도시개발구역 지정 및 개발계획수립․고시

❍ 2013.  7. : 개발계획(변경) 및 실시계획(변경) 인가

❍ 2014.  4. : 부지조성사업 착공(1지구)

❍ 2014. 10.~2018. 4. : 선 분양용지 분양(1지구, 29필지)

❍ 2017. 12. : 부지조성사업 착공(2지구)

❍ 2018. 12. : 부지조성사업 준공(1지구)

❍ 2019.  3. : 공사완료 공고(1지구)

❍ 2019. 10. : 지구단위계획 변경(종교용지→공공청사)

❍ 2020.  9. : 부지조성사업 준공(2지구)

❍ 2020. 12. : 공사완료 공고 및 구역 해제

❍ 2021.  2. : 사후환경영향평가 용역 시행

❍ 2021.  6. : 건설공사 사후평가 용역 시행

□ 추진계획

❍ 2022.  2. : 건설공사 사후평가 용역 준공

❍ 2024.  2. : 사후환경영향평가 용역 준공

구)진주역 문화거리 조성 사업

구)진주역 철도부지 재생프로젝트 지구와 남강변 도시계획도로를 연결하여 보행자 위주의 문화거리를 조성함으로써 복합문화공원과 국립진주박물관의 활성화를 위한 거점 기반 조성   *프로젝트 3단계 사업

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 구)진주역 문화거리 조성

❍ 위    치 : 진주시 천전동 일원

❍ 사업기간 : 2022~2024년

❍ 사 업 량 : 문화거리 L=852.0m, B=20.0m, 접속도로 4개소, 주차장 등

❍ 사 업 비 : 384억원(보상비 237 공사비 147)

□ 추진상황

❍ 2019.  9. : 구)진주역 철도부지 재생프로젝트 시민설명회 개최

❍ 2020.  3. : 구)진주역 지구단위계획 구역 결정(변경) 고시

❍ 2020.  4. : 국유재산 총괄청 협의 완료(매각승인-기획재정부)

□ 추진계획

❍ 2022.  5. : 기본 및 실시설계 및 각종 조사 용역비 편성(2억원)

❍ 2022. 12. : 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2023.  2. : 착공

❍ 2024. 12. : 준공

초전신도심 개발사업 및 행정복합타운 조성

｢미래 50년 전략사업｣ 관련 경남도에서 지역균형발전을 위한 초전신도심
개발사업을 시행하여 체계적인 도시발전 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 초전동 일원(경상남도 농업기술원)

❍ 사 업 량 : 415,000㎡(125,000평)

❍ 사 업 비 : 5,263억원(보상 2,468 조성비 550 금융비용 54 기타 2,191)

❍ 사업기간 : 2014~2029년(15년간)

❍ 토지이용 : 상업 89,000㎡, 업무 42,000㎡, 복합 49,000㎡, 주상복합 43,000㎡, 기타 192,000㎡

❍ 시행방식 : 도시개발사업, 경남개발공사 시행(舊 종축장부지 도 현물출자)

□ 추진상황

❍ 2013.  8. : 개발추진 기본계획(안) 방침 결정

❍ 2014.  8. : 위․수탁 협약체결(경상남도↔경남개발공사)

❍ 2014. 11.  2015. 10. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 실시

❍ 2016. 11. : 舊 종축장부지 공유재산관리계획 의결(행정재산→일반재산)

❍ 2019. 10. : 초전신도심 1단계(舊종축장부지) 현물출자(경상남도→경남개발공사)

❍ 2019. 10.  2020. 10. : 타당성조사 완료 및 지방재정투자심사(1단계 사업)

❍ 2020. 11. 4. : 중앙투자심사 결과 조건부 승인 통보(행안부→경상남도)(1단계 사업)
(조건사항 : 2단계 사업계획 수립 후 1단계 사업을 포함하여 투자심사 후 추진, 1단계 실시설계 후 2단계 심사)

❍ 2021. 10. : 도시개발구역 지정 제안서 접수(경남개발공사→진주시)(1단계 사업)

□ 추진계획

❍ 2021.  6.~2022. 12. : 1단계사업 구역지정(67,853㎡) 및 실시계획 수립

❍ 2021.  8.~2022.  4. : 초전신도심 전체 개발계획 수립 용역 추진

❍ 2023.  6.~2025. 11. : 1단계사업(舊 종축장부지) 착공 및 준공

❍ 2024.  6.~2026.  5. : 2단계사업 구역지정 및 실시계획 수립

❍ 2026.  7.~2029.  6. : 2단계사업(現 농업기술원) 착공 및 준공

남부내륙고속철도 조기 착공 추진

❍ 침체된 서부경남 경제 활성화와 국가 균형발전을 위한 혁신 동력

❍ 진주 미래 발전비전의 동력으로 남중부 100만 생활권 중심도시로 성장

□ 사업개요

❍ 노    선 : 김천~합천~진주~고성~통영~거제  ※서울~진주(3:30→2:00)

❍ 사업기간 : 2019~2028년[2019 국가균형발전 프로젝트]

❍ 사 업 비 : 4조 9,874억 원(정부재정사업)

❍ 사업내용 : KTX노선 177.9㎞  ※ 설계속도 250㎞/h, 25회/일 운행

□ 추진상황

❍ 2014.  1.~ : 남부내륙철도 재정사업 예비타당성 조사

❍ 2017.  5.  2. : 재정사업평가 자문위원회 개최(조사완료)
- BC(경제성) 0.72, AHP(종합평가) 0.429→재정사업 진행 중단

❍ 2019.  1. 29. : 예비타당성 조사 면제 발표(2019 국가균형발전 프로젝트)

❍ 2019.  4.  3. : 남부내륙고속철도 지원 TF팀 구성

❍ 2019.  9.~2020.  7. : 진주미래 발전비전 구상 용역

❍ 2019. 11.~2021. 10. : 타당성조사 및 기본계획 용역(국토부)

❍ 2020.  2.~2021.  8. : (전략)환경영향평가 용역(국토부)

❍ 2020.  4. 23. : 남부내륙철도 진주경유노선 당위성 제출(시→국토부, 경남도)

❍ 2020.  9.    : (전략)환경영향평가협의회 심의

❍ 2020. 12. 28.~2021.  1. 26. : (전략)환경영향평가 초안 공람

❍ 2021.  1. 26. : (전략)환경영향평가 초안 주민설명회

❍ 2021.  3. 11. : (전략)환경영향평가 초안 공청회

❍ 2021.  8. 19. : (전략)환경영향평가 환경부 협의 완료

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 타당성조사 및 기본계획 고시

❍ 2022.  1. : 대형공사 입찰방법 심의

❍ 2022.  3. : 기본 및 실시설계(2022년 당초예산 확보 : 419억 원 확보)

❍ 2023년 착공/2028년 준공

건 설 하 천 과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	24	1	7	8	6	2
현 원	24	1	8	9	4	2
증 감	-	-	1	1	△2	-

□ 하천현황

(단위 : ㎞)

구 분	개 소	연 장	축제 연장	기개수 연 장	미개수 연 장	개수율 (％)	비 고
계	240	600	772	399	373	52
국가하천	3	73	46	44	2	95
지방하천	55	312	473	272	201	58
소 하 천	182	215	253	83	170	33

□ 배수문 현황

(단위 : ㎞)

관리부서	계	국가하천	지방하천	비 고
진주시	81	28	53
농어촌공사	4	4	-

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진중	시기 미도래	미착공	비 고
계	27	9	18	-	-
예 산 사 업	26	8	18	-	-
비 예산사업	1	1	-	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업 --- 9건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요 성과
진주 뿌리일반 산업단지 조성사업	❍ 위 치 : 정촌면 예하리 일원 ❍ 사 업 량 : 962,459.1㎡ ❍ 사 업 비 : 262,500백만원 ❍ 사업기간 : 2011~2021년 ❍ 유치업종 : 금형, 소성가공, 열처리, 세라믹, 물류 등	❍ 2012. 7. : 타당성조사 및 기본구상 용역 ❍ 2013. 5. : 산업단지계획(개발계획 및 실시계획) 수립용역 착수 ❍ 2013.12. : 특수목적법인(SPC) 설립 ❍ 2014. 9. : 특화단지 지정 고시 (산업부) ❍ 2015. 5. : 산업단지계획 승인․고시 ❍ 2016.12. : 착공 ❍ 2017. 7. : 산업시설용지(91필지) 선 분양 ❍ 2019.12. : 산업단지계획 변경(유치업 종 추가) 고시 ❍ 2020. 7. : 산업단지계획 변경(화석산 지 공원 결정, 유치업종 추가) 신청 ❍ 2020. 9. : 준공 ❍ 2021. 1. : 산업단지계획 변경 승인 및 준공인가 ❍ 2024. 1. : 분양 및 대출 상환 완료

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요 성과
진주시 건설기계 공영주기장 설치	❍ 위 치 : 하촌동 580-1 ❍ 사 업 량 - 주기장설치 A=3,264㎡ (주차대수 : 40~60대) - 사무실 및 화장실 각 1동 ❍ 사 업 비 : 1,782백만원 ❍ 사업기간 : 2020~2021년	❍ 2020. 1. ~ 8. : 토지보상협의 완료 ❍ 2020. 8. : 실시설계 완료 ❍ 2020.12. : 착공 ❍ 2021.12. : 준공
집현면 정평마을 마을만들기 사업	❍ 위 치 : 집현면 정평리 일원 ❍ 사 업 량 - 문화배움터 조성 1식 -공동생활홈 리모델링 1식 - 지역역량강화사업 1식 ❍ 사 업 비 : 465백만원 (국325, 도42, 시98) ❍ 사업기간 : 2019~2021년	❍ 2018. 3. : 사업 공모 심의(1차 경남도) ❍ 2018. 4. : 사업 공모 심의(2차 농축산부) ❍ 2018. 9. : 신규 사업 확정 ❍ 2019. 2. : 한국농어촌공 사 일괄 위․수탁 협약 ❍ 2020. 6. : 기본 및 실시 설계계획 수립 협의 (경남도) 및 승인․고시 (진주시) ❍ 2020. 8. : 착공 ❍ 2021.12. : 준공
갈전천 주변 보행교 설치사업	❍ 위 치 : 금산면 속사리 ~ 충무공동 일원 ❍ 사 업 량 : 보행교 설치 L=36m, B=5.5m ❍ 사 업 비 : 1,500백만원 ❍ 사업기간 : 2021년	❍ 2021. 7. : 착공 ❍ 2021.11. : 준공	단절된 산책로 연결하여 영천강 둘레길 조성
영천강 보행교 설치공사	❍ 위 치 : 충무공동 영천강 일원 ❍ 사 업 량 : 보행교 설치 L=74m, B=3.5m ❍ 사 업 비 : 2,000백만원 ❍ 사업기간 : 2021년	❍ 2021. 7. : 착공 ❍ 2021.12. : 준공	대곡중학교 등 혁신도시 산책로 보행편의를 위한 보행교 설치

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
금산 하천부지 수변형 테마공원 조성	❍ 위 치 : 금산면 송백리 ❍ 사 업 량 : 테마공원 조성 A=61,863㎡ ❍ 사 업 비 : 3,100백만원 ❍ 사업기간 : 2018~2021년	❍ 2021. 3. : 착공 ❍ 2021.11. : 준공	특색 있는 시민휴식공간제공 및 관광기반구축
남강 호탄둔치 정비공사	❍ 위 치 : 호탄동 일원 ❍ 사 업 량 - 하천정비 L=303m - 야외무대 설치 ❍ 사 업 비 : 1,100백만원 ❍ 사업기간 : 2019~2021년	❍ 2019.12. : 착공 ❍ 2021.11. : 준공	시민들에게 안전하고 쾌적한 친수 공간 제공
도동 샛강 환경 개선사업	❍ 위 치 : 상평동 ~ 하대동 ❍ 사 업 량 : L=3.1㎞ ❍ 사 업 비 : 6,700백만원 ❍ 사업기간 : 2019~2021년	❍ 2019. 5. : 착공 ❍ 2021.12. : 준공	오수와 냄새 등 도동샛강의 환경개선을 통한 지역 활성화에 기여
스마트 홍수관리 시스템 구축사업	❍ 위 치 : 남강 일원 ❍ 사 업 량 : 배수문 원격 제어 40개소 ❍ 사 업 비 : 4,350백만원 ❍ 사업기간 : 2020~2021년	❍ 2020.12. : 선도사업 (1차) 착공 ❍ 2021. 8. : 선도사업 (1차) 준공 ❍ 2021.11. : 2차 착공 ❍ 2021.12. : 2차 준공	하천 실시간 모니터링 및 재해예방

□ 추진중 사업 --- 18건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
경남항공 (진주지구) 국가 산업단지 조성사업	❍ 위 치 : 정촌면 예하․대축․화개리 일원 ❍ 사 업 량 : 834,870㎡ ❍ 사 업 비 : 219,800백만원 ❍ 사업기간 : 2011~2022년 ❍ 시 행 자 : 한국토지주택공사 ❍ 유치업종 : 중형민항기 완제품 및 관련 부품 생산업종	□ 추진사항 ❍ 2011. 3. : 국가산업단지 지정 건의서 제출 (경남도→국토부, 지경부) ❍ 2014. 3. : 경남항공 지역특화산업 단지 선정(국토부) ❍ 2014.12. : 항공산업 국가산업단지 확정 발표(국토부) ❍ 2017. 5. : 산업단지계획 승인고시 (국토부) ❍ 2017.11. : 사업시행 협약 체결 (LH, 경남도, 진주시) ❍ 2018. 6. : 편입부지 및 지장물 보상협의 통지 ❍ 2019. 3. : 수용재결(중토위) ❍ 2019. 6. : 토지(사유지) 등기완료 (2019. 5. 공탁신청) ❍ 2019. 9. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022.12. : 준공
경남항공 국가산단 공업용수도 건설사업	❍ 위 치 : 정촌면 대축리 일원 ❍ 사 업 량 - 배 수 지 V=1,600㎥ - 진입도로 L=245.0m ❍ 사 업 비 : 2,900백만원 ❍ 사업기간 : 2020~2022년	□ 추진사항 ❍ 2011. 3. : 국가산업단지 지정 건의서 제출(경남도→국토부, 지경부) ❍2014. 3. : 경남항공 지역특화산업 단지 선정(국토부) ❍2014.12. : 항공산업 국가산업단지 확정 발표(국토부) ❍2017. 5. : 산업단지계획 승인 고시 (국토부) ❍2020.11. : 기본 및 실시설계 용역 착수 ❍2021. 4. : 기본 및 실시설계 용역 완료 ❍2021. 6. : 편입부지 및 지장물 보상 협의 □ 향후계획 ❍ 2022. 3. : 착공 ❍ 2022.12. : 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
경남항공 공공폐수 처리관로 설치사업	❍ 위 치 : 정촌면 예하리 일원 ❍ 사 업 량 : 연계처리 관로 설치 L=2.0㎞ ❍ 사 업 비 : 3,200백만원 (국 57.4%, 도 7.4%, 시 35.2%) ❍ 사업기간 : 2020~2022년	□ 추진사항 ❍ 2011. 3. : 국가산업단지 지정 건의서 제출 (경남도→국토부, 지경부) ❍ 2014. 3. : 경남항공 지역특화산업 단지 선정(국토부) ❍ 2014.12. : 항공산업 국가산업단지 확정 발표(국토부) ❍ 2017. 5. : 산업단지계획 승인 고시 (국토부) ❍ 2020. 3. : 예산(국비)확보 관련 기관 협의(환경부) ❍ 2020.11. : 기본 및 실시설계 용역 착수 ❍ 2021. 4. : 기본 및 실시설계 용역 완료 ❍ 2021. 7. : 설계 안정성 검토 용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 착공 ❍ 2022.12. : 준공
망경탕~ 진주지식 산업센터 간 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 망경동 37-14번지 일원 ❍ 사 업 량 : 도시계획 도로 개설 L=297m, B=20m ❍ 사 업 비 : 8,400백만원 ❍ 사업기간 : 2018~2022년	□ 추진사항 ❍ 2017. 9. : 도시관리계획(도로) 결정요청(→도시계획과) ❍ 2018. 1. : 사업계획(안) 수립 ❍ 2018. 2. : 지방재정투자사업 심사 승인(자체) ❍ 2018.10. : 도시계획도로 결정고시, 실시설계 및 보상조사 착수 ❍ 2019. 8. : 토지 및 지장물 감정평가 ❍ 2020. 6. : 실시계획인가 승인고시 ❍ 2020. 8. : 지장물 철거공사 착공 ❍ 2021. 4. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 지장물 철거 공사 준공 ❍ 2022. 4. : 공사 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
제2바이오 산업 전문 농공단지 조성	❍위 치 : 문산읍 삼곡리 일원 ❍사 업 량 : 231,894㎡ ❍사 업 비 : 74,255백만원 ❍사업기간 : 2021~2026년	□ 추진사항 ❍2020.11. : 1차 수요조사 실시(진흥원) → 24개 업체 입주 희망 ❍2020.12. : 제2바이오산업농공단지 조성 건의(진흥원→시) ❍2021. 3. : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 착수 ❍2021. 9. : 타당성조사 의뢰 □ 향후계획 ❍2022. 6. : 지방재정 투자심사 의뢰 ❍2022. 7. : 농공단지계획(개발계획 및 실시계획)수립 용역 착수 ❍2022.10. : 농공단지 지정계획 반영 요청(경남도) ❍2023.11. : 농공단지계획 승인 ❍2023.12. : 토지보상 협의 ❍2025. 1. : 착공 ❍2026.12. : 준공
가산 일반산업 단지 확장	❍위 치 : 이반성면 가산리 일원 ❍사 업 량 : 산업단지 확장 (A=253,687㎡→296,285㎡) ❍사 업 비 : 42,000백만원 ❍사업기간 : 2021~2022년	□ 추진사항 ❍2021. 6. : 회전익 비행센터 투자 협약 체결(진주시․KAI) ❍2021. 7. : 투자유치위원회 심의․ 의결 ❍2021. 9. : 산업단지계획 변경 신청 및 주민 공람․공고 □향후계획 ❍2021.12. : 관계기관 협의 및 지방 산업단지계획 심의(도) ❍2022. 1. : 산업단지계획(변경) 승인․고시 ❍2022. 2. : 토지보상 및 착공 ❍2022.12. : 공사 완료 및 산업단지 준공인가

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
다목적 아동･복지 센터 건립 (구. 영남 백화점)	❍위 치 : 인사동 9-1번지 ❍사업내용 : 연면적 6,870㎡/1동 〔아동 관련 복지시설 및 지하공영주차장(80 면)〕 ❍사 업 비 : 24,900백만원 (국 50, 도 10, 시 189) ❍사업기간 : 2020~2023년	□ 추진사항 ❍2020. 2.~11. : 타당성조사, 용역 중간보고회, 각종 행정절차 진행 ❍2021. 1.~ 3. : 도시계획시설 실시계획 인가 ❍2021. 4. : 도시재생 인정사업 (위험건축물 재생사업) 선정 * 국․도비 확보 60억원 ❍2021. 6. : 수용재결 신청 (진주시⇒경남도) ❍2021. 4.~ 8. : 건축기획 사전검토 및 건축 설계공모, 건축철거 공사 발주 ❍2021.10. : 부지보상 완료 □ 향후계획 ❍2021.11.~2022. 1. : 기존 건축물 철거(지상부분), 기본 및 실시설계 착수 ❍2022. 5.~6. : 기본 및 실시설계 완료, 공사발주 ❍2022. 7.~2023.12. : 착공 및 준공	구)영남백화점 철거공사 전인접 다가구 3동 민원
진주대첩 광장 조성사업	❍위 치 : 본성동 일원(진주성 촉석문 앞) ❍사업내용 : 19,870㎡ 〔역사공원, 지하 주차장 등〕 ❍사 업 비 : 94,000백만원 (균특전환40 도12 시888) ※ 보상비(시비) 600억원 포함 ❍사업기간 : 2007~2023년	□ 추진사항 ❍2007. 5. : 타당성조사 및 기본계획 수립 ❍2015. 2. : 지방재정중앙투자사업 심사 조건부 승인 ❍2017. 7. : 보상 및 건물철거 완료(부지 108필지 13,000㎡, 건물 81동) ❍2018. 4.~2019. 8. : 문화재 정밀 발굴조사 ❍ 2020. 9. : 문화재 보존방안 심의 완료(매장문화재분과) ❍ 2020.11.~2021. 7. : 현상변경 허가신청(문화재청) 및 심의(3회) 완료 ❍ 2021. 8.~11. : 실시설계 마무리 및 공사발주 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 업체선정 및 공사 착공 ❍ 2023. 6. : 공사 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
안락공원 현대화사업	❍ 위 치 : 장재동 245번지 일원 (안락공원 주변) ❍ 사업내용 29,289㎡⇒131,156㎡ (101,867㎡ 확장) ❍ 사 업 비 : 63,300백만원 ❍ 사업기간 : 2012~2023년	□ 추진사항 ❍ 2013. 3.~9. : 기본계획수립 용역 ❍ 2013. 6. : 편입부지 보상 협의 (63필지 131,156㎡) ※ 현 실적 : 47필지 125,101㎡(95%) ❍ 2019. 4. : 지방재정 투자 심사 (중앙:재심사) 조건부 승인 ⇒민원 최소화, 633억원 ❍ 2020. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수 ❍ 2020. 9.~12. : 총괄․공공건축가 자문(1~6차) 및 한국장례문화진흥원 자문 ❍ 2020.12. : 기본 및 실시설계용역 (중간) 보고회 개최 ❍ 2021. 5. : 도 지방건설기술 심의 ❍ 2021. 8. : 도시계획시설(장사시 설)사업 실시계획인가 고시 ❍ 2021. 9.~10. : 실시설계 마무리 및 공사발주 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 업체선정 및 공사 착공 ❍ 2023.12. : 공사 준공
수곡면 농촌중심지 활성화사업	❍ 위 치 : 수곡면 대천리 일원 ❍ 사 업 량 - 커뮤니티센터 증축 (A=280㎡) - 어울림보행로 조성 (L=2㎞) - 덕수정(국궁장) 리모델링(A=371㎡) ❍ 사 업 비 : 6,000백만원 (국4,200, 도540, 시1,260) ❍ 사업기간 : 2017~2021년	□ 추진사항 ❍ 2016. 1. : 사업공모 심의 (1차 경남도) ❍ 2016. 4. : 사업 공모 심의 (2차 농림축산식품부) ❍ 2016. 9. : 신규 사업 확정 ❍ 2018. 3. : 기본계획수립 협의 (경남도) 및 승인․고시(진주시) ❍ 2019.10. : 시행계획수립 협의 (경남도) 및 승인․고시(진주시) ❍ 2019.12. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022.12. : 준공예정

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
대곡면 농촌중심지 활성화사업	❍ 위 치 : 대곡면 광석리 일원 ❍ 사 업 량 - 대곡문화융합센터 조성 (A=1,140㎡) - 대곡시장 리모델링 (A=446㎡) - 무장애 안전가로 정비 등 (L=680m) ❍ 사 업 비 : 4,847백만원 (국 3,393 도 436 시 1,018) ❍ 사업기간 : 2018~2022년	□ 추진사항 ❍ 2017. 2. : 사업 공모 심의 (1차 경남도) ❍ 2017. 2. : 사업 공모 심의 (2차 농축산부) ❍ 2017. 9. : 신규 사업 확정 ❍2018. 2.: 한국농어촌공사 일괄 위․수탁 협약 ❍2019. 2.: 기본계획수립 협의 (경남도) 및 승인․고시(진주시) ❍ 2021.10. : 시행계획수립 협의 (경남도) 및 승인․고시(진주시) ❍ 2021.10. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022.12. : 준공
금곡면 기초생활 거점 육성사업	❍ 위 치 : 금곡면 두문리 일원 ❍ 사 업 량 - 금곡 거점시장정비 1식 - 앉은뱅이 밀 테마마당 조성 1식 - 금곡행복거점센터 증축 1식 - 게이트볼장 개선 1식 ❍ 사 업 비 : 394,000백만원 (국2,758, 도355, 시827) ❍ 사업기간 : 2019~2023년	□ 추진사항 ❍ 2018. 3. : 사업 공모 심의 (1차 경남도) ❍ 2018. 4. : 사업 공모 심의 (2차 농축산부) ❍ 2018. 9. : 신규 사업 확정 ❍ 2019. 2. : 한국농어촌공사 일괄 위․수탁 협약 ❍ 2020. 9. : 기본계획수립 협의 (경남도) 및 승인․고시(진주시) ❍ 2021.11. : 시행계획수립 협의 (경남도) 및 승인․고시(진주시) □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 착공 ❍ 2023.12. : 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
신촌지구 취약지역 생활여건 개조사업	❍ 위 치 : 일반성면 창촌리 일원 ❍ 사 업 량 - 생활․안전․위생 인프라 - 주택정비지원 - 마을환경개선 - 휴먼케어 및 주민역량 강화 ❍ 사 업 비 : 2,594백만원 (국1,922, 도201, 시471) ❍ 사업기간 : 2020~2023년	□ 추진사항 ❍ 2020. 1. : 사업계획서 제출 및 서면평가(경남도) ❍ 2020. 2. : 대면평가 (국가균형발전위원회) ❍ 2020. 3. : 공모선정 ❍ 2020. 6. : 한국농어촌공사 일괄 위․수탁 협약 ❍ 2021. 8. : 기본계획 수립 및 승인․고시 □ 향후계획 ❍ 2022. 2. : 시행계획 수립 및 승인․고시 ❍ 2022. 2. : 착공 ❍ 2023.12. : 준공
대동지구 취약지역 생활여건 개조사업	❍ 위 치 : 이반성면 대천리 일원 ❍ 사 업 량 - 생활․안전․위생 인프라 - 주택정비지원 - 마을환경개선 - 휴먼케어 및 주민역량 강화 ❍ 사 업 비 : 1,857백만원 (국1,378, 도143, 시336) ❍ 사업기간 : 2021~2024년	□ 추진사항 ❍ 2021. 1. : 사업계획서 제출 및 서면평가(경남도) ❍ 2021. 2. : 대면평가 (국가균형발전위원회) ❍ 2021. 3. : 공모 선정 ❍ 2021. 4. : 한국농어촌공사 일괄 위․수탁 협약 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 기본계획 수립 및 승인․고시 ❍ 2022. 6. : 시행계획 수립 및 승인․고시 ❍ 2022. 6. : 착공 ❍ 2024.12.: 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
가좌천 고향의 강 조성사업 (계 속)	❍ 위 치 : 가좌동~ 내동면 신율리 (대동마을)일원 ❍ 사 업 량 : L=3.1㎞, B=30~50m ❍ 사 업 비 : 20,462백만원 (국12,277 도2,455 시5,730) ❍ 사업기간 : 2010~2022년 (12년간)	□ 추진사항 ❍ 2010. 5. : 고향의 강 선정 ❍ 2013. 7.~2018. 11. : 사업시행(1~5차분) ❍ 2019. 3. : 사업 착공(6차분) □ 향후계획 ❍ 2022. 3. : 사업 준공(총괄)
금곡세경 소하천 정비사업 (계 속)	❍ 위 치 : 금곡면 두문리 일원 ❍사 업 량 : L=1.5㎞, B=10~15m ❍ 사 업 비 : 5,032백만원 (국 50% 시 50%) ❍ 사업기간 : 2018~2022년 (5년간)	□ 추진사항 ❍ 2019. 1. : 실시설계 용역 준공 ❍ 2019. 5. : 보상협의 ❍ 2019. 9. : 착공 (보상 협의 : 10필지, 880㎡) □ 향후계획 ❍ 2022.12. : 준공
명석 우수골 소하천 정비사업 (계 속)	❍ 위 치 : 명석면 우수리 일원 ❍ 사 업 량 : L=1.1㎞, B=8~12m ❍ 사 업 비 : 4,044백만원 (국 50% 시 50%) ❍ 사업기간 : 2019~2023년 (5년간)	□ 추진사항 ❍ 2019. 2. : 실시설계 용역 착수 ❍ 2019.12. : 실시설계 용역 준공 ❍ 2020. 3. : 보상협의(1차) (보상 협의 : 23필지, 3,812㎡) □ 향후계획 ❍ 2021. 2. : 보상협의(2차) (보상 협의 : 26필지, 4,370㎡) ❍ 2021.12. : 착공 ❍ 2023. 6. : 준공
남강둔치 친수공간 조성 (상평동~ 초장동)	❍ 위 치 : 상평동~ 초장동 일원 ❍ 사 업 량 : L=8.6㎞, - 자전거도로 및 보행로, 쉼터, 운동시설, - 조경시설, 다목적 광장 등 ❍ 사 업 비 : 6,800백만원 ❍ 사업기간 : 2021~2022년	□ 추진사항 ❍ 2021. 1. : 실시설계용역 착수 ❍ 2021. 5. : 추경 사업비 확보 ❍ 2021. 8. : 사업 착공(1차분) ❍ 2021.11. : 사업 착공(2차분) □ 향후계획 ❍ 2022. 2. : 사업 완료

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

❍ 경남항공 국가산업단지, 제2바이오산업 전문농공단지 조성, 가산 일반산업단지

확장사업 통하여 지역경제 활성화 및 일자리 창출

❍ 진주대첩광장 조성사업을 통한 역사와 문화공존의 장 마련으로 원도심 활성화

및 삶의 질 향상

❍ 다목적 아동․복지센터 건립으로 지역별 균형 있는

복지체계를 구축하고 부족한 주차 공간을 제공하여 시민들의 정주여건 개선

❍ 농촌 정주여건 개선을 통해 살기 좋은 농촌마을 조성

❍ 하천 정비를 통한 재해예방과 하천 내 주민편의시설 설치로 시민들의 불편사항

해소

⇒ 산업기반 구축과 농촌, 도심의 정주여건 개선으로 지역경제 활성 및 주민들의

삶의 질 향상

2. 총    괄

(단위 : 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	15	550,458	-	-	-	-
일반시책사업	1	42,000	연	중	추	진
주요예산사업	14	508,458	연	중	추	진

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

경남항공(진주지구) 국가산업단지 조성사업

❍ 대한민국 항공산업 G7 도약을 위한 동북아 항공산업 생산거점 육성

❍ 경남의 새로운 미래 50년을 주도할 성장동력 산업 기반시설 확충

□ 사업개요

❍ 위    치 : 정촌면 예하․대축․화개리 일원

❍ 사 업 량 : 산업단지 조성 A=834,870㎡

❍ 사 업 비 : 219,800백만원(용지비 136,500 조성비 83,300)

❍ 사업기간 : 2011~2022년(12년간)

❍ 시 행 자 : 한국토지주택공사

❍ 유치업종 : 중형민항기 완제품 및 관련 부품 생산업종

□ 추진상황

❍ 2011.  3. : 국가산업단지 지정 건의서 제출(경남도→국토부, 지경부)

❍ 2014.  3. : 경남항공 지역특화 산업단지 선정(국토부)

❍ 2014. 12. : 항공 국가산업단지 확정 발표(국토부)

❍ 2017.  5. : 산업단지계획 승인 고시(국토부)

❍ 2017. 11. : 사업시행 협약 체결(LH, 경남도, 진주시)

❍ 2018.  6. : 편입부지 및 지장물 보상협의 통지

❍ 2019.  3. : 수용재결(중토위)

❍ 2019.  6. : 토지(사유지) 등기 완료(2019. 5. 공탁 신청)

❍ 2019.  9. : 착공

□ 추진계획

❍ 2022. 12. : 준공

경남항공 국가산단 공업용수도 건설사업

경남항공 국가산업단지 내 공업용수 적기 공급으로 산업단지 활성화 및 입주기업 지원

□ 사업개요

❍ 위    치 : 정촌면 대축리 일원

❍ 사 업 량 : 배수지 V=1,600㎥, 진입도로 L=245.0m

❍ 사 업 비 : 2,900백만원

❍ 사업기간 : 2020~2022년(3년간)

□ 추진상황

❍ 2011.  3. : 국가산업단지 지정 건의서 제출(경남도→국토부, 지경부)

❍ 2014.  3. : 경남항공 지역특화 산업단지 선정(국토부)

❍ 2014. 12. : 항공 국가산업단지 확정 발표(국토부)

❍ 2017.  5. : 산업단지계획 승인 고시(국토부)

❍ 2020.  2. : 공업용수 공급시설 지원 협의(국토부, 환경부)

❍ 2020. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2021.  4. : 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2021.  6. : 편입부지 및 지장물 보상협의

□ 추진계획

❍ 2022.  3. : 착공

❍ 2022. 12. : 준공

경남항공 국가산단 공공폐수처리관로 설치사업

경남항공 국가산업단지 내 발생되는 오․폐수를 적정 처리로 산업단지 활성화 및 환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 정촌면 예하리 일원

❍ 사 업 량 : 연계처리 관로 설치 L=2.0㎞

❍ 사 업 비 : 3,200백만원(국 57.4% 도 7.4% 시 35.2%)

❍ 사업기간 : 2020~2022년(3년간)

□ 추진상황

❍ 2011.  3. : 국가산업단지 지정 건의서 제출(경남도→국토부, 지경부)

❍ 2014.  3. : 경남항공 지역특화 산업단지 선정(국토부)

❍ 2014. 12. : 항공 국가산업단지 확정 발표(국토부)

❍ 2017.  5. : 산업단지계획 승인 고시(국토부)

❍ 2020.  3. : 예산(국비)확보 관련기관 협의(환경부)

❍ 2020. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2021.  4. : 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2021.  7. : 설계 안정성 검토 용역 착수

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 착공

❍ 2022. 12. : 준공

망경탕~진주지식산업센터 간 도시계획도로 개설

❍ 도심개발로 교통량 증가에 따른 차량통행 분산으로 교통 불편 해소

❍ 도심지역 생활환경 개선 및 지역균형개발

□ 사업개요

❍ 위    치 : 망경동 37-14번지 일원

❍ 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L=297m, B=20m

❍ 사 업 비 : 8,400백만원

❍ 사업기간 : 2018~2022년(5년간)

□ 추진상황

❍ 2017.  9. : 도시관리계획(도로) 결정 요청(→도시계획과)

❍ 2018.  1. : 사업계획(안) 수립

❍ 2018.  2. : 지방재정투자사업 심사 승인(자체)

❍ 2018. 10. : 도시계획도로 결정 고시, 실시설계 및 보상조사 착수

❍ 2019.  8. : 토지 및 지장물 감정평가

❍ 2019.  9. : 보상협의 통지 ※수용절차진행 중

❍ 2020.  4. : 지방재정투자사업 재심사 승인(자체)

❍ 2020.  6. : 실시계획인가 승인고시(진주시 고시 제2020-55호)

❍ 2020.  8. : 지장물 철거 공사 착공

❍ 2021.  4. : 도시계획도로 개설 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 지장물 철거 공사 준공

❍ 2022.  4. : 도시계획도로 개설 공사 준공

제2바이오산업 전문농공단지 조성사업

성장 유망기업의 지역 유치를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출과 미래 지역주력사업을 위한 바이오산업 인프라 구축 및 집적화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 문산읍 삼곡리 일원

❍ 사 업 량 : 농공단지 조성 A=231,894㎡

❍ 사 업 비 : 74,255백만원

❍ 사업기간 : 2021~2026년

□ 추진상황

❍ 2020. 11. : 1차 수요조사 실시(진흥원)→24개업체 입주 희망

❍ 2020. 12. : 제2바이오산업 농공단지 조성 건의(진흥원→시)

❍ 2021.  3. : 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 착수

❍ 2021.  9. : 타당성조사 의뢰

□ 추진계획

❍ 2022.  6. : 지방재정 투자심사 의뢰

❍ 2022.  7. : 농공단지계획(개발계획 및 실시계획)수립 용역 착수

❍ 2022. 10. : 농공단지 지정계획 반영 요청(경남도)

❍ 2023. 11. : 농공단지계획 승인

❍ 2023. 12. : 토지보상 협의

❍ 2025.  1. : 착공

❍ 2026. 12. : 준공

가산 일반산업단지 확장사업

한국항공우주산업(KAI) 회전익 비행센터 설립 투자 협약에 따른 맞춤형 기반시설 조성을 통한 미분양 산업용지 해소 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 이반성면 가산리 1391번지 일원

❍ 사 업 량 : 산업단지 확장(A=253,687㎡→296,285㎡, 증 42,598㎡)

❍ 사 업 비 : 42,000백만원(민자 100%)

❍ 사업기간 : 2021~2022년

□ 추진상황

❍ 2021.  6. : 회전익 비행센터 투자협약 체결(진주시․KAI)

❍ 2021.  7. : 투자유치위원회 심의․의결

❍ 2021.  9. : 산업단지계획 변경 신청 및 주민 공람․공고

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 관계기관 협의 및 지방산업단지계획 심의(경상남도)

❍ 2022.  1. : 산업단지계획(변경) 승인․고시

❍ 2022.  2. : 토지보상 및 공사 착공

❍ 2022. 12. : 공사 완료 및 산업단지 준공인가

다목적 아동․복지센터 건립(구.영남백화점)

❍ 지역별 균형 있는 아동․복지 체계 구축 및 원도심 활성화 도모

❍ 성북동 청사 이전으로 지역 주민의 편의와 효율적인 행정업무 수행

□ 사업개요

❍ 위    치 : 인사동 9-1번지(2,296.2㎡)

❍ 시설규모 : 연면적 6,870㎡/1동

❍ 총사업비 : 24,900백만원(국 50 도 10 시 189)

❍ 주요시설 : 아동관련 복지시설, 성북동 청사 이전, 지하 공영주차장(80면)

□ 추진상황

❍ 2020.  2.~ 11. : 타당성조사, 용역 중간보고회, 각종행정절차 진행

❍ 2021.  1.~  3. : 도시계획시설 실시계획 인가

❍ 2021.  4.      : 도시재생 인정사업(위험건축물 재생사업) 선정
* 국․도비 확보 60억원

❍ 2021.  6.       : 수용재결 신청(진주시⇒경남도)
⇒ 보상협의 78%(141동/202동), 수용재결신청 23%(61동/202동)
※ 수용위원회 개최:2021. 8. 31.  수용개시일:2021. 10. 22.

❍ 2021.  4.~  8. : 건축기획 사전검토 및 건축 설계공모, 건축철거 공사 발주
❍ 2021. 10.      : 부지보상 완료

□ 추진계획

❍ 2021. 11.~2022.  1. : 기존 건축물 철거(지상부분), 기본 및 실시설계 착수

❍ 2022.  5.~  6. : 기본 및 실시설계 완료, 공사발주

❍ 2022.  7.~2023. 12. : 공사 착공 및 준공

진주대첩광장 조성사업

❍ 진주대첩의 역사성 제고 및 호국충절 진주의 얼 고취

❍국난극복의 역사현장을 관광 자원화하여 관광객 증대 및 원도심 활성화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 본성동 일원(진주성 촉석문 앞)

❍ 사 업 량 : 19,870㎡〔역사공원, 지하 주차장 등〕

❍ 사 업 비 : 94,000백만원(균특전환 40 도 12 시 888) ※보상비(시비) 600억원 포함

❍ 사업기간 : 2007~2023년(16년간)

□ 추진상황

❍ 2007.  5. : 타당성조사 및 기본계획 수립

❍ 2015.  2. : 지방재정중앙투자사업 심사 조건부(주차장 규모 재산정) 승인

❍ 2017.  7. : 보상 및 건물철거 완료(부지 108필지 13,000㎡, 건물 81동)

❍ 2018.  4.~2019.  8. : 문화재 정밀 발굴조사

❍ 2020.  9. : 문화재 보존방안 심의 완료(매장문화재분과)

❍ 2020. 11.~2021.  7. : 현상변경허가 신청(문화재청) 및 심의(3회)
- 심의 결과:최종 허가(2021.7.14.)

❍ 2021.  8.~11. : 실시설계 마무리 및 공사발주

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 업체선정 및 공사 착공

❍ 2023.  6. : 공사 준공

안락공원 현대화 사업

❍ 문화․휴식․산책 등의 다목적 생활공간으로의 선진국형 장묘문화 창출

❍쾌적하고 위생적인 최첨단 시설을 갖춘 신개념 화장 및 장묘문화 공간 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 장재동 245번지 일원(안락공원 주변)

❍ 사업내용 : 29,289㎡⇒131,156㎡(101,867㎡ 확장)
〔화장로 7기, 봉안당신축 20,300기, 자연장지 14,096기, 주차장 176대〕

❍ 사 업 비 : 63,300백만원(국 15,900 시 47,400)

❍ 사업기간 : 2012~2023년(12년간)

□ 추진상황

❍ 2013.  3.~  9. : 기본계획수립 용역

❍ 2013.  6. : 편입부지 보상 협의(63필지 131,156㎡) ※ 현 실적 : 47필지 125,101㎡(95%)

❍ 2019.  4. : 지방재정 투자 심사(중앙:재심사) 조건부 승인⇒민원최소화, 633억원

❍ 2020.  5. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2020.  9.~ 12. : 총괄․공공건축가 자문(1~6차) 및 한국장례문화진흥원 자문

❍ 2020. 12. : 기본 및 실시설계용역 (중간)보고회 개최

❍ 2021.  4. : 도시계획시설(장사시설) 결정

❍ 2021.  5. : 경상남도 지방건설기술심의

❍ 2021.  8. : 도시계획시설(장사시설)사업 실시계획인가 고시

❍ 2021.  9.~ 10. : 실시설계 마무리 및 공사발주

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 업체 선정 및 공사 착공

❍ 2023. 12. : 공사 준공

일반농산어촌 개발사업

❍ 농촌 지역의 다양한 자원을 활용하여 지역주민의 기초생활 수준을 높이고

계획적인 개발을 통해 지역별 특화발전과 삶의 질 향상 도모

❍ 농촌 정주여건 개선을 통해 살기 좋은 농촌마을 조성 및 주민 자립 역량 강화

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치	총사업비	2022년예산	사업기간	비고
계	3개 지구	14,787	2,497
수곡면 농촌중심지 활성화사업	대천리 일원	6,000	-	2017~2022	계속
대곡면 농촌중심지 활성화사업	광석리 일원	4,847	984	2018~2022	계속
금곡면 기초생활거점 육성사업	두문리 일원	3,940	1,513	2019~2023	계속

❍ 재    원 : 국비 70%, 도비 9%, 시비 21%

❍ 대상사업 : 기초생활 기반확충, 지역경관개선, 지역역량강화 등

□ 추진계획

❍ 일반농산어촌개발사업(공모) 사업선정방식이 농촌협약으로 전환

⇒ 농촌협약 전제조건* 이행 및 준비

* 5인이상 전담조직, 농촌협약위원회, 중간지원조직 운영
* 대상지역내 마을만들기 사업을 포함한 지방이양사업 연계
* 농촌공간 전략계획 및 농촌생활권 활성화계획수립

농어촌 취약지역 생활여건 개조사업

❍ 국가균형발전위원회 주관 공모사업으로 안전․위생 등 생활 인프라 확충 및       주거환경 개선, 주민역량강화 등 지원을 통해 취약지역 주민의 기본적인 생      활수준 보장

❍ 농촌 정주여건 개선을 통해 살기 좋은 농촌마을 조성 및 주민자립 역량 강화

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치	총사업비	2022년예산	사업기간	비고
계	2개 지구	4,451	1,283
신촌지구 취약지역 생활여건 개조사업	일반성면 창촌리 일원	2,594	726	2020∼2023	계속
대동지구 취약지역 생활여건 개조사업	이반성면 대천리 일원	1,857	557	2021∼2024	계속

❍ 재    원 : 국비 70%, 도비 9%, 시비 21%

❍ 대상사업 : 생활․위생․안전 인프라구축, 주택정비지원, 마을환경개선 등

□ 추진상황

❍ 한국농어촌공사 일괄 위․수탁 협약 완료

□ 추진계획

❍ 기본계획 승인(농림축산식품부) 및 시행계획 수립 후 사업추진

천수교~소망진산 승강기 설치사업

❍ 남강변에서 소망진산 테마공원까지 시민들이 접근성이 어려워 개선 필요하여      승강기 및 구름다리 설치로 시민들의 불편 사항 해소

❍ 소망진산 테마공원의 접근성 향상으로 소망진산 테마공원사업 시너지 효과

기대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 망경동 161-1번지 일원

❍ 사업내용 : 승강기 및 구름다리(L=28m) 설치

❍ 사 업 비 : 1,800백만원

❍ 사업기간 : 2022. 1.~2022. 4.

□ 추진상황

❍ 2020.  1. : 공원조성계획 변경 고시 및 실시계획 인가 신청

❍ 2020.  4. : 소망진산 테마공원 공사 착공
※ 사업비 : 15,180백만원, 면 적 : A=33,398㎡

❍ 2021. 11. : 승강기 설치사업 실시설계 용역 착수

❍ 2021. 12. : 행정절차 이행(공원조성계획 및 실시계획 인가 협의, 하천점용 등)

□ 추진계획

❍ 2022.  1. : 사업 착공

❍ 2022.  3. : 소망진산 테마공원 조성사업 완료

❍ 2022.  4. : 사업 준공

남강 퇴적토 준설사업

❍ 집중호우 시 유수 흐름에 방해가 되는 남강 퇴적토 일부 구간을 준설하여      시민들의 재산과 생명 보호 및 하천정화

❍ 남강 경관 개선 및 부유물질 제거로 인한 악취 제거

❍ 하천 퇴적토 제거로 하상 단면 확보로 집중호우 시 재해 예방

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 상평동~초전동 남강 일원

❍ 사업내용 : 남강 퇴적토 일부 구간 준설(상평교~금산교 L= 5.7㎞)

❍ 사 업 비 : 1,000백만원

❍ 사업기간 : 2022. 1.~2022. 4.

□ 추진상황

❍ 2021. 11. : 실시설계용역 착수

❍ 2021. 12. : 실시설계용역 완료

□ 추진계획

❍ 2022.  1. : 사업 착공

❍ 2022.  4. : 사업 준공

남강 와룡지구 내 친수시설 설치사업

시민들이 즐겨 찾는 남강 와룡지구내 부족한 주민 편의시설을 설치하여 시민 편의 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 금산면 중천리 남강둔치(와룡지구)

❍ 사업내용 : 화장실, 쉼터, 세면대 등 주민편의시설 설치

❍ 사 업 비 : 850백만원

❍ 사업기간 : 2022. 1.~2022. 4.

□ 추진상황

❍ 2016.  2. 22. : 남강 와룡지구 사업 착공(부산지방국토관리청 시행)
※ 사업비 : 15,676백만원

면  적 : 하천환경정비 A=44만㎡

❍ 2019. 10. 29. : 남강 와룡지구 사업 준공 및 이관(부산청→진주시)

❍ 2020. 12. : 와룡지구 체육시설(축구장) 화장실 설치(체육진흥과)

❍ 2021.  9. : 와룡지구 체육시설(야구장) 화장실 추가 설치(체육진흥과)

❍ 2021. 10. : 주민편의시설 실시설계용역 착수

□ 추진계획

❍ 2022.  1. : 사업 착공

❍ 2022.  4. : 사업 준공

하천 정비 및 유지관리 사업

❍ 하천 정비 및 시설 유지관리를 통한 재해사전 예방

❍ 하천 내 친수공간 조성으로 시민편의 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 관내

❍ 사 업 비 : 10,273백만원

❍ 사업내용

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사업 기간	사 업 비						비고
			소 계	국 비		도 비		시 비
합 계			10,273	600	909		8,764
국가하천 유지보수	남강 배수문, 제방 보수 1식 친수시설관리 (남강,가화천) 1식	매년 (지난년도)	600 (300)	600
일반하천 정비사업	문산천 외 54개소	매년 (지난년도)	1,200 (0)		600		600
지방하천 배수문 보수 및 준설, 표지판 정비	문산천 외 54개소	매년 (지난년도)	418 (300)		209		209
기성제 정비	문산천 외 54개소	매년 (지난년도)	200 (300)		100		100
소하천(세천) 정비 및 유지관리	소하천(세천) 정비 43개소	매년 (지난년도)	4,371 (1,951)				4,371
금곡 세경 소하천 정비(전환)	하천정비 L=1.3㎞	2018~ 2022년 (총사업비)	1,612 (5,032)				1,612
명석 우수골 소하천 정비(전환)	하천정비 L=1.1㎞	2019~ 2022년 (총사업비)	1,872 (4,044)				1,872

□ 추진계획

❍ 2022.  2.~ 12. : 하천유지보수사업 시행 및 준공

도  로  과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	20	1	5	7	3	4	공 무 직 12 임 기 제 10
현 원	20	1	6	6	5	2
증 감	-	-	1	△1	2	△2

□ 예산규모

(단위 : 억원)

구 분	2021년	2022년	증 감	비 고
일반회계	428	366	△62

□ 도로 및 교량 현황

(단위 : 노선, 개)

구분	계	고속 국도	국도	국가지원 지 방 도	지방도	시 도		농어촌 도 로
						동지역	읍면지역
도로 (㎞)	1,713 (1,741)	2 (55)	3 (120)	1 (11)	10 (192)	1,405 (463)	23 (185)	269 (715)

□ 시설물안전유지관리특별법 대상 도로시설물 현황

(단위 : 개)

계	1종 교량	2종 교량	3종 교량	옹벽	복개 도로	터널	지하 차도	보도 육교	비고
197	8	12	162	6	1	2	1	5

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진중	시기 미도래	예산부족	비 고
계	37	19	18	-	-
예산 사업	37	19	18	-	-
비예산 사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업 --- 19건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
금산면 현지마을 주변 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 금산면 장사리 ❍ 사 업 량 : L=138m, B=6~8m ❍ 사 업 비 : 580백만원 ❍ 사업기간 : 2019~2021년	❍ 2019. 3. : 실시설계 완료 ❍ 2019. 4. : 보상협의 통지 ❍ 2020.12. : 공사 착공 ❍ 2021. 6. : 공사 준공	장기미집행 도시계획도로 개설로 통행불편 해소 및 주거환경개선
상대동 구법원 뒤편 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 상대동 일원 ❍ 사 업 량 : L=65m, B=8m ❍ 사 업 비 : 600백만원 ❍ 사업기간 : 2019~2021년	❍ 2021. 3. : 실시설계 완료 ❍ 2021. 3. : 공사 착공 ❍ 2021. 8. : 공사 준공	장기미집행 도시계획도로 개설로 통행불편 해소 및 주거환경개선
초장동 장재실 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 초장동 일원 ❍ 사 업 량 : L=46m, B=6m ❍ 사 업 비 : 80백만원 ❍ 사업기간 : 2021~2021년	❍ 2020.12. : 실시설계 완료 ❍ 2021. 2. : 공사 착공 ❍ 2021. 4. : 공사 준공	장기미집행 도시계획도로 개설로 통행불편 해소 및 주거환경개선

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
초전동 초북마을 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 초장동 일원 ❍ 사 업 량 : L=80m, B=6m ❍ 사 업 비 : 800백만원 ❍ 사업기간 : 2018~2021년	❍ 2018. 3. : 실시설계 완료 ❍ 2018. 5. : 보상협의 ❍ 2019. 7. : 착공 ❍ 2021. 4. : 준공	장기미집행 도시계획도로 개설로 통행불편해소 및 주거환경개선
정촌 삼구마을~ 죽봉마을 간 (리도204호선) 도로개설	❍위 치 : 정촌면 화개리 ❍ 사 업 량 : L=150m, B=8m ❍ 사 업 비 : 1,500백만원 ❍ 사업기간 : 2020~2021년	❍ 2020. 1. : 실시설계 완료 ❍ 2020. 5. : 위․수탁협약 (한국철도시설공단) ❍ 2020.10. : 착공 ❍ 2021. 9. : 준공	농촌지역 교통불편 해소로 주민생활환경 개선
정촌 봉동 ~ 내계간 (농도305호선) 도로확․포장	❍위 치 : 정촌면 관봉리 ❍ 사 업 량 : L=282m, B=5m ❍ 사 업 비 : 200백만원 ❍ 사업기간 : 2020~2021년	❍ 2020. 1. : 실시설계 착수 ❍ 2020. 6. : 보상협의 ❍ 2021. 5. : 착공 ❍ 2021. 9. : 준공	농촌지역 교통불편 해소로 주민생활환경 개선
대곡송곡마을 (시도 9호선) 도로 확․포장	❍ 위 치 : 대곡면 와룡리 ❍ 사 업 량 : L=1.3㎞, B=8m ❍ 사 업 비 : 4,000백만원 ❍ 사업기간 : 2019~2021년	❍ 2019. 8. : 실시설계 완료 ❍ 2019. 9. : 보상협의 통지 ❍ 2020. 3. : 착공 ❍ 2021.10. : 준공	농촌지역 교통불편 해소로 주민생활환경 개선
소규모 주민숙원사업	❍ 위 치 : 진주시 관내 ❍ 사 업 량 - 주민숙원사업 : 62개소 - 주민참여예산사업 : 9개소 ❍ 사 업 비 - 주민숙원 : 1,737백만원 - 주민참여예산 : 141백만원 ❍ 사업기간 : 2021년	❍ 2021. 1. : 실시설계 완료 ❍ 2021. 3. : 착공 ❍ 2021. 6. : 준공	정주환경정비 및 주민생활불편 해소

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
도로 덧씌우기	❍ 위 치 - 대신로(구국도33호선) 외 15개소 ❍ 사 업 량 : 덧씌우기 L=10.0㎞ ❍ 사 업 비 : 1,293백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 4. ~ 6.	❍ 2021. 4. : 착공 ❍ 2021. 6. : 준공 - 대신로(구국도33호선) - 초전실내수영장~하수처리장간 - 김시민대교 주변 - 공단광장~상평교간 - 봉곡광장~진주초교 - 이현상가주변 - 이현웰가~구북부파출소 - 신안광장~10호광장 - 중앙병원 주변 - 초전~집현간 구국도 - 호탄동 대경빌라트 앞 - 충무공동지역 - 하대동 남강교 밑 - 동부지역, 서부지역 - 문산읍 구국도2호선 - 개양오거리 주변외 2개소	노후도로 재포장을 통한 쾌적한 도로환경 제공
보도정비	❍ 위 치 : 도동초등학교 주변 외 10개소 ❍ 사 업 량 : 보도교체 L=5.2㎞ ❍ 사 업 비 : 988백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 4. ~ 7.	❍ 2021. 4. : 착공 ❍ 2021. 7. : 준공 - 개양중학교 주변 외 1개소 - 경대병원 주변 - 상봉서동아파트 주변 외 1개소 - 금산푸르지오 앞 - 상봉동 봉원중학교 뒤 - 신안녹지공원 옆 신안로 - 신안동 진양호로 - 상대동 돗골로 - 신안동 남강로 - 도동초등학교 주변	노후도로 재포장을 통한 쾌적한 도로환경 제공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
이반성 수목원앞 회전교차로 설치	❍ 위 치 : 이반성 수목원 ❍ 사 업 량 : 회전교차로 설치 1개소 ❍ 사 업 비 : 280백만원 ❍ 사업기간 : 2020.12.~2021. 4.	❍ 2020.12. : 착공 ❍ 2021. 4. : 준공	회전교차로 설치로 원활한 교통 흐름 유도 및 교통사고 감소
판문오동길 회전교차로 설치	❍ 위 치 : 판문동 ❍ 사 업 량 : 회전교차로 설치 1개소 ❍ 사 업 비 : 261백만원 ❍ 사업기간 : 2020. 12.~2021. 4.	❍ 2020.12. : 착공 ❍ 2021. 4. : 준공	회전교차로 설치로 원활한 교통 흐름 유도 및 교통사고 감소
옥봉삼거리 (현대오일뱅크)앞 가각개선	❍ 위 치 : 옥봉동 ❍ 사 업 량 : 가각확장 L=80m ❍ 사 업 비 : 106백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 3.~5.	❍ 2021. 3. : 착공 ❍ 2021. 5. : 준공	현대오일뱅크 앞 교차로 가각정비로 교통사고 예방 및 원활한 교통 흐름 유도
정촌뿌리산단 앞 가각개선	❍ 위 치 : 정촌면 예하리 ❍ 사 업 량 : 가각확장 L=72m ❍ 사 업 비 : 47백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 3.~5.	❍ 2021. 3. : 착공 ❍ 2021. 5. : 준공	강주연못 앞 교차로 가각정비로 교통사고 예방 및 원활한 교통 흐름 유도
대사IC 회전교차로 추가설치	❍ 위 치 : 이현동 ❍ 사 업 량 : 회전교차로 설치 1개소 ❍ 사 업 비 : 565백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 4.~6.	❍ 2021. 4. : 착공 ❍ 2021. 6. : 준공	회전교차로 추가 설치로 원활한 교통흐름 유도 및 교통사고 감소

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
소규모 주민숙원사업 (도로안전 시설물 유지관리)	❍ 위 치 : 관내 읍․면․동 ❍ 사 업 량 : 35개소, L=6,000m ❍ 사 업 비 : 560백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 1.~12.	❍ 2021. 1. : 설계 ❍ 2021. 3. : 착공 ❍ 2021. 6. : 준공	도로안전 시설물 설치를 통한 주민숙원 해소
도로안전 시설물 유지관리	❍ 위 치 : 진주시 관내 ❍ 사 업 량 - 이반성면 하곡리 외 20개소 반사경 설치공사 외 20개 사업 ❍ 사 업 비 : 400백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 1.~12.	❍ 2021. 1. : 착공 ❍ 2021.12. : 준공	과속방지턱, 반사경, 가드레일 정비 등을 통한 안전한 도로 환경 조성
어린이 보호구역 개선사업	❍ 위 치 : 관내 초등학교 ❍ 사 업 량 - 19개소 과속단속장비 설치 - 10개소 주정차단속장비 설치 - 기타 차선도색, 표지판정비 ❍ 사 업 비 : 1,600백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 1.~12.	❍ 2021. 4. : 착공 ❍ 2021.12. : 준공	어린이보호구역 내 시설물 정비 및 추가 설치를 통한 안전한 통학 환경 조성
교량유지 관리사업	❍ 위 치 : 관내 ❍ 사 업 량 - 12개소 도로시설 점검용역 - 4개소 도로시설 정비공사 ❍ 사 업 비 : 1,340백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 1.~12.	❍ 2021. 4. : 착공 ❍ 2021.12. : 준공	관내 교량, 옹벽 등을 점검하고 정비하여 안전한 도로 통행 환경조성

□ 추진중 사업 --- 18건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
말티고개~장재 도로 확･포장	❍ 위 치 : 초장동 일원 ❍ 사 업 량 : L=1.65㎞, B=25m ❍ 사 업 비 : 25,300백만원 (금회 12,300백만원) ❍ 사업기간 : 2018~2022년	□ 추진사항 ❍ 2019. 3. : 실시설계 완료 ❍ 2019. 6. : 보상협의 통지 ❍ 2020. 3. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 부분 개통 ❍ 2022.12. : 준공
경상대~내동 도로 확․포장	❍ 위 치 : 가좌동~내동면 독산리 일원 ❍ 사 업 량 : L=3.1㎞, B=20m ❍ 사 업 비 : 28,600백만원 (금회 12,490백만원) ❍ 사업기간 : 2018~2022년	□ 추진사항 ❍ 2019.10. : 실시설계 완료 ❍ 2019.12. : 보상협의 통지 ❍ 2020.11. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 부분 개통 ❍ 2022.12. : 준공
초전~대곡 도로 확･포장	❍ 위 치 : 금산교사거리~ 초전동(장흥교) ❍ 사 업 량 : L=0.35㎞, B=20m ❍ 사 업 비 : 8,970백만원 (금회 1,970백만원) ❍ 사업기간 : 2018~2021년	□ 추진사항 ❍ 2019. 2. : 실시설계 완료 ❍ 2019. 4. : 보상협의 통지 ❍ 2020. 1. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021. 12. : 준공
명석 ~ 집현 우회도로 개설	❍ 위 치 : 명석면 우수리~ 집현면 사촌리 ❍ 사 업 량 : L=2.12㎞, B=9m ❍ 사 업 비 : 14,600백만원 (금회 4,100백만원) ❍ 사업기간 : 2018~2022년	□ 추진사항 ❍ 2019. 2. : 실시설계 완료 ❍ 2019. 5. : 보상협의 통지 ❍ 2020. 1. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 6. : 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
10호광장 주변 ~ 평거주공아파트간 (중로2-7호선) 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 평거동 일원 ❍ 사 업 량 : L=0.9㎞, B=15m ❍ 사 업 비 : 15,800백만원 (금회 3,888백만원) ❍ 사업기간 : 2018~2022년	□ 추진사항 ❍ 2019.12. : 실시설계 완료 ❍ 2019.12. : 보상협의 통지 ❍ 2020.10. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 6. : 준공
10호광장동편 ~ 여중오거리간 (중로1-56호선) 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 신안동 일원 ❍ 사 업 량 : L=0.95㎞, B=20m ❍ 사 업 비 : 19,400백만원 (금회 6,086백만원) ❍ 사업기간 : 2018~2022년	□ 추진사항 ❍ 2019.12. : 실시설계 완료 ❍ 2019.12. : 보상협의 통지 ❍ 2020.10. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 6. : 준공
주약동 중로2-3호선 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 주약동 일원 ❍ 사 업 량 : L=0.32㎞, B=15m ❍ 사 업 비 : 8,800백만원 (금회 5,100백만원) ❍ 사업기간 : 2020~2023년	□ 추진사항 ❍ 2020. 2. : 실시설계 착수 ❍ 2020. 6. : 보상협의 통지 ❍ 2021. 8. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 8. : 준공
금산삼거리 ~ 지방도 (1009호선)간 도로개설	❍ 위 치 : 금산면 중천리 ❍ 사 업 량 : L=0.4㎞, B=20m ❍ 사 업 비 : 10,000백만원 (금회 4,920백만원) ❍ 사업기간 : 2019~2022년	□ 추진사항 ❍ 2019.11. : 실시설계 착수 ❍ 2020. 5. : 보상협의 통지 ❍ 2020.10. : 도시계획시설결정 ❍ 2021. 1. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 6. : 준공
부흥교~장흥교간 연결도로 확․포장	❍ 위 치 : 초장동, 집현면 장흥리 일원 ❍ 사 업 량 : L=1.2㎞, B=10m ❍ 사 업 비 : 2,800백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 1.~2021. 12.	□ 추진사항 ❍ 2021. 1. : 실시설계 착수 ❍ 2021. 3. : 소규모 영향평가 ❍ 2021. 4. : 보상협의 ❍ 2021. 5. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
남강변 다목적문화센터 주변 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 망경동 일원 ❍ 사 업 량 : L=0.45㎞, B=8~20m ❍ 사 업 비 : 17,000백만원 (금회 7,300백만원) ❍ 사업기간 : 2021~2023년	□ 추진사항 ❍ 2021. 4. : 지방재정투자심사 ❍ 2021. 5. : 보상업무 위수탁 ❍ 2021. 6. : 실시설계 착수 ❍ 2021. 7. : 시설 결정 □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 실시계획 인가 ❍ 2022. 7. : 착공 ❍ 2023.12. : 준공
진주교~갤러리아 백화점간 보행로정비	❍ 위 치 : 중앙동 일원 ❍ 사 업 량 : 보도정비 L=1.4㎞ ❍ 사 업 비 : 2,233백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 7.~2022. 3.	□ 추진사항 ❍ 2020.11. : 투자심사 승인 ❍ 2021. 2. : 총괄계획가 자문 ❍ 2021. 4. : 경관심의 ❍ 2021. 7. : 착공 및 주민 설명회 개최 □ 향후계획 ❍ 2022. 3. : 준공
망경초등학교 주변 환경개선	❍ 위 치 : 망경동 일원 ❍ 사 업 량 : 보도확장 L=100m ❍ 사 업 비 : 202백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 6.~2021.11.	□ 추진사항 ❍ 2021. 4. : 투자심사 및 공유재산 심의 ❍ 2021. 6. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 준공	명도소송 중, 강제집행 후 (건축물 철거) 공사 가능
상평교주변 교통체계개선	❍ 위 치 : 호탄동 일원 ❍ 사 업 량 : 차로확장 L=335m ❍ 사 업 비 : 582백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 8.~2021.11.	□ 추진사항 ❍ 2021. 5. : 전문기관 자문 ❍ 2021. 6. : 관련기간 협의 ❍ 2021. 7. : 특별교부세 교부 ❍ 2021. 8. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
천수교~ 신안현대 아파트간 보도개설	❍ 위 치 : 신안동 일원 ❍ 사 업 량 : 보도개설 L=253m ❍ 사 업 비 : 153백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 7.~2021.10.	□ 추진사항 ❍ 2021. 4. : 실시설계 ❍ 2021. 7. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 준공
교통사고 잦은곳 개선 (천수교, 희망교)	❍ 위 치 : 신안동 외 1 ❍ 사 업 량 : 교차로 및 차로개선, 전방신호등 설치 등 ❍ 사 업 비 : 380백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 8.~2021.10.	□ 추진사항 ❍ 2021. 2. : 사업확정 (행안부) ❍ 2021. 6. : 실시설계 ❍ 2021. 7. : 전문기관(도로 교통공단) 설계 검토 완료 ❍ 2021. 9. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 준공
금산교 접속차로 개량공사	❍ 위 치 : 금산교 ❍ 사 업 량 - 차로 확장 L=150m, B=3.55m - 보행로 확장 L=250m, B=3.45m ❍ 사 업 비 : 10,300백만원 ❍ 사업기간 : 2020.12.~2022.12.	□ 추진사항 ❍ 2020.12. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 4. : 준공	차량 통행량이 많아 교량 상부작업 시 시민불편 발생
나불천 복개도로 보수공사	❍ 위 치 : 신안 나불천 ❍ 사 업 량 - 콘크리트 단면보수 1,074.2㎡ - 균열 수지주입 870.7m ❍ 사 업 비 : 300백만원 ❍ 사업기간 : 2021.11.~2022. 4.	□ 추진사항 ❍ 2021. 4. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 준공	복개천 내 작업으로 갈수기에만 공사 가능
진양교 보행로 설치사업	❍ 위 치 : 진양교 ❍ 사 업 량 : 보행로 설치 1식 (B=3.5m, L=40m) ❍ 사 업 비 : 500백만원 ❍ 사업기간 : 2022. 1.~2022. 4.		설계 중 (2022. 1. 착공예정)

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

❍ 미래지향적 도시 도로 체계 구축

- 지역 발전과 연계하여 시가지 내 주요 간선 도로 확․포장으로 교통 불편을

해소하고 장기미집행 도시계획도로의 계획적 투자로 원활한 교통환경 조성

❍ 농촌 지역 도로망 확충으로 지역균형 발전 도모

- 농촌 지역의 도로 확․포장으로 교통불편 해소

❍ 노면 불량 차도 등 정비사업으로 쾌적한 도로환경조성

- 도로유지관리 및 위험도로 개선사업으로 안전하고 쾌적한 도로 조성

2. 총    괄

(단위 : 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	9	28,491	5	-	4	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	9	28,491	5	-	4	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

말티고개~장재 도로 확․포장

초장지구 도심개발로 인한 통행량 증가에 따라 교통체증이 유발되어 도시계획도로(대로3-11호선) 확․포장으로 교통난 해소는 물론 지역균형 발전 도모 및 지역 주민숙원 해소

□ 사업개요

❍ 위    치 : 초장동 일원

❍ 사업기간 : 2018~2022년

❍ 사 업 량 : 도로 확․포장 L=1.65㎞, B=12m→25m(4차선)

❍ 사 업 비 : 25,300백만원

□ 추진상황

❍ 2018.  8.~ 12. : 행정절차 이행(지방재정투자심사, 중기지방재정계획 반영 등)

❍ 2019.  6. : 편입토지 보상 협의 통보

❍ 2019.  7. : 경상남도 지방건설기술심의 완료

❍ 2020.  3. : 착공

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 부분 준공

❍ 2022. 12. : 전체 준공

경상대~내동 도로 확․포장

남서부권 여건 변화(항공산단, 역세권, 정촌산단 등)로 시내 우회 노선인 도로(시도1호선)를 확․포장하여 교통난 해소 및 지역주민 민원 해소

□ 사업개요

❍ 위    치 : 가좌동~내동면 독산리 일원

❍ 사업기간 : 2018~2022년

❍ 사 업 량 : 도로 확․포장 L=3.1㎞, B=10m→20m(4차선)

❍ 사 업 비 : 28,600백만원(시비 100%)
* 공사비 14,664, 감리비 1,800, 설계비 228, 부대비 38, 토지보상비 11,870

□ 추진상황

❍ 2018.  9.~ 12. : 행정절차 이행
(지방재정투자심사, 중기지방재정계획 반영 등)

❍ 2019. 10. : 기본 및 실시설계용역 완료

❍ 2019. 12. : 1차 편입토지 및 지장물 보상협의(88필지, 19,553㎡)

❍ 2020.  4. : 2차 편입토지 및 지장물 보상협의(36필지, 12,205㎡)
※ 보상률 80%

❍ 2020. 11. : 착공

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 부분 준공

❍ 2022. 12. : 전체 준공

남강변 다목적 문화센터 주변 도시계획도로 개설

남강변 다목적 문화센터 건립, 진주지식산업센터의 건립, 구)진주역 지구 단위계획구역 개발, 강남지구 도시재생 뉴딜사업 등에 따른 교통량 증가 대비 및 개발사업 이용활성화를 위한 도시계획도로를 개설하여 노후된 도심생활환경 개선과 지역균형발전 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 망경동 일원

❍ 사업기간 : 2021~2023년

❍ 사 업 량 : 도로 개설 L=445m, B=8~20m

❍ 사 업 비 : 17,000백만원(시비 100%)
* 공사비 4,890, 설계비 100, 부대비 10, 토지보상비 12,000

□ 추진상황(진도율 10%)

❍ 2021.  2. : 주거환경개선사업지구 정비계획(변경) 수립 보고(도시재생과)

❍ 2021.  4. : 지방재정 투자심사(자체)

❍ 2021.  5. : 보상업무 위수탁 협약 체결(한국부동산원)

❍ 2021.  6. : 실시설계용역 착수

❍ 2021.  7. : 도시계획시설 결정

□ 추진계획

❍ 2021.  8. : 실시계획인가 신청

❍ 2021. 10. : 보상협의 및 건축물 철거

❍ 2022.  7. : 착공

❍ 2023. 12. : 준공

주약동 중로2-3호선 도시계획도로 개설

주약동 일원 도시계획도로 미개설로 인해 주민생활 불편과 주변 생활 환경을 저해하고 있어, 도로를 개설하여 주민생활 불편을 해소하고 도심 주거환경 개선 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 주약동 일원

❍ 사업기간 : 2020~2023년

❍ 사 업 량 : 도로 개설 L=320m, B=15m(자전거교량 1개소)

❍ 사 업 비 : 8,800백만원(시비 100%)
* 공사비 4,335, 설계비 77, 부대비 15, 토지보상비 4,373

□ 추진상황(진도율 10%)

❍ 2020.  2. : 실시설계용역 착수

❍ 2020.  6. : 보상협의(11필지, 3,648㎡)  ※ 보상율 90%

❍ 2020.  7. : 실시계획인가 고시

❍ 2020.  8. : 지방재정투자심사

❍ 2020. 11. : 실시계획인가(변경) 고시

❍ 2021.  8. : 착공

□ 추진계획

❍ 2023.  8. : 준공

하촌교차로~하촌마을 간 도로 확․포장

하촌교차로~하촌마을 간 도로를 확장하여 말티고개~장재도로 확장 및 하촌 회전교차로 설치로 인해 증가하는 교통량을 집현면 사촌방향으로 분산하고 보도가 없어 생활불편을 겪고 있는 하촌마을 간 보행환경 개선 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 초장동(하촌동) 일원

❍ 사업기간 : 2022~2024년

❍ 사 업 량 : 도로 개설 L=1.0㎞, B=8m→20m

❍ 사 업 비 : 11,800백만원(시비 100%)

□ 추진상황

❍ 2021. 10. : 지방재정 투자심사

□ 추진계획

❍ 2022.  1. : 실시설계용역 시행

❍ 2022.  5. : 편입토지 및 지장물 보상

❍ 2022.  7. : 착공

❍ 2024. 12. : 준공

도시계획도로 개설

❍ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 시가지내 주거환경 개선

❍ 차량 및 주민 통행 불편 해소로 주민생활 편익 증진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 관내

❍ 사 업 량

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사업비	기투자	2021	2022	2023이후
계	L=6.85㎞	100,550	31,910	42,840	15,910	9,890
말티고개 ~ 장재 도로 확․포장	L=1.65㎞ B=25m	25,300	13,000	12,300
경상대 ~ 내동 도로 확․포장	L=3.1㎞ B=20m	28,600	15,210	12,490	900
남강변 다목적 문화센터 주변 도시계획도로 개설	L=445m B=8~10m	17,000		7,300	7,310	2,390
주약동 중로2-3호선 도시계획도로 개설	L=320m B=15m	8,800	3,700	5,100
판문 중로2-7호선 도시계획도로 개설	L=120m B=15m	2,200		200	2,000
문산 덕남마을 도시계획도로 개설	L=160m B=8m	1,950		550	1,400
소로문산2-9,2-10호선 도시계획도로 개설	L=180m B=8m	1,900		600	300	1,000
소로문산2-11호선 도시계획도로 개설	L=125m B=8m	1,500		600	300	600
소로금산2-9호선 도시계획도로 개설	L=120m B=8m	1,200		900	300
소로금산3-4호선 도시계획도로 개설	L=223m B=6~8m	1,600		500	1,100
소로남강3-4호선 도시계획도로 개설	L=102m B=8m	1,500			300	1,200
대로 1-4호선 도시계획도로 개설	L=484m B=35m	9,000		2,300	2,000	4,700

□ 추진계획

❍ 연차별, 단계별 사업추진

장기미집행 도시계획시설(도로) 정비 계획

2020년 7월 1일 장기미집행 시설의 자동실효(일몰제)에 대비하여 도시 계획시설(도로) 정비 계획

□ 주요내용

❍ (관련근거) 장기미집행 도시계획시설 실효 일몰제
- 국토계획법 제48조(도시․군계획시설의 실효 등) 제1항

❍ 시설결정 실효 시기(실효 기산일)
- 2000년 7월 1일 이전 결정 고시 : 2020년 7월 1일
※ 2000년 7월 2일 이후 결정 고시 : 고시일로부터 20년 되는 다음날

▷ 국토계획법 법률안 일부개정 : 2019. 8. 20.[2020. 1. 1. 시행]
⇒ 장기미집행시설은 실시계획 고시일로부터 5년 이후 실효
⇒ 시행자가 토지면적의 2/3 이상을 확보한 경우 7년 이후 실효
⇒ 시행자가 모든 토지 및 물건을 확보한 경우 효력유지

□ 추진현황 및 추진계획

❍ 2019.  3. : 장기미집행 도시계획시설 정비 및 관리방안 수립 용역(도시계획과)

❍ 2019.  4.~ 9. : 미집행 도시계획시설 전수 조사 및 존치여부 결정

❍ 2019. 10. : 존치결정 시설 실시계획 인가 용역 발주

❍ 2020.  3.~ 6. : 존치결정 장기미집행시설 실시계획 인가 신청

❍ 2020.  6. : 장기미집행 실효고시 및 존치결정시설 실시계획인가고시 완료

❍ 2020.  7.~2025.  6. : 보상협의 통지 및 사업시행

□ 도시계획시설(도로) 존치현황

(단위 : ㎢)

합 계		10년미만		10년이상 ~20년미만		20년이상 (장기미집행)		비고
개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적
58	231	12	22	10	30	36	179

□ 존치시설 사업 추진현황

(단위 : 억원)

합 계		기 완료		추진 중		미집행		비고
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
58	1,696	19	168	16	1,028	23	500

□ 미집행시설 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

합 계		집 행 계 획						비 고
		2021년까지		2022년		2023년이후
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
23	500	7	130	5	100	11	270

□ 추진방안

❍ 장기미집행시설 23개소에 대해서는 인가일(2020. 6.30.)로부터 5년간 실효가 유예됨에 따라 2025. 6월까지 소유권 확보가 필요

⇒ 총사업비 500억 원 중 2022년 당초예산 100억 원 확보하고, 2025년까지 연차적으로 사업비 확보하여 장기미집행시설 해제 대비

시도 및 농어촌도로 확․포장

지역주민들의 교통 불편 해소 및 주민생활 편익 증진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 관내

❍ 사업기간 : 2022.  1.~2022. 12.

❍ 사 업 량

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사업비	기투자	2021	2022	2023이후
계	L=4,060m	9,038	0	0	9,038	0
명석 팔미마을 (시도16호선) 도로 확장	L=100m	300			300
명석 신기마을(면도102호선) 도로 확․포장	L=1,400m	200			200
집현 냉정마을(면도 103호선)도로 확포장공사	L=500m	500			500
정촌 죽봉마을(리도203호선) 도로 확․포장	L=100m	1,000			1,000
정촌 화원마을(리도206호선) 도로 확․포장	L=320m	200			200
지수 덕암마을(농도 307호선) 도로 확․포장	L=240m	300			300
이반성 계룡마을(농도309호선) 도로 확․포장	L=250m	300			300
미천 정호마을(농도302호선) 도로 확․포장	L=230m	300			300
주민불편해소사업	86개소	5,246			5,246
주민참여예산사업	3개소	130			130
댐주변지역지원사업		562			562

□ 추진계획

❍ 2022. 1. : 실시설계 용역

❍ 2022.  4.~ 12. : 착공 및 준공

도로유지관리사업

관내 도로의 보수 및 시설개선을 위한 유지관리 사업을 시행하여 시민에 쾌적하고 안전한 도로환경 제공

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 관내

❍ 사업기간 : 2022년

❍ 사 업 비 : 13,753백만원

❍ 사 업 량

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요		비고
	사 업 량	사업비
3개 사업		13,753
도로보수 및 유지 관리	∘위치 : 관내 일원(연중) ∘도로 배수 개선, 인도정비, 긴급보수, 풀베기, 표지판 외	6,410
도로덧씌우기 사업	∘위치 : 칠암동 통계청사거리~동성상가 외 59개소 ∘덧씌우기 60개소	5,738
위험도로개선(교통 사고 잦은곳 개선)	∘위치 : 집현면 덕성 침수도로 외 6개소 ∘상습침수 도로 개선, 배수로 개선 등	1,605

□ 추진계획

❍ 2022.  1.~  2. : 실시설계

❍ 2022.  3.~ 12. : 공사 시행 및 준공

도로안전시설물 유지관리

관내 도로의 안전한 통행환경 조성을 위해 도로안전 시설물 보수 및 신설을 위한 유지관리 사업을 시행하여 시민에게 쾌적하고 안전한 도로환경 제공

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 관내

❍ 사업기간 : 2022년

❍ 사 업 비 : 1,200백만원

❍ 사 업 량

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요		비고
	사 업 량	사업비
3개 사업		1,200
위험도로 가드레일 설치	∘위치 : 관내 일원(연중) ∘낙하위험도로 가드레일 설치 등	600
미끄럼방지 포장 및 낙석방지시설 설치	∘위치 : 관내 일원(연중) ∘굴곡도로, 급경사지 정비 등	400
과속방지턱, 반사경 설치	∘위치 : 관내 일원(연중) ∘보행자 보호, 급커브길 반사경 설치 등	200

□ 추진계획

❍ 2022.  1.~  2. : 실시설계

❍ 2022.  3.~ 12. : 공사 시행 및 준공

시 민 안 전 과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원 현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	전문경력관나군
정 원	26	1	6	9	5	4	1
현 원	24	1	6	7	5	5
증 감	△2			△2		1	△1

□ 민방위대 현황

(단위 : 대, 명)

총 계		통․리대		직장대		지원대
대수	대원수	대수	대원수	대수	대원수	대수	대원수
876	20,469	811	18,777	64	1,612	1	80

□ 민방위 시설․장비 현황

시 설 현 황		장 비 현 황
비상급수시설	비상대피시설	민방위장비	화생방장비	방독면장비
55개소/9,921톤	146개소/1.160㎢	6종/2,329개	7종/391개	1종/20,257개

□ 민방위 교육장 현황

위 치	규 모	준 공	조 성 비
상봉대룡길 42	건 물 : 720㎡ 주 차 장 : 1,020㎡ 수용인원 : 350명	2010. 6. 28.	사업비 : 959백만원 - 국비 150 - 도비 105 - 시비 704

□ 배수장 및 우수저류시설 관리 현황

구분	시 설 명	위 치		규 모	시설물관리자
		읍면	동리		소 속	성 명
	합 계			배수펌프장 10개소 우수저류시설 1개소
1	삼곡배수장	문산	삼곡	- 전동기 350마력 × 2대 - 원동기 320마력 × 3대 - 펌 프 1,200mm × 5대	시민안전과	박만종
2	가방배수장	금산	가방	- 전동기 75마력 × 3대 - 펌 프 500mm × 3대	시민안전과	이재오
3	월평배수장	집현	장흥	- 원동기 320마력 × 1대 150마력 × 1대 - 펌 프 850mm × 1대 1,200mm × 1대	시민안전과	김상도
4	향양배수장	집현	덕오	- 전동기 175마력 × 3대 - 펌 프 700mm × 3대	시민안전과	이창수
5	삭평배수장	명석	관지	- 원동기 400마력 × 2대 450마력 × 2대 - 펌 프 1,200mm × 2대 900mm × 2대	시민안전과	김남헌
6	덕천강배수장	수곡	원내	- 전동기 100마력 × 2대 60마력 × 1대 - 펌 프 800mm × 2대 600mm × 1대	시민안전과	박창민
7	나불천배수장	진주시	성북 (인사)	- 전동기 500마력 × 7대 - 펌 프 1,200mm × 7대	시민안전과	전재만
8	장대배수장	진주시	중앙 (옥봉)	- 전동기 60마력 × 1대 - 원동기 320마력 × 2대 - 펌 프 500mm × 1대 1,200mm × 2대	시민안전과	곽수호
9	상대배수장	진주시	상평	- 전동기 330마력 × 3대 - 펌 프 1,200mm × 3대	시민안전과	곽수호
10	상평배수장	진주시	초장	- 전동기 300마력 × 3대 - 원동기 320마력 × 4대 - 펌 프 1,200mm × 7대	시민안전과	구상훈
11	상평우수 저류시설	진주시	상평	- 전동기 250마력 × 1대 120마력×1대 - 펌 프 800mm × 7대 500mm × 7대	시민안전과	정효윤

□ 재난안전상황실 장비 현황

품 명	규 격	단위	수량	비 고
남강댐 현황판	600×1,500㎜	식	1
방재전산서버		set	1	강우량 9개소, AWS 15개소, 수위계 7개소 데이터 수집
강우상황 표출기		set	2	LCD 1대, 현황판 1개
팩스기	신도리코 VN/M617	대	1
전화기		대	13
상황용 PC		대	13	컴퓨터 13대
배수장원격제어설비		대	6	나불천, 상평, 삼곡, 가방, 상대, 상평배수장우수저류시설
LED디스플레이장치		대	1
CCTV		대	37	국가 및 지방하천의 위험지역 관리, 교량 수위, 배수장 유수지 관측
지진가속도계측기		식	1	시청사
영상회의 장비		식	1	영상 코덱(1), 카메라(1), 오디오믹서(1), 오디오앰프(2), 전원공급장치(1), 천정스피커(6), 의장마이크(1), 무선마이크(3)

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진중	시기 미도래	미착공	비 고
계	28	18	10	-	-
예 산 사 업	26	18	8	-	-
비예산사업	2	-	2	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업 --- 18건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
지수천(상동마을) 수해복구공사	❍ 위 치 : 지수면 청담리 일원 ❍ 사 업 량 : 전석쌓기 A=339㎡ ❍ 사 업 비 : 66백만원(재난관리기금) ❍ 사업기간 : 2020. 12.~2021. 1.	❍ 2020.12.16. : 착공 ❍ 2021. 1.22. : 준공	재해 사전 예방
지수천(청담마을) 수해복구공사	❍ 위 치 : 지수면 청담리 일원 ❍ 사 업 량 : 전석쌓기 A=458㎡ ❍ 사 업 비 : 114백만원(재난관리기금) ❍ 사업기간 : 2021. 3.~4.	❍ 2020. 3.11. : 착공 ❍ 2021. 4.27. : 준공	재해 사전 예방
반성지구 재난 대응조기경보 시스템 구축사업	❍ 위 치 : 사봉면 방촌리 일원 ❍ 사 업 량 : 시스템 구축 1식 ❍ 사 업 비 : 350백만원 (국175, 도53, 시122) ❍ 사업기간 : 2021. 2.~5.	❍ 2021. 2. 1. : 착공 ❍ 2021. 5. 2. : 준공	재해 사전 예방
남강댐 치수능력증대사업 남강유역 방류량 증대 시 홍수피해정도 예측학술용역	❍ 위 치 : 진주시 관내 일원 ❍ 과 업 량 : 극한(PMF)방류 시 피해분석 및 대책,대응방안수립 1식 ❍ 용 역 비 : 22백만원 (재난관리기금) ❍ 용역기간 : 2021. 2~5. ❍ 용 역 사 : 경상국립대학교 산학협력단	❍ 2021. 2. 3. : 착수 ❍ 2021. 5. 3. : 완료	안전도시 구현

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
지수천(청담교) 재해위험지 정비공사	❍ 위 치 : 지수면 청담리 일원 ❍ 사 업 량 : 블록쌓기 L=115m ❍ 사 업 비 : 94백만원 (재난관리기금) ❍ 사업기간 : 2021. 3.~5.	❍ 2021. 3.11. : 착공 ❍ 2021. 5. 6. : 준공	재해 사전 예방
내동 유동마을 외 1개소 상습 침수지역 차단시설 설치공사	❍ 위 치 : 문산읍 옥산리 일원 ❍ 사 업 량 : 차단시설 3개소 ❍ 사 업 비 : 11백만원 (재난관리기금) ❍ 사업기간 : 2021. 4.~5.	❍ 2021. 4.13. : 착공 ❍ 2021. 5. 6. : 준공	재해 사전 예방
문산 정동마을 재해위험지 정비공사	❍ 위 치 : 문산읍 옥산리 일원 ❍ 사 업 량 : 세천정비 L=100m ❍ 사 업 비 : 30백만원 (재난관리기금) ❍ 사업기간 : 2021. 3.~5.	❍ 2021. 3.26. : 착공 ❍ 2021. 5.25. : 준공	재해 사전 예방
장재․장흥 자연재해위험 지구정비사업 문화재시굴조사용역	❍ 위 치 : 장재동, 집현면일원 ❍ 과 업 량 : 문화재시굴조사 1식 ❍ 용 역 비 : 50백만원 ❍ 용역기간 : 2021. 4.~6. ❍ 용 역 사 : (재)극동문화재연구원	❍ 2021. 4. 7. : 착수 ❍ 2021. 6.10. : 완료	사업대상지 문화재시굴조사
대곡 신흥마을 재해위험지 정비공사	❍ 위 치 : 대곡면 단목리 일원 ❍ 사 업 량 : 배수로정비 L=100m ❍ 사 업 비 : 30백만원 (재난관리기금) ❍ 사업기간 : 2021. 4.~6.	❍ 2021. 4.16. : 착공 ❍ 2021. 6.14. : 준공	재해 사전 예방
진주시 남강댐수해피해 산정 조사 용역	❍ 위 치 : 내동면 삼계리 일원 ❍ 과 업 량 : 수해피해 산정 1식 ❍ 용 역 비 : 21백만원 (재난관리기금) ❍ 용역기간 : 2021. 3.~6. ❍ 용 역 사 : ㈜서경손해사정	❍ 2021. 4. 1. : 착수 ❍ 2021. 6.18. : 완료	피해주민 환경분쟁 조정신청

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
소규모공공시설 실태조사 (마을진입로) 용역	❍ 위 치 : 진주시 관내 일원 ❍ 과 업 량 : 마을진입로 조사 1식 ❍ 용 역 비 : 22백만원 (재난관리기금) ❍ 용역기간 : 2021. 5.~7. ❍ 용 역 사 : ㈜하존이앤씨	❍ 2021. 5.14. : 착수 ❍ 2021. 7.12. : 완료	재해 사전 예방, 마을 진입로 조사 34개소
향양자연 재해위험지구 정비사업 분석 평가 용역	❍ 위 치 : 미천면 벌당리 일원 ❍ 과 업 량 : 분석평가 1식 ❍ 용 역 비 : 175백만원 ❍ 용역기간 : 2020. 3.~2021. 7. ❍ 용 역 사 : 양산시 화성엔지니어링㈜	❍ 2020. 3.13. : 착수 ❍ 2021. 7. 4. : 완료	사업 분석 평가
재난 예･경보시설 [음성통보, 강우관측] 교체물품 구매설치	❍ 위 치 : 수곡 원외마을 외 9개소 ❍ 사 업 량 : 음성통보장치 1식 강우량계 교체 1식 강우량계 신설 1식 ❍ 사 업 비 : 87백만원 ❍ 사업기간 : 2021. 3.~7.	❍ 2021. 5.10. : 착공 ❍ 2021. 7. 9. : 준공	재난 예경보 시설 설치
장재․장흥 자연재해위험지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	❍ 위 치 : 장재동, 집현면 일원 ❍ 과 업 량 : 기본 및 실시설계 1식 ❍ 용 역 비 : 332백만원 ❍ 용역기간 : 2019. 1. 10. ~2021. 7. 31. ❍ 용 역 사 : 창원시 소재 KSM기술㈜	❍ 2019. 1.10. : 착수 ❍ 2021. 7.31. : 완료	기본 및 실시설계 용역
소규모 재해위험지 정비사업	❍ 위 치 : 문산읍 외 18개 읍면동 ❍ 사 업 량 : 문산 옥산천 재해위험지 정비 외 28개소 ❍ 사업비 : 700백만원	❍ 2021. 3. : 착공 ❍ 2021. 8. : 준공	재해 사전 예방

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
폭염 저감시설 그늘막 설치 사업	❍ 위 치 : 관내 횡단보도, 교통섬 등 ❍ 사 업 량 : 11개소 ❍ 사 업 비 : 46백만원 (도18, 시28) ❍ 사업기간 : 2021. 5.~8.	❍ 2021. 5.~8. : 완료	폭염 저감 시설 설치 - 설치 누계 127개소
재난대비 방역물품 구입	❍ 사 업 비 : 150백만원 ❍ 구매물품 : 마스크, 손소독제	❍ 2021. 3. : 마스크구입 - 상대동 배부 (선제검사 홍보용) ❍ 2021. 4. : 마스크구입 - 자가격리자 전담공무원 배부 ❍ 2021. 5. : 마스크구입 - 읍면동 배부(이통장, 경로당, 기간제근로자 등) ❍ 2021. 6. : 손소독제 구입 - 실과소 배부(부서, 노인⸱ 장애인시설, 다중이용시설 등)	재난대응을 위한 원활한 방역 물품 수급으로 시민 안전 확보
재난대응 안전한국훈련	❍ 사업기간 : 2021년 하반기 ❍ 사 업 비 : 5백만원 ❍ 참여대상 : 진주시, 진주소방서, 진주경찰서	❍ 2021. 7. : 국․도비 교부 ❍ 2021. 8. : 행정안전부 훈련방향 시달 및 계획 수립 - 기관별 상황에 따른 자율실시 (소규모, 비대면) ❍ 2021.10.28. : 비대면(영상) 토론훈련 - 무림페이퍼 대형 화재로 인한 유해화학물질 유출 사고 가상훈련	대형재난에 대비 재난 대응 체계점검

□ 추진중 사업 --- 10건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
재난대책본부 구성․운영	❍ 운영기간 : 상황발생시 ❍ 구 성 : 상황총괄반 및 임무별 반 편성	□ 추진사항 ❍ 코로나19 재대본 구성 - 2020. 2.~상황 종료 시 - 상황총괄반(시민안전과, 보건소) 및 재대본 반별 편성 (현장실무반 5, 협업지원반 5) - 중대본, 도․시 재대본 영상회의, 자가격리자 관리, 역학조사 및 예방종관리, 중점관리시설 점검, 안심숙소 근무, 해외 입국자 수송지원 등
코로나19 대응 진주형 방역추진 총괄	❍ 기 간 : 2020. 2.~ 상황 종료 시 ❍ 발생현황 (21. 11. 1. 0시기준) - 전국확진자 366,386명 - 경남확진자 13,011명 - 진주확진자 1,795명	□ 추진사항 ❍ 신속한 정보제공과 시민 소통 언론 브리핑 : 625회 ❍ 진주형 방역추진 - 자가격리자 관리 21,692명 - 해외입국자 관리 및 안심숙소 운영 : 3,696명 - 중대본, 도 회의자료 신속전달 및 안내 - 방역수칙점검 : 12,985개소 (고위험 주1회, 그 외 2주1회)
지역안전관리단 조기 정착 사업	❍ 배 경 -현장 중심의 안전관리를 목적으로 한 행안부 시범 사업 - 안전점검 진단 측정 장비구입을 위한 목적 사업비 ❍ 사 업 량 : 안전점검 진단 측정 장비구입 1식 ❍ 사 업 비 : 145백만원 (특별교부세)	□ 추진사항 ❍ 2021. 6. : 특별교부세교부 ❍ 2021. 7. : 안전관리팀신설 ❍ 2021.10. : 구매계획 수립 □ 향후계획 ❍ 2021.11.~12. : 안전점검 진단 물품 구매 ❍ 안전점검 실무교육 - 11월 : 행안부 주관 - 11,12월 : 국토안전관리원 주관

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
재해사전대비	❍ 사 업 량 - 표준행동매뉴얼 및 주민홍보물 제작, - 배수장 유지관리 1식 ❍ 사 업 비 : 918백만원 ❍ 사업기간 : 21년 연중	□ 추진사항 ❍ 2021. 4. : 배수장 등 재해대비 시설물‧장비 점검 및 정비 완료 ❍ 2021. 5.~8. : 자연재난 대비 주민홍보물 제작 배포 (집중호우, 폭염 등) ❍ 2021. 5.~9. : 폭염대비 그늘막 쉼터 운영 □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 자연재난대비 주민 홍보물 제작 배포
상평배수장 환경정비사업	❍ 위 치 : 하대동 일원 ❍ 사 업 량 - 배수장 환경정비 (판넬설치) 1식 ❍ 사 업 비 : 300백만원 ❍ 사업기간 : 21. 7.~22. 1.	□ 추진사항 ❍ 2021. 7.16. : 설계용역 착수 ❍ 2021. 9.13. : 설계용역 완료 ❍ 2021.11. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 1. : 준공 예정	준공기한 미도래
봉래 사면 재해위험지 정비사업	❍ 위 치 : 봉래동 일원 ❍ 사 업 량 - 주택철거 13동, - 사면정비 L=40m ❍ 사 업 비 : 1,450백만원 (특700, 시기금750) ❍ 사업기간 : 20. 9.~22. 2.	□ 추진사항 ❍ 2021. 2.~10. : 토지 및 지장물 보상 협의 ❍ 2021.11. : 설계용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 설계용역 완료 ❍ 2021.12. : 착공 ❍ 2022. 2. : 준공 예정	준공기한 미도래
배수펌프장 원격제어 설비정비사업	❍ 위 치 : 장대배수장 외 2개소 ❍ 사 업 량 - 원격제어(장대, 덕천, 향양 시스템 개량) 설비 설치 ❍ 사 업 비 : 160백만원 (도88, 시72) ❍ 사업기간 : 21. 5.~12.	□ 추진사항 ❍ 2021.10. : 입찰 ❍ 2021.11. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 준공 예정	준공기한 미도래

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
2021년 남강수중보 고무판체 제2경간 제작 구입	❍ 위 치 : 칠암동 478-5 ❍ 사 업 비 : 528백만원(재난관리기금) ❍ 사 업 량 : 고무판체 제작(L=75m) ❍ 사업기간 - 21. 4.29.~22. 3. 9. ❍ 사 업 자 : ㈜유일기연 대표 이선정	□ 추진사항 ❍ 2021. 4.29. : 착수 ❍ 2021. 5.16. : 고무보 제작 착수 ❍ 2021. 6.28. : 고무보 제작 완료 ❍ 2021.10. : 사업기간 연장 (2022. 3. 9.) ※ 재해대책기간(5.15~10.15) 및 12월 남강유등축제로 인한 연장 □ 향후계획 ❍ 2022. 3. : 현장설치 및 완료	재해대책 기간 (5.15.~10.15.) 및 12월 축제 이후 사업 추진
2021년 나불천 배수장 제진기 구입 교체	❍ 위 치 : 인사동 181-7 ❍ 사 업 비 : 419백만원 (재난관리기금) ❍ 사 업 량 : 제진기 교체 2식 ❍ 사업기간 - 21. 4.14.~12.31. ❍ 사 업 자 : ㈜세광산업 동근한	□ 추진사항 ❍ 2021. 4.14. : 착공 ❍ 2021. 8. : 부대공사 실시설계용역 ❍ 2021.10. : 컨베이어, 부대공사발주 ❍ 2021.10. : 사업기간연장(12.31.) ❍ 2021.11. 5. : 제진기 2기 제작 완료 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 현장설치 및 완료	재해대책 기간 (5.15.~10.15.) 및 12월 축제 이후 사업 추진 19~21년까지 총6기 교체 완료
2021년 민방위 사이버교육 실시	❍ 교육대상 - 전 민방위대원 (20,645명) ❍ 교육기간 - 본교육 : 21. 4.30. ~ 7.18. - 1차 보충 : 21. 8.27. ~ 9.26. - 2차 보충 : 21.10.29. ~ 12.5. ❍ 사 업 비 : 28백만원 ❍ 교육방법 : 사이버 교육(PC 또는 모바일) ❍ 위탁업체 : ㈜콘텐츠 팩토리상상역	□ 추진사항 ❍ 2021. 2. : 컨텐츠 사전심사 및 위탁업체 선정(계약) ❍ 2021. 2. : 행안부 승인 요청 ❍ 2021. 3. : 읍면동 담당자 교육 ❍ 2021. 4. : 본 교육 시작 ❍ 2021. 8. : 1차 보충교육 ❍ 2021.10. : 2차 보충교육 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 2차 보충교육 ❍ 2021.12. : 사업 종료	코로나19로 사이버교육 실시

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

❍ 사회⸱자연재난 예방을 위한 재난안전대책본부 운영으로 재난 수습 등에 관한

사항을 총괄․조정하여 조기 대응

❍ 안전의식 제고를 위한 안전문화운동

-안전문화운동 정기적 실시로 안전하고 건강한 사회구축

-시민참여 활성화로위험․사고․재난 사전에 예방

❍ 현장 중심의 안전 점검을 통한 각종 시설물 재난 사전예방

❍ 사회재난예방을 위한 시설물 안전점검 및 안전관리계획 수립으로 안전관리 체계

확립 및 각종 재난 대비

❍ 자연재해위험지구 지속적 정비로 지역주민의 생명과 재산 보호

- 장재․장흥 자연재해위험지구 정비사업 시행

- 소규모 재해 위험지 정비사업으로 호우 및 태풍 피해 예방 만전

❍ 민방위 교육․훈련, 을지태극연습 실시 등으로 민방위 사태 발생 시 즉각 대처할

수 있는 능력 함양 및 비상 대비 위기관리 역량 강화

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	9	34,973	5	3	1	-
일반시책사업	7	-	3	3	1	-
주요예산사업	2	34,973	2	-	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

재난대응 안전한국훈련 실시

재난관리책임기관의 재난 대응체계 확립과 재난 대비 대응능력을 점검하고 시민의 안전 문화 확산을 위한 훈련 실시

□ 훈련개요

❍ 근    거 : ｢재난 및 안전관리기본법｣ 제35조(재난대비훈련 실시)

❍ 기    간 : 2022. 9월 중

❍ 참여기관 : 진주시, 진주소방서, 진주경찰서, 유관기관, 민간단체

❍ 훈련중점

- 현장조치 행동 매뉴얼 기반 종합훈련을 통한 현장 대응능력 강화

- 다양한 상황 속에 발생하는 다중 재난 대응능력 향상

□ 추진계획

❍ 중점훈련

- 훈련유형 : 지진, 다중 밀집시설 대형 화재, 유해화학물질 유출 사고

- 토론훈련 : 상황 판단 회의 및 재난안전대책본부 운영

- 현장훈련 : 실제 재난 유사 상황 설계 및 현장 대응 훈련

❍ 기타훈련 : 공무원 비상 소집, 안전취약계층 이용시설, 다중이용시설
화재 대피 안전시설 점검 및 홍보

❍ 훈련일정

계획 수립	⇨	역량교육·컨설팅	⇨	훈련 실시	⇨	평가 및 환류
주관 : 행정안전부 ▶ 기본계획 수립 ▶ 시행계획 수립 (7월)		주관 : 행정안전부 ▶ 훈련담당자, 민간 전문가 역량교육(3월~8월) ▶ 기관별 민간 전문가 컨설팅 지원(4월~9월)		주관 : 훈련 주관기관 ▶ ‘22년 안전한국훈련 (9월) ※ ‘21년 코로나로 인하여 비대면 토론훈련실시		주관 : 행정안전부 ▶ 안전한국훈련 평가(12월) ▶ 인센티브(12월) *포상(다음해 1월)
컨설팅·평가		▶ 훈련 全 과정에 대하여 매뉴얼을 바탕으로 민간 전문가가 컨설팅 및 평가∙환류

코로나19 대응 재난안전대책본부 구성․운영

코로나19 확산방지 선제적 대응체계 구축과 총력대응을 위하여 진주시 재난안전대책본부를 구성․운영

□ 운영근거

❍「재난 및 안전관리 기본법」제16조(지역재난안전대책본부)

❍「진주시 재난안전대책본부 설치‧운영 등에 관한 조례」제8조

❍ 진주시 감염병 현장조치 행동 매뉴얼

□ 추진상황 및 계획

❍ 재난안전대책본부 상황실 운영 및 코로나19 대응 총괄

- 코로나19 발생현황(2021. 11. 1. 0시 기준)

구 분	확진자	퇴원자	사망자	비 고
전 국	366,386	337,353	2,858
경 남	13,011	12,463	38
진 주	1,795	1,769	3

- 코로나19 일일상황보고 및 정부↔도↔시․군 영상회의 주관

- 방역수칙 안내 및 중점관리 시설 점검

- 자가격리자 관리 및 전담공무원 배정

- 해외입국자 교통편의 제공 : KTX 진주역, 마산역, 김해공항

- 신속한 정보제공과 시민 소통(언론브리핑)

- 코로나19 대응 상황종료 시까지 운영

❍ 자연재난, 사회재난(감염병, ASF, AI 등) 발생시 재난안전대책본부 구성․운영

지역안전관리단 상시 안전점검 실시

재난 위험시설 안전점검․진단 및 각 분야별 안전관리 연계를 통하여 연중 현장 중심의 안전관리로 모든 시민이 안전한 행복 진주 건설

□ 사업개요

❍사업기간 : 2022.  1.~2022. 12.

❍ 주요업무

- 재난 취약 시설의 안전관리를 위한 상시 안전점검 계획 수립․시행 및 긴급 안전점검

- 사전재해예방 등 관련 유관기관 공조 체계 강화 등

□ 추진계획

❍ 2022.  1. : 설 연휴 대비 다중이용시설 등 안전점검

❍ 2022.  2. : 해빙기 대비 옹벽 및 절토 사면 안전점검

❍ 2022.  3. : 어린이 놀이시설 안전점검

❍ 2022.  4. : 봄 행락철 다중이용시설 등 안전점검

❍ 2022.  5. : 공동주택 취약시설 안전점검

❍ 2022.  6. : 운동시설, 종교시설 등 안전점검

❍ 2022.  7. : 장마 및 집중호우 대비 안전점검

❍ 2022.  8. : 노후 교량 안전점검

❍ 2022.  9. : 추석 연휴 대비 다중이용시설 등 안전점검

❍ 2022. 10. : 의료시설 등 다중이용시설 안전점검

❍ 2022. 11. : 재난 취약 가구 건축물 안전점검

❍ 2022. 12. : 동절기 사회복지시설 등 안전점검

제3종시설물 지정을 위한 실태조사 기본계획 수립

제1․2․3종 시설물 외 재난 발생 위험이 높거나 지속적인 관리가 필요한 시설물을 실태 조사하여 제3종 시설물로 신규 지정․고시하여 체계적인 관리를 하기 위함

□ 사업개요

❍ 근    거

-『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제8조(제3종 시설물의  지정 등)

-『시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침』제100조(실태조사)

❍ 기    간 : 2022. 6. 22. 한

❍ 대상시설

- 토목분야(2013. 1. 1. 이전 준공된 교량, 터널 등)

- 건축분야(2008. 1. 1. 이전 사용승인된 공동주택 및 다중시설 등)

❍ 조사방법 : 자체 시행계획 수립 후 『제3종시설물 지정을 위한 실태조사 매뉴얼』에 따른 조사 실시

❍ 조사주체 : 소관부서(해당 시설물 관리부서)

□ 추진계획

❍ 2022.  6. : 실태조사 기본계획 수립(총괄부서–시민안전과)

❍ 2022.  6. : 실태조사 시행계획 수립(소관부서)

❍ 2023.  1.~10. : 실태 조사 실시(소관부서)

❍ 2023. 11. : 제3종시설물 지정 여부 결과 보고(소관부서)

지역축제 및 행사 안전관리

지역축제 및 행사 개최 시 안전에 관한 계획을 심의하고 축제장 및 행사장의 안전에 관한 사항을 사전에 점검하여 해당 축제 및 행사가 안전하게 진행되도록 하기 위함

□ 사업개요

❍ 근    거 :「재난 및 안전관리 기본법」제66조의 11 및「공연법」제11조

❍ 기    간 : 지역축제 및 행사 개최 21일전~종료시

❍ 점검위원 : 건설안전 옴부즈맨 중 건축, 전기, 가스, 소방분야 위원

□ 추진계획

❍ 안전관리계획 및 재해대처계획 수립 대상 축제 또는 행사

- 순간 최대 참여 인원이 1천명 이상 예상되는 축제 또는 개최 장소가 산․수면이거나 사용하는 재료가 불․폭죽․석유류 등 폭발성 물질을 사용하는 지역축제

- 공연장 외의 시설이나 장소에서 1천명 이상의 관람이 예상되는 행사

❍ 지역축제 및 행사 안전점검 업무흐름도

안전관리계획 및 재해대처계획 제출 (개최 21일 전)	⇨	안전관리위원회 심의 (개최 5일 전)	⇨	합동 지도･점검 (개최 직전)	⇨	현장상황실 운영 (개최 기간 중)
축제 및 행사 개최자		안전관리실무위원회		건설안전옴부즈맨		개최자 및 진주시

□ 주요 추진내용

❍ 지역축제 및 행사 안전에 관한 계획 심의

❍ 지역 축제장 또는 행사장 건설안전 옴부즈맨 위원 합동 안전점검 추진

❍ 축제 기간 중 현장 합동상황실 설치․운영

❍ 유관기관 협조체계 유지 등 신속 상황 대응 체계 마련

민간 다중이용시설 위기상황 매뉴얼 지도⸱점검

민간 다중이용시설에 대한 안전관리를 강화하고 재난에 대비한 선제적 예방 조치 활동의 상시화 도모

□ 사업개요

❍ 근    거 : ｢재난 및 안전관리 기본법｣ 제34조의6 제3항

- 다중이용시설 등의 위기 상황 매뉴얼 작성․관리 및 훈련

❍ 점검대상 : ｢건축법 시행령｣ 제2조 제17호 가목에 따른 판매․문화 등의 시설로 사용하는 바닥면적 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축물(15개소)

❍ 점검시기 : 상‧하반기 전수 지도‧점검

❍ 점검내용

- 매뉴얼 작성 여부, 매뉴얼 구성 적정성

- 훈련계획서 및 결과보고서 등을 확인하여 실제 훈련내용 적정성 여부 등

□ 추진계획

❍ 2022.  5. : 민간다중이용시설 관리 대상 재정비

❍ 2022.  6. : 상반기 민간다중이용시설 매뉴얼 작성 및 훈련 실적 점검

❍ 2022.  8. : 민간전문가 현장 맞춤형 컨설팅 참여(희망시설)

❍ 2022. 12. : 하반기 현장 지도‧점검 실시

장재･장흥 자연재해위험지구 정비사업

❍ 자연재해위험지구에 대한 근원적 예방대책 수립 추진

❍ 저지대 상습침수 피해지역 정비로 지역주민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 장재동․집현면 장흥리 일원

❍ 사업기간 : 2019~2024년(6년)

❍ 사 업 량 : 배수펌프장 및 유수지 설치 1식, 서원못 준설 및 정비 L=2.3㎞,
교량 5개소(월평교, 박스교 4개), 가동보 1개소 등

❍ 사 업 비 : 33,573백만원(국비 50% 도비 15% 시비 35%)

□ 추진상황

❍ 2018.  1.(2020.10.) : 행정예고 및 (변경)지구 지정 고시(2회)

❍ 2019.  1. : 실시설계 용역 착수

❍ 2019.  8. : 주민설명회(1, 2차) 개최

❍ 2020.  2.~2021.  6. : 각종 협의 진행

❍ 2020. 11. : 토지 및 지장물 보상 협의(109필지 중 1차분 32필지)

❍ 2021.  6. 22. : 행안부 사전 설계검토 결과 조치계획서 제출
※ 행정안전부 협의 완료하여 총사업비(당초 105억→변경 336억) 변경

❍ 2021.  6. : 토지 및 지장물 보상 협의(2차분 46필지)

❍ 2021.  9.~ 11. : 조달청 계약 의뢰 및 심사(기술․원가검토, 입찰 포함)

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 착공

❍ 2022.  3. : 토지 및 지장물 보상 협의(3차분 31필지)

❍ 2024. 12. : 준공

진주시 자연재해저감 종합계획 재수립

❍ 지역별 자연재해 위험성을 진단하고 대책을 마련하여 예방투자에 활용

❍ 방재분야 최상위 종합계획을 수립 시행하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 법적근거

❍ 자연재해대책법 제16조(자연재해저감 종합계획의 수립)

* 범  위

- 관할구역 전체를 대상으로 계획을 수립

- 목표연도를 10년으로 5년마다 재검토하는 중･장기계획

- 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 대설, 가뭄 및 이에 준하는 자연현상으로
발생하는 재해

* 2017. 4. 1차 수립(승인) 후 5년 경과로 2021년 용역 시행하여 2022년 2차 수립(승인)하여야 함

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 진주시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역

❍ 위    치 : 진주시 전역

❍ 과 업 량 : 진주시 자연재해저감 종합계획 재수립 1식

❍ 용 역 비 : 1,400백만원(시비)

❍ 용역기간 : 2021  6.~2023.  6.(2년간)

□ 추진상황

❍ 2021.  2.~6. : 사업수행능력평가(PQ) 후 지명경쟁입찰(업체선정)

❍ 2021.  6. 10. : 용역 착수

□ 추진계획

❍ 2021.  6.~2022. 5. : 기초현황조사, 자연재해위험지구 선정

❍ 2022.  6.~2023. 5. : 자연재해저감대책 수립, 시행계획 작성

❍ 2023.  6.  9. : 용역 완료(행정안전부 승인)

민방위 비상대비 역량 강화

민방위 사태 발생 시 즉각 대처할 수 있는 능력 함양 및 비상대비 위기 관리 역량 강화를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호

□ 민방위 교육․훈련 실시

❍ 민방위 기본교육

- 교육대상 : 민방위대원 1~4년차

- 교육시간 : 4시간(이론 1시간, 실기 3시간)

- 교육장소 : 진주시 민방위체험센터

❍ 민방위 사이버교육

- 교육대상 : 민방위대원 5년차 이상

- 교육시간 : 1시간

- 교육방법 : 사이버교육(PC 또는 모바일)

- 소요예산 : 33백만원

❍ 민방위 훈련

- 훈련대상 : 민방위대원 포함 전 시민

- 훈련목표 : 전시 등의 비상사태 및 각종 재난 대비를 위한 실전 중심의 참여․맞춤형 훈련실시

- 훈련장소 : 관내 공공기관 및 다중이용시설 등

- 훈련일정 : 연 6회(전국단위 3, 5, 9, 10월/지역단위 4, 7월)

□ 2022년 을지태극연습 실시

❍ 연습일자 : 2022. 5월

❍ 연습방법 : 전시 전환절차 연습, 도상연습, 전시 현안과제 토의, 실제훈련 병행

❍ 주요내용

- 국가총력전 연습을 통한 완벽한 국가비상대비 태세 확립

- 실제 전쟁 상황을 고려한 실질적 전시 전환 절차 훈련 실시

- 정부연습과 군사연습 간 연계강화

- 최근 테러 양상에 따른 대응훈련 강화

- 지역별 주민참여 맞춤형 실제 훈련 확대 실시

건   축   과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	-	1	4	8	7	3
현 원	22	-	1	6	5	5	5
증 감	△1	-	-	2	△3	△2	2

□ 건축물 현황

(단위 : 동)

구 분	계	주거용	상업용	농업용	공업용	기타
2021년	64,428	43,612	11,689	2,141	1,532	5,454

□ 건축물대장 관리 현황

(2021. 11. 1. 현재)

구 분	계	일반건축물	집합건축물	총괄표제부	비 고
2021년	172,214	62,559	104,717	4,938	도면 : 219,819

□ 건축허가 현황

(단위 : 건/㎡)

구 분		계	주거용	공업용	상업용	기타
2020년	건수	724	242	50	276	156
	면적	339,453	40,909	77,706	101,335	119,503
2021년	건수	779	331	46	253	149
	면적	875,512	356,578	62,944	145,807	310,183

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진중	시기 미도래	미착공	비 고
계	9	3	6	-	-
예 산 사 업	8	3	5	-	-
비예산사업	1	-	1	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업 --- 3건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
소규모 공동주택 지원사업	❍ 지원대상 - 서울연립 외 14개소 공동주택(20세대미만) ❍ 지원기준 - 총사업비의 80% (단지당 2천만원 한도) ❍ 내 용 - 옥상 방수, 도장, 주차장 보수 등 ❍ 사 업 비 : 200백만원	❍ 2021. 1. : 신청접수 ❍ 2021. 2. : 지원대상자 선정 ❍ 2021. 3.~6. : 사업시행 및 완료 - 15개 단지 ·옥상방수, 도장 : 10개 ·주차장 보수 : 1개 ·외벽보수 : 1개 ·엘리베이터 교체 : 1개 ·현관 및 담장보수 : 2개	쾌적하고 안전한 주거환경 조성
하대둔치 야외무대 설치사업	❍ 위 치 - 하대동 38-1번지 일원 (한국폴리텍대학앞 둔치) ❍ 사 업 비 : 956백만원 ❍ 사업기간 - 2020.10.~2021. 5. ❍ 주요시설 - 야외무대(막구조), 관람석	❍ 2020. 4. : 사업계획 수립 ❍ 2020. 5. : 공유재산심의회 심의, 설계용역 시행 ❍ 2020. 7. : 예산확보 ❍ 2020.10. : 설계 및 인허가 완료 ❍ 2020.11. : 시공자 선정 및 착공 ❍ 2021. 5. : 공사 완료 ❍ 2021. 6. : 준공식 및 이관	동부(하대) 지역민의 문화 향유 기회 제공
하대둔치 운동시설 설치사업	❍ 위 치 : 하대둔치 ❍ 사 업 비 : 1,006백만원 ❍ 사업기간 - 2020.10.~2021. 5. ❍ 주요시설 - 파크골프장(9홀), 인라인, 스케이트장, 산책로 정비	❍ 2020. 7. : 사업계획 수립 ❍ 2020.11. : 설계 및 인․허가 완료 시공자 선정 ❍ 2020.12. : 착공 ❍ 2021. 5. : 공사 완료 ❍ 2021. 6. : 준공식 및 이관	지역주민의 건강증진과 여가활동 기여

□ 추진중 사업 --- 6건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
농촌주거환경 개선사업	❍ 사업물량 : 주택개량 사업 ❍ 사 업 량 : 35동 ❍ 빈집정비사업 - 빈집철거 : 12동 - 사 업 비 : 7백만원	□ 추진사항 ❍ 주택개량사업 - 완료 4동, 추진중 30동 ❍ 빈집정비사업 - 완료 8동, 추진동 4동	농번기 등으로 지연 및 중도포기자 발생 ⇒ 예비후보 대상자 확보
화재안전 성능보강 지원사업	❍ 사업내용 - 화재취약 건축물 외장재 교체, 스프링클러 설치 등 ❍ 사 업 량 : 5개소 ❍ 사 업 비 : 134백만원 (국 33%, 도 17%, 시 17%, 자부담 33%) ❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. (사업비 소진 시까지)	□ 추진사항 ❍ 어린이집 4개소, 의료시설 1개소
기존건축물 유지관리 철저	❍ 근거법령 : 건축물관리법 제13조 ❍ 점검대상 - 다중이용건축물, - 연면적 3,000㎡ 이상인 집합건축물 ❍ 점검시기 - 준공 후 5년 내 실시, 이후 매3년마다 실시 ❍ 점검개소 : 111개소	□ 추진사항 ❍ 2021. 2. : 대상 통보 ❍ 2021. 6. : 50% 완료 ❍ 2021. 8. : 점검 촉구 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 점검 완료	관련규정 인식 미흡 및 코로나에 따른 경제적 사유로 기간 내 점검 미실시 ⇒사전에 계도 기간을 충분히 주어 기간 내 정기점검토록 행정지도

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
건축지도원 지정 및 운 영	❍ 근거법령 : 건축법 및 건축조례 ❍ 인 원 : 14명 (건축사 등) ❍ 사 업 비 : 22백만원 ❍ 주요업무 - 건축행정건실화 및 위반건축물 실태파악을 위한 현장확인 업무	□ 추진사항 ❍ 2021. 4. : 지정 ❍ 2021. 5.:상반기 건축행정 건실화 점검(110건) ❍ 2021. 8. : 농막용 가설건축물 실태점검(330건) ❍ 2021.10. : 하반기 건축행정 건실화 점검(101건)
공공건축가 제도	❍ 근거법령 : 건축기본법 제23조 ❍ 구 성 - 총괄계획가 : 1명 - 공공건축가 : 21명 (교수 8, 건축사 13) ❍ 운영형태 - 총괄계획가 : 주2회 - 공공건축가 : 필요 시 ❍ 주요역할 - 사업의 기획에서 준공 까지 사업전반에 대한 자문․조정	□ 추진사항 ❍ 2019. 5.30. : 국토교통부 공모사업 선정(국비 256백만원) ❍ 2019. 6. 5. : 공공건축가 지정 운영 ❍ 2019. 9.~2020. 4. : 공간환경전략계획 수립 ❍ 2020. 3.24. : 국토교통부 2차 공모사업 선정 (국비 : 60백만원) ❍ 2021. 7. 8. : 공공건축가 2기 발대식 및 1기성과보고회 개최 ❍ 2019. 7. ~ 현재 : 총괄․공공건축가 자문(추진중32건)
코로나19대응 안전숙소 운영	❍ 위 치 : 평거로 6번길 22 ❍ 사 업 비 : 1,007백만원 ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ ❍ 주요내용 - 해외입국자 코로나19 진단검사결과 확인 전 검사결과 대기시설	□ 추진사항 ❍ 2020. 3.11. : 대구, 경북 출신 대학생 코로나19 진단검사를 위한 임시 격리시설 ❍ 2020. 5. 3.~현재 : 해외입국자 코로나19 진단검사 결과 대기시설, 부득이하게 자가 격리장소 마련이 어려운 시민에게 자가격리장소 제공

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

❍ 소규모 공동주택의 노후 공용 부분 보수비 지원을 통해 쾌적하고 살기 좋은 주     거환경을 조성하고, 투명하고 책임감 있는 건축 행정 수행으로 시민 만족도 극대화

❍ 화재안전성능보강 지원사업으로 취약요인 건축물에 대한 화재 위험을 예방하고,      농촌주거환경개선사업으로 정주 여건을 개선하여 농촌지역 활성화 도모

❍ 농막용 가설건축물에 신고표지판 설치를 통해 가설건축물 효율적 관리, 농촌지역     의 노후․불량주택 개량 및 노후 슬레이트 지붕 철거로 생활 여건 개선 및 정주     여건 조성

❍ 다중이용 건축물 등의 정기적인 점검을 통한 건축물 생애 이력 정보 플랫폼 구축으로 건축물의 체계적인 유지․관리 지도 및 건축물 안전사고 예방

❍ 건축 전문가를 활용하여 건설 현장 및 위반건축물에 대한 정기적이고 체계적인      지도단속으로 공사장 안전확보 및 위반건축물 사전차단을 통한 건축행정 질서

확립

❍ 빈집 및 유휴자원 정비․활용 기반 구축으로 체계적이고 효율적인 빈집 정비를     통한 안전사고 예방 및 정주 환경 개선

❍ 우리 시 공공건축물과 공간환경의 우수성을 건축문화제를 통해 홍보, 공공건축가     활용 및 시민․유관기관 참여를 통한 건축의 공공적 가치 실현

⇒ 투명하고 책임감 있는 건축 행정 수행과 건축물 안전성 확보를 통해 쾌적하고       살기 좋은 주거환경을 조성하고 공공건축가제도, 건축문화제 등으로 진주시

건축문화의 품격을 높임.

2. 총    괄

(단위 : 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	11	995	-	1	-	10
일반시책사업	3	-	-	-	-	3
주요예산사업	8	995	-	1	-	7

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

소규모 공동주택 지원사업

20세대 미만의 소규모 공동주택을 대상으로 노후된 공용 부분의 보수비를 지원하여 입주민의 경제적 부담을 줄이고 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

❍ 지원대상 : 준공 후 10년이 경과된 20세대 미만의 공동주택
(아파트, 연립주택, 다세대주택)

❍ 지원기준 : 총 사업비의 80% 범위 내(2천만원 한도)

❍ 지원사업 : 보안등, 상․하수도시설, 단지 내 도로, 주차장 등의 공동주택 공용 부분 및 부대․복리시설의 유지보수

❍ 예 산 액 : 400백만원(시비 100%)

❍ 사업기간 : 2022.  1.~ 12.

□ 추진계획

❍ 2022.  1. : 지원대상 및 지원절차 공고(읍면동 및 게시판)

❍ 2022.  1. : 보조금 지원신청
(입주자대표회의 의결하여 입주자대표가 신청)

❍ 2022.  2. : 현장조사 실시 및 공동주택지원심의위원회 심의, 대상자 선정

❍ 2022.  3.~ 12. : 지원대상 선정 통보 및 사업 시행

2022년 건축행정 건실화 추진

❍ 건축행정 건실화를 통한 시민의 편의 및 건축 부조리 방지

❍안전하고 친환경적인 건축 유도로 도시경관 개선

□ 사업개요

❍ 건축행정 관련 제반사항에 대하여 연중 건실화 추진

❍ 상부기관 건축행정 관련 각종 평가에 대비하여 병행 추진

□ 추진계획

❍ 대 시민 건축행정 서비스 제고

- 전자정보시스템(세움터)을 활용한 실무종합심의회 개최

- 지침 및 불합리한 조례 등의 숨은 규제 정비

❍ 건축행정 법질서 확립

- 위반건축물 등 사전 단속 및 정비 강화

- 건축허가(신고) 및 사용승인 관련 현장관리 철저로 위반건축물 발생 방지

- 건축구조 확인서 적정성 등 검토 및 건축사의 손해배상보험 가입 확인

❍ 건축 부조리 방지대책 강구

- 투명하고 공정하며 책임 있는 건축행정 업무 수행

- 건축사 업무에 대한 행정지도 철저 및 건축사 간담회 개최

❍ 아름다운 건축물 조성을 위한 건축상 제도 운영(격년제 운영, 2020년 시행)

건축공사장 안전관리 추진

❍ 건축공사장 정기․수시 안전점검을 통한 재난예방 활동 강화

❍ 건축물 해체 시 안전관리 철저로 사고를 미연에 대비

□ 사업개요

❍ 시공 중인 건축공사장 정기점검을 통한 안전의식 고취 및 재해 예방

❍ 공사장 수시점검을 통한 위험요소 확인 등 현장 중심의 안전점검 실시

❍ 건축물 해체 시 관리기준 강화로 안전성 확보

□ 추진계획

❍ 건축공사장 정기․수시 점검(동절기, 해빙기, 우수기)

- 공사장 안전점검
(건축물의 구조안전, 가시설물, 건설기계, 경사지 등 안전조치)

- 안전관리계획 수립 및 비상연락체계 구축

- 폭염대비 작업시간 조정 및 근로자 쉼터 조성 등

- 코로나19 대비 마스크 지급, 체온계․소독제 비치 등 점검

- 공사 관련자(현장대리인, 감리자) 정위치 근무실태 점검

❍ 건축물 해체 시 안전관리 강화

- 철거 건축물 현장 여건에 적합한 해체계획 수립 시행

- 해체 허가 건에 대하여 해체공사 감리자 지정 및 지도・감독

- 해체 후 완료신고 받아 처리결과 확인

화재안전성능보강 지원사업

❍ 보강 대상 건축물의 선정․통지 등 행정 소요기간을 단축시켜 시설 관리자     에게 법령 개정에 따른 시설보강 준비 및 시행 기간을 여유있게 부여

❍ 기존건축물 화재안전성능 조기 확보로 안전한 도시 조성에 기여

□ 사업개요

❍ 사업내용

- 화재취약 건축물의 화재안전성능보강을 위한 인화성 외장재 교체, 간이 스프링클러 설치 등

- 대상시설 : 3층 이상 피난약자 시설(의료, 노유자 등)로서 가연성 외장재 사용․스프링클러 미설치 건축물, 1층이 필로티 구조인 1,000㎡ 미만 다중이용업소

- 53개 대상 시설물 중 보강 완료 14개소(2019 4개, 2020 7개, 2021 3개),
보강 예정  7개소(2021 2개, 2022 5개)

❍ 사업기간 : 2022.  1.~ 12.

❍ 사 업 비 : 134백만원(국비 66 도비 34 시비 34)
※ 민간자본사업보조(국비 33%, 도비 17%, 시비 17%, 자부담 33%)

□ 추진계획

❍ 2021. 11. : 사업대상자 통보 및 신청 안내

❍ 2021. 12. : 심의 및 사업대상자 결정

❍ 2022.  1. : 사업대상자 통보 및 사업 시행

❍ 2022. 12. : 사업 완료 보고 및 정산

농막용 가설건축물 신고표지판 설치

❍ 농지법 적용 완화로 건축법에 따른 가설건축물축조신고 없이 농막을 무단       축조하여 주거용으로 사용함으로써 화재위험 및 환경오염 가중

❍ 가설건축물 축조 신고된 농막에 대하여는 신고표지판을 부착하여 불법 축조     행위 근절 및 무단증축 예방

□ 사업개요

❍ 대    상 : 신고 수리된 농막용 가설건축물

❍ 사업기간 : 2022.  1.~ 12.

❍ 소요예산 : 8백만원(신고 800건)

❍ 사업내용 : 건축법 제20조의 규정에 따른 농막용 가설건축물의 규모 및 존치기간이 표기된 신고표지판 부착

□ 추진상황

❍ 2021.  10. : 약 240건 신고 표지판 배부

□ 추진계획

❍ 2022.  1.~ 12. : 신고표지판 배부 및 위반행위 근절 홍보

❍ 2022.  6월 중  : 농막용 가설건축물에 대한 실태조사 계획 수립

❍ 2022.  8.~ 10. : 건축지도원을 통한 농막용 가설건축물 실태조사 점검

농촌지역 주거환경 개선 사업

농촌 지역의 노후․불량주택 개량 및 빈집 정비로 생활환경 개선 및 정주 여건 조성

□ 사업개요

❍ 농촌 주택개량 사업

- 사 업 량 : 35동(특별 15, 일반 20)

- 사 업 비 : 신축․개축․대수선 최대 2억원, 증축･리모델링 최대 1억원

- 건축규모 : 세대당 연면적 150㎡ 이하(부속창고 포함)

❍ 농촌 빈집정비 사업

- 사 업 량 : 15동(슬레이트지붕 13동, 일반지붕 2동)

- 사 업 비 : 8.5백만원(도비 30% 시비 70%)

· 슬레이트지붕 빈집정비 : 13동 6.5백만원(동당 0.5백만원 보조)

· 일반지붕 빈집 : 2동 2백만원(동당 1백만원 보조)

□ 추진계획

❍ 2022.  1.~  2. : 추진계획 및 지침 수립

❍ 2022.  2. ~  3. : 물량배정(경남도) 및 사업대상자 신청

❍ 2022.  2.~ 12. : 사업시행 및 완료

❍ 2022. 12. : 종합평가 준비

건축물 유지관리 점검 추진

❍ 다중이용 건축물 등의 정기적인 점검을 통한 유지․관리로 대형 붕괴 사고예방       및 안전성 확보

❍ 건축물 생애 이력 정보플랫폼 구축으로 체계적인 유지․관리 지도 및  건축물

안전사고 예방

□ 사업개요

❍ 법률근거 :『건축물관리법』제13조(정기점검의 실시)

❍ 점검대상 : 다중이용건축물, 연면적 3,000㎡ 이상인 집합건축물 등

❍ 점검시기 : 사용승인 후 5년 내 최초 실시, 이후 매 3년마다 실시

❍ 사 업 비 : 민간에서 직접 시행

❍ 점검개수 : 170개소 정도(2021년 111개소)

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 2022년 정기점검 대상 선정 및 민간관리자에게 통보

❍ 2022.  6. : 상반기 50% 점검

❍ 2022.  7. : 미점검 시설 정기점검 촉구 계도 및 행정지도

❍ 2022. 12. : 당해 정기점검 대상 건축물 점검 완료

건축지도원 운영 활성화

❍ 전문성을 갖춘 건축지도원을 활용하여 건축물에 대한 각종 점검 및 지도를       통한 위반 건축물 발생 사전 차단 및 도시 미관 개선

❍ 선제적인 위법 사항 조사․처분 병행으로 건축행정 질서 확립

□ 사업개요

❍ 근거법령 : ｢건축법｣ 제37조 및 ｢진주시 건축조례｣ 제29조

❍ 구성인원 : 14명(건축사 13, 기술사 1)

❍ 운영기간 : 2021.  4.~2023.  4.

❍ 사 업 비 : 22백만원/년

❍ 주요업무

- 위반건축물 단속 및 현장지도 등

- 가설건축물 및 공작물 실태조사

- 장기 미착공 및 미준공 건축물 조사

□ 추진계획

❍ 2022.  4. : 2021년 상반기 건축행정건실화 점검 시행(100건)

❍ 2022.  8. : 가설건축물 실태점검 계획(200건)

❍ 2022. 10. : 2021년 하반기 건축행정건실화 점검 시행(100건)

빈집 정비사업 추진

❍ 방치된 도시․농촌 지역의 노후주택 및 빈집의 효율적인 정비․활용으로      안전사고 예방 및 정주환경 개선

❍ 지역 내 빈집 및 유휴자원 관리․활용 기반 구축으로 체계적인 빈집 관리

□ 사업개요

❍ 정비대상 : 1년 이상 거주․사용하지 않고 방치된 주택 또는 건축물

❍ 법적근거 :『빈집 및 소규모 주택 정비에 관한 특례법』 및
『농어촌정비법』제64조(빈집정비계획의 수립 등)

❍ 정비내용 : 빈집 판정 결과에 대한 활용방안 및 관리계획

❍ 사 업 비 : 120백만원(전문기관 위탁용역비)

□ 추진상황

❍ 2020.  8. : 빈집 실태조사 계획 수립

❍ 2020. 12. : 빈집실태조사 완료

❍ 2021.  3. : 1,073호 빈집판정(도시지역 464호, 농촌지역 609호)

❍ 2021.  6. : 진주시 도심 빈집정비계획 수립 용역 발주(464호)

❍ 2021. 10. : 진주시 농촌 빈집정비계획 수립 용역 발주(609호)

□ 추진계획

❍ 2022.  3. : 도심 빈집정비계획 수립 완료

❍ 2022.  6. : 농촌 빈집정비계획 수립 완료

❍ 2022.  9. : 빈집정비사업 시행

공공건축가 제도 운영

건축․도시공간 환경 관련 디자인 정책 수립과 사업의 기획․설계 단계에 민간전문가를 참여시켜 사업의 효율적 운영과 디자인 관리체계 개선을 통한 디자인 역량 강화에 기여

□ 사업개요

❍ 근거법령 : 건축기본법 제23조(민간전문가의 참여)

❍ 구    성 : 총괄계획가 1명 및 공공건축가 21명(교수 8, 건축사 13)

❍ 소요예산 : 237백만원

❍ 근무형태 : 총괄계획가 비상근(주 2회) 및 공공건축가(필요 시)

❍ 역    할

- 도시 공간환경 및 공공건축 사업의 기획 및 자문

- 공공건축물의 설계에 대한 조정 ․ 자문

□ 추진상황

❍ 2019.  5. 30. : 국토교통부 공모사업 선정(국비 256백만원 지원)

❍ 2019.  6.  5. : 총괄․공공건축가 위촉

❍ 2019.  9.~2020. 4. : 진주시 공간환경 전략계획 수립

❍ 2020.  3. 24. : 국토교통부 2차 공모사업 선정(국비 60백만원 지원)

❍ 2021.  7.  8. : 공공건축가 2기 발대식 및 1기 성과보고회 개최

❍ 2019.  7.~현재 : 총괄․공공건축가 자문 등(공약․현안사업 32건 추진 중)

□ 추진계획

❍ 공공발주사업에 대한 총괄․공공건축가 자문 지속 시행 : 연중

❍ 관련 공무원․민간 전문가(총괄․공공건축가) 간담회 등 : 연 2회

진주건축문화제 개최

❍ 우리 시 공공건축물과 공간환경의 우수성을 알리고 문화예술도시로서의      위상제고와 시민 자부심을 고취를 위해 건축문화제를 개최

❍ 공공기관, 학교, 민간 등의 참여 유도와 공공건축가의 활동과 성과 홍보 및 정보 공유의 계기 마련

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 진주건축문화제

❍ 위    치 : 구)진주역사 등, 차량정비고 우리 시 공공건축물 내 전시 예정

❍ 사업기간 : 2022.  1.~ 12.

❍ 소요예산 : 65백만원

❍ 사업내용

- 친환경 건축을 선도하는 진주의 공공건축물 우수성 홍보 및 전시

- 시민이 참여할 수 있는 건축 관련 프로그램 운영

- 공공기관, 학교 등 유관기관 참여 전시

□ 추진계획

❍ 2022.  1.~  5. : 기획 및 건축 자료 수집

❍ 2022.  5.~ 10. : 행사 용역 발주

❍ 2022. 10.~ 12. : 건축문화제 개최

주 택 경 관 과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅳ. 특수시책

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	24	-	1	6	10	5	2
현 원	24	-	1	8	7	5	3
증 감	-	-	-	2	△3	-	1

□ 주거급여 현황

❍ 일반현황

(단위 : 가구/명)

총 계		일반수급자								시 설 수급자
가 구	수급권자	소 계		자 가		임 차		기 타
		가구	인원	가구	인원	가구	인원	가구	인원
10,309	14,415	10,073	14,179	679	912	9,041	12,838	353	429	236

※ 기 타 : 장기입원 등 급여 미지급 대상

❍ 주거유형별 현황

(단위 : 가구)

총 계	자 가				임 차								기타
가구	소계	전체	부분	기타	소계	영구	국민	매입	전세	민간 임대	사용 대차	민간시설입소
10,309	679	420	26	233	9,041	864	518	1,064	1,048	3,611	1,882	54	589

※ 자가 기타(233가구) : 사실상 소유자(미등기 등), 기타(589가구) : 장기입원 등 + 시설수급자

❍ 연도별 대상자 현황

(단위 : 가구/명)

구 분	가 구	가구원	증 감	비 고
2020년	8,906	12,569	(증) 9%
2021년	10,309	14,415	(증)15%

※ 기초생계급여 부양의무자 기준폐지(2021. 1.) 후 대상자 증가

□ 공동주택 사업계획 승인 현황

구 분	건	동	세 대	연면적(㎡)	비 고
2019년	1	8	702	80,968
2020년	-	-	-	-
2021년	6	61	3,313	575,694

□ 주택보급률 현황

(단위 : 가구/%)

구 분	일 반 가 구	주 택 수					주 택 보급률	비고
		합 계	아파트	연립	다세대	단독
2019년	142,723	158,076	78,631	1,297	2,236	75,912	110.76
2020년	146,660	162,641	83,007	1,297	2,236	76,101	110.89

□ 가로등․보안등 시설 현황

총 계				동 지 역			읍․면 지역			터널등외
계	가로등	보안등	터널등외	소계	가로등	보안등	소계	가로등	보안등
31,651	15,315	14,426	1,910	18,645	11,792	6,853	11,096	3,523	7,573	1,910

□ 시 지정 현수막 게시대 현황

계	읍․면	동	비 고
178	63	115	1단 행정용 76

※ 게시기간 : 7일, 게시수수료 : 1매당 3,000원, 매주 화요일 시 홈페이지 통합예약시스템에서 추첨

□ 시 지정 벽보 게시판 현황

계	조명식	비조명식	비 고
69	34	35

□ 광고업 등록 현황

계	개인업체	법인업체	비 고
170	160	10

□ 대형 옥상간판 현황

계	동성동	대안동	칠암동	강남동	상대동	장대동	비 고
13	6	1	3	1	1	1

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미착공	비 고
계	25	12	13	-	-
예 산 사 업	25	12	13	-	-
비 예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업 --- 12건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원	❍ 사업대상 - 무주택 신혼부부중 혼인 신고 5년 이내, 기준 중위 소득 180% 이하 ❍ 사업기간 : 2021. 6.~10. ❍ 사업내용 -대출 잔액의 1.5% 지원 (최대 100만원) -자녀 1인당 지원금액의 20% 가산(최대 150만원) ❍ 사 업 비 : 295백만원	❍ 2021. 6.~ 7. : 공고 및 접수 ❍ 2021. 8.~10. : 사업비 지급 - 지원대상 : 286가구, 295백만원 - 1차 지급 : 189가구, 200백만원 - 2차 지급 : 97가구, 95백만원	주거비 부담 완화 및 안정적 주거 생활 지원, 결혼 장려 및 출산율 제고
제9기 진주시 공공디자인 자율봉사단 도시경관 개선사업	❍ 위 치 : 진양교, 석류공원 ❍ 사업기간 : 2021. 5.~10. ❍ 사 업 량 : 2개소 ❍ 사업내용 : 보수작업 및 벽화 제작 ❍ 사 업 비 : 19.6백만원	❍ 2021. 5.~6. : 봉사단 공개모집 ❍ 2021. 6. : 봉사단 발대식 (20명) ❍ 2021. 7.~8. : 기존벽화 정화, 보수 및 벽화제작 ❍ 2021.10. : 작품집 제작	민관협치를 통해 시민들의 시각 문화 창출, 아름다운 도시 경관 형성

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
평거 벚꽃길 야간 경관조명 설치사업	❍ 위 치 : 평거동 벚꽃길 ❍ 사업기간 : 2021. 1.~3. ❍ 사업내용 : RGB투광등 151개 설치 ❍ 사 업 비 : 275백만원	❍ 2021. 1. : 계약 및 착공 ❍ 2021. 3. : 준공	경관조명 연출을 통한 벚꽃길 조성
진주성 주변 이미지 가로등 교체공사	❍ 위 치 : 진주성 주변 ❍ 사업기간 : 2021. 1.~6. ❍ 사업내용 : 이미지 가로등 120개 교체 ❍ 사 업 비 : 390백만원	❍ 2021. 3. : 계약 및 착공 ❍ 2021. 6. : 준공	진주성 주변에 전통적인 경관 이미지 형성
관내 주요도로 가로등 추가 설치공사	❍ 위 치 : 구진주역~ 한전사거리 외 4개소 ❍ 사업기간 : 2021. 1.~7. ❍ 사업내용 : 가로등 89개 설치 ❍ 사 업 비 : 230백만원	❍ 2021. 4. : 계약 및 착공 ❍ 2021. 7. : 준공	도로변 조도 개선을 통한 차량사고 및 범죄 예방
뒤벼리 야간경관조명 개선사업	❍ 위 치 : 뒤벼리 일원 ❍ 사업기간 : 2021. 1.~9. ❍ 사업내용 - RGBW투광등 89개 설치 - LED투광등 29개 설치 ❍ 사 업 비 : 325백만원	❍ 2021. 6. : 계약 및 착공 ❍ 2021. 9. : 준공	경관조명 연출을 통한 뒤벼리 야간경관 조성
진양교 경관조명 개선사업	❍ 위 치 : 진양교 일원 ❍ 사업기간 : 2021. 1.~9. ❍ 사업내용 - LED투광등 110개 교체 - RGB라인바 485개 교체 ❍ 사 업 비 : 288백만원	❍ 2021. 6. : 계약 및 착공 ❍ 2021. 9. : 준공	경관조명 연출을 통한 교량 이미지 제고

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
진주교 및 천수교 경관조명 개선사업	❍ 위 치 : 진주교, 천수교 ❍ 사업기간 : 2021. 7.~9. ❍ 사업내용 - 투광램프 277개 교체 - MH투광등 16개 교체 - 고보조명 20개 설치 - LED투광등 24개 설치 ❍ 사 업 비 : 239백만원	❍ 2021. 7. : 계약 및 착공 ❍ 2021. 9. : 준공	경관조명 연출을 통한 교량 이미지 제고
진주시 관문지역 경관조명 설치공사	❍ 위 치 : 진주IC, 서진주IC ❍ 사업기간 : 2021. 5.~10. ❍ 사업내용 - LED투광등 267개 설치 - 경관사인물 설치 1식 ❍ 사 업 비 : 516백만원	❍ 2021. 6. : 계약 및 착공 ❍ 2021.10. : 준공	경관조명 연출을 통한 관문 지역 야간경관 조성
진주역 야간경관조명 설치공사	❍ 위 치 : 진주역 일원 ❍ 사업기간 : 2021. 8.~10. ❍ 사업내용 - LED열주등 16개 설치 - 조명등 44개 교체 ❍ 사 업 비 : 126백만원	❍ 2021. 8. : 계약 및 착공 ❍ 2021.10. : 준공	경관조명 연출을 통한 진주역 야간경관 조성
시지정 현수막 게시대 신설 및 교체	❍ 위 치 : 문산읍사무소 앞 외 21개소 ❍ 사업기간 : 2021. 2.~4. ❍ 사 업 량 : 26개 - 신설 19개, 교체 7개 ❍ 사 업 비 : 102백만원	❍ 2021. 2. : 실시설계 및 입찰 ❍ 2021. 3. : 착공 ❍ 2021. 4. : 준공	옥외광고물 게시시설 정비를 통한 안전사고 예방
무연고 간판 정비	❍ 위 치 : 진주시 일원 ❍ 사업기간 : 2021. 5.~7. ❍ 사 업 량 : 52개 ❍ 사업내용 : 무연고 노후 간판 철거사업 ❍ 사 업 비 : 18백만원	❍ 2021. 5. : 사업 홍보 및 대상 간판 조사 ❍ 2021. 6. : 착공 ❍ 2021. 7. : 준공	간판 정비를 통한 도시 경관 개선

□ 추진중 사업 --- 13건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
주거급여 지원사업	□ 임차급여(현금) 지원 ❍ 사업대상 : 7,800가구 ❍ 사업기간 : 연중 ❍ 사업내용 : 임차료 지원 ❍ 사 업 비 : 12,400백만원	□ 추진사항 ❍ 사업대상 : 7,800가구 ❍ 추 진 중 : 10,517백만원 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 사업완료
	□ 수선유지급여(현물) 지원 ❍ 사업대상 : 111가구 ❍ 사업기간 : 2021. 3.~12. ❍ 사업내용 : 주택 개보수 ❍ 사 업 비 : 910백만원	□ 추진사항 ❍ 2021. 3. : 사업시행 □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 공사완료 후 개별점검 ❍ 2021.12. : 사업완료
농어촌 장애인 주택개조 사업	❍ 사업대상 : 농어촌 거주 장애인 중 기준소득액 이하 가구 ❍ 사업기간 : 2021. 4.~12. ❍ 사 업 량 : 5가구 ❍ 사업내용 : 주택 내 장애인 편의시설 설치 ❍ 사 업 비 : 19백만원	□ 추진사항 ❍ 2021. 4. : 위탁업체 협약 (새뜰협동조합) ❍ 2021. 5.~ 8. : 대상자 발굴 ❍ 2021. 6. 22. : 업무협약 해지 (업체 폐업) ❍ 2021. 8. : 위탁업체 재계약 (진주주거복지센터) ❍ 2021. 9.~10. : 사업시행 □ 향후계획 ❍ 2021.11.~12. : 사업완료 및 정산
고령자 복지주택 건설사업	❍ 위 치 : 평거동 359 일원 ❍ 사업기간 : 2019. 4.~2022.12. ❍ 사업내용 : 임대주택 140호 - 영구임대 104호 - 국민임대 36호 (청년주택 18호 포함) - 복지시설 1,452.75㎡ - 국․공립어린이집 533.66㎡ ❍ 사 업 비 : 19,858백만원 (국비 9,500, 시비 6,416, LH 3,942)	□ 추진사항 ❍ 2019. 4. : 사업공모 선정 ❍ 2019. 6. : 투자심사 승인 ❍ 2019.12. : 사업계획 승인 ❍ 2021. 4. : 착공 ❍ 2021. 4. : 사업계획 변경승인 (어린이집, 청년주택 공급) □ 향후계획 ❍ 2022.12. : 준공 ❍ 2023. 6. : 입주예정

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
공동주택 관리지원사업	❍ 사업대상 : 20세대 이상 10년 이상 경과된 공동주택 ❍ 사업기간 : 2021. 1.~12. ❍ 사 업 량 : 38개소 ❍ 사업내용 : 노후 공용시설 등 유지보수 ❍ 사 업 비 : 875백만원	□ 추진사항 ❍ 2021. 1. : 사업 공고 ❍ 2021. 3. : 대상자 선정 ❍ 2021.10. : 기완료 사업 (30개소, 648백만원) □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 추진 중 (8개소, 227백만원) ❍ 2021.12. : 사업완료 및 정산
2021년 거리갤러리 조성사업	❍ 사업기간 : 2021. 10.~12. ❍ 사 업 량 : 공사장 가설울타리 디자인안 7점 ❍ 사업내용 : 거리갤러리 조성을 위한 공사장 가설 울타리 디자인안 확보 ❍ 사 업 비 : 22백만원	□ 추진사항 ❍ 2021.10.:경상국립대학교 산학협력단 업무협약 □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 사업시행 ❍ 2021.12. : 사업완료
범죄예방 유니버설 디자인 사업	❍ 위 치 : 제일여자고등학교 통학로 일원 ❍ 사업기간 : 2021.10.~12. ❍ 사업내용 - 실무추진단 구성 - 범죄예방 환경디자인을 적용한 안심 통학로 조성 ❍ 사 업 비 : 20백만원	□ 추진사항 ❍ 2021.10. : 실무추진단 구성 및 사업대상지 선정 □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 사업시행 ❍ 2021.12. : 사업완료
경상대후문 가로등 추가설치공사	❍ 위 치 : 가호동 일원 ❍ 사업기간 : 2021. 9.~11. ❍ 사업내용 - 가로등주(8M) 9개 설치 - LED등기구 9개 설치 - 가로등주(6M) 8개 교체 - LED등기구 16개 교체 ❍ 사 업 비 : 53백만원	□ 추진사항 ❍ 2021.10. : 계약 및 착공 □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
김시민대교 경관조명 개선사업	❍ 위 치 : 충무공동 일원 ❍ 사업기간 : 2021.10.~12. ❍ 사업내용 - LED투광등 78개 교체 - 제어설비 1식 ❍ 사 업 비 : 280백만원	□ 추진사항 ❍ 2021.10. : 계약 및 착공 □ 향후계획 ❍ 2021.12. : 준공
LED금융연계 도로조명 교체사업	❍ 위 치 : 도심지 일원 ❍ 사업기간 : 2021. 8.~2022. 2. ❍ 사업내용 : 가로등 및 보행등 교체 3,033등 ❍ 사 업 비 : 919백만원 (국 276, 시 276, 민간투자 367)	□ 추진사항 ❍ 2021. 8. : 계약 및 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 2. : 준공
불법광고물 수거보상제	❍ 사업대상 : 일반 시민 ❍ 사업기간 : 2021. 4.~11. ❍ 사업내용 : 벽보, 전단 등 불법유동광고물을 수거하여 제출한 시민에게 보상금 지급 ❍ 사 업 비 : 100백만원	□ 추진사항 ❍ 2021. 4. : 홍보물 배부 ❍ 2021. 4.~10. : 신청 접수 및 수거보상금 지급(98백만원) □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 사업완료
지정게시대 보급사업	❍ 위 치 : 상봉동행정복지 센터 앞 외 4개소 ❍ 사업기간 : 2021. 9.~11. ❍ 사 업 량 : 5개 (설치 4, 보수 1) ❍ 사업내용 : 저단형 현수막 게시대(1단2열형) 설치 및 보수 ❍ 사 업 비 : 10백만원(도비)	□ 추진사항 ❍ 2021. 9. : 실시설계 및 입찰 ❍ 2021.10. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 준공

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
광고물정비 및 안전점검 지원사업	❍ 위 치 : 경상대 가좌 캠퍼스 정문 앞~개양오거리 ❍ 사업기간 : 2021.10.~11. ❍ 사 업 량 : 50개소 ❍ 사업내용 : 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 실시 ❍ 사 업 비 : 10백만원(도비)	□ 추진사항 ❍ 2021.10. : 용역발주 및 사업시행 □ 향후계획 ❍ 2021.11. : 사업완료
옥외광고 소비쿠폰 지원사업	❍ 사업대상 : 소상공인 ❍ 사업기간 : 2021. 7.~12. ❍ 사 업 량 : 30여 명 ❍ 사업내용 - 간판 제작 및 설치비 지원 - 최대 150만원 이내 지원 (자부담 20%) ❍ 사 업 비 : 39백만원(도비)	□ 추진사항 ❍ 2021. 7. : 신청접수 ❍ 2021. 8. : 선정통보 ❍ 2021. 9.~10. : 관련서류 접수 및 허가사항 처리 □ 향후계획 ❍ 2021.11.~12. : 간판 제작․설치 및 지원금 지급

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

❍ 저소득층 주거급여 및 신혼부부의 주택전세대출 이자지원으로 주거비 부담을 완화하고 저소득 맞춤형 주택 개․보수 실시로 양질의 주거수준 확보

❍ 고령자뿐만 아니라 청년대상 임대주택, 어린이집 등 주민 공동이용 시설 확충으로 지역사회 융화 및 생애주기 통합형 진주형 고령자 복지주택 추진

❍ 공동주택 노후시설 정비로 입주민의 쾌적한 생활환경을 조성하고 공동주택 활성화 사업으로 소통․공감 및 입주민 간 유대 강화

❍ 도시공원의 유니버설디자인 도입 및 폐철도 터널의 경관개선 추진으로 도시경관을 아름답고 쾌적하게 관리․형성하고 공공디자인 적용사업 활성화

❍ 새벼리, 남가람 문화거리 및 보행교의 경관조명을 설치 개선함으로써 아름다운 야간경관도시를 조성하고 시민 문화복지 증진

❍ 옥외광고물 정비 및 간판개선사업 실시를 통한 쾌적한 생활환경 조성

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	15	19,950.8	13	2	-	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	15	19,950.8	13	2	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

저소득층 주거급여 지원사업

주거가 불안정한 저소득 취약계층에게 실질적인 생활지원 강화를 통해 주거 생활안정 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 국민기초생활보장수급자 중 주거급여 수급자

❍ 사업기간 : 연중

❍ 사업내용 : 임차가구 임차급여 및 자가가구 수선유지급여 지원

❍ 사 업 비 : 14,742백만원(국비 13,268 도비 1,032 시비 442)

□ 추진계획

❍ 임차급여(현금) 지원

- 대상가구/사업비 : 임차 8,000가구/13,700백만원

- 지원내용 : 기준임대료 금액 이내 임차료 지원

(단위 : 원/월)

가구원 수	1인	2인	3인	4인	5인	6인
기준임대료	163,000	183,000	218,000	254,000	262,000	310,000

❍ 수선유지급여(현물) 지원

- 한국토지주택공사 협약 체결 : 2022. 1~2월 중

- 대상가구/사업비 : 자가 127가구/1,042백만원

- 지원내용 : 자가소유 주택 보수

구 분	경보수	중보수	대보수
수선비용	457만원 이내	849만원 이내	1,241만원 이내
수선주기	3년	5년	7년
수선예시	도배, 장판 등	오･급수, 난방 등	지붕, 기둥 등

농어촌 장애인 주택개조사업

농촌지역 저소득 장애인의 생활에 불편이 없도록 편의시설 설치를 지원하여 일상생활 편의 증진 및 주거안정 도모

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 장애인복지법에 해당하는 등록장애인으로 농어촌 지역에 거주하며 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득액 이하인 자

※ 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득 (2021년 기준)

구 분	1인 가구	2인 가구	3인 가구	4인 가구
월평균 소득(원)	2,991,631	4,562,535	6,240,520	7,094,205

❍ 사업기간 : 2022.  2.~ 12.

❍ 사 업 량 : 4가구

❍ 지원규모 : 가구당 3,800천원 이내(최대 150% 가능)

❍ 사업내용 : 화장실 개조, 보조손잡이 설치, 문턱 낮추기 등

❍ 사 업 비 : 15,200천원(국비 7,600 도비 2,280 시비 5,320)

□ 추진계획

❍ 2022.  2. : 국토부 시행지침 확정 통지

❍ 2022.  3. : 사업계획 수립 및 대상자 선정

❍ 2022.  4. : 위탁업체 선정

❍ 2022.  4.~ 12. : 사업 시행 및 정산

신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원사업

❍ 신혼부부의 주거비 부담 완화 및 안정된 정주 여건 조성으로 결혼 장려

❍ 집 걱정 없이 일하고 아이를 키울 수 있는 기반 마련

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 시 거주 무주택 신혼부부 중 혼인신고 5년 이내, 기준중위소득
180% 이내, 금융권 주택 전세자금 대출금 1억 5천만원 이하

※ 기준중위소득 180% (2021년 기준)

구 분	소득기준(원)	건강보험료 본인부담금(원)
		직장가입자	지역가입자	혼합
2인 가구	5,559,000	191,093	200,980	194,212
3인 가구	7,171,000	246,992	271,376	252,295
4인 가구	8,777,000	308,297	341,915	321,769

❍ 사업기간 : 2022.  6.~ 12.

❍ 사업내용 : 주택 전세자금 대출 잔액의 1.5% 지원(연 1회, 최대 100만원)

- 단, 자녀가 있는 가정은 지원금에서 자녀 1인당 20% 가산 지원(최대 150만원)

❍ 사 업 비 : 400백만원(시비)

□ 추진계획

❍ 2022.  6. : 사업 공고 및 신청 접수

❍ 2022.  7. : 지원대상자 확정 및 사업비 지급

❍ 2022.  8.~ 12. : 하반기 사업 시행

※ 상반기 사업비 잔액 발생 시, 하반기 수시접수 및 지원

고령자 복지주택 건설사업

❍ 고령자를 위한 특화 설계로 입주민의 복지 증진 및 주거환경 개선

❍ 지역주민이 공동으로 이용 가능한 노인복지시설과 국․공립어린이집 확충으로 지역사회 융화 및 생애주기 통합형 고령자 복지주택 사업 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 평거동 359번지 일원

❍ 사업기간 : 2019.  4.~2022. 12.

❍ 사업내용 : 임대주택 140호(청년주택 18호 포함), 복지시설 1,986㎡

❍ 사 업 비 : 19,858백만원(국비 9,500 시비 6,416 LH 3,942)

❍ 사업시행자 : 진주시, LH 공동시행

※ 진주시 : 부지제공과 기반시설 설치 및 복지시설 운영,  LH : 건설 및 임대주택 운영

□ 추진상황

❍ 2019.  4. : 사업 공모 선정(국토부)

❍ 2019.  6. : 지방재정 투자심사 승인(경남도)

❍ 2021.  2. : 부지매입 완료(진주시)

❍ 2021.  4. : 착공

❍ 2021.  4. : 사업계획 변경승인

※ 변경내용 : 국․공립어린이집(533㎡) 설치 및 청년주택(18호) 공급

❍ 2021.  9. : 사업계획 변경승인

※ 변경내용 : 관습로 설치에 따른 사업부지면적 조정

□ 추진계획

❍ 2022. 12. : 준공

❍ 2023.  6. : 입주

공동주택관리 지원사업

노후된 공동주택의 공용시설 유지보수에 필요한 비용을 일부 지원하여 입주민의 경제적 부담 완화 및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022.  1.~ 12.

❍ 사업내용

- 공동주택관리 지원사업 : 20세대 이상 10년 이상 경과된 공동주택의  공용부분 및 부대․복리시설 유지․보수

※ 지원기준 : 공동주택 단지의 규모에 따라 차등 지원(전체공사비 50% 이내)

단지 규모(세대수)	20~149	150~299	300~499	500~999	1,000이상
최대지원금(백만원)	20	30	40	45	50

- 영구임대주택 공용전기료 지원 : 3개소(가좌주공1차, 평거주공2차, 혁신LH3단지)

❍ 사 업 비 : 890백만원(시비)

- 공동주택관리 지원사업 : 850백만원

- 영구임대주택 공용전기료 지원 : 40백만원

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 사업공고

❍ 2022.  1. : 보조금 신청접수

❍ 2022.  2. : 현장조사 실시, 위원회 심의 및 대상자 선정

❍ 2022.  3. : 사업시행

❍ 2022. 12. : 사업완료 및 정산

공동주택 공동체 활성화 추진

❍ 공동주택 단지 내 주민참여 프로그램 운영을 지원하여 입주민 교류 활성화의

장 마련

❍ 이웃 간 소통과 나눔으로 갈등을 해소하고 더불어 사는 공동체 문화 조성

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 관내 150세대 이상 의무관리대상 아파트

❍ 사업기간 : 2022.  3.~ 12.

❍ 사업내용 : 공동주택의 주민참여 프로그램 공모사업 추진

- 공동주택 입주민들의 긴밀한 접촉과 지속적인 참여를 통해 유대감을 형성하고 함께 살기좋은 마을 만들기 프로그램 발굴 및 지원

- 주민 소통․화합, 주거환경 개선, 여가․취미․교양, 사회봉사활동, 친환경․재활용․에너지 절약, 공동체 역량강화 프로그램 등

❍ 사 업 비 : 15백만원(시비)

□ 추진계획

❍ 2022.  3. : 사업공모

❍ 2022.  4. : 위원회 심의 및 대상자 선정

❍ 2022.  5. : 사업시행

❍ 2022. 12. : 사업완료 및 정산

제10기 진주시 공공디자인 자율봉사단 운영

❍ 공공디자인을 접목한 아름답고 세련된 도시경관 조성으로 ‘디자인도시진주’ 위상     확립

❍ 시민의 문화예술 활동과 도시경관 개선사업의 자율적 참여로 주인의식 고취 및

문화향유 기회 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 미정

❍ 사업기간 : 2022.  5.~ 10.

❍ 사 업 량 : 공공디자인 사업 1식

❍ 사업내용

- 참가대상 : 진주시에 주소를 둔 대학생 등 일반 성인

- 공공디자인 자율봉사단 공개모집(20명)

- 공공장소 및 시설물 등을 대상으로 디자인 개선사업 추진

- 사업 작품집 제작 및 결과보고회(토론회) 개최

❍ 사 업 비 : 19.6백만원(시비)

□ 추진계획

❍ 2022.  5.~  6. : 자율봉사단 공개모집

❍ 2022.  6.~  7. : 자율봉사단 발대식, 사업대상지 및 디자인(안) 확정

❍ 2022.  7.~  8. : 사업시행

❍ 2022.  9.~ 10. : 작품집 제작 및 결과보고회 개최

제8회 진주시 도시․공공디자인 작품공모전

❍ 창의성과 공공성이 우수한 아이디어 작품을 시의 공간활용 정책에 접목하여

수준 높은 도시경관 형성

❍ 모두가 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 디자인 개발로 새로운 도시이미지

구축 및 시민 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022.  3.~  9.

❍ 사업내용 : 도시․공공디자인 작품공모전

- 참가대상 : 일반인 및 전국 대학(원)생

- 공모작품 : 도시경관 개선, 공공공간 연출, 공공시설물 디자인, 공공미술
(순수 미술작품 디자인)

- 접수방법 : 방문접수, 우편접수, E-mail접수

- 시상내역 : 작품 17점(대상 1, 금상 2, 은상 3, 동상 3, 입선 10)

- 심사기준 : 창의성, 활용성, 공공성 등이 우수한 작품 선정

❍ 사 업 비 : 20백만원(시비)

□ 추진계획

❍ 2022.  1.~  2. : 공모전 주제선정 및 홍보활동

❍ 2022.  3.~  7. : 작품 공모

❍ 2022.  8. : 작품 접수 및 출품작 심사

❍ 2022.  9. : 시상식 및 수상작품 전시

야간 경관조명 개선사업

❍ 야간 경관조명 설치 및 개선으로 아름답고 활기찬 도심 분위기 조성

❍ 다채로운 경관조명 연출을 통한 볼거리 제공으로 관광 활성화 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 일원

❍ 사업기간 : 2022.  1.~ 9.

❍ 사업내용

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사 업 내 용		비고
		사 업 량	사업비
계	3개 사업		1,150
1	새벼리 야간 경관조명 개선사업	투광등 설치 1식	450
2	남가람 문화거리 경관조명 개선사업	투광등 설치 1식 RGB 라인바 설치 1식	300
3	진주시 보행교 야간 경관조명 사업 (판문동, 충무공동)	투광등 설치 1식 RGB 라인바 설치 1식	400	2개소

❍ 사 업 비 : 1,150백만원(시비)

□ 추진계획

❍ 2022.  1. ~ 5. : 진주시 보행교 야간 경관조명 사업 추진

❍ 2022.  2. ~ 9. : 새벼리 야간 경관조명 개선사업 추진

❍ 2022.  3. ~ 8. : 남가람 문화거리 경관조명 개선사업 추진

가로등․보안등 설치 및 정비공사

❍ 가로등․보안등 유지관리로 야간 시간대 시민통행 불편 해소

❍ 안정적인 조도 확보로 도로안전 및 범죄사고 등의 위험요인 사전 제거

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 일원

❍ 사업기간 : 2022.  1.~ 12.

❍ 사업내용

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사 업 내 용		비고
		사 업 량	사업비
계	6개 사업		1,647
1	가로등 및 보안등 설치	가로등 설치 50등 보안등 설치 250등	510
2	가로등 유지관리 단가계약	연간 단가계약 1식	200
3	노후 가로등 교체 및 유지관리	가로등 교체․유지관리 225개소 터널등 교체 400등	615
4	주요도로 가로등 추가 설치	가로등주 설치 40본	140
5	망경동 강변도로 가로등 노후선로 교체	노후 선로 교체 35개소	122
6	진마대로 진출입부 가로등 설치	가로등 설치 15개소	60

❍ 사 업 비 : 1,647백만원(시비)

□ 추진계획

❍ 2022.  1.~ 12. : 취약지역 민원 해소, 노후 시설물 교체 및 사업 시행

봉곡광장 간판개선사업

봉곡광장에 설치된 봉황조형물과 연계하고 지역주민들의 의견을 반영한 참신하고 예술적인 간판개선을 통하여 특색있는 거리 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주대로 1149~진주성로 77 일원(510m)

❍ 사업기간 : 2022.  1.~ 10.

❍ 사 업 량 : 건물 23동, 업소 61개소, 간판 74개

❍ 사업내용

- 간판개선 : 간판 디자인․설치․제작 분리 발주

- 건물 입면 정비 및 폐업간판 철거

- 불법광고물 제거(창문 이용 광고물 등)

- 교체 간판에 대한 옥외광고물 표시 허가 및 신고 처리

❍ 사 업 비 : 300백만원(국비 150 시비 150)

□ 추진계획

❍ 2022.  1. : 정비시범구역 지정

❍ 2022.  2. : 간판 디자인 사업자 입찰 및 전문가 컨설팅

❍ 2022.  3. : 간판 디자인 업소주 의견수렴 및 동의서 징구

❍ 2022.  7. : 간판 제작 사업자 입찰 및 착공

❍ 2022. 10. : 준공

시 지정 현수막 게시대 신설 및 교체

❍ 현수막 지정게시대를 신설하여 광고 수요 충족
❍ 사다리형 게시대를 풍속감지 자동 게시대로 교체하여 안전사고 예방

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 관내 간선도로변

❍ 사업기간 : 2022.  2.~  6.

❍ 사 업 량 : 현수막 게시대 15개(신설 11, 교체 4)

구분	사 업 명	사업량	설치위치
신설	저단형 게시대 신설	11개	대평면, 상봉동, 이현동, 평거동
교체	풍속감지 자동 게시대 교체	4개	명석면, 진성면, 대곡면, 이현동

❍ 사업내용

- 광고 수요에 부응하기 위한 현수막 지정게시대 신설

- 강풍에 취약한 사다리형 게시대를 풍속감지 자동 게시대로 교체

❍ 사 업 비 : 78백만원(국비 30 시비 48)

□ 추진계획

❍ 2022.  2.~ 3. : 실시설계 및 계약

❍ 2022.  4. : 착공

❍ 2022.  6. : 준공

옥외광고물 정비 사업

불법광고물을 수거하고 장기간 방치된 무연고 간판을 정비하여 쾌적한 생활환경 조성 및 도시 미관 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 관내

❍ 사업기간 : 연중

❍ 사업내용 : 불법광고물 야간 단속 및 수거보상제, 무연고 간판 정비

❍ 사 업 비 : 120백만원(국비 20 시비 100)

- 불법광고물 수거보상제 : 100백만원(시비)

- 무연고 간판 정비 : 20백만원(국비)

□ 추진계획

❍ 불법광고물 야간 단속 : 연중 수시

❍ 불법광고물 수거보상제

- 2022.  2. : 보상기준 마련(벽보, 전단지 대상 보상금액 등)

- 2022.  3.~ 10. : 사업시행
(주소지 읍․면사무소, 동 행정복지센터 접수 및 보상금 지급)

❍ 무연고 간판 정비

- 2022.  4. : 사업공고 및 신청접수

- 2022.  5. : 현장조사 및 대상선정

- 2022.  6.~  8. : 사업시행

Ⅳ. 특수시책

가좌동 근린공원 유니버설디자인 사업

❍ 다수의 사람들이 이용하는 도시공원에 유니버설 디자인을 도입하여 사회적 약자

등 모두를 배려한 디자인 도시 구현 및 시민의 삶의 질 증대

❍ 우범지역을 중심으로 범죄를 예방할 수 있는 도시환경디자인(CPTED)적용 추진

으로 안전하고 아름다운 도시환경 형성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 가좌택지근린공원(가좌동 539)

❍ 사업기간 : 2022.  1.~ 10.

❍ 사 업 량 : 공원 유니버설디자인 적용사업 1식(A=19,000㎡)

❍ 사업내용 : 모두가 이용하기 안전하고 편안한 도시공원 개선사업

- 경사로 안전 손잡이 설치, 미끄럼방지 인도 포장, 볼라드 및 쉼터 정비

- 점자블록․경사로 설치, 맨홀 교체(유모차 빠짐 방지), 산책로 야간조명 설치

- 범죄예방 디자인을 적용한 시설물, 부조, 벽화, 사인물 등 설치

❍ 사 업 비 : 154백만원(도비 77 시비 77)

□ 추진상황

❍ 2021.  6. : 2022년 경상남도 유니버설디자인 도비 지원사업 신청

❍ 2021. 10. : 범죄예방 환경디자인사업 실무추진단 구성 및 업무협약식 개최

□ 추진계획

❍ 2022.  1. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2022.  2. : 일상․계약 심사 및 계약

❍ 2022.  5. : 착공

❍ 2022. 10. : 준공

폐철도 진치령터널 경관 개선사업

❍ 폐철도 터널의 어둡고 삭막한 공간에 조형물과 조명벽화 등의 예술작품설치로

효율적인 국토 이용 및 품격 높은 도시경관 조성

❍ 가장 걷고 싶은 명품 산책로 조성으로 시민의 삶의 질 향상 및 일상 속에서

예술을 체험하고 즐기는 문화향유 기회 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 경전선 폐철도 진치령터널(주약동~가좌동)

❍ 사업기간 : 2022.  1.~  9.

❍ 사 업 량 : 터널 경관개선사업 1식(L=240m, H=5.8m, B=3.6m)

❍ 사업내용

- 터널 진․출입구 환경개선 및 상징물 등 포토존 설치

- 레이저조명, LED일루미네이션 등 조명을 활용한 빛 테마경관 조성

- 터널 측벽 부조 등을 활용한 키즈존 및 희망거리 조성

- 터널 대피소(3개소) 예술작품 설치 및 터널 바닥일부 꽃길 조성

❍ 사 업 비 : 400백만원(시비)

□ 추진계획

❍ 2022.  1. : 기본설계 용역

❍ 2022.  2. : 일상감사, 제안 공모 및 평가

❍ 2022.  4. : 착공

❍ 2022.  9. : 준공

		제234회 진주시의회(제2차정례회)

시정 주요업무 보고서

(2021년 실적 및 2022년 계획)

진   주  시

(교통환경국)

보 고 순 서

□	교 통 행 정 과

□	환 경 관 리 과

□	청 소 과

□	산 림 과

□	공 원 관 리 과

□	매장사업소

□	차량등록사업소

교 통 행 정 과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	28	1	1	7	10	6	3
현 원	29	1	1	8	11	5	3
증 감	1	-	-	1	1	△1	-

※ 질병휴직 1명

□ 위원회

(2021. 11. 1. 현재)

구 분 위원회수	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여 성 위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
4	74	21	53	15	28	38	72	9	17

□ 예산규모

(단위 : 억원)

구 분	2020년	2021년	증 감	비 고
총 계	624	690	66
일반회계	527	591	64
특별회계	97	99	2

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	12	-	12	-	-	-
예산사업	11	-	11	-	-	-
비예산사업	1	-	1	-	-	-

2. 추진실적

□ 추진중 사업  ---  12건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
특별교통수단 휠체어 콜택시 운영	❍ 위탁관리 차량 : 34대 (동진 17대, 일진 17대) ❍ 위탁기간 : 2년간 ('21. 1. 1. ~ '23. 12. 31.) ❍ 이용대상 : 중증 장애인, 65세 이상, 동반가족 등 ❍ 사업비 : 2,380백만원 (대당 70백만원×34대)	❍ 이용 현황(7. 31. 기준) ❍ 등록회원 : 968명 (7. 1. 회원제 실시) ❍ 이용횟수 : 29,669회 ❍ 이용인원 : 36,267명 ❍ 사업비 지급 : 분기별 - 1회당 589,900천원×4회
시내버스 재정지원금 지원	❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. ❍ 사 업 비 : 23,230백만원 ❍ 사업대상 : 94개 노선, 272대 (부산 37, 부일 47, 삼성 100, 시민 88) ❍ 지원방법 : 표준운송원가적용, 수입금 차감 후 지원	□ 추진사항 ❍ 재정지원금 지원(1 ~ 7월) : 15,889백만원 ❍ 2021. 2.~12. 암행평가단 운영 (3단계, 120명) ❍ 2020년 시내버스 업체 경영 및 서비스·경영 평가 용역 발주 준비 중 (2020년 실적 차등지원 근거) □ 향후계획 ❍ 표준운송원가 적용 업체별 재정지원금 지원 : 2022. 1. ~ 12. ❍ 용역결과 평가를 통한 업체별 차등지원 : 2022. 12.
시내버스 국비 공모사업 추진 (중·고생 통학노선, 동부지역 순환버스)	❍ 사업내용 - 중·고생 통학노선 : 2개 노선 (10번, 20번) - 동부지역 순환버스 : 8개 노선 (1번, 2번, 2-1번, 3번, 3-1번, 4번, 5번, 6번) ❍ 사업비 : 1,381백만원 (국비 350, 시비 1,031)	□ 추진사항 ❍ 중·고생 통학노선 운행 - 2020. 3. 2. ~ : 본 운행 개시 - 2021. 1. 1. ~ 12. 31. : 계속 사업 ❍ 동부지역 순환버스 운영 - 2020. 7. 30. : 본 운행 개시 - 2021. 1. 1. ~ 12. 31. : 계속 사업 □ 향후계획 ❍ 2022. 1. ~ 12. : 표준운송원가 적용 매월 재정지원금 지원 시 통합 지원
진주~사천간 광역환승 할인 시행	❍ 사업대상 : 시내버스 303대 (진주 272, 사천 31), 시외버스 17대(경상남도) ❍ 사업내용 : 진주·사천 간 시내버스와 시외버스 간 무료 환승 ❍ 사업비 : 241백만원 (도비 73, 시비 168)	□ 추진사항 ❍ 2020. 11. 1. : 진주~사천 간 광역환승할인제 시행 ❍ 2021. 1. 1. ~ 12. 31. : 계속 사업 □ 향후계획 ❍ 2022. 1. ~ 12. : 매월 시내버스, 시외버스 이용자 확인 후 익월 정산
브라보 행복택시 운영	❍ 대상마을 : 13개 읍면 38개 마을 ❍ 추진기간 : 2019. 10. ~ - 운영방법 : 노선형 - 탑승요금 : 100원 - 운행구간 : 마을 ⇔ 면소재지 - 사업자선정 : 공개모집 ❍ 지원방법 : 운행지원금 지원 (협정요금 – 탑승요금) ❍ 사업비 : 625백만원	□ 추진사항 ❍ 2018. 12. : 지역별 순회간담회 ❍ 2019. 1. : 택시업계 대표 간담회 ❍ 2019. 4. ~ 5.: 대상마을 현지실사 - 12개 면 31개 마을 (택시업계 합동) ❍ 2019. 8. : 운송사업자 공개모집 ❍ 2019. 10. : 31개 마을 시범운영 ❍ 2020. 1. : 31개 마을 정상운영 ❍ 2020. 2. : 운영평가 및 확대 방안 용역 실시 ❍ 2020. 9. ~ 10. : 신규 수요마을(8개)확대 주민설명회 등 의견수렴 ❍ 2020. 11. : 신규 수요마을 확대 운영 □ 향후계획 ❍ 2021. 11. : 운송사업자 선정 및 교육 ❍ 2021. 12. ~ : 외곽지역 비수익 시내버스 대체 추가 수요 마을 지속 발굴
전세버스 장비구입 지원사업	❍ 대상 : 전세버스 운송사업자 (17개 업체, 263대) ❍ 내용 : 전세버스 영상기록장 치, 음주측정기, 발열체크기 구입 비용 지원(보조 70%, 자부담 30%) ❍ 예산액 : 73백만원 (도 21, 시 52)	□ 추진사항 ❍ 보조금 1~5차 지급 완료 (14개 업체, 65백만원) □ 향후계획 ❍ 장비구입 추가 신청 업체 대상으로 사업 추진
화물자동차 공영차고지 운영	❍ 위치 : 호탄동 440-2, 769번지 ❍ 규모 - 면적 : 대지 50,447㎡, 건축면적 999.02㎡, 연면적 2,320.34㎡ - 주차면수 : 449면 (대형 333, 소형 116) - 부대시설 : 관리동(지상 3층), 정비고, 세차장 ❍ 이용대상 : 사업용 화물자동차 및 차주 승용차	□ 추진사항 ❍ 2021. 1. ~ 9. : 시범운영(무료) ❍ 2021. 10. : 유료화 전환 및 기간제근로자 채용 ❍ 정기권 이용대수 : 397대 (화물 234, 승용 163) □ 향후계획 ❍ 정기권 이용자 추가 신청 접수
불법 주·정차 단속 및 주차 질서 확립	❍ 단속인원 : 12명 (공무직, 임기제) - 현장단속 : 6명(3개조) - 단속자료 판독 : 2명 - 민원상담 : 2명 - 주민신고제 처리 : 2명 ※토·일·공휴일 :1개조 2명 ❍ 단속장비 및 제도 - 시내버스 탑재형 CCTV ·단속노선 : 130, 251, 350번 ·단속대수 : 9대(노선별 3대) - 고정식 CCTV : 48대 - 이동식 CCTV : 3대 - 주민신고제 : 전국민 누구라도 ❍ 단속구간 : 주요 간선도로, 교차로 모퉁이 등 ❍ 단속시간(이동식 CCTV) - 평 일 : 7 ~ 20시 - 공휴일 : 9 ~ 18시	□ 추진사항 ❍ 월 평균 단속건수 : 5,366건 - 시내버스탑재형 : 553건 - 고정식CCTV : 3,100건 - 이동식CCTV : 926건 - 주민신고제 : 787건 □ 향후계획 ❍ 도로변 단속 - 주요 간선도로 : 중점단속 - 이면도로 : 계도 위주 단속 ❍ 행정계도 - 주민신고제 지속 안내 - 불법 주·정차 근절 홍보 강화
공영주차장 확 충 사 업	❍ 소규모 공영주차장 설치 - 대상지 : 마을 공동 부지· 국공유지 등 - 사업비 : 150백만원 ❍ 내 집 주차장 갖기 사업 - 지원대상 : 주택에 주차장을 설치하고자 하는 시민 - 지 원 액 : 1면 2백만원/ 2면 3백만원 - 총사업비 : 40백만원	□ 추진사항 ❍ 소규모 공영주차장 설치 - 신안동(1개소, 91면) - 초전동(2개소, 30면) - 가좌동(3개소, 216면) ❍ 내 집 주차장 갖기 사업 - 13가구/ 21면/ 34백만원 지원 □ 향후계획 ❍ 소규모 공영주차장 설치 - 서진주IC/하대동(2개소, 92면) - 사업대상지 확보 및 사업 추진 ❍ 내 집 주차장 갖기 사업 - 예산 소진 시까지
공영유료 주 차 장 관 리	❍ 대상 : 55개소, 1,679면 ❍ 관리 - 공개입찰 : 48개소 - 수의계약 : 6개소 - 시 직 영 : 1개소 (평거동 공영) ❍ 시설물 정비 : 120백만원 ❍ 주차관리원 지도 ❍ 2021년 주차장사용료 계약금액 : 645백만원	□ 추진사항 ❍ 위탁관리 운영 - 계약체결 : 위탁 54개소 - 사용료 징수 : 443백만원 - 주차관리원 계도 : 수시 ❍ 직영(평거동 공영주차장) - 주차요금 수입 : 36,852천원 ❍ 시설물 정비(재도색, 보수 등) : 119백만원 □ 향후계획 ❍ 위탁계약 : 분기별(1년 단위) - 12월 계약추진 : 11개소 ❍ 시설물 정비 : 1백만원
우수저류시설 상부활용 공영주차장 조성	❍ 위 치 : 3개소(초전동 1679, 평거동 1060, 가좌동 1984-1) ❍ 사업기간 : 2020. ~ 2023. ❍ 사업비 : 7,708백만원 (국비 2,354, 시비 5,354) ❍ 사업내용 - 공영주차장 3개소 251면 (A = 8,771㎡)	□ 추진사항 ❍ 2019. 1. : 우수저류시설 상부 활용 주차장 조성 기본계획 수립 ❍ 2020. 6. : 도시계획시설결정 (변경) 용역 시행 ❍ 2021. 3. : 실시설계용역 시행 □ 향후계획 ❍ 2021. 11. : 착공(초전동, 평거동) ❍ 2022. 5. : 준공(초전동, 평거동) ❍ 2022. 상반기 : 사업비 추가 확보 ❍ 2022. 하반기 : 착공(가좌동) ❍ 2023. 상반기 : 준공(가좌동)
신안동 공영주차장 조성사업	❍ 위 치 : 신안동 442-11번지 일원 ❍ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2022. 3. ❍ 사업비 : 3,000백만원 (시비 3,000) ❍ 사업내용 - 공영주차장 1개소 35면 (A = 857.6㎡)	□ 추진사항 ❍ 2020. 9. : 어린이보호구역 내 노상공영주차장 폐지 계획 수립 ❍ 2021. 2. : 주민의견 수렴 ❍ 2021. 3. : 사업 부지 추천 (신안동 → 교통행정과) ❍ 2021. 6. : 공유재산 심의 의결 ❍ 2021. 9. : 사업비 확보 □ 향후계획 ❍ 2021. 11. : 보상협의 및 실시설계 ❍ 2021. 12. : 착 공 ❍ 2022. 3. : 준 공

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 부강한 진주 건설을 위한 안전 교통도시 만들기

❍ 교통안전도시 시책 추진, 교통안전시설 확충 및 어린이 교통안전교육 강화

□ 인구 50만 자족도시 대비한 대중교통 체계 구축

❍ 대중교통 광역시스템 구축 추진

□ 시민이 행복한 대중교통 기반체계 정비

❍ 시내버스 운송관리·운행기록·정보관리 시스템 개선

□ 원활한 교통 소통 등 쾌적한 도로 환경 조성

❍ 교통신호 제어시스템 구축과 불법 주정차 근절 추진

□ 주택·아파트 밀집지역 및 상가지역 등 주차 공간 확보 투자

❍ 시내 전역 451개 생활권역별 단·장기 대책에 따라 주차공간 마련

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	13	61,401	11	-	2
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	13	61,401	11	-	2	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

주택밀집지역 주차 공간 확보

❍주택밀집지역 내 주차 공간 확보를 통하여 주차난을 해소하고 원활한

교통 소통 및 정주여건을 개선하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시내 주택밀집지역 전역

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 87개소 5,139면

2020		2021 ~ 2022		2022이후
개소	면수	개소	면수	개소	면수
10	584	19	1,267	58	3,288

❍ 사 업 비 : 16,086백만원

□ 추진상황

❍ 2020.   5. : 상대동 전화국사거리~하대강변 간 공영주차장 조성(1개소, 123면)

❍ 2020.  5. ~  9. : 노상주차장 설치사업(8개소, 626면)

❍ 2020.  8. : 장대동 공영주차타워 건립(1개소, 44면)

❍ 2020. 10. : 학교 부설주차장 개방(1개소, 98면)

❍ 2020. 11. : 평거동 공영주차타워 건립(1개소, 107면)

❍ 2020. 11. : 평거동 노상주차장 조성(1개소, 20면)

❍ 2020. 12. : 하촌천 공영주차장 조성(1개소, 97면)

❍ 2020. 12. : 유휴지를 활용한 공영주차장 조성(2개소, 20면)

❍ 2020. 12. : 내 집 주차장 갖기 사업(11건, 18면)

❍ 2021.  1. : 신안로 노상주차장 조성(1개소, 91면)

❍ 2021.  3. : 우수저류시설 상부활용 공영주차장 조성사업 대상지 변경

❍ 2021.  3. : 우수저류시설 상부활용 공영주차장 조성사업 실시설계용역

❍ 2021.  4. : 가좌동 노외공영주차장 조성(2개소, 146면)

❍ 2021.  8. : 유휴지를 활용한 공영주차장 조성(2개소, 30면)

❍ 2021.  9. : 가좌동 역세권 지하주차장 개방(1개소, 70면)

□ 추진계획

❍ 2021. 10. ~ 12.	: 하대동 노외주차장 조성(1개소, 62면)

❍ 2021. 11. ~ 2023.	: 우수저류시설 상부활용 공영주차장 조성사업(3개소, 251면)

❍ 2021. 11. ~ 2022. 3. : 서진주IC 공영주차장 확충(1개소, 30면)

❍ 2021. 12. ~ 2022. 3. : 신안동 공영주차장 준공(1개소, 35면)

❍ 2022.  1. ~	: 나대지 활용사업 등 추진

❍ 2022.  1. ~	: 내 집 주차장 갖기 사업 등 지속 추진

□ 기대효과

❍ 주거 밀집지역 주차공간 마련으로 주거환경 개선에 기여

신안, 평거 상가지역 주차 공간 추가 확보

❍신안, 평거 상가지역 주차공간 추가확보를 통하여 상가 이용자들의 주차

편의 제공과 불법 주·정차 근절로 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 신안·평거 지구

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 375면(주택밀집지역 주차 공간 확보사업과 연계)

❍ 사 업 비 : 6,056백만원

□ 추진상황

❍ 2020.  6. : 우수저류시설 활용사업 도시계획시설 결정 용역 시행

❍ 2020.  5. ~ 9. : 노상주차장 설치사업(5개소, 267면)

❍ 2020. 11. : 평거동 공영주차타워 건립(1개소, 107면)

❍ 2020. 11. : 평거동 노상주차장 조성(1개소, 20면)

❍ 2021.  1. : 신안로 노상주차장 설치(1개소, 91면)

❍ 2021.  3. : 우수저류시설 상부활용 공영주차장 조성사업 실시설계용역 시행

□ 추진계획

❍ 2021. 11. ~ 2022. 3. : 서진주 IC 공영주차장 확충(1개소, 30면)

❍ 2021. 11. ~ 2022. 5. : 우수저류시설 상부활용 공영주차장 조성사업(평거동)

❍ 2021. 12. ~ 2022. 3. : 신안동 공영주차장 조성사업(1개소, 35면)

□ 기대효과

❍ 주차난 완화 및 도심 환경 개선으로 지역상권 활성화에 기여

초전 아파트 밀집지역 주차 공간 추가 확보

❍초전지구 아파트 밀집지역의 주차 공간 부족으로 발생하는 도로변

불법 주차 근절 및 원활한 교통 소통을 위하여 주차 공간을 확보하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 초전 아파트 밀집지역

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2022년

❍ 사업내용 : 318면(주택 밀집지역 주차 공간 확보사업과 연계)

❍ 사 업 비 : 1,402백만원

□ 추진상황

❍ 2019. 10. : 자투리땅 활용 주차장 조성(2개소, 20면)

❍ 2020.  6. : 우수저류시설 활용사업 도시계획시설 결정 용역 시행

❍ 2020.  6. ~ 12. : 하촌천 공영주차장 조성사업(1개소, 97면)

❍ 2020. 12. : 유휴지를 활용한 공영주차장 조성(2개소, 20면)

❍ 2021.  3. : 우수저류시설 상부활용 공영주차장 조성사업 실시설계용역 시행

❍ 2021.  8. : 유휴지를 활용한 공영주차장 조성(2개소, 30면)

□ 추진계획

❍ 2021. 11. ~ 2022. 5. : 우수저류시설 상부활용 공영주차장 조성사업(초전동)

□ 기대효과

❍ 주차난 완화 및 도심 환경 개선으로 지역상권 활성화에 기여

어린이교통공원 및 청소년모험공원 운영

❍어린이 교통안전 교육 실시로 교통안전에 대한 경각심 고취 및 준법질서

의식을 함양시켜 건전한 교통문화 환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

❍ 위치 및 규모 : 진주시 삼계로 531(평거동) / 부지 20,312㎡

❍ 주요시설

- 어린이교통공원 : 실내·외교육장(전시실 및 영상 홍보관 외 5개소)

- 청소년모험공원 : 인라인스케이트장, X게임장, 자전거 전용도로

❍ 이용대상 : 관내·외 어린이 및 청소년

❍ 이용방법 : 홈페이지 예약 또는 방문접수 / 무료

❍ 위탁사업비(년간) : 204백만원

※ 이용객 현황	(단위 : 명)

구 분	계	어린이	청소년	일 반
2019년	78,406	50,729	5,555	22,122
2020년	11,739	7,623	824	3,292
2021년 10월	3,808	2,735	218	855

□ 추진상황

❍ 2020. :전시실 교체공사, 교육용 페달자동차 20대 구입, 실외교육장 비가림시설, 자전거 전용도로 보수 등 노후시설 정비공사 완료

❍ 2021.  3. : 휴게실 리모델링 공사 완료

❍ 2021. 11. : 실감콘텐츠 영상관 조성 및 청소년 X게임장 노후시설 정비공사 완료

□ 추진계획

❍ 어린이 교통안전교육 실시(연중) : 초등학교, 유치원, 어린이집 대상

❍ 찾아가는 어린이, 어르신 교통안전 교실 : 비수기(7 ~ 8월 / 12 ~ 2월)

□ 기대효과

❍ 다양하고 특색 있는 교통안전 체험 학습 환경 제공으로 교육효과 극대화

진주시 광역환승할인제 특화도시 조성

❍미래 남부권 100만 중심도시 진주 발전을 위하여 진주시를 중심으로 전국

지역과 광역환승할인체계를 구축하여 진주시가 대중교통 특화도시로 거듭     나게 하고자 함

□ 사업개요

❍ 사업목표 : 시외·고속버스/철도 이용 시 ⇨ 시내버스 무료 이용(택시비 할인)

❍ 환승권역 : 전국 단위

❍ 환승수단 : 버스(시내·군내·시외·고속), 철도, 택시

❍ 시행방법 : 단계적 시행

구 분		환승수단	시행시기	비 고
시범 단계		시내버스 ~ 시외버스(진주~사천)	2020. 11. 1.	완료
정식 단계	1 단계	시내버스(~ 택시) ~ 시외버스(전국 전체 노선)	2022.
	2 단계	시내버스(~ 택시) ~ 고속버스(전국 전체 노선)	2023.
	3 단계	시내버스(~ 택시) ~ 철도	2024.

□ 추진상황

❍ 2020.  6. 24.	: 진주시 광역환승할인제 전국 확대 기본계획 보고

❍ 2020.  7. 21.	: 사업 제안(市 → 道 용역에 반영 요구 : 경남연구원 수행)

❍ 2020. 12. 31.	: 사업 확정(道 노선버스 운영체계 개편 용역결과에 반영)
⇨ 道와 연계 필요사업으로 행정·예산적 지원 근거 마련

□ 추진계획

❍ 실시계획 마련 및 추진 : 진주시 제4차 지방대중교통계획 수립용역 진행

- 용역기간 : 2021. 8. ~ 2023. 4.(20개월) / 경남연구원 수행(용역비 4억원)

- 주요내용 : 전국 광역환승할인제 추진, 서부경남KTX 및 복합터미널 이전 대비 노선 정비 등

□ 기대효과

❍ 진주시민 및 외래 방문객의 교통요금 절감으로 대중교통 이용 활성화

❍ 진주시민과 동일한 교통서비스 및 혜택 제공으로 인근 시·군 통합계기 마련

❍ 전국 최고의 스마트 대중교통 인프라 구축으로 머물고 싶은 도시여건 마련

진주시 화물자동차 공영차고지 운영

❍화물자동차 공영차고지를 본격적으로 운영하여 불법 밤샘주차 문제를 해소하고

교통사고 예방, 도시미관 개선에 기여하고자 함

□ 시설현황

❍ 위    치 : 진주시 호탄동 440-2, 769번지

❍ 사 업 비 : 340억원(국 258, 도 26, 시 56)

❍ 규    모

- 면    적 : 대지 50,447㎡, 건축면적 999.02㎡, 연면적 2,320.34㎡

- 주차면수 : 449면(대형 333, 소형 116)

- 부대시설 : 관리동(지상 3층), 정비고, 세차장

□ 추진상황

❍ 2015. 10. : 1단계(동편) 시설공사 준공(2016. 10.부터 유료 직영)

❍ 2020.  9. : 2단계(서편) 시설공사 준공

❍ 2020. 12. : 건축물 사용승인 및 준공인가, 재산 이관(균형개발과→교통행정과)

❍ 2021.  1. : 무료 시범운영 개시(부대시설 제외)

❍ 2021.  2. : 위탁 추진계획 수립

❍ 2021.  3. ~ 7. : 수탁자 선정 전자입찰 공고(총 8차, 유찰)

❍ 2021.  9. : 유료화 전환 홍보 및 정기권 이용자 모집

❍ 2021. 10. : 시 직영 개시(1년간 예정, 부대시설 제외)

□ 추진계획

❍ 2022.  1. : 관리위탁 비용 원가계산 용역 시행

❍ 2022.  3. : 상반기 정기권 이용자 모집

□ 기대효과

❍ 영업용 화물차 불법 밤샘주차 문제 해소 및 화물운수종사자 편의 제공

브라보 행복택시 운영

❍교통수요가 없고 주민의 요구가 있는 지역에 브라보 진주행복택시를 확대

운영하고자 함

□ 사업개요

❍ 대    상 : 13개 읍면 38개 마을(금곡, 일반성, 대평면 제외)

❍ 운영기간 : 2019. 10. ~ 계속

- 운행구간 : 마을회관 ⇔ 면소재지 또는 인근 생활권

- 운행방법 : 노선형(출발시간, 1일 운행횟수 지정)

- 탑승요금 : 100원/1인

❍ 사 업 비 : 연간 625백만원

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기 투자	2021	2022	2023이후
계	2,738	513	625	600	1,000
국 비	938	128	250	300	260
도 비	809	164	125	150	370
시 비	991	221	250	150	370

□ 추진상황

❍ 2019.  1. ~  7. : 지역 순회 및 택시업계 간담회, 대상마을 현지조사 등

❍ 2019.  8. ~  9. : 운송사업자(한정면허) 공개모집 및 교육

❍ 2019. 10. ~ 12. : 브라보 행복택시 시범운영

❍ 2020.  1. ~  9. : 브라보 행복택시 정상운영(12개 면 31개 마을)

❍ 2020.  2. ~  9. : 브라보 행복택시 운영평가 및 확대방안 용역 시행

❍ 2020.  9. ~ 10. : 주민의견수렴 및 확대종합계획 수립

❍ 2020. 11. : 브라보 행복택시 신규 수요마을(7개) 확대운영

※ 신규 수요마을(7개) : 문산(정동, 상이), 진성(산골), 지수(마실), 대곡(서지골), 명석(엄목), 수곡(구태)

□ 추진계획

❍ 2021. 11. : 운송사업자(한정면허) 선정 및 교육

❍ 2021. 12. ~ : 외곽 비수익노선 시내버스 대체 추가 수요마을 지속 발굴

□ 기대효과

❍ 주민 맞춤형 교통편의 제공으로 교통 복지 혜택 확대 기여

❍ 택시업계 수익보장으로 경영난 해소 및 지역 내 택시 초과공급 완화에 기여

사업용자동차 유가보조금 지원사업

❍정부의 에너지 세제개편에 따른 유류세 인상분의 일부(전부)를 여객 및 화물      운송사업자에게 사업용자동차 유가보조금으로 지원하고자 함

□ 사업개요

❍ 지원시기 : 2002년부터 지속

❍ 지원대상 : 5,257대(버스 853 / 택시 1,693 / 사업용 화물자동차 2,711)

계	버 스			택 시		화 물
	시내	시외	전세	개인	법인	일반	개인
5,257	260 (CNG 153)	591	2	999	694	1,575	1,136

※ 전기자동차 제외(미포함) : 47대(시내버스 12, 개인택시 7, 법인택시 1, 개인화물 27)

❍ 사 업 비 : 28,000백만원

(재원 : 정유회사 유류 출고 시 자동차 주행세 징수액의 지방자치단체별 안분액)

□ 추진상황

❍ 유가보조금 지급 : 월 1회	(21.11.1.현재, 단위 : 백만원)

연 도	총사업비	집행금액	집행잔액	비 고
2021년	28,000	18,268	9,732

※ 2021년 11월 현재 지급기준 단가(ℓ, ㎥, kg당) : 국토교통부 고시

- 경유	: 시내･시외･일반고속버스 380.09원, 우등고속버스･화물 345.54원

- LPG	: 택시 197.97원 / CNG : 노선버스 65.30원, 전세버스 32.65원

- 수소	: 노선･전세 3,500원(2021.9.24.시행)

□ 추진계획

❍ 매월 신청 접수한 유가보조금 정기적 지급 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

❍ 유가보조금 부정수급 조사 및 행정처분 : 수시

□ 기대효과

❍ 여객 및 화물운송사업자 재정 지원으로 자립 경영 기여

불법 주·정차 단속 및 주차 질서 확립

❍도로에서 일어나는 교통상의 모든 위험과 장해를 제거하여 안전하고 원활한

교통흐름을 확보하기 위함

□ 사업개요

❍ 고정식 CCTV : 48대【08~20시, 연중무휴】

❍ 이동식 CCTV :  3대【07~20시, 연중무휴】

❍ 시내버스 탑재형 CCTV : 9대【상시, 08~20시, 연중무휴】

- 운행노선 : 130번, 251번, 350번 / 노선별 3대

❍ 주민신고제 : 시민 누구나 안전신문고 앱으로 신고 가능

- 신고대상 :어린이보호구역, 소화전, 교차로 모퉁이, 버스정류장, 횡단보도, 인도, 이중주차, 안전지대, 황색복선 구간

- 신고방법 : 1 ~ 5분 이상 주·정차한 차량을 신고할 경우 과태료 부과

□ 추진상황 (2021. 1. 1. ~ 10. 31.)

❍ 단속현황	(단위 : 건)

계	고정식	이동식	버스탑재형	주민신고제	비 고
64,415	37,206	11,117	6,643	9,449

❍ 과태료 부과·징수현황	(단위 : 백만원)

부 과 액	징 수 액	미 납 액	징 수 율 (%)	비 고
2,002	1,322	680	66

□ 추진계획

❍ 교통흐름 방해로 안전사고 발생 우려가 있는 주요 간선도로변 단속강화

❍ 주택가 이면 도로는 계도 위주의 단속 및 홍보활동 병행

❍ 주민신고제(안전신문고 앱) 활성화

□ 기대효과

❍ 교통흐름을 방해하는 불법 주·정차 단속으로 주차질서 확립

❍ 보행권 확보 및 원활한 교통소통으로 시민의 안전 확보

시민 참여형 주차장 조성

❍차량 증가 및 주차 공간 부족에서 발생하는 주차문제를 해결하기 위하여

시민 참여형 주차장을 조성하고자 함

□ 사업개요

❍ 사업내용

- 내 집 담장 허물어 주차장 갖기 사업(15개소, 25면)

- 부설주차장 개방사업(2개소, 200면)

- 민간 유휴 자투리땅 활용 임시주차장 조성사업(10개소, 100면)

- 마을 소규모 주차장 조성사업

❍ 사 업 비 : 300백만원

□ 추진상황

❍ 2021. 1. ~  : 내 집 담장 허물어 주차장 갖기사업(13개소, 21면)

❍ 2021. 1. ~  : 유휴 자투리땅 활용 임시주차장 조성사업 등(5개소, 267면)

□ 추진계획

❍ 2022. 1. ~  : 내 집 담장 허물어 주차장 갖기 사업

❍ 2022. 1. ~  : 자투리땅 활용 임시주차장 조성사업

❍ 2022. 1. ~  : 마을 소규모 주차장 조성사업

□ 기대효과

❍ 지역 주차문제를 주민·행정이 함께 해결해가는 책임 공동체 역할

교통약자 바우처택시 운영

❍특별교통수단 이용 수요 증가에 따라 배차시간 지연 등 불편사항 발생으로

바우처택시 도입을 통해 이용자 불편 해소 및 교통약자의 이동편의 증진을

도모하고자 함

□ 사업개요

❍ 이용대상 : 진주시에 주소를 두고 회원 등록된 비 휠체어 이용자

❍ 이용요금 : 2,000원

❍ 지원금액 : 택시 이용 요금(최대 1인당 월 100천원)  ※ 초과분 자부담

❍ 이용횟수 : 1인 1일 편도 4회

❍ 운영방법 : 일부 임차 운영(택시회사 위탁 또는 공개모집)

❍ 운영대수 : 17대

❍ 사 업 비 : 연간 320백만원

□ 추진계획

❍ 2022. 상반기 : 진주시 교통약자의 이동편의 증진 조례 개정 택시업계 간담회, 관련 단체 등 의견 수렴시행 세부 추진 계획 수립

❍ 2022. 하반기 : 사업자 공개모집 및 선정, 교육실시
교통약자 바우처택시 운영

□ 기대효과

❍ 특별교통수단 대기 시간 단축으로 이용자 불편 해소

❍ 특별교통수단 운영 효율 증대 및 교통약자 이동 편의 증진

LED 횡단보도 바닥신호등 설치 사업

❍횡단보도 양쪽 인도 부분 바닥에 LED 바닥신호등을 설치하여 추가적인

보행자 신호정보 제공

❍야간 차량운전자의 시인성 확보와 스마트폰 사용 등으로 인한 교통사고

사전 예방

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 관내

❍ 사업기간 : 2022. 8 ~ 10월

❍ 사업내용 : 바닥신호등 설치 3개소

❍ 사 업 비 : 300백만원(교차로 1개소당 사업비 약 100백만원 소요)

□ 추진사항

❍ 2021. 7. :	한국토지주택공사(LH)에서 정주여건 개선사업으로 충무공동 어린이보호구역 내 4개소 바닥신호등 시범설치 완료

□ 추진계획

❍ 2021. 8. ~ 2022. 3. : 시설물 설치 효과 및 유지관리 문제점 검토

❍ 2022. 3. ~  4. : 진주경찰서와 추가 사업대상지 협의 및 위치 선정

❍ 2022. 4. ~  5. : 추가경정예산 편성

❍ 2022. 8. ~ 10. : LED 횡단보도 바닥신호등 추가설치 사업 실시

□ 기대효과

❍ 야간 및 우천 시 차량운전자의 보행신호등 시인성 확보

❍ 보행자의 인지능력 제고 및 교통사고 예방

우수저류시설 상부활용 주차장 조성

❍주택밀집지역 주차난 해소를 위해 재해예방시설인 우수저류시설 상부를

활용하여 공영주차장을 조성하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 3개소(초전동 1679, 평거동 1060, 가좌동 1984-1)

❍ 사업기간 : 2020. ~ 2023.

❍ 사 업 량 : 지상 1층(부지면적 8,771㎡, 251면)

❍ 사 업 비 : 7,708백만원(균특 2,354, 시비 5,354)

※ 사업비 추가 확보 예정 : 4,708백만원 ⇒ 7,708백만원(시비 3,000백만원 증)

□ 추진상황

❍ 2019.  4. : 균형발전특별회계(주차환경개선사업) 예산 신청

❍ 2019. 11. : 공유재산심의회 원안 가결 및 지방재정투자사업 심사 통과

❍ 2020. ~ 2021. : 균특(주차환경개선사업) 2,354백만원 확보

❍ 2020.  6. : 도시계획시설 중복 결정 용역 시행

❍ 2021.  3. : 국토부 사업변경 승인(사업위치 변경 1개소 : 평거동 ⇒ 가좌동)

❍ 2021.  3. : 실시설계용역 시행

❍ 2021. 10. : 도시계획시설 결정

□ 추진계획

❍ 2021. 11. : 공사 착공(초전동, 평거동)

❍ 2022.  5. : 공사 준공(초전동, 평거동)

❍ 2022. 상반기 : 사업비 추가 확보(2022년 1회 추경 3,000백만원)

❍ 2022. 하반기 : 공사 착공(가좌동)

❍ 2023. 상반기 : 공사 준공(가좌동)

□ 기대효과

❍ 주거 밀집지역 주차공간 마련으로 주거환경 개선에 기여

환 경 관 리 과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황(6개 팀 : 환경행정, 대기개선, 생활환경, 수질개선, 수계관리, 자전거도시)

(단위 : 명)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	29	-	1	8	9	6	5
현 원	28	-	1	10	8	3	6	공무직4 환경공무직1
증 감	△1	-	-	2	△1	△3	1

□ 위원회

(2021. 11. 1. 현재)

구 분 위원회수	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원 중 여 성 위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
진주시지속 가능발전 협의회	50	4	46	3	7	43	93	21	46

□ 예산규모

(단위 : 억원)

구 분		2020년	2021년	증 감	비 고
총 계		404	796	392
일반회계		268	676	408
특별회계	소 계	136	120	△16
	수질개선	107	88	△19
	지하수관리	6	6	-
	공공폐수	23	26	3

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 :  건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	25	7	18	-	-
예산사업	21	7	14	-	-
비예산사업	4	-	4	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업  ---  7건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주 요 성 과
야생동물 피해예방 및 보상지원 사업	❍ 피해예방시설 설치비 지원사업 - 사 업 비 : 192백만원 - 지원금액 : 설치비의 60%(최대 5백만원)	□ 추진사항 ❍ 지원사업 신청서 접수 및 지원대상자 심의 확정 : '21. 2 ~ 3월 - 확정현황 : 80건/192백만원 ❍ 준공검사 및 보조금 지원 : '21. 8월 - 지원시설 : 철망울타리 77, 전기목책기 3	❍피해예방시설 설치로 농작물 피해 예방
	❍ 야생동물로 인한 농작물 피해보상 지원 - 사 업 비 : 45백만원 - 지원금액 : 피해액의 40~80%	□ 추진사항 ❍ 피해보상 신청 : 65건/64백만원 ❍ 피해보상금 지급 : 60건/45백만원	❍피해보상으로 농업인 사기진작
천연가스 차량 보급사업	❍ 천연가스 차량 보급 - 사업대상 : 시내버스 - 사 업 량 : 9대 - 지원금액 : 12백만원/대 - 사 업 비 : 108백만원	□ 추진사항 ❍ 천연가스차량(시내버스) 보급 : 9대/108백만원	❍천연가스 차량 보급 확대로 미세먼지 저감에 기여
미세먼지 및 오존 신호등 설치사업	❍ 사 업 량 : 1개소 ❍ 설치장소 - 충무공동 이성자미술관 옆 ❍ 사 업 비 : 10백만원	□ 추진사항 ❍ 공사 착공 : '21. 4월 ❍ 신호등 설치 : '21. 4월	❍고농도 미세먼지 및 오존 취약 연령층의 신속 대응 체계 구축
슬레이트 실태조사	❍ 사 업 량 : 실태조사 1식 ❍ 사업대상 : 진주시 일원 ❍ 사 업 비 : 40백만원	□ 추진사항 ❍ 슬레이트 실태조사 - '21. 5 ~ 9월	❍석면관리 안전성, 전문성 확보로 시민의 건강 피해예방
전기버스 충전기 설치	❍ 전기버스 충전기 설치 - 사업대상 : 시내버스업체 - 사 업 량 : 3기 - 지원금액 : 50백만원/기 - 사 업 비 : 150백만원	□ 추진사항 ❍ 전기버스 충전기 설치 : 3기/150백만원 (공영차고지 내 설치완료)	❍전기버스차량 보급확대를 위한 인프라 구축
전기버스 구매지원	❍ 전기버스 차량 보급 - 사업대상 : 시내버스 - 사 업 량 : 12대 - 지원금액 : 16백만원/대 - 사 업 비 : 1,920백만원	□ 추진사항 ❍ 전기버스차량(시내버스) 보급 : 12대/1,920백만원	❍전기버스 차량 보급 확대로 미세먼지 저감에 기여
자전거도로 개설	❍ 구)진주역~경상대 후문 자전거도로 식재공사 - 위 치 : 주약동 일원 - 사업량 : L=254m, B=11m - 사업비 : 500백만원 - 기 간 : '20.10월~'21.4월	□ 추진사항 ❍ '20. 10월 : 착공 ❍ '21. 4월 : 준공	❍낙후된 구도심 지역의 정주여건 개선 및 자전거 이용 활성화
	❍ 오미마을~청동기박물관 - 위 치 : 대평, 명석면 - 사업량 : L=8.2㎞, B=3.5m - 사업비 : 10,000백만원 - 기 간 : '20.5월~'21.10월	□ 추진사항 ❍ '20. 5월 : 착공 ❍ '21. 10월 : 준공	❍산청군과 자전거 인프라 공유 및 자전거 이용 활성화

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
환경개선 부담금 부과·징수	❍ 부과대상 : 경유자동차 ❍ 부과횟수 : 연간 2회 - 1기분 : 3월 - 2기분 : 9월	□ 추진사항 ❍ 2021년도 부과 현황 - 50,243건/2,234백만원 ❍ 2021년도 징수 현황 - 41,687건/1,856백만원(83%) □ 향후계획 ❍ 체납자 납부독려 및 압류 조치 : '21. 12월
탄소배출량 감축을 통한 기후변화 대응	❍ 폐기물 부문 온실가스 배출권 관리 용역 - 목 적 : 공공분야 온실 가스 배출량 관리 - 대 상 : 53개 시설 (하수처리장, 매립장, 정수장 등) - 사 업 비 : 44백만원 ※ 배출권 : 이산화탄소 1톤당 30,000원 거래	□ 추진사항 ❍ 지정일 : '15. 7. 25. ❍ 1차 계획기간 : '15 ~ '17년 - 할당량 준수 ❍ 2차 계획기간 : '18 ~ '20년(3년) - 할당량 준수 ❍ 3차 계획기간 : '21 ~ '25년(5년) - 대상시설 : 53개 시설 ❍ 온실가스 배출량 산정 및 모니터링 용역 시행 - 업 체 명 : 카이트엔지니어링 외 1 - 용 역 비 : 44백만원 - 용역기간 : '21. 1 ~ 12월 □ 향후계획 ❍ 온실가스 배출량 목표 미달성 시 배출권 매입
탄소배출량 감축을 통한 기후변화 대응	❍ 탄소포인트제 운영 - 대상 : 공동, 일반주택 - 항목 : 전기, 수도, 도시가스 - 참여방법 : 탄소포인트 홈페이지 이용 또는 서면신청 - 인센티브 지급 : 2회/년 ※ 1포인트 = 2원으로 환산 지급 - 사업비 : 108백만원	□ 추진사항 ❍ 가입자 수 : 7,908세대 ❍ 상반기 인센티브 지급 : 2,413세대/46백만원 ❍ 홍보 전단지 배부 : 5,300매 □ 향후계획 ❍ 탄소포인트제 가입 홍보 : 홈페이지 등 ❍ 하반기 인센티브 지급 : 2,700세대/62백만원
가정용 친환경보일러 설치지원	❍ 가정용 친환경보일러 설치 지원 - 지원대상 : 주택소유자 - 사 업 량 : 5,793대 - 지원금액 ·일반 20만원/세대 ·저소득 60만원/세대 - 사 업 비 : 1,157백만원	□ 추진사항 ❍ 친환경보일러 설치 지원 : 4,006가구/801백만원 □ 향후계획 ❍ 친환경보일러 설치 지원 : 1,787가구/356백만원
슬레이트 처리지원 및 지붕개량사업	❍ 지원대상 : 슬레이트 건물 ❍ 슬레이트 처리 - 사 업 량 : 285세대 - 사 업 비 : 946백만원 - 지원기준 ·주 택 : 3,440천원/세대 ·비주택 : 200㎡ 이하/세대 ❍ 지붕개량 - 사 업 량 : 15세대 - 사 업 비 : 76백만원 - 지원기준 ·일반 : 300만원/세대 ·우선지원가구 : 1,000만원/세대	□ 추진사항 ❍ 지원대상 접수 : '21. 1 ~ 2월 ❍위탁업체 선정 및 슬레이트 해체 공사 발주 : '21. 3월(10개 권역) ❍ 슬레이트 처리 및 지붕개량 - 슬레이트 처리 : 250세대 - 지붕 개량 : 10세대 □ 향후계획 ❍ 슬레이트 처리 공사 준공 : '21. 12월
전기자동차 보급사업	❍ 전기승용차 보급 - 지원금액 : 최대 14백만원/대 - 사 업 비 : 15,987백만원	□ 추진사항 ❍ 전기자동차 보급 : 657대/8,516백만원 □ 향후계획 ❍ 대상자 추가 선정 및 보조금 지급 : '21. 11 ~ 12월
	❍ 전기화물차 보급 확대 - 지원금액 : 22백만원/대 - 사 업 비 : 6,896백만원	□ 추진사항 ❍ 전기화물차 보급 : 261대/5,747백만원 □ 향후계획 ❍ 대상자 추가 선정 및 보조금 지급 : '21. 11 ~ 12월
	❍ 전기이륜차 보급 확대 - 지원금액 : 180만원/대 - 사 업 비 : 360백만원	□ 추진사항 ❍ 전기이륜차 보급 : 156대/341백만원 □ 향후계획 ❍ 대상자 추가 선정 및 보조금 지급 : '21. 11 ~ 12월
수소자동차 보급사업	❍ 수소자동차 보급 - 지원금액 : 33.1백만원/대 - 사 업 비 : 5,097백만원	□ 추진사항 ❍ 수소자동차 보급 : 70대/2,317백만원 □ 향후계획 ❍ 대상자 추가 선정 및 보조금 지급 : '21. 11 ~ 12월
수소차 충전시설 운 영	❍ 위치 : 판문로 194 (서진주충전소 부지 내) ❍ 사 업 비 : 198백만원 ❍ 위탁업체 : ㈜진주수소충전소	□ 추진사항 ❍ 수소충전소 준공 : '21. 4월 ❍ 수소충전소 민간위탁 협약 : '21. 4월 ❍ 수소충전소 운영 : '21. 4월 ~ 계속

□ 추진중 사업  ---  18건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
운행차 배출가스 저감사업	❍ 노후경유차 조기폐차 지원 - 사업대상 : 배출가스 5등급 경유차 - 사 업 량 : 3,810대 - 사 업 비 : 6,096백만원 - 지원금액 : 차종별 최대 300~4,000만원	□ 추진사항 ❍ 노후경유차 조기폐차 지원 : 2,274대/4,174백만원 ❍ 노후경유차 조기폐차 선정 : 1,536대/1,922백만원 □ 향후계획 ❍ 보조금 지급 : '21. 11 ~ 12월
	❍ 경유차 저감장치 부착사업 - 사업대상 : 배출가스 5등급 경유차 - 사 업 량 : 2,000대 - 사 업 비 : 7,600백만원 - 지원금액 : 차종별 최대 292~632만원	□ 추진사항 ❍ 저감장치 부착지원 : 999대/3,394백만원 ❍ 저감장치 부착지원 대상자 선정 : 1,001대/4,206백만원 □ 향후계획 ❍ 선정자 보조금 지급 : '21. 11 ~ 12월
	❍ LPG 화물차 신차구입 지원 - 사업대상 : 노후경유차 조기폐차 후 LPG 1톤 화물차 구매자 - 사 업 량 : 250대 - 사 업 비 : 1,104백만원 - 지원금액 : 400만원/대	□ 추진사항 ❍ LPG 화물차 신차 구매 지원 : 132대/528백만원 ❍ LPG 화물차 신차 구매 선정 : 118대/576백만원 □ 향후계획 ❍ 선정자 보조금 지급 : '21. 11 ~ 12월
	❍ 건설기계 엔진교체 사업 - 사업대상 : Tier-1이하 엔진을 탑재한 지게차, 굴삭기 - 사 업 량 : 88대 - 사 업 비 : 1,460백만원 - 지원금액 : 차종별 12,993~ 19,013천원	□ 추진사항 ❍ 건설기계 엔진교체 지원 : 34대/363백만원 ❍ 건설기계 엔진교체 대상자 선정 : 54대/1,097백만원 □ 향후계획 ❍ 보조금 지급 : '21. 11 ~ 12월
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	❍ 지원대상 - 대기배출업소 1~5종 사업장(중소기업) ❍ 사업량 : 40개소 ❍ 사업비 : 1,890백만원 ❍ 지원기준 - 방지시설 종류·용량별 산정금액 기준별 지원 ❍ 지원금액 - 방지시설 교체비용의 90% 지원	□ 추진사항 ❍ 사업 승인 - 32개소/1,758백만원 ❍ 보조금 지급 - 25개소/1,453백만원 □ 향후계획 ❍ 사업 추진 및 보조금 지급 : '21. 11 ~ 12월
주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업	❍ 지원대상 - 연간 휘발유 판매량 2,000㎥ 미만 주유소 (중소기업) ❍ 사업량 : 29개소 ❍ 사업비 : 198백만원 ❍ 지원기준 - 판매량 및 조기 설치 시기별 차등 지원 ❍ 지원금액 - 유증기 회수설비 설치비의 30~50% 지원	□ 추진사항 ❍ 사업신청 공고 - '21. 1월(1차), 3월(2차) ❍ 사업 승인 및 보조금 지급현황 - 2개소/8백만원 □ 향후계획 ❍ 배출시설 점검 시 지원사업 독려 ❍ 잔여예산 명시이월 후 집행
대기·소음 배출업소 관리	❍ 업소 현황 : 375개소 - 대기 : 273개소 - 소음·진동 : 102개소 ❍ 정기 점검 -대상업소 수 : 189개소 ·대기 : 155개소 ·소음･진동 : 34개소 ❍ 환경기술인 교육 : 83명	□ 추진사항 ❍배출업소 점검 실적 - 점검업소 : 121개소 - 위반업소 : 12개소 ·대 기 : 10개소 ·소음･진동 : 2개소 - 행정조치 : 12개소 ·경 고 : 4개소 ·사용중지명령 : 1개소 ·개선명령 : 2개소 ·과 태 료 : 3개소(180만원) ·고 발 : 2개소 ❍ 환경기술인 교육 : 60명 □ 향후계획 ❍ 지도점검 지속 추진 ❍ 환경기술인 교육 : 23명
비산먼지 발생 사업장 관리	❍ 업소현황 : 134개소 - 건설업 : 102개소 - 비금속물질 채취 제조 가공업 : 20개소 - 시멘트 제조업, 가공 및 저장업 : 10개소 - 1차금속 제조업 : 2개소	□ 추진사항 ❍사업장 점검 실적 - 점검업소 : 119개소 - 위반업소 : 10개소 - 행정조치 : 10개소 ·경 고 : 6개소 ·개선명령 : 3개소 ·조치이행명령 : 1개소 □ 향후계획 ❍ 지도점검 지속 추진
수질오염원 관 리	❍ 대상 : 1,208개소 (폐수 549, 기타수질 206, 가축분뇨 453) ❍ 정기점검 - 대상업소 : 451개소 (폐수 215, 기타수질 60, 가축분뇨 176) ※ 점검 제외 : 343개소 - 자율점검 업소 : 25개소 - 우수관리 업소 : 312개소 - 신규 업소 : 6개소 ❍ 환경기술인 교육 : 164명	□ 추진사항 ❍ 배출업소 점검실적 - 지도점검 업소 : 251개소 (폐수 117, 기타수질 36, 가축분뇨 98) - 위반업소 : 29개소 (폐수 21, 가축분뇨 8) ·조치명령 : 1개소 ·조업정지 : 1개소 (병과 1, 과태료 2,000천원) ·사용중지 : 3개소(병과3, 고발3) ·개선명령 : 3개소 (병과2, 과태료 1,000천원) ·경 고 : 7개소 (병과 6, 과태료 5,200천원) ·과 태 료 : 11개소(6,600천원) ·고 발 : 3개소 ❍ 환경기술인 교육 : 80명 □ 향후계획 ❍ 지도점검 지속 추진 ❍ 환경기술인 교육 : 84명
지하수 관리	❍ 지하수 이용실태 조사 - 대상지역 : 대곡면, 정촌면 등 - 조사내용 : 시설 사용 유무, 신고·허가 유무 등 - 사 업 비 : 47백만원 ※ 허가 및 신고시설 : 845공	□ 추진사항 ❍ 조사기간 : '21. 4 ~ 9월 ❍ 조사업체 : ㈜토성개발 ❍ 조사결과 : 방치공 57개소 □ 향후계획 ❍ 방치공 원상 복구 사업 추진
	❍ 보조지하수 관측망 설치 - 사업량 : 4개소 - 기 간 : '21. 1 ~ 12월 - 사업비 : 90백만원 ※ 관측망설치 목표 : 84개소 (2020년까지 설치 : 62개소)	□ 추진사항 ❍ 보조지하수 관측망 설치 발주 - 설치발주 : '21. 1월 - 대행기관 : 한국농어촌공사 □ 향후계획 ❍ 보조지하수 관측망 설치 완료 : '21. 12월
	❍ 보조지하수 관측망 모니터링 실시 - 사업량 : 61개소 - 기 간 : '21. 1 ~ 12월 - 측정항목 : 수위, 온도, 전기전도도 등 - 사업비 : 85백만원	□ 추진사항 ❍ 보조지하수 관측망 모니터링 용역 - 용역발주 : '21. 1월 - 대행기관 : 한국농어촌공사 □ 향후계획 ❍ 보조지하수 관측망 모니터링 용역 준공 : '21. 12월
	❍ 지하수 이용부담금 부과·징수 - 대상 : 605개소 [생활용수(가정용 제외), 공업용수] - 부과기준 : 85원/톤 - 부과주기 : 매월	□ 추진사항 ❍ 지하수 이용부담금 부과·징수 - 부과금액 : 153백만원 - 징수금액 : 150백만원(98%) □ 향후계획 ❍ 이용부담금 부과·징수 : 11~12월분
일반 산업단지 공공폐수 처리시설 운영·관리	❍ 대 상 - 공공폐수처리시설 ·정촌일반산업단지 ·진주(사봉)일반산업단지 ❍ 사업비 : 2,643백만원 ❍ 사업기간 : 연중 ❍ 사업내용 - 공공폐수처리시설 위탁 계약 -오·폐수처리 사용료 부과 및 징수	□ 추진사항 ❍ 공공폐수처리시설 위탁계약 - 정촌공공폐수처리시설(2차년도) ·시설용량 : 4,500㎥/일 ·계약금액 : 801,800천원/년 ·기 간 : '21. 1. 1. ~ 12. 31. ·위탁업체 : 환경시설관리(주) - 사봉공공폐수처리시설(3차년도) ·시설용량 : 1,000㎥/일 ·계약금액 : 458,792천원/년 ·기 간 : '21. 1. 1. ~ 12. 31. ·위탁업체 : 환경시설관리(주) ❍ 오･폐수처리 사용료 부과 및 징수 - 근거 : 공공폐수처리시설 운영 및 비용부담 조례 - 부과주기 : 매월 - '21년 부과·징수현황('21년 9월) ·대상 : 정촌 229건, 사봉 82건 ·부과 : 정촌 288,791천원 사봉 108,395천원 ·징수 : 정촌 285,792천원(99.0%) 사봉 107,384천원(99.1%) □ 향후계획 ❍ 정촌·사봉 공공폐수처리시설 민간위탁계약 : '21. 12월
낙동강수계 주민지원 사업 추진	❍ 대상지역 : 5개 면･동 ❍ 사 업 비 : 2,277백만원 ❍ 사업내용 : 34건 - 일반지원사업 : 27건/664백만원 - 직접지원사업(5건) : 1,400세대/663백만원 - 중･장기사업 : 2건/950백만원	□ 추진사항 ❍ '20. 10월 : '21년도 주민지원사업 계획 수립 ❍ '21. 3월 : 사업계획 승인 및 확정 (경남도,낙동강유역환경청) ❍ '21. 3월 ~ 현재 : 사업 추진 ·완 료 : 30건/1,299백만원 ·추진 중 : 4건/978백만원 (중장기/추가사업) □ 향후계획 ❍ 주민지원사업 완료 : '21. 12월
자전거 이용활성화 추진	❍ 공영 자전거 대여소 운영 ❍ 전 시민 자전거보험 가입 ❍ 남강과 함께하는 자전거 투어 및 자전거 환경 순찰반 운영 ❍ 시민 자전거 안전 교육장 운영 ❍ 찾아가는 자전거 수리 ❍ 자전거 동호회 활성화	□ 추진사항 ❍ 자전거 대여소 운영 : 3개소 312대, 14개 동 53대 운영 ❍ 자전거 보험 지원 : 336건/238백만원 ❍ 자전거 순찰반 : 21개 읍면동 운영 ❍ 자전거 교육장 운영실적 : 시민 241명 ❍ 자전거 수리 실적 : 19개소(12개 면, 7개 시범학교) 366대/981건 수리점검 ❍ 자전거 동호회 구성 : 21개 읍면동 동호회(410명) □ 향후계획 ❍ 21개 읍면동 자전거 이용 활성화 추진
자전거도로 개설	❍ 희망교~남강댐 자전거· 보행도로 조성 - 위 치 : 내동면 일원 - 사업량 : L=1.4㎞, B=5.5m - 사업비 : 11,000백만원 - 기 간 : '21. 7월 ~ '22. 1월	□ 추진사항 ❍ '21. 7월 : 공사 착공 ※ 공정률 : 30% □ 향후계획 ❍ '22. 1월 : 공사 준공
	❍ 구)수목원역~함안경계 자전거도로 개설 - 위 치 : 일반성, 이반성면 일원 - 사업량 : L=7.0km, B=5.5m - 사업비 : 3,000백만원 - 기 간 : '21. 7월 ~ '22. 7월	□ 추진사항 ❍ '21. 7월 : 공사 착공 ※ 공정률 : 30% □ 향후계획 ❍ '22. 7월 : 공사 준공
	❍ 내동 산강마을~유동마을 자전거도로 개설 - 위 치 : 내동면 일원 - 사업량 : L=2.4㎞, B=5.5m - 사업비 : 1,950백만원 - 기 간 : '21. 7월 ~ '22. 1월	□ 추진사항 ❍ '21. 7월 : 공사 착공 ※ 공정률 : 30% □ 향후계획 ❍ '22. 1월 : 공사 준공
	❍ 혁신도시~금산교 자전거 도로 개설 - 위 치 : 충무공동, 금산면 일원 - 사업량 : L=3.8㎞, B=3.5m - 사업비 : 4,600백만원 - 기 간 : '21. 7월 ~ '22. 1월	□ 추진사항 ❍ '21. 7월 : 공사 착공 ※ 공정률 : 30% □ 향후계획 ❍ '22. 1월 : 공사 준공

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 야생동물로 인한 인명 및 농작물 피해 최소화로 인간과 야생동물이 공존하는 건강한 생태환경 조성

□ 기후변화 대응 및 저탄소 사회 전환을 위한 그린뉴딜 정책 구현

❍ 친환경 교통수단 보급 확대로 오염물질 감축 및 그린경제로의 전환

❍ 기후변화 대응 및 미세먼지 저감 시책 추진으로 깨끗한 대기환경 조성

□ 남강·지방하천 수질관리를 통한 생태환경 조성

□ 수질오염 총량관리로 효율적이고 체계적인 수 환경 관리기반 구축

□ 자전거 이용활성화 시책 적극 추진 및 자전거도로 인프라 구축으로 친환경 도시 조성에 기여

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	7	71,058	5	2	-	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	7	71,058	5	2	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

야생동물로 인한 농작물 피해예방 및 보상

❍야생동물로 인한 인명 및 농작물 피해를 최소화하여 인간과 야생동물이

공존하는 건강한 생태환경 조성

□ 사업개요

❍ 사 업 비 : 471백만원(국 62, 도 25, 시 384)

❍ 사업내용

- 야생동물 피해예방 및 보상 지원사업

- 유해야생동물 구제 및 생태계 교란생물 퇴치사업

□ 추진계획

❍ 야생동물 피해예방시설 설치비용 지원 : 254백만원(국 42, 도 12, 시 200)

- 2022. 2. ~  3. : 지원대상자 신청서 접수 및 대상자 확정

- 2022. 4. ~  8. : 피해예방시설 설치비 지원

❍ 야생동물로 인한 피해보상 지원 : 57백만원(도 7, 시 50)

- 2022. 2. ~ 12. : 신청자 접수 후 지급

❍ 포획틀 설치·운영 : 50백만원(국 4, 도 1, 시 45)

- 2022. 2. : 포획틀 구입

- 2022. 1. ~ 12. : 희망농가를 대상으로 포획틀 설치･운영

❍ 유해야생동물 수확기 피해방지단 운영 : 78백만원

- 2022. 7. ~ 12. : 수확기 피해방지단 운영

- 2022. 1. ~ 12. : 포획 보상금 지급

❍ 생태계교란생물 퇴치사업 : 20백만원(국 10, 도 3, 시 7)

- 2022. 2. ~ 12. : 뉴트리아, 가시박 등 생태계교란생물 퇴치사업 실시

❍ 반달가슴곰 공존문화 조성사업 : 12백만원(국 6, 도 2, 시 4)

- 2022. 2. ~ 12. : 올무 수거 및 홍보

□ 기대효과

❍ 농작물 피해 예방을 통한 농가의 안정적 소득 보장과 생태계 유지에 기여

진주형 그린 모빌리티(뉴딜) 보급 확대

❍저탄소·친환경 경제기반 전환(그린뉴딜)을 위한 전기·수소차 보급 및 노후

경유차량의 친환경차 전환 확대

□ 사업개요

❍ 대상사업

- 충전 인프라 구축 : 수소충전소 3개소, 전기차 공공급속충전기 89기

- 수소·전기차 보급 : 13,579대

- 노후 경유차 친환경차 전환 : 14,690대(조기폐차, 매연저감장치 부착 등)

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2025년

❍ 소요예산 : 277,953백만원

□ 2021년 추진성과

❍ 무공해 수소차 보급 기반 구축

- 서부경남 1호 수소충전소 준공, 수소차 70대 보급

❍ 친환경 대중교통 보급 : 전기 저상시내버스 12대, 전기택시 12대

❍ 노후 경유차 친환경차 전환 : 전기차 1,086대, 조기폐차 등 3,252대

□ 추진계획	(단위 : 백만원, 대)

구 분		계	기시행 (2021년)	2022년	2023년	2024년	2025년
사 업 비		277,953	43,553	54,953	58,093	58,000	63,354
사업량	수소충전소(개소)	3	1	1	1	-	-
	공공급속충전기(기)	89	9	20	20	20	20
	수소차 보급	2,604	154	205	410	715	1,120
	전기차 보급	10,975	1,677	1,673	2,125	2,425	3,075
	노후경유차 친환경 전환	14,690	5,810	5,280	3,600	-	-

□ 기대효과

❍ 친환경 교통수단 보급을 통해 그린경제로 전환 가속화, 시민의 삶의 질 개선

대기 오염원 관리 강화

❍ 대기오염 저감사업 및 오염원 관리 강화로 깨끗한 대기 환경 조성

□ 사업개요

❍ 대기 오염원 관리 : 407개소(대기배출업소 273, 비산먼지발생업소 134)

❍ 대기오염 저감사업 추진

□ 추진계획

❍ 대기 배출업소 지도·점검

- 전년도 미 점검업소 우선 점검 실시

- 민원 다발업소 및 상습 위반업소 중점 단속 실시

- 무허가 대기 배출시설 설치·운영 등 대기오염 행위 중점 단속

❍ 비산먼지 발생 사업장 지도·점검

- 정기점검 : 봄철(3 ~ 5월) 및 가을철(10 ~ 11월) 집중 실시

- 수시점검 : 민원 발생 등 필요 시 점검

❍ 대기오염 저감사업 추진

- 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 : 40개소/1,771백만원

- 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업 : 30개소/40백만원

- 굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원사업 : 3개소/40백만원

- 청정연료 전환 지원사업 : 4개소/315백만원

□ 기대효과

❍ 대기오염물질 저감으로 깨끗한 대기 환경 조성

❍ 영세사업장의 경제적 부담 경감

수질 오염원 및 지하수 관리

❍폐수, 가축분뇨 등 오염원 관리 및 지하수 개발·이용 체계적 관리로 수질

오염 사전예방

□ 사업개요

❍ 수질오염원 관리 : 1,208개소

- 폐수배출시설 : 549, 기타수질오염원 : 206, 가축분뇨 배출시설 : 453

❍ 지하수 관정 관리 : 7,784개소(허가대상 : 127, 신고대상 : 7,657)

□ 추진상황

❍ 수질오염원 점검 251개소(폐수 117, 기타수질오염 36, 가축분뇨 98)

- 행정조치 : 29개소(개선명령 3, 사용중지 3, 조업정지 1, 고발 3, 기타 19)

❍ 지하수 개발·이용 관련 사업

- 보조지하수 관측망 설치(4개소) 및 모니터링(61개소)

- 보조지하수 관측망 통신모뎀 교체공사 : 26개소

□ 추진계획

❍ 수질오염원 관리 : 581개소(폐수 285, 기타수질오염 121, 가축분뇨 175)

❍ 축사 주변 무인 악취포집기 설치운영(3개소) : 60백만원

※ 축산 악취 민원 적극 대응 및 강력한 조치(개선명령 및 과태료 부과)

❍ 지하수 개발·이용 관련 사업

- 보조지하수 관측망 설치(4개소) 및 모니터링(61개소) : 175백만원

- 지하수 이용실태조사 : 55백만원

- 지하수 방치공 원상복구 : 100백만원(사업량 : 100개소)

- 지하수 관리계획 수립 용역 : 300백만원(용역 기간 : 20개월)

- 미등록 지하수시설 자진신고 기간 운영 : 2021. 11월 ~ 2022. 10월(1년)

□ 기대효과

❍ 수질오염원 및 지하수 체계적 관리로 깨끗한 수질보전

낙동강수계 주민지원사업 추진

❍진양호 상수원관리지역 지정으로 행위 제한을 받고 있는 주민의 소득 증대,

복지증진 등 사업 추진으로 피해 주민 생활환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 내동면, 명석면, 대평면, 수곡면, 판문동 일원

❍ 총사업비 : 2,778백만원(총 39개 사업)

- 특별지원사업 : 1,000백만원(수곡농산물유통센터 태양광발전시설 공사 등)

- 중장기사업 : 700백만원(내동면 텃밭가꾸기 사업)

- 5개 면·동 : 1,078백만원(일반지원사업, 직접지원사업 등)

❍ 주요사업 : 주민 복지증진, 소득증대, 생활지원, 수질개선 등

□ 추진계획

❍ 2022. 2. : 2022년도 주민지원사업 사업계획 확정(낙동강유역환경청)

❍ 2022. 3. : 주민지원사업 추진

❍ 2022. 9. : 2023년도 주민지원사업 사업계획 수립 및 승인신청

□ 기대효과

❍ 상수원관리지역 주민의 숙원사업 해결 및 생활환경 개선

진양호 순환 자전거도로 조성

❍ 통행량이 많은 진양호 일주도로의 자전거·차량 분리로 안전을 도모

❍ 수려한 자연 경관을 활용한 자전거도로 개설로 진양호 관광객 유치

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 대평면, 명석면 일원(진양호 일주도로)

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2024. 12월

❍ 사업내용 : 자전거도로 개설 L=40㎞, B=3.5m

❍ 총사업비 : 50,000백만원

□ 추진상황

❍ 2018. 10. : 지방재정 투자심사(1차분-10,000백만원)

❍ 2019.  3. ~ 11. : 오미마을~청동기박물관 구간 실시설계 용역(1차분)

❍ 2019. 10. : 지방재정 투자심사(2,3차분-15,000백만원)

❍ 2020.  5. ~ 2021. 10. : 오미마을~청동기박물관 자전거도로 개설(1차분)

❍ 2021.  6. : 청동기박물관~내촌 구간 실시설계 용역 착수(2차분)

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 청동기박물관~내촌 구간 실시설계 용역 준공(2차분-8,000백만원)

❍ 2022.  2. ~ 2024. 12. : 진양호 순환 자전거도로 잔여구간 개설

□ 기대효과

❍ 자전거 이용자의 안전성 확보 및 편리 제공

❍ 진양호의 빼어난 자연 경관을 활용한 자전거 이용 관광인프라 구축

경전선 폐역사 부지를 활용한 공원 조성

❍경전선 폐선 부지를 활용하여 조성한 자전거도로를 따라 폐역사 부지를

활용한 공원을 조성하여 자전거 이용자와 지역주민의 휴식공간 제공

❍공원시설이 부족한 읍·면지역에 접근성이 좋은 폐역사 부지를 활용한

공원 조성으로 농촌지역 주민들의 삶의 질 향상을 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 문산읍, 내동면, 일반성면, 이반성면 일원

※ 내동역, 남문산역, 갈촌역, 반성역, 평촌역

❍ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 12월

❍ 사업내용 : 경전선 폐역사 활용 공원 조성 5개소

❍ 총사업비 : 4,000백만원

□ 추진계획

❍ 2022.  1. ~  3. : 실시설계 용역

❍ 2022.  4. ~ 12. : 내동역, 갈촌역, 반성역 공원화 사업 추진(3개소-1,900백만원)

❍ 2023.  1. ~  3. : 실시설계 용역

❍ 2023.  4. ~ 12. : 남문산역, 평촌역 공원화 사업 추진(2개소-2,100백만원)

□ 기대효과

❍자전거도로를 따라 폐역사 부지를 활용한 특색 있는 공원을 조성하여 자전거 이용자와 지역주민의 휴식공간 제공 및 정주여건 개선

❍장기미집행 도시계획시설로 해제된 읍·면지역(문산읍 1개소, 일반성면 4개소) 공원의 대체 공원으로 조성

※ 소재지에 위치하고 있어 접근성이 좋고 평지로 지리적 여건이 우수

청   소  과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅳ. 특수시책

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

❍ 일반직	(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	24	1	7	7	4	5
현 원	25	1	7	11	3	3	휴직 1
증 감	1	-	-	4	△1	△2

※ 별도인원 : 시간선택임기제(불법투기단속원) 3명

❍ 공무직	(단위 : 명)

구 분	계	단 순 노 무 원					도 로 보수원	환 경 공무직
		소 계	시설물․장비 유지관리인부	현장공사 ․작업 등 현업인부	현장지도 단속․감시 인부	단순잡역 조무인부
정 원	43	6	-	4	2	-	-	37
현 원	33	2	-	2	-	-	-	31
증 감	△10	△4	-	△2	△2	-	-	△6

□ 위원회	(2021. 11. 1.현재)

구분 위원회	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여 성 위원수	%
			계	공무원	%	민간인	%
생활폐기물수집운반 대행업체평가위원회	9	2	7	-	-	7	100	3	43
음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회	11	4	7	-	-	7	100	3	43

□ 예산규모	(단위 : 억원)

구 분	2020	2021년	증 감	비 고
총 계	473	502	29
일반회계	271	298	27
특별회계	202	204	2

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄	(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진중	시기 미도래	미착공	비 고
계	7	-	7	-	-
예산사업	7	-	7	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 추진중 사업  ---  7건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
사봉 농폐자재 수거장 설치 및 처리시스템 개선	❍ 농폐자재 수거처리 - 예산액 : 280,000천원 - 사업량 : 780톤 - 대상지역 : 4개 권역/ 17개 읍면동	❍ 2021. 1. : 농폐자재 수거물량 조사 ❍ 2021. 3. : 수거 200톤 ❍ 2021. 6. : 임시집하장 대상지 선정 ❍ 2021. 7. : 수거 400톤 ❍ 2021. 8. : 수거 180톤
	❍ 농폐자재 수거장 설치 - 예 산 액 : 40,000천원 - 사 업 량 : 2개소 - 대상지역 : 2개 읍·면	□ 추진사항 ❍ 2021. 3. ~ 8. : 설치 대상지 조사 ❍ 2021. 9. : 문산읍 설치 완료 ❍ 2021. 10. : 집현면 1개소 설치 중 (재배정 32,000천원) □ 향후계획 ❍ 2021. 12. : 농폐자재 수거장 설치 완료	❍설치 후 사후관리에 따른 면단위 담당자 지정 운영

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
청소대행업무 효율적 관리 체계확립	❍ 청소대행용역 - 예산액 : 16,650백만원 - 대행업무 ·생활폐기물 수집운반 ·가로청소 - 대행구역 : 4개 구역 ·1구역 : 상평·상대· 하대· 초장동 집현·대곡면 ·2구역 : 중앙·성북· 상봉· 이현동 명석면 ·3구역 : 천전·평거· 신안· 판문동 내동·정촌면 ·4구역 : 가호·충무공동, 금산면, 문산읍, 진성· 사봉· 일반성·이반성	□ 추진사항 ❍ 2020년 청소대행용역비 정산 - 용역기관 : 경남경영경제연구원 - 미집행금 환수 : 150,919천원 ❍ 2021년 청소대행용역 시행 - 대행업체 : 진주환경 외 3개사 - 대행금액 : 17,412백만원 - 대행기간 : 2021.1.1.~2021.12.31. - 대행분야 : 생활폐기물 수집운반 ❍ 2021년 청소대행업체 평가 용역 - 대상업체 : 진주환경 외 3개사 - 평가항목 ·주민만족도 및 현장 평가 등(진행 중) - 평가결과 활용 ·가산점, 용역비 감액, 계약해지 등 인센티브 및 패널티 부여
대형폐기물 수집·운반· 처리 민간대행	❍ 2021년 대형폐기물 수집·운반·처리 대행용역 - 예산액 : 3,571백만원 - 대행업무 ·대형폐기물 수집· 운반· 처리 - 대행구역 : 2개 구역 ·1구역 : 가호동, 금곡면, 금산면, 내동면, 문산읍, 사봉면, 정촌면, 지수면, 일반성면, 이반성면, 진 성면, 천전동, 충무공동 ·2구역 : 대곡면, 대평면, 명석면, 미천면, 상대동, 상봉동, 상평동, 성북동, 수곡면, 신안동, 이현동, 중앙동, 집현면, 초장동, 판문동, 평거동, 하대동	□ 추진사항 ❍ 2020년 대형폐기물 수집·운반·처리 정산 - 용역기관 : 경남경영경제연구원 - 미집행금 환수 : 9,782천원 ❍ 2021년 대형폐기물 수집·운반· 처리 대행용역 시행 - 대행업체 : 시민환경, 경동산업(주) - 대행금액 : 3,571백만원 - 대행기간 : 2021.1.1.~2021.12.31. - 대행분야 : 대형폐기물 수집·운반· 처리 ❍ 2022~2023년 대형폐기물 수집·운반· 처리대행 원가산정 용역 - 용역기관 : 경남경영경제연구원 - 용 역 비 : 5,621천원(용역 완료)

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
클린(clean) 진주가꾸기 사업추진	❍ 깨끗한 시가지 조성 - 시민대청소의 날 운영 - 클린 진주 가꾸기 홍보 - 쓰레기 불법투기 단속 ·단속반 : 2개 반 4명 ·중앙시장 주변지역 ·우심지역 관리 - 청소인력 운영 ·구역배치 : 분기별 순환	□ 추진사항 ❍ 시민대청소의 날 : 월 1회 ❍ 행복홀씨 입양사업 추진 - 환경정비 및 꽃길 조성 (70개 단체 / 70개소 운영) ❍ 시민수사대 발족 및 운영 - 30개 읍·면·동 / 300명 - 매월 1~2회 합동 순찰 및 자체활동 ❍ 쓰레기 불법투기 합동 야간단속 - 활동대상 : 시민수사대, 직원합동 - 단속 및 과태료 부과 : 425건 /74,300천원 ❍ 불법투기 단속용 이동식 CCTV 운영 - 10대 / 취약지 배치, 자체운영 ❍ 시민홍보 강화 - 청소종합안내서, 올바른 생활 쓰레기 배출방법, 대형폐가전 무상수거 안내 문, 다국어판 쓰레기배출 홍보안내문 등 □ 향후계획 ❍ 불법투기 상습지역 단속강화 - 읍면동별 이동식 CCTV 설치 지속 확대 - 투기 상습지역 예고 없는 단속 지속 실시 - 각종 봉사단체를 활용 홍보	❍불법투기홍보 및 단속에도 시민준법의식 부족 ❍지속적인 야간 및 암행 단속으로 불법투기에 대한 경각심 고취

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
사업장폐기물 관리 강화	❍ 폐기물사업장 지도점검 - 점검대상 : 964개소 ·폐기물처리업소 : 48개소 ·배출업소 : 916개소 - 점검기간 : 연중 - 점검내용 ·폐기물 보관·관리 상태 ·폐기물 배출자 신고사항 ·법규 준수여부 ·기타 환경오염 행위 ❍ 불법폐기물(투기, 방치) 발생 예방 대책 수립 - 기간 : 연중 - 계획 ·대시민 홍보활동 강화 ·시민 합동 감시 활동 ·읍면동장회의시 상황전파 ·취약지역 순찰강화 ·폐기물처리업 점검 강화 : 방치폐기물 발생 예방	□ 추진사항 ❍ 폐기물 사업장 지도점검 - 점검기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12. ❍ 점검업소 : 417개소 - 위반업소 : 21개소 - 조치사항 ·고 발 : 3개소 ·과 태 료 : 13개소/16,500천원 ·경 고 : 1개소 ·조치명령 : 3개소 ·경고 및 개선명령 : 2개소 □ 추진사항 ❍ 불법폐기물 발생 적발 - 이반성면 발산리 불법투기 : 진행 중 ❍ 불법폐기물 발생 예방 홍보 - 현수막게첨 : 읍면동 50개 - 홍보물제작 배부 : 40,000부 - 리플릿 배부 : 4,000부 - 읍면동장회의자료 홍보 3회 □ 향후계획 ❍ 언론 및 홈페이지 등 홍보 ❍ 불법폐기물 발생 취약 지역 (나대지, 빈공장 등) 예찰활동 강화 ❍ 폐기물처리업소 수시 점검 강화

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
자원순환운동 확산 및 재활용 활성화	❍ 공동주택 음식물쓰레기 감량화 - RFID 음식물 종량제 시행 공동주택 관리 - RFID 음식물 종량제 미시행 공동주택 감량 인센티브제 추진 ❍ 자원순환운동 활성화 사업 추진 - 재활용품 매각 및 자원 순환체계 구축 - 배출원별 재활용품 분리배출 홍보	□ 추진사항 ❍ 공동주택 음식물쓰레기 감량화 추진 - RFID 음식물 종량제 추진 ·대상 : 93개소 60,786세대 - RFID 음식물 종량제 미시행 공동주택 감량 인센티브 추진 ·대상 : 14개소 ·인센티브 제공 내역 : 음식물 납부 필증(120ℓ) 200매 제공 □ 추진사항 ❍ 자원재활용 활성화사업 추진 - 재활용품 매각 ·종 류 : 플라스틱류 외 9종 ·매각대금 : 2,679톤/660백만원 ※ 2020년도(2,925톤/668백만원) - 종이팩, 폐전지 수거보상제 실시 ·종이팩 수거량 : 29톤 ·폐전지 수거량 : 12톤 ·보상 : 종량제봉투 70,000장 - 영농폐비닐 수거보상금 지급 ·지급실적 : 321백만원(3,020톤) - 폐형광등 수거 : 9톤 - 아이스팩 수거 : 15톤 - 폐현수막 장바구니 및 마대 제작 : 2,800장 - 재활용품 및 음식물 분리배출 홍보 ·홍보물 배부 및 안내문 발송 ·홍보도우미 운영 : 4개조(7명)

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
자원순환운동 확산 및 재활용 활성화	❍ 녹색생활 실천과 나눔 문화 추진 - 나눔장터 운영	□ 추진사항 ❍ 녹색생활실천 및 나눔문화 추진 - 상설 나눔장터 운영 : 5개 동 - 횟수 : 월 4회 ❍ 알뜰나눔 장터 행사 : 코로나19로 행사 취소 ❍ 1회용품 줄이기 추진 - 공공부문 1회용품 줄이기 실천 지침 안내 : 80개소 - 식품접객업소 등 1회용품 사용 억제 제도 안내 및 홍보 : 4,100개소 □ 향후계획 ❍ 음식물쓰레기 감량화 지속 추진 ❍ 재활용품 분리배출 지속 홍보
120기동대 운영	❍ 120기동순찰반 시민 생활불편 사항 처리 ❍홈페이지 견문신고방 운영 ❍ 내부 행정시스템 견문신고제 운영 ❍ 120자원봉사대 합동 순회봉사	□ 추진사항 ❍ 120기동대 : 2개조 4명 - 순찰 및 시민불편 사항 처리 - 추진실적 : 2,590건 ❍ 홈페이지 시민 견문신고방 운영 - 추진실적 : 394건 ❍ 내부 직원의 시민생활불편 신고 - 추진실적 : 3,265건 ❍ 120기동대 합동순회봉사 실시 - 회수 : 2회 - 분야 : 노후 등 교체, 전기 시설 안전점검 등 - 참여기관 : 한국전기안전공사, 한국전력공사 - 추진실적 : 2회 / 60건 □ 향후계획 ❍ 읍면동 오지 및 취약지역 순찰강화 ❍ 견문신고제 연간 목표달성 ❍ 합동순회봉사 2회 실시 - 11월(수곡면, 대평면)

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 2022년 청소 대행 업체 지도 및 평가 강화로 질 높은 청소 서비스 제공

□ 대형폐기물 수집·운반·처리 민간 대행 일원화로 신속처리 및 주민 불편 해소

□ 불법폐기물 발생 예방을 위한 홍보 활동 및 지도 점검 강화

□ 공동주택 음식물쓰레기 종량제 지속 관리

□ 재이용·재활용 활성화를 위한 범시민 자원순환운동 확산

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	7	24,866	7	-	-	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	7	24,866	7	-	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

청소대행업무의 효율적 관리

❍ 청소 대행업무의 체계적 관리로 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성

❍ 청소 대행업체 지도 및 평가 강화로 질 높은 서비스 제공

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ 예 산 액 : 18,300백만원

❍ 대행분야 : 생활폐기물(종량제봉투, 음식물류, 재활용품) 수집운반 및 가로청소

※ 동 재활용품 문전수거 및 읍∙면 소재지 재활용품 수거 지역 확대

❍ 추진내용

- 청소대행업체 실적평가 : 한국폐기물협회 또는 연구기관

- 청소대행용역비 정산검사 : 원가산정연구기관 또는 회계법인

- 청소 민간대행 용역 시행

□ 추진계획

❍ 2021년 청소 민간대행 용역비 정산 검사

- 정산검사 결과에 따라 부당 집행액 환수 및 위법 시 고발조치

❍ 2022년 청소 대행업체 평가

- 평가결과에 따른 인센티브 부여로 깨끗한 거리 조성 만전

❍ 2023년 청소 대행업체 원가산정 용역 시행

❍ 2023년 청소 민간대행 용역 시행

□ 기대효과

❍ 생활폐기물 수집·운반 및 가로청소를 민간대행하여 청소 서비스 질 향상

❍ 청소 대행업체 지도 및 평가 강화로 질 높은 서비스 제공

대형폐기물 수집·운반·처리 민간대행

❍ 대형폐기물 대행 과정 일원화로 운영의 효율성 및 연속성 도모

❍ 기존 대형폐기물 수집·운반 환경공무직 읍면동 배치로 쾌적한 도시 환경 조성

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ 예 산 액 : 4,268백만원

❍ 대행분야 : 대형폐기물(종량제봉투에 담을 수 없는 생활폐기물) 수집·운반·처리

❍ 추진내용

- 읍·면·동 및 인터넷 접수(직영) → 수집·운반(직영) → 처리(대행)

□ 추진계획

❍ 수거 대행구역을 2개 권역으로 나누어 대형폐기물 처리

❍ 각 읍·면·동 수거 일자 지정으로 주 2회 이상 정기수거

❍ 대형폐기물이 적체 및 방치되지 않도록 기동 수거반 편성·운영

□ 기대효과

❍ 대형폐기물 대행 일원화를 통해 신속한 민원 처리 제공

❍대형폐기물 시스템 개편과 맞추어 대형폐기물 수거 환경공무직 읍면동 배치로 조직의 효율성 증대 및 청소행정 업무의 전문성 강화

클린(clean) 진주가꾸기 사업 추진

❍ 청소 사각지대를 쾌적한 환경조성으로 도시이미지 제고

❍ 문화시민 질서운동 전개와 홍보활동 강화로 선진 시민의식 함양

□ 사업개요

❍ 기    간 : 연중

❍ 장    소 : 읍·면·동

❍ 참여대상 : 사회단체, 시민, 공무원 등

❍ 중점추진분야 : 3대 분야를 통한 쓰레기 없는 클린 진주가꾸기

- 청소분야 : 대청소의 날, 문화시민 질서운동 등 추진

- 단속분야 : 시민수사대, 불법투기단속반(시)

- 홍보분야 : 대시민 홍보, 언론 홍보 등

□ 추진계획

❍ 대청소의 날 : 매월 첫째·셋째 주 화요일

❍ 문화시민 질서운동 시범거리의 날 : 월 1회

❍ □행복홀씨 입양사업 추진□ : 환경정비 및 꽃길조성 구간관리

- 다중이 이용하는 공원, 유원지, 도심하천 등을 주민, 단체에 입양관리

❍ 시민수사대 운영 : 30개 읍·면·동 300명

❍ 쓰레기불법투기 야간 합동단속 : 매월 1회

❍ 클린 진주가꾸기 시민교육 : 각종 행사 시 동영상 자료 활용 교육

□ 기대효과

❍ 동영상 교육, 홍보 등을 통한 시민의식 고취와 깨끗한 진주이미지 조성

❍ 유관기관, 사회봉사단체, 시민 등의 솔선 참여로 자율적 청소 분위기 확산

사업장폐기물 관리 강화

❍ 폐기물 사업장의 지도·점검 강화로 폐기물의 적정처리 유도

❍ 민·관 합동 지도·점검 실시로 시민공감대 형성 및 투명성 제고

□ 사업개요

❍ 사업장폐기물 관리대상

(단위 : 개소)

계	폐기물 배출 사업장					폐기물 처리업소	비 고
	소 계	건 설	사업장	지 정	의 료
1,453	1,405	105	137	589	574	48

□ 추진계획

❍ 폐기물처리업체 및 대규모 배출사업장 집중 점검

- 대    상 : 폐기물 배출사업장 및 처리업소 643개소

- 정기점검 : 처리업체 연 2회, 배출사업장 연 1회

- 수시점검 : 민원발생 사업장 연중 수시 지도·점검 실시

❍ 폐기물 배출사업장 환경오염행위 예방대책 강화

- 폐기물 배출업소 교육 및 홍보물 제작

- 민·관 합동 지도·점검 실시 : 연 1회(하반기 예정)

- 불법폐기물 발생 취약지역(나대지, 빈공장 등) 예찰 활동 강화

❍ 올바로시스템(폐기물종합관리시스템, 한국환경공단) 정착 지도

-사업장폐기물의 배출·운반·최종 처리까지의 전 과정을 투명하게 관리하여 불법폐기물 발생 예방

□ 기대효과

❍ 폐기물의 적정처리 유도 및 취약지역 순찰강화로 환경오염 예방

❍ 올바로시스템 운영으로 폐기물처리의 투명성 확보

자원순환운동 확산 및 재활용 활성화

❍폐기물의 감량(Reduction), 재이용(Reuse), 재활용(Recycling) 활성화로 ｢지속 가능한 자원 순환형 경제·사회체계｣ 구축

❍ 저탄소 녹색성장을 위한 녹색생활 실천운동과 나눔문화 확산

□ 사업개요

❍ RFID 음식물 종량제 시행 공동주택의 지속적인 관리

❍ 범시민 자원순환운동 활성화

- 배출원별 재활용 계획 수립 : 시민 참여분위기 조성

- 고품질 자원순환체계 구축 : 투명페트병 분리 배출 시행 홍보

- 1회용품 사용억제 : 1회용품 규제업소 준수사항 홍보

❍ 녹색생활 실천과 나눔문화 추진 : 자원사랑 나눔장터 운영 등

□ 추진계획

❍ 공동주택 RFID 음식물쓰레기 종량제 지속 관리

- 신축 공동주택(200세대 이상)의 RFID 음식물 종량제 민간 자율참여 추진

❍ 범시민 자원순환운동 활성화

- 공동주택, 상가, 편의점 등 배출원별 분리·배출 홍보 강화

- 1회용컵 보증금제도 시행 홍보 : 홍보도우미 지속 운영

- 종이팩, 폐전지 수거보상제 홍보 : 재활용품 업사이클 확대

❍ 녹색생활 실천을 위한 중고물품 나눔장터 운영 및 재활용품 판매

❍ 영농폐비닐 보상금 지급 : kg당 100원 ~ 140원

□ 기대효과

❍ 음식물쓰레기 감량화로 처리비용 절감

❍ 재이용·재활용 활성화로 자원이용 효과 제고

시민중심 찾아가는 120기동대 운영

❍ 시민 불편사항의 신속한 처리로 시민 중심의 현장 행정 구현

❍ 농촌지역 순회봉사로 오지마을 주민편의 향상

□ 사업개요

❍ 120기동 순찰반 상시 운영

❍ 직원 견문신고제 및 홈페이지 시민 견문신고방 운영

❍ 120기동대 합동순회봉사 실시

□ 추진계획

❍ 120기동 순찰반 상시 운영

- 본청 기동 순찰반 운영 : 2개조 4명

- 읍·면·동 기동 순찰반 운영 : 30개조 60명

❍ 120기동대 노후차량 교체 : 2대(수곡면, 미천면)

❍ 견문신고제 활성화

- 내부 행정시스템 □120기동대 견문신고제□ 운영

- 시민 참여를 위한 시 홈페이지 □120기동대 견문신고방□ 운영

❍ 120기동대 합동순회봉사 실시

- 대상지역 : 정촌·금곡·사봉·지수면(연 4회)

- 참여기관 : 한국전력공사 등 유관기관 및 전문 업체

- 활동내용 : 노후등 교체, 전기 안전점검, 가전·보일러의 점검 수리

□ 기대효과

❍ 시민중심 현장 행정 실현

❍ 농촌 취약지역 주민생활 편의 및 삶의 질 향상 도모

농폐자재 수거 및 처리시스템 개선 지원

❍ 농폐자재 수거 처리시스템 개선으로 영농폐기물 효율적 관리

❍ 영농폐기물 집중 수거로 농촌지역의 환경오염 방지

□ 사업개요

❍ 위    치 : 읍·면·동 관내(읍·면 16개소, 동 2개소)

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

❍ 사 업 량

- 영농폐기물 800톤(부직포, 차광막, 영농자재 등)

- 농폐자재 수거장 설치 및 보완 : 2개소

❍ 사 업 비 : 350백만원

❍ 수거체계 : 농가(개별) ➯ 수거장 배출 ➯ 민간 업체 처리

□ 추진계획

❍ 농폐자재 수거장 설치 및 보완 : 2022. 2. ~ 12.

❍ 수거장 수집 및 처리

- 기존 수거장 : 연중 수집 및 처리

- 추가 설치 수거장 : 수거장 설치 후 처리

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2021	2022	2023	2024이후	비고
계	2,167	767	350	350	350	350
국 비
도 비	470.3	134.3	84	84	84	84
시 비	1,696.7	632.7	266	266	266	266
기 타

※ 도비 지원은 기금 운영계획에 따라 확보

Ⅳ. 특수시책

다회용컵 사용하기

❍ 다회용컵 구매 후 전 부서 배부

❍ 지역자활센터와의 협업을 통한 다회용컵 수거·세척·배달 시스템 구축

□ 사업개요

❍ 시행시기 : 2022. 2.

❍ 대    상 : 진주시 전 부서

❍ 사 업 비 : 65백만원(다회용컵·텀블러, 수거함 제작)

❍ 사업내용 : 전부서 다회용컵 사용으로 인한 1회용 종이컵사용 억제

□ 현황 및 문제점

❍ 부서에서 발생하는 1회용품의 대부분이 1회용 종이컵

❍ 다회용컵 사용에 따른 세척·유지관리 필요

□ 추진계획

❍ 2022. 1. : 타기관 및 민간참여 홍보

❍ 2022. 2. : 다회용컵·수거함 구매 및 전부서 배부, 사업시행

❍ 2022. 2. : 지역 유관단체와 다회용컵 세척·살균 사업 대행 협약

□ 기대효과

❍ 1회용품 쓰레기배출 감소 및 환경보전의식 함양 및 고취

❍ 지역단체 연계를 통한 지역일자리 창출

❍ 친환경사업 정책기반 마련 및 민간부분의 자발적 참여 유도

산   림   과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1.  총    괄

2. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황	(단위 : 명)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	19	-	1	6	5	4	3
현 원	18	-	1	5	3	3	6
증 감	△1	-	-	△1	△2	△1	3

□ 위원회	(2021. 11. 1. 현재)

구 분 위원회수	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여 성 위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
산사태 취약 지역 지정 위원회	8	4	4	1	25	3	75	1	25
진주시 시립 공원 위원회	13	4	9	3	33	6	67	4	44

□ 예산규모	(단위 : 억원)

구 분	2020년	2021년	증 감	비 고
총 계	291	281	△10
일반회계	291	281	△10
특별회계	-	-	-

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	31	21	10	-	-	-
예산사업	31	21	10	-	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업  ---  21건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주 요 성 과
2021년 산림욕장 및 생태숲 정비사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 가좌산 외 3개산 ❍ 사업내용 : 등산로 정비 및 편의시설 시설 ❍ 사업기간 : '21. 4. ~ '21. 5. ❍ 사 업 비 : 105백만원	❍착 공 : '21. 4. ❍준 공 : '21. 5.	- 침목계단 설치(331단) - 야외 운동기구 설치 (2대) - 논슬립 설치(271m) - 목수로 설치(8m)
2021년 숲길정비 사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 망진산 등산로 ❍ 사업내용 : 숲길 정비 및 편의시설 설치 ❍ 사업기간 : '21. 4. ~ '21. 5. ❍ 사 업 비 : 84백만원	❍착 공 : '21. 4. ❍준 공 : '21. 5.	- 데크 설치 1식 - 목교 설치 1식 - 침목계단 설치 60단 - 논슬립 설치 134개 - 난간 철거(철재, 콘크리트 등)
월아산 우드랜드 주차장 개선공사 (산림휴양)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 산138 일원 ❍ 사업내용 : 주차타워 설치 ❍ 사업기간 : '20. 7. ~ '21. 7. ❍ 사 업 비 : 1,800백만원	❍실시설계 : '20. 5. ❍착 공 : '20. 7. ❍준 공 : '21. 7.	- 주차타워 92면 설치
월아산 우드랜드 진출입로 확포장공사 (산림휴양)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 산138 일원 ❍ 사업내용 : 진출입로 확장 ❍ 사업기간 : '20. 12. ~ '21. 4. ❍ 사 업 비 : 167백만원	❍ 실시설계 : '20. 11. ❍ 착 공 : '20. 12. ❍ 준 공 : '21. 4.	- 진출입로 확장 (L=208m)
숲속어린이 도서관 진입로데크 설치공사 (산림휴양)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 산134 일원 ❍ 사업내용 : 진입로 데크 설치 ❍ 사업기간 : '21. 3. ~ '21. 6. ❍ 사 업 비 : 147백만원	❍ 실시설계 : '21. 3. ❍ 착 공 : '21. 3. ❍ 준 공 : '21. 6.	- 진입로 데크 설치 (L=86m)
월아산 테마등산로 정비공사 (산림휴양)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 산134 일원 ❍ 사업내용 : 등산로 포장 ❍ 사업기간 : '21. 4. ~ '21. 6. ❍ 사 업 비 : 107백만원	❍ 실시설계 : '21. 3. ❍ 착 공 : '21. 4. ❍ 준 공 : '21. 6	- 등산로 흙콘크리트 포장(L=204m)
2021년 산림욕장 정비사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 월아산 외 2개소 ❍ 사업내용 : 산림욕장 정비 및 편의시설 설치 ❍ 사업기간 : '21. 8. ~ '21. 9. ❍ 사 업 비 : 21백만원	❍ 착 공 : '21. 8. ❍ 준 공 : '21. 9.	- 침목계단 설치 54단 - 목수로 설치 6m
월아산 우드랜드 스마트가든 조성사업 (숲속의 진주)	❍ 위 치 : 진성면 달음산로 313 ❍ 사업내용 - 식생패널, 관수, 조명시스템 - 수목·초화식재, 조경석 쌓기 ❍ 사업기간 : '21. 4. ~ '21. 5. ❍ 사 업 비 : 30백만원 (국 15, 도 5, 시 10)	❍ 착 공 : '21. 4. ❍ 준 공 : '21. 5.	❍ 스마트 가든 조성으로 산림교육 체험환경 제공
진성시유림 생활숲 유지관리 (숲속의 진주)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 시유림 ❍ 사 업 량 : 42.2ha ❍ 사업내용 - 예초, 제초, 방제, 관수, 수목· 초화식재, 이식 등 ❍ 사업기간 : '21. 3. ~ '21. 8. ❍ 사 업 비 : 600백만원	❍ 협약체결 : '21. 3. ❍ 착 공 : '21. 3. ❍ 준 공 : '21. 8.	❍ 산림기능증진 및 건전하고 지속 가능 한 산림자원 조성
진성시유림 생활숲 정비사업 (숲속의 진주)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 시유림 ❍ 사 업 량 : 정비 1식 ❍ 사업내용 : 표토제거, 산석치장 쌓기, 산책로 개설 등 ❍ 사업기간 : '21. 4. ~ '21. 8. ❍ 사 업 비 : 400백만원	❍ 협약체결 : '21. 4. ❍ 착 공 : '21. 4. ❍ 준 공 : '21. 8.	❍ 산책로정비를 통한 이용객 편의 도모 및 안전사고예방 기여
조림사업 (산림보호)	❍ 위 치 : 정촌면 소곡리 산199 외 39필지 ❍ 사 업 량 : 55ha ❍ 사업기간 : '21. 2. ~ '21. 5. ❍ 사 업 비 : 369백만원	❍ 착 공 : '21. 2. ❍ 준 공 : '21. 5.	❍ 경제수 식재로 산림자원 조성
2020년 산사태발생 대상지 복구공사 (산림보호)	❍ 위 치 : 미천면 반지리 외 5개소 ❍ 사 업 량 : 6개소 ❍ 사업내용 : L형 측구, 큰돌메쌓기 콘크리트 옹벽, 마대 쌓기 등 ❍ 사 업 비 : 500백만원	❍ 착 공 : '21. 12. ❍ 준 공 : '21. 5.
보호수 및 노거수 정비사업 (산림보호)	❍ 위 치 : 정촌면 소곡리 외 3개소 ❍ 사 업 량 : 4개소 ❍ 사업내용 : 외과수술, 브레싱 설치, 영양공급 등 ❍ 사 업 비 : 18백만원	❍ 착 공 : '21. 6. ❍ 준 공 : '21. 6.	❍ 보호수 및 노거수 정비 4개소
2021년 보호수 및 노거수 정비사업 동부지구 (산림보호)	❍ 위 치 : 금산면 장사리 외 15개소 ❍ 사 업 량 : 16개소 ❍ 사업내용 : 외과수술, 브레싱 설치, 영양공급, 고사가지 제거 등 ❍ 사 업 비 : 33백만원	❍ 착 공 : '21. 3. ❍ 준 공 : '21. 4.	❍ 보호수 및 노거수 정비 16개소
2021년 보호수 및 노거수 정비사업 서부지구 (산림보호)	❍ 위 치 : 명석면 우수리 외 12개소 ❍ 사 업 량 : 13개소 ❍ 사업내용 - 외과수술, 브레싱 설치 - 영양공급, 고사가지 제거 등 ❍ 사 업 비 : 26백만원	❍ 착 공 : '21. 3. ❍ 준 공 : '21. 4.	❍ 보호수 및 노거 정비 13개소
책임방제구역 재선충병 방제사업 (산림보호)	❍ 위 치 : 대곡면 와룡리 산214번지 외 143필지 ❍ 사업내용 : 피해목 제거, 예방나무주사 ❍ 사업기간 : '21. 2. ~ '21. 3. ❍ 사 업 비 : 400백만원	❍ 착 공 : '21. 2. ❍ 준 공 : '21. 3.	- 피해목 제거 : 913본 - 예방나무주사 : 202ha
재선충병 방제사업 (산림보호)	❍ 위 치 : 관내 재선충병 발생지역 ❍ 사업내용 : 피해목 제거, 예방나무주사 ❍ 사업기간 : '21. 1. ~ '21. 5. ❍ 사 업 비 : 1,888백만원 (국 788, 도 89, 시 1,011)	❍ 착 공 : '21. 1. ❍ 준 공 : '21. 5.	- 피해목 제거 : 8,804본 - 예방나무주사 : 534.6ha
재선충병 항공방제 사업 (산림보호)	❍ 위 치 : 대곡, 지수면 일원 ❍ 사업내용 : 항공약제살포 ❍ 사업기간 : '21. 5. ~ '21. 6. ❍ 사 업 비 : 13백만원 (국 9.1, 도 1.2, 시 2.7)	❍ 착 공 : '21. 5. ❍ 준 공 : '21. 6.	- 헬기항공방제 : 300ha
밤나무해충 항공방제 (산림보호)	❍ 위 치 : 문산읍 안전리 외 62필지 ❍ 사 업 량 : 206.9㏊ ❍ 사업내용 : 항공약제살포 ❍ 사업기간 : '21. 7. ❍ 사 업 비 : 8백만원	❍ 착 공 : '21. 7. ❍ 착 공 : '21. 7.	- 항공약제 : 206.9ha
집현면덕오리 땅밀림 지반조사 용역 (산림보호)	❍ 위 치 : 집현면 덕오리 산182 ❍ 사업내용 : 땅밀림 발생 대상지 지반조사 ❍ 사업기간 : '21. 6. ~ '21. 12. ❍ 사 업 비 : 19백만원	❍ 착 공 : '21. 5. ❍ 준 공 : '21. 9.
땅밀림 산사태발생 의심대상지 복구대책 수립 연구용역 (산림보호)	❍ 위 치 : 명석면 용산리 외 12개소 ❍ 사업내용 : 대상지 복구대책 수립 ❍ 사업기간 : '21. 7. ~ '21. 9. ❍ 사 업 비 : 16백만원	❍ 착 공 : '21. 5. ❍ 준 공 : '21. 9.

□ 추진중 사업  ---  10건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
월아산 자연휴양림 조성 (산림휴양)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 산 116-34 일원 ❍ 사업내용 - 숙박(133인/일) 및 편의시설 - 숲길·보행교 등 기반시설 구축 ❍ 사업기간 : '19. 9. ~ '21. 12. ❍ 사 업 비 : 9,350백만원 (균 2,500, 도 750, 시 6,100)	□ 추진사항 ❍ 자연휴양림지정 : '17. 4. ❍ 실시설계 용역 : '19. 6. ❍ 사전재해평가 : '19. 8. ❍ 사전환경영향 : '19. 11. ❍ 발주 : '19. 12. ❍ 건축허가 : '20. 3. ❍ 조성 승인 : '20. 3. ❍ 착공 : '20. 5. □ 향후계획 ❍ 완료 : '21. 12. (준공예정일 : '23. 5.)
진양호 우드랜드 조성 (산림휴양)	❍ 위 치 : 판문동 478번지 일원 ❍ 사업내용 : - 목재문화체험장 1동 (연면적 1,513.5㎡) - 옥외광장 및 편익시설 등 ❍ 사업기간 : '20. 6. ~ '21. 12. ❍ 사 업 비 : 6,584백만원 (전환도비 4,800, 도 360, 시 1,424)	□ 추진사항 ❍ 실시설계 : '20. 5. ❍ 착 공 : '20. 6. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '21. 12.
월아산 산림레포츠 단지조성 (산림휴양)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 산134 일원 ❍ 사업내용 - 산림레포츠시설 4종 - 산림체험안내소 1동 (2층, 연면적 474㎡) ❍ 사업기간 : '19. 12. ~ '21. 12. ❍ 사 업 비 : 7,194백만원 (전환도비 3,340, 도 1,002, 시 2,852)	□ 추진사항 ❍ 설계 용역 착수 : '19. 12. ❍ 환경영향평가 : '20. 2. ❍ 계약심의위원회 : '20. 5. ❍ 착공 : '21. 4. □ 향후계획 ❍ 준공 : '21. 12.
진양호 우드랜드 실내전시 기획 및 제작사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 판문동 478번지 일원 ❍ 사업내용 : 목재문화체험장 내 전시공간(면적 348.5㎡) ❍ 사업기간 : '21. 7. ~ '21. 12. ❍ 사 업 비 : 600백만원 (전환도비 480, 도 36, 시 840) ❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰	□ 추진사항 ❍ 제안서 평가 : '21. 6. ❍ 착 공 : '21. 7. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '22. 2.
월아산 치유의숲 조성(건축) 기본 및 실시설계 용역 (산림휴양)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 116-9번지 일원 ❍ 사업내용 : 월아산 치유센터 설계 용역 ❍ 설계대상 : 치유센터 및 야외 화장실 각 1동(연면적 1,000㎡) ❍ 사업기간 : '21. 8. ~ '21. 11. ❍ 사 업 비 : 174백만원 ❍ 계약방법 : 일반설계공모	□ 추진사항 ❍ 설계공모공고 : '21. 6. ❍ 작품 접수 : '21. 7. ❍ 작품 심사 : '21. 7. ❍ 심사결과 발표 : '21. 7. ❍ 착 공 : '21. 8. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '21. 11.
임도사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 대곡 가정 외 7개소 ❍ 사 업 량 - 신설 : 2.9km(대곡 가정) - 대행사업 등 정비 : 16.32km ❍ 사업내용 - 임도개설, 노면 및 측구정비 - 임도변 풀베기 등 ❍ 사업기간 : '20. 6. ~ '21. 11. ❍ 사 업 비 : 1,223백만원 (균 652, 도 158, 시 413)	□ 추진사항 [임도신설 착공] □ 대곡 가정(1.77km) : '20. 6. □ 가정(1.13km) : '21. 3. [임도유지보수 착공] □ 방어산 외 4개소(16km) : '21. 4. □ 내동 독산(0.32km) : '21. 6. □ 향후계획 ❍ 준공 및 정산 - 신 설 : '21. 9. - 유지보수 : '21. 11.
2021년 테마등산로 정비 대행사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 월아산 등산로 ❍ 사업내용 - 데크로드 설치 2개소 - 목교 설치 3개소 - 산석치장 쌓기 4.8㎡ ❍ 사업기간 : '21. 5. ~ '21. 11. ❍ 사 업 비 : 294백만원	□ 추진사항 ❍ 착공 : '21. 5. □ 향후계획 ❍ 준공 : '21. 11.
2021년 등산로 정비사업 (산림휴양)	❍ 위 치 - 월아산 우드랜드 내 ❍ 사업내용 - 데크로드 설치 1개소 ❍ 사업기간 : '21. 8. ~ '21. 11. ❍ 사 업 비 : 124백만원	□ 추진사항 ❍ 착공 : '21. 10. □ 향후계획 ❍ 준공 : '22. 1.
조림지 가꾸기사업 (산림보호)	❍ 위 치 : 전읍면, 농촌동 ❍ 사 업 량 : 187.9ha - 풀 베 기 : 149.8ha - 덩굴제거 : 38.1ha ❍ 사업내용 : 풀베기, 덩굴제거 ❍ 사업기간 : '21. 10. ~ '21. 11. ❍ 사 업 비 : 1,002백만원 (국 501, 도 150, 시 351)	□ 추진사항 ❍ 착 공 : '21. 10. ❍ 준 공 : '21. 11.
하반기 재선충병 방제사업 (산림보호)	❍ 위 치 : 전읍면, 농촌동 ❍ 사 업 량 - 피해목 제거 3,000여 본 - 예방나무주사 340ha ❍ 사업내용 - 피해목제거, 예방나무 주사 ❍ 사업기간 : '21. 10. ~ '21. 12. ❍ 사 업 비 : 500백만원	□ 향후계획 ❍ 착 공 : '21. 10. ❍ 준 공 : '21. 12.

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	10	27,634	9	1	-	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	10	27,634	9	1	-	-

2. 단위사업별 주요업무 추진계획

지방정원조성

❍ 지방정원을 조성하여 새로운 지역 관광명소를 발굴하고 정원문화       산업 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진성면 동산리 산134번지 일원

❍ 사업기간 : 2022. 2. ~ 2022. 9.

❍ 사 업 량 : 지방정원 타당성 조사 및 기본 계획 수립 용역 1식

❍ 사 업 비 : 300백만원

□ 추진계획

❍ 2022. 2. : 타당성 조사 및 기본 계획 수립 용역 발주

❍ 2022. 9. : 타당성 조사 및 기본 계획 수립 용역 완료

□ 기대효과

❍야외휴양문화 확산에 발맞춘 지방정원 조성을 통한 정원문화 확산 및 정원 산업 활성화

작가정원 조성관리

❍ 숲속의진주 내에 작가정원을 조성하여 새로운 지역 관광명소를 발굴하고 테마가 있는 정원 공간 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진성면 동산리 산134번지 일원

❍ 사업기간 : 2022년(1년간)

❍ 사 업 량 : 국내외 유명 작가정원 조성 및 관리 용역 1식

❍ 사 업 비 : 1,900백만원

□ 추진계획

❍ 2022.  1. : 작가정원 조성 및 관리 용역 발주

❍ 2022. 12. : 작가정원 조성 및 관리 용역 완료

□ 기대효과

❍월아산 일원 산림휴양시설(숲속의 진주, 자연휴양림, 산림레포츠단지)과 연계하여 작가정원을 조성하여 새로운 지역 관광명소 발굴

선학산 등산로변 주차장 조성

❍ 등산로변에 주차장 등 기반시설 설치를 통한 낙후된 생활환경 개선 및 산림 접근성 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 하대동 711-1번지 일원

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2022년(2년간)

❍ 사업내용 : 등산로변 주차장 설치(5,000㎡, 98면)

❍ 사 업 비 : 2,900백만원(시비 100%)

- 편입토지(10필지), 손실보상비 15억원, 공사비 8억원

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 선학산 등산로변 공영주차장 손실보상 완료

❍ 2022.  2. : 선학산 등산로변 공영주차장 사업 발주

❍ 2022.  7. : 선학산 등산로변 공영주차장 사업 완료

□ 기대효과

❍등산로변 주차 공간 확보로 선학산을 이용하는 등산객 및 주변 거주자 불편 민원 해소

월아산 진성 동산지구 공영주차장 조성

❍ 월아산 자연휴양림, 산림레포츠단지, 숲속의진주 등 산림문화 체험 공간       방문객의 주차 편의성 도모 및 낙후된 생활환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진성면 동산리 12204-1번지 일원

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2022년(2년간)

❍ 사업내용 : 공영주차장 설치(3,400㎡, 소형 283면, 대형 20면)

❍ 총사업비 : 5,900백만원(균특 50%, 시비 50%)

□ 추진상황

❍ 2021.  2. : 실시설계 용역 발주

❍ 2021. 10. : 실시설계 용역 완료

□ 추진계획

❍ 2021. 11. : 환경 및 재해영향평가 협의 완료

❍ 2021. 12. : 사업 발주

❍ 2022. 12. : 사업 완료

□ 기대효과

❍월아산 일원 산림휴양시설(숲속의진주, 자연휴양림, 산림레포츠단지) 방문객의 주차 편의성 도모

치유의 숲 조성사업

❍최근 아토피, 알레르기 비염 등 환경성질환과 우울증 등 현대병 증가에      따른 자연치유의 관심이 증가하고 있어 지역주민 및 시민의 심신회복 및     건강증진을 위한 치유의 숲 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진성면 동산리 산116-9번지 일원

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2023년(5년간)

❍ 사업내용 : 치유의 숲 조성(치유센터, 치유숲길, 산림요가장 등)

❍ 총사업비 : 7,031백만원(전환 50%, 도비 15%, 시비 35%)
(전환 2,500, 도비 750, 시비 3,781)

□ 추진계획

❍ 2021. 11. : 치유의 숲 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2021. 12. : 건축분야 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2022.  3. : 산림분야 실시설계 용역 완료

❍ 2022.  4. ~ 2023. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

❍산림의 자연 치유 기능을 활용한 치유의 숲 조성으로 시민들의 심신 회복 및 건강 증진을 위한 공간 조성

월아산 숲속의 진주 운영

❍월아산 산림자원을 활용한 산림교육, 휴양 및 모험시설 운영으로 시민

여가생활 활력 도모 및 시 브랜드 가치 제고

□ 운영개요

❍ 위    치 : 진주시 진성면 달음산로 313(동산리 산134번지 일원)

❍ 기    간 : 연중

- 휴관일 : (공통) 매주 화요일 / (우드랜드) 1월 1일, 명절 연휴

❍ 주요시설

- 우 드 랜 드 : 목재체험장, 목공체험장, 도서관(도서 12,000권)

- 레포츠단지 : 산림체험안내소, 곡선형짚와이어, 하늘숲길, 네트어드벤처, 키즈어드벤처,

짚라인, 에코라이더

- 자연휴양림 : 방문자안내소, 숲속의집, 단체휴양관, 산림휴양관, 복합위생시설, 잔디광장

❍ 운 영 비 : 3,455백만원

□ 추진계획

❍ 2021. 11. : 운영 매뉴얼 구축

❍ 2021. 12. : 자연휴양림 및 산림레포츠단지 조성공사 준공 및 내부 집기 비품 구입 비치, 자연휴양림 및 산림레포츠시설 가동점검 및 시범운영

❍ 2022.  1. : 월아산 숲속의 진주(우드랜드, 자연휴양림, 산림레포츠) 시설 개장 및 시설별 프로그램 운영

❍ 2024.  1. : 치유의 숲 운영(2021년 설계, 2023년 12월 준공예정)

□ 기대효과

❍전 연령층이 즐길 수 있는 산림복지시설 운영으로 시민 정서함양 및 삶의 질 향상

❍복합 산림복지서비스 제공으로 우리 시 대표 관광명소 역할 및 지역경제 활성화 도모

진양호 우드랜드 운영

❍생활권과 가까운 진양호 주변 우드랜드 운영으로 목재문화 활성화 도모 및     다양한 목재문화 체험 기회 제공

□ 운영개요

❍ 위    치 : 판문동 478번지 일원(진양호공원 후문 꿈키움동산 주변)

❍ 기    간 : 연중

- 휴관일 : 매주 화요일, 1월 1일, 명절 연휴

❍ 운영시설 : 목재문화체험장 1동

- 주요시설 : 목공체험실, 전시실, 다목적체험실, 목재독서실 등

❍ 체험프로그램

- 목공 : 반제품키트 목공체험, 목재코딩체험, 목재실용품 만들기 등

- 전시 : 진주성 느티나무 3D복원 영상, 시민참여 포토 영상,
느티나무의 사계 VR체험, 소목작품 및 목공품 전시 등

❍ 운 영 비 : 518백만원

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 공사 준공 및 시설 시운전, 가동점검

❍ 2021. 12. : 시범운영

❍ 2022.  1. : 개관 및 체험프로그램 정상 운영
(산림교육 인증프로그램 개발, 기획전시 병행 추진)

□ 기대효과

❍월아산 우드랜드와 차별화된 프로그램 운영으로 다양한 목재 문화 체험 기회 제공 및 목재 친화 도시 이미지 제고

❍ 진양호 인프라와 연계한 체험관광 시너지 효과로 진양호공원 활성화 기여

소나무재선충병 방제사업

❍소나무재선충병 피해확산 차단 및 생태적으로 건강한 산림자원 육성에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 전읍면, 농촌동

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

❍ 사 업 비 : 2,231백만원(국비 627, 도 79, 시비 1,524)

*시설비 1,725 감리비 100, 부대비 6, 민간위탁 400

□ 추진계획

❍ 2022.  1. ~  4. : 피해목 및 고사목 제거

❍ 2022.  9. ~ 12. : 예방나무주사

□ 기대효과

❍ 소나무재선충병 방제를 통한 소나무 임상 피해 최소화 및 건강한 산림 자원 육성에 기여

보호수 및 노거수의 생육환경 개선

❍보호수 및 노거수의 기능 유지증진, 보호 관리를 위하여 보호수 및 노거수의 생육환경을 개선하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 관내

❍ 사업기간 : 2022. 4. ~ 2022. 8.

❍ 사 업 비 : 327백만원(시비 327)

*시설비 326, 부대비 1

□ 추진계획

❍ 2022. 4. : 대상목 선정·설계 및 계약

❍ 2022. 8. : 사업 준공

□ 기대효과

❍ 보호수 및 노거수의 생육환경 개선을 통한 진주시 자연문화유산 보호에 기여

산불방지 대책 추진

❍시기별 산불방지대책 상황실을 운영하여 산불방지 역량 집중과 초동진화 태세 확립으로 산불피해 최소화 및 산림자원 보호에 기여

□ 사업개요

❍ 상황실 운영 : 산림과 및 전읍면, 농촌동

❍ 운영기간

- 상반기 : 2022.  1.  1. ~  5. 15.

- 하반기 : 2022. 11.  1. ~ 12. 31.

❍ 사 업 비 : 4,676백만원(국비 541, 도비 243, 시비 3,892)

*인건비 2,837, 일반운영비 1,987

□ 추진계획

❍ 2022. 1. ~ 2022. 5. 15., 2022. 10. 15. ~ 2022. 12. 31.

- 산불방지대책 상황실 운영 : 26개소

- 초소감시원 배치 : 초소감시원 21명

- 산불전문예방 진화대 운영 : 173명(전문예방진화대 47, 읍면동 일반 진화대 126명)

- 산불진화 헬기임차 : 권역별 1대(진주·사천·남해 권역)

□ 기대효과

❍ 시기적절한 산불방지대책을 추진하여 진주시 산불 재난 피해 최소화 및 산림자원 보호에 기여

공 원 관 리 과

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황	(단위 : 명)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	22	-	1	6	7	4	4
현 원	22	-	1	8	5	5	3
증 감	-	-	-	2	△2	1	△1

※ 별도인원 : 20명(일반공무직 15명 / 환경공무직 4명 / 시간선택제임기제 1명)

□ 위원회	(2021. 11. 1. 현재)

구 분 위원회	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여 성 위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
도시공원 위 원 회	15	5	10	-	-	10	66.6	5	33.3
도시림 등의 조성관리 심의위원회	12	3	6	-	-	6	50.0	4	33.3

□ 예산규모	(단위 : 억원)

구 분	2020년	2021년	증 감	비 고
총 계	224	395	171
일반회계	224	325	101
특별회계	-	70	70

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진중	시기 미도래	미착공	비 고
계	59	39	20	-	-
예산사업	59	39	20	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업  ---  39건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주 요 성 과
진양호 자연생태 문화탐방로 조성사업 (귀 곡 지 구)	❍ 위 치 - 진주시 대평면, 귀곡동 일원 ❍ 사업내용 -대평면 사평마을~귀곡동 까꼬실(22.7km)대나무 숲길, 전망쉼터, 편익시설, 안내판 정비 등 ❍ 사 업 비 : 1,044백만원 ❍ 도 급 자 : 월드산업개발 (주)	❍ 착공 : 2020. 12. 8. ❍ 준공 : 2021. 11. 3.	❍ 귀곡동 일원 자연생태 문화탐방로 체험으로 이용객들의 편의 도모 및 생태 관광 기반 구축
금산근린공원 조성사업	❍ 위 치 - 옥봉동 398번지 일원 ❍ 사업내용 - 공원조성(A=3,000㎡) ❍ 사 업 비 : 779백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜산울림	❍ 착공 : 2020. 12. 21. ❍ 준공 : 2021. 7. 31.	❍ 주민들의건강과 시민들의정서생활 향상 기여
진주 금산근린공원 조명시설 설치공사	❍ 위 치 - 옥봉동 398번지 일원 ❍ 사업내용 - 공원등 설치 ❍ 사 업 비 : 83백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜건설전기공사	❍ 착공 : 2020. 12. 23. ❍ 준공 : 2021. 7. 20.	❍안전사고 예방 및 편의도모
물초울공원 어린이 놀이시설 조성공사	❍ 위 치 - 충무공동 183번지 (물초울공원) ❍ 사업내용 - 어린이놀이시설 조성 A=9,000㎡ ❍ 사 업 비 : 2,610백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜영진건설조경	❍ 착공 : 2020. 12. 28. ❍ 준공 : 2021. 8. 9.	❍물초울공원 내 어린이들을 위한 놀이시설 조성으로 아이들 정서 함양에 이바지
2021년 금호지 데크 정비공사	❍ 위 치 - 금호지공원 ❍ 사업내용 - 데크 정비 238㎡ ❍ 사 업 비 : 94백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜호수조경	❍ 착공 : 2021. 2. 1. ❍ 준공 : 2021. 3. 26.	❍노후 목재데크 정비를 통한 안전사고 예방과 시민편의 증진
2021년 금호지 남측 수변데크 정비공사	❍ 위 치 - 금호지공원 ❍ 사업내용 - 데크 정비 426㎡ ❍ 사 업 비 : 149백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜청산조경	❍ 착공 : 2021. 5. 14. ❍ 준공 : 2021. 7. 12.	❍노후 목재데크 정비를 통한 안전사고 예방과 시민편의 증진
2021년 초전공원 수변데크 정비공사	❍ 위 치 - 초전공원 ❍ 사업내용 - 데크 정비 209㎡ ❍ 사 업 비 : 88백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜동우그린	❍ 착공 : 2021. 2. 1. ❍ 준공 : 2021. 3. 22.	❍노후 목재데크 정비를 통한 안전사고 예방과 시민 편의 증진
물초울공원 어린이 놀이시설 조성공사 전기공사	❍ 위 치 - 충무공동 183번지 (물초울공원) ❍ 사업내용 - 공원등 설치 ❍ 사 업 비 : 85백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜명진이엔씨	❍ 착공 : 2021. 2. 17. ❍ 준공 : 2021. 7. 31.	❍물초울공원 내 어린이들을 위한 놀이시설 조성으로아이들 정서함양에 이바지
하촌천 가로수 조성사업	❍ 위 치 - 충무공동 183번지 (물초울공원) ❍ 사업내용 - 이팝나무 외 4종 11,338본 식재 ❍ 사 업 비 : 182백만원 ❍ 도 급 자 : 남영조경건설㈜	❍ 착공 : 2021. 2. 26. ❍ 준공 : 2021. 4. 26.	❍하촌천 강변에 가로수를 식재하여 여가시간에 걸을 수 있는 산책로 환경 조성에 따른 주민 정주여건 개선
공원 및 녹지 유지관리사업 (정촌산단 지구)	❍ 위 치 : 정촌산단지구 ❍ 사업내용 - 예초작업 184,200㎡ - 제초작업 8,400㎡ ❍ 사 업 비 : 88백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜금잔디조경	❍ 착공 : 2021. 3. 2. ❍ 준공 : 2021. 10. 27.	❍산단지구 내 공원, 녹지에 대한 분기별 제초, 예초 등 유지관리 작업으로 쾌적한 경관 도모
공원 및 녹지 유지관리사업 (사봉산단 지구)	❍ 위 치 : 사봉산단지구 ❍ 사업내용 - 예초작업 146,840㎡ - 제초작업 3,080㎡ - 소나무 전정 288주 ❍ 사 업 비 : 90백만원 ❍ 도 급 자 : 도담조경㈜	❍ 착공 : 2021. 3. 2. ❍ 준공 : 2021. 10. 27.	❍산단지구 내 공원, 녹지에 대한 분기별 제초, 예초 등 유지관리 작업으로 쾌적한 경관 도모
공원 및 녹지 유지관리사업 (뿌리산단 지구)	❍ 위 치 : 뿌리산단지구 ❍ 사업내용 - 예초작업 216,920㎡ - 제초작업 31,240㎡ ❍ 사 업 비 : 125백만원 ❍ 도 급 자 : 도담조경㈜	❍ 착공 : 2021. 3. 2. ❍ 준공 : 2021. 10. 27.	❍산단지구 내 공원, 녹지에 대한 분기별 제초, 예초 등 유지관리 작업으로 쾌적한 경관 도모
공원 및 녹지 유지관리사업 (신진주역세권 내 녹지)	❍ 위 치 - 신진주역세권 내 녹지 ❍ 사업내용 - 예초작업 345,200㎡ - 제초작업 24,020㎡ ❍ 사 업 비 : 173백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜서경엔지니어링	❍ 착공 : 2021. 3. 2. ❍ 준공 : 2021. 10. 27.	❍녹지에 대한 분기별 제초, 예초 등 유지관리 작업으로 쾌적한 경관 도모
공원 및 녹지 유지관리사업 (신진주역세권 내 공원)	❍ 위 치 - 신진주역세권 내 공원 ❍ 사업내용 - 예초작업 125,400㎡ - 제초작업 24,320㎡ ❍ 사 업 비 : 79백만원 ❍ 도 급 자 : 청수조경㈜	❍ 착공 : 2021. 3. 2. ❍ 준공 : 2021. 10. 27.	❍공원에 대한 분기별 제초, 예초 등 유지관리 작업으로 쾌적한 경관 도모
초장1지구 근린2공원 정비공사	❍ 위 치 : 초전동 1674번지 (초장1지구근린2공원) ❍ 사업내용 - 막구조물 및 스탠드 설치 등 ❍ 사 업 비 : 234백만원 ❍ 도 급 자 : 호수조경㈜	❍ 착공 : 2021. 3. 8. ❍ 준공 : 2021. 6. 5.	❍공원 내 막구조물 및 스탠드를 설치하여 휴식공간 제공으로 주민 정주여건 개선
2021년 강주연못 데크 정비공사	❍ 위 치 - 강주연못공원 ❍ 사업내용 - 데크 정비 281㎡ ❍ 사 업 비 : 105백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜청산조경	❍ 착공 : 2021. 3. 9. ❍ 준공 : 2021. 4. 26.	❍노후목재데크 정비를 통한 안전사고 예방과 시민 편의 증진
2021년 초전공원 야외무대 관람데크 정비공사	❍ 위 치 - 초전공원 ❍ 사업내용 - 데크 정비 167㎡ ❍ 사 업 비 : 70백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜신라조경	❍ 착공 : 2021. 3. 9. ❍ 준공 : 2021. 5. 7.	❍노후목재데크 정비를 통한 안전사고 예방과 시민 편의 증진
2021년 녹지 및 공원 내 소나무 전정공사 (가 호 동)	❍ 위 치 - 프린지공원 외 9개소 ❍ 사업내용 - 소나무류 548주 전정 ❍ 사 업 비 : 66백만원 ❍ 도 급 자 : 대각디앤씨㈜	❍ 착공 : 2021. 3. 10. ❍ 준공 : 2021. 4. 28.	❍녹지 및 공원 내 소나무류전정을 통한 수목 생육 개선
2021년 녹지 및 공원 내 소나무 전정공사 (충무공동)	❍ 위 치 - 바람모아공원 외 8개소 ❍ 사업내용 - 소나무류 762주 전정 ❍ 사 업 비 : 77백만원 ❍ 도 급 자 : 사람과뜰	❍ 착공 : 2021. 3. 10. ❍ 준공 : 2021. 4. 26.	❍녹지 및 공원 내 소나무류전정을 통한 수목 생육 개선
2021년 녹지 및 공원 내 소나무 전정공사 (금산면, 하대·초장동)	❍ 위 치 - 금호지공원 외 24개소 ❍ 사업내용 - 소나무류 780주 전정 ❍ 사 업 비 : 86백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜조은숲	❍ 착공 : 2021. 3. 10. ❍ 준공 : 2021. 4. 19.	❍녹지 및 공원 내 소나무류 전정을 통한 수목 생육 개선
영천강변 가로수 조성사업	❍ 위 치 - 종합경기장 ~ 따스하리공원 ❍ 사업내용 - 왕벚나무 외 1종 249본 식재 ❍ 사 업 비 : 167백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜서경엔지니어링	❍ 착공 : 2021. 3. 25. ❍ 준공 : 2021. 10. 12.	❍영천강 주변 경관개선및쾌적한 환경 조성
남강변 휴식공간 조성공사	❍ 위 치 - 주약동 799-1번지 일원 ❍ 사업내용 - 화훼류 및 수목식재, 휴식시설물 설치 ❍ 사 업 비 : 300백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜동현건설	❍ 착공 : 2021. 3. 26. ❍ 준공 : 2021. 7. 23.	❍남강변 강변에 쉼터를 조성하여 시민들의 산책로 환경 조성에 따른 주민 정주여건 개선
2021년 비봉·선학공원 유지관리사업 (민간대행)	❍ 위 치 - 옥봉동 산1-1번지 일원 ❍ 사업내용 - 예초작업 244.1ha - 제초작업 85,200㎡ - 가지치기 10,000주 - 지주목 해체, 설치 등 ❍ 사 업 비 : 520백만원 ❍ 도 급 자 : 진주시 산림조합	❍ 착공 : 2021. 4. 9. ❍ 준공 : 2021. 12. 9.	❍비봉, 선학산 제모습찾기사업에따른 사업지 내 제초, 예초 등 유지관리 작업으로 쾌적한 경관 도모
금호지 생태공원 내 친수시설 조성사업	❍ 위 치 - 금산면 용아리 707번지 일원 ❍ 사업내용 - 안개분수 설치 ❍ 사 업 비 : 193백만원 ❍ 도 급 자 : 다음조경㈜	❍ 착공 : 2021. 4. 21. ❍ 준공 : 2021. 8. 20.	❍여름철공원내 어린이들을위한 물놀이터 조성으로 아이들에게놀이공간 제공
남강변 휴식공간 조성 전기공사	❍ 위 치 - 주약동 799-1번지 일원 ❍ 사업내용 - 공원등 설치 ❍ 사 업 비 : 72백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜에이치일렉	❍ 착공 : 2021. 4. 23. ❍ 준공 : 2021. 7. 21.	❍남강변 강변에 쉼터를 조성하여 시민들의 산책로 환경 조성에 따른 주민 정주여건 개선
남해고속도로 진주휴게소 반려견놀이터 조성사업	❍ 위 치 - 호탄동 432번지 일원 ❍ 사업내용 - 반려견놀이터 조성 (반려견놀이시설, 휴게시설물 등) ❍ 사 업 비 : 361백만원 ❍ 도 급 자 : 대호산업㈜	❍ 착공 : 2021. 4. 23. ❍ 준공 : 2021. 7. 31.	❍올바른 반려문화 육성 및 쾌적한 환경 제공
남해고속도로 진주휴게소 반려견놀이터 공원등설치공사	❍ 위 치 - 호탄동 432번지 일원 ❍ 사업내용 - 공원등 설치 ❍ 사 업 비 : 53백만원 ❍ 도 급 자 : (합)대명전기공사	❍ 착공 : 2021. 5. 11. ❍ 준공 : 2021. 7. 9.	❍안전사고 예방 및 편의도모
2021년 스마트가든 조성사업	❍ 위 치 - 정촌면 산업로 88 외 2개소 ❍ 사업내용 - 스마트가든 설치 3개소 ❍ 사 업 비 : 80백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜신라조경	❍ 착공 : 2021. 5. 18. ❍ 준공 : 2021. 6. 14.	❍기업 내 휴식공간에 녹지공간을 조성하여 휴식 환경 개선
진양호동물원 정비사업	❍ 위 치 - 진양호 동물원 일원 ❍ 사업내용 - 동물원 시설 보수 등 ❍ 사 업 비 : 82백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜용진	❍ 착공 : 2021. 5. 18. ❍ 준공 : 2021. 7. 16.	❍동물원 시설 보수로, 동물 복지 및 이용객 편의 증진
희망공원 외 1개소 수목식재사업	❍ 위 치 - 희망공원, 진주역 앞 녹지 ❍ 사업내용 - 수목(금목서 외 10종) 식재 및 포장 등 ❍ 사 업 비 : 106백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜화인조경	❍ 착공 : 2021. 5. 27. ❍ 준공 : 2021. 7. 22.	❍공원,녹지수목 식재를 통한 경관 향상
희망공원 공원등 설치공사	❍ 위 치 - 가좌동 1965번지 희망공원 ❍ 사업내용 - 전력간선 인입 - 옥외 가로등 및 경관조명 설치 ❍ 사 업 비 : 148백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜대상전력	❍ 착공 : 2021. 6. 9. ❍ 준공 : 2021. 8. 22.	❍공원등 설치를 통한 야간시간공원 이용의 안전 제고
따스하리공원 연결 산책로 정비공사	❍ 위 치 - 따스하리공원 ❍ 사업내용 - 전석쌓기 216㎡ - 흙콘크리트포장 162㎡ - 난간설치 L=63m 등 ❍ 사 업 비 : 58백만원 ❍ 도 급 자 : 청수조경㈜	❍ 착공 : 2021. 6. 10. ❍ 준공 : 2021. 8. 6.	❍공원 내 산책로 연결을 통한 시민 편의 증진 및 정주여건 개선
희망공원 산책로 조성사업	❍ 위 치 - 가좌동 1965번지 희망공원 ❍ 사업내용 - 데크 계단 L37.4m - 데크 로드 L51.59m - 산책로 개설, 야자 매트 포장 - 흙먼지털이기, 운동기구 설치 ❍ 사 업 비 : 218백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜도원아트산업	❍ 착공 : 2021. 6. 16. ❍ 준공 : 2021. 8. 28.	❍공원 내 산책로 추가 개설 및 편의시설 설치를 통한 휴식공간 제공
2021년 수경시설 청소용역	❍ 위 치 - 금호지공원 외 5개소 ❍ 사업내용 - 수경시설 6개소 주 1회 청소 ❍ 사 업 비 : 56백만원 ❍ 도 급 자 : 명부㈜	❍ 착수 : 2021. 6. 29. ❍ 완료 : 2021. 9. 10. ※코로나19 확산에 따른 운영 중단 : 2021. 7. 13. ~ 8. 8.	❍수경시설의 원활한 관리를 통한 쾌적한 시설 제공
2021년 바닥분수 운영관리 용역	❍ 위 치 - 평거녹지 외 3개소 ❍ 사업내용 - 바닥분수 4개소 운영관리 ❍ 사 업 비 : 65백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜성원조경	❍ 착수 : 2021. 7. 1. ❍ 완료 : 2021. 8. 31. ※코로나19 확산에 따른 운영 중단 : 2021. 7. 13. ~ 8. 8.	❍바닥분수의원활한 관리를 통한 쾌적한 시설 제공
2021년 물놀이장 운영관리 용역	❍ 위 치 - 금호지, 물초울공원 ❍ 사업내용 - 물놀이터 2개소 운영관리 ❍ 사 업 비 : 58백만원 ❍ 도 급 자 : 호수조경㈜	❍ 착수 : 2021. 7. 3. ❍ 완료 : 2021. 8. 31. ※코로나19 확산에 따른 운영 중단 : 2021. 7. 13. ~ 8. 8.	❍여름철어린이들의 쾌적한물놀이공간 제공
노을지공원 수경시설 정비사업	❍ 위 치 - 충무공동 14(노을지공원) ❍ 사업내용 : 수경시설 정비 ❍ 사 업 비 : 136백만원 ❍ 도 급 자 : ㈜예원조경건설	❍ 착공 : 2021. 8. 6. ❍ 준공 : 2021. 9. 16.	❍수경시설의 유수 흐름을 개선하여 공원 내 침하 방지 및 이용자 안전 도모
참살이울공원 데크 리모델링공사	❍ 위 치 : 참살이울공원 ❍ 사업내용 : 노후 데크 철거 및 흙콘크리트 포장 560㎡ ❍ 사 업 비 : 83백만원 ❍ 도 급 자 : 주식회사 장우조경건설	❍ 착공 : 2021. 8. 6. ❍ 준공 : 2021. 9. 16.	❍노후 목재데크 정비를 통한 안전사고 예방과 시민 편의 증진
가호10 어린이공원 외 1개소 데크 정비공사	❍ 위 치 - 가호10어린이공원 외 1개소 ❍ 사업내용 : 노후 데크 철거 및 탄성 포장 165㎡, 데크 설치 92.4㎡ ❍ 사 업 비 : 63백만원 ❍ 도 급 자 : 주식회사 동우그린	❍ 착공 : 2021. 10. 8. ❍ 준공 : 2021. 11. 16.	❍노후 목재데크 정비를 통한 안전사고 예방과 시민 편의 증진

□ 추진중 사업  ---  20건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
소망진산 유등테마공원 조성사업 (1 차 분)	❍ 위 치 - 망경동 163-5번지 일원 ❍ 사업내용 - 공원조성 33,398㎡ ❍ 사 업 비 - 2,744백만원 ❍ 사업기간 - 2020. 4. 23. ~ 2022. 6. 16. ❍ 도 급 자 : 한성건설㈜	□ 추진사항 ❍ 2020. 4. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 3. : 준공 (예정)
진양호 둘레길 산책 데크로드 설치공사	❍ 위 치 - 진양호공원 편백숲 산책로 일원 ❍ 사업내용 - 연결 보행 데크로드 (273m 정도) ❍ 사 업 비 : 339백만원 ❍ 사업기간 - 2020. 12. 21. ~ 2021. 12. 20. ❍ 도 급 자 : ㈜동우그린	□ 추진사항 ❍ 2020. 12. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021. 12. : 준공
진양호 둘레길 조성사업 (주차장)	❍ 위 치 - 진주시 판문동 소싸움경기장 맞은편 일원 ❍ 사업내용 - 주차장 A=2,443㎡, 62면 (승용차) ❍ 사 업 비 : 697백만원 ❍ 사업기간 - 2020. 12. 23. ~ 2021. 12. 22. ❍ 도 급 자 : 두강건설㈜	□ 추진사항 ❍ 2020. 12. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021. 12. : 준공
망경공원 등산로변 주차장 조성 공사	❍ 위 치 - 망경동 221-9번지 일원 ❍ 사업내용 - 주차장 조성 A=3,240㎡ ❍ 사 업 비 : 524백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 4. 9. ~ 2021. 12. 20. ❍ 도 급 자 : 신도종합건설㈜	□ 추진사항 ❍ 2021. 4. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021. 12. : 준공
비봉공원 조성사업 손실보상 (업무지원) 용역	❍ 위 치 - 옥봉동 산1번지 일원 ❍ 사업내용 - 추가 편입구역 지장물 조사 및 보상협의 ❍ 사 업 비 : 123백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 5. 21. ~ 2022. 1. 15. ❍ 도 급 자 : ㈜미래소싱	□ 추진사항 ❍ 2021. 5. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 1. : 준공	❍ 보상협의 지연 - 지속적인 보상협의 독려
선학공원 조성사업 손실보상 (업무지원) 용역	❍ 위 치 - 옥봉동 산11번지 일원 ❍ 사업내용 - 추가 편입구역 지장물 조사 및 보상협의 ❍ 사 업 비 : 135백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 5. 21. ~ 2022. 1. 15. ❍ 도 급 자 : ㈜미래소싱	□ 추진사항 ❍ 2021. 5. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 1. : 준공	❍ 보상협의 지연 - 지속적인 보상협의 독려
미세먼지 차단숲 조성사업	❍ 위 치 - 문산읍 삼곡리 980-4번지 일원 ❍ 사업내용 - 수목식재 및 산책로 개설 ❍ 사 업 비 : 1,258백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 5. 24. ~ 2021. 11. 21. ❍ 도 급 자 : 정우종합건설㈜	□ 추진사항 ❍ 2021. 5. : 착공 * 하절기 식재 시 고사율이 높아 식재 시기 변경에 따른 공사 중지 '21. 7. 1. ~ '21. 9. 30. □ 향후계획 ❍ 2021. 11. : 준공
미세먼지 차단숲 공원등 설치공사	❍ 위 치 - 문산읍 삼곡리 980-4번지 일원 ❍ 사업내용 - 공원등 설치 ❍ 사 업 비 : 123백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 8. 4. ~ 2021. 12. 1. ❍ 도 급 자 : 성천전기㈜	□ 추진사항 ❍ 2021. 8. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021. 12. : 준공
가좌산공원 화장실 설치공사	❍ 위 치 - 가좌동 산132번지 일원 ❍ 사업내용 - 화장실 설치 1조 ❍ 사 업 비 : 233백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 8. 9. ~ 2022. 2. 4. ❍ 도 급 자 : ㈜대하산업개발	□ 추진사항 ❍ 2021. 8. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 2. : 준공
진주 신안지구 지구단위계획 변경(결정) 및 실시설계 용역	❍ 위 치 - 신안동 436번지 외 1개소 ❍ 사업내용 - 지구단위계획 변경 및 실시 설계용역 1식 ❍ 사 업 비 : 58백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 8. 26. ~ 2022. 1. 26. ❍ 시 행 자 : 진우엔지니어링	□ 추진사항 ❍ 2021. 8. : 착수 □ 향후계획 ❍ 2022. 1. : 완료 및 공사발주
비봉공원 힐링숲 조성사업 (민 간 대 행)	❍ 위 치 - 상봉동 395번지 일원 ❍ 사업내용 - 숲가꾸기(4.64ha), 수목식재 등 ❍ 사 업 비 : 428백만원 ❍ 사업기간 : - 2021. 9. 1. ~ 2022. 2. 27. ❍ 도 급 자 : 진주시 산림조합	□ 추진사항 ❍ 2021. 9. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 2. : 준공	❍ 보상협의 지연 - 지속적인 보상협의 독려
진양호 다이나믹 광장 조성공사	❍ 위 치 - 진주시 진양호근린공원 꿈키움동산 광장 ❍ 사업내용 - 다이나믹 광장 조성 A=4,770㎡ ❍ 사 업 비 : 714백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 9. 16. ~ 2022. 1. 13. ❍ 도 급 자 : 대호산업㈜	□ 추진사항 ❍ 2021. 9. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021. 12. : 준공
장대 어린이공원 정비사업	❍ 위 치 - 장대동 103번지 일원 ❍ 사업내용 - 어린이놀이시설 정비 ❍ 사 업 비 : 140백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 9. 23 ~ 2022. 1. 20. ❍ 시 행 자 : 금잔디조경㈜	□ 추진사항 ❍ 2021. 9. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2021. 12. : 준공
공원 녹지 산책로 조명취약지 개선사업	❍ 위 치 - 비봉공원 녹색숲 외 6개소 ❍ 사업내용 - 공원등 110EA, 볼라드 조명 135EA 설치 ❍ 사 업 비 : 532백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 10. 13. ~ 2022. 1. 10. ❍ 도 급 자 : ㈜태일전력	□ 추진사항 ❍ 2021. 10. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 1. : 준공
진주대로 가로경관 개선사업	❍ 위 치 - 진주교 사거리~평안광장 교차로 ❍ 사업내용 - 안개분수 및 조경식재 등 ❍ 사 업 비 : 524백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 10. 20. ~ 2022. 1. 17. ❍ 시 행 자 : 토영종합건설㈜	□ 추진사항 ❍ 2021. 10. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 1. : 준공
2021년 선학공원 숲가꾸기 및 산책로 정비사업 (민 간 대 행)	❍ 위 치 - 상대동 870-5번지 일원 ❍ 사업내용 - 숲가꾸기 및 산책로 개설 ❍ 사 업 비 : 485백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 10. 6. ~ 2022. 1. 3. ❍ 도 급 자 : 진주시 산림조합	□ 추진사항 ❍ 2021. 10. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 1. : 준공	❍ 보상협의 지연 - 지속적인 보상협의 독려
물초울공원 유수지 수경시설 설치공사	❍ 위 치 - 충무공동 183번지 일원 ❍ 사업내용 - 수경시설 설치 ❍ 사 업 비 : 500백만원 ❍ 사업기간 : 착공일로부터 90일간	□ 추진사항 ❍ 2021. 10. : 계약심사의뢰 □ 향후계획 ❍ 2021. 11. : 착공 ❍ 2022. 2. : 준공 ❍ 미착수 사유 - 계약심사 중
진양호 독서카페 (리모델링) 조성공사	❍ 위 치 - 진주시 진양호근린공원 (구 주택) ❍ 사업내용 - 독서카페(리모델링) 지상 1층(연면적) 167.27㎡ ❍ 사 업 비 : 1,144백만원 ❍ 사업기간 : 착공일부터 3개월 ❍ 도 급 자 : 동흥종합건설㈜	□ 추진사항 ❍ 2021. 11. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 1. : 준공
진양호 소규모 카페갤러리 (리모델링) 조성공사	❍ 위 치 - 진주시 진양호근린공원 (구 카페) ❍ 사업내용 - 소규모 카페 갤러리 (리모델링) 지상 2층 (연면적) 196.70㎡ ❍ 사 업 비 : 983백만원 ❍ 사업기간 : 착공일부터 3개월 ❍ 도 급 자 : ㈜대능종합건설	□ 추진사항 ❍ 2021. 11. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2022. 1. : 준공
진양호 편익 모노레일 설치	❍ 위 치 -진주시 판문동 진양호근린공원 (꿈키움동산 다이나믹광장 ~ 전통예술회관) ❍ 사업내용 - 모노레일 설치 약 96m, 14인승 ❍ 사 업 비 : 2,000백만원 ❍ 사업기간 : 착공일부터 7개월	□ 향후계획 ❍ 2021. 11. : 착공 ❍ 2022. 5. : 준공 ❍ 미착수 사유 -지반조사 및 안정성 검토 사항 반영에 따른 실시설계 용역 시일 소요

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 쾌적한 도시경관 조성 및 시민 휴식공간 제공

❍ 공원을 통한 시민의 건강·휴양 및 정서생활 향상

❍ 시민이 공감하고 즐길 수 있는 도심지 내 친수공간 조성

❍ 특색 있는 시민 휴식공간 제공 및 정주여건 개선, 관광기반 구축

❍ 남강변 주요 경관지 정비를 통한 지역 명소 제공

□ 진양호 일원 활성화를 통한 관광인프라 구축

❍장기미집행공원 일몰제 시행에 따른 난개발 방지 및 진양호 수변 경관 요충지 보전

❍ 시설 노후로 외면 받고 있는 진양호 일원 정비를 통한 관광기반 구축

❍진양호 일원의 자연적 요소를 활용하여 친환경적 다양한 콘텐츠 개발을 통해 시너지(동반상승)효과 창출 및 다양한 계층이 이용하는 특색 있는 공원조성

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	8	713,460	8	-	-	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	8	713,460	8	-	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

시가지 녹지·공원 및 가로수 등 관리

❍체계적이고 지속적인 녹지, 공원, 가로수 유지관리를 통해 쾌적한 시민 생활환경을 제공하고 도심경관을 개선하여 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

❍ 현    황

녹 지		공 원		조경지		가로수
개소	면적(㎡)	개소	면적(㎡)	개소	면적(㎡)	노선	수량(주)
221	1,465,590	163	39,263,212	418	603,980	286	75,715

❍ 내    용 : 녹지, 공원, 분리대, 조경지 등 예초, 제초, 방제, 시설물 정비 등

※ 시설물 : 화장실(29개소), 어린이놀이시설(75개소), 수경시설(22개소), 야외 운동기구(283개소, 1,694개), 공원등(118개소, 1,711개) 등

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.(연중)

❍ 사 업 비 : 5,180백만원 ⇒ 기간제 295명(남 125명, 여 170명)

※ 공무직 10명

□ 추진계획

❍ 녹지·공원, 조경지 등 예초 및 제초작업, 병해충 방제 연계적 시행

❍ 조경 시설물 사전 점검, 도색 등 수시 정비

❍ 시가지 가로수 정비, 녹지·공원 주요 시설물 정비 및 민원처리

❍ 공원 내 화장실(29개소) 청소 및 방역

❍비봉·선학공원 조성지 및 일반산업단지, 신진주역세권 등 관리 이관된 공원·녹지에 대하여 체계적인 관리를 위해 유지관리사업 시행

❍여름철 공원 내 물놀이시설의 위생 및 안전관리를 위하여 운영관리 및 청소 용역 시행

□ 기대효과

❍생활권 주변 녹지, 공원, 가로수 등의 체계적이고 지속적인 유지관리로  쾌적한 생활환경 제공 및 삶의 질 향상 도모

금호지 수변형 테마공원(SOC) 조성

❍금산면 금호지 일원 수변을 활용하여 월아산과 연계한 수변형 테마공원     조성으로 특색 있는 시민 휴식공간 제공 및 정주여건 개선

❍장기미집행공원 일몰제 시행으로 공원 해제에 따른 난개발 방지 및 민원    해소

□ 사업개요

❍ 위    치 : 금산면 용아리 금호지 일원(금호지 근린공원)

❍ 사업내용 : 테마정원 피크닉장, 편익 및 운동시설, 수변무대 조성 등(9ha)

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2022년

❍ 사 업 비 : 11,800백만원(균특 400, 시비 11,400)

*보상비 6,500, 용역비 200, 공사 5,100

□ 추진상황

❍ 2018. 11. : 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역 착수

❍ 2019.  2. : 토지 및 지장물 보상 협의 시행

❍ 2020.  1. : 도시공원위원회 심의
❍ 2020.  2. : 실시계획인가 신청

❍ 2020. 12. : 공사착공

❍ 2021.  5. : 1차분(물놀이시설) 시험가동

❍ 2021.  7. : 물놀이시설 및 놀이시설 개장

❍ 2021.  9. : 1차분(물놀이시설 및 놀이시설) 준공

□ 추진계획

❍ 2022.  4. : 공사 준공(2차분)

□ 기대효과

❍금산면 금호지 일원 수변을 활용하여 월아산과 연계한 수변형 테마공원 조성으로 특색 있는 시민 휴식공간 제공 및 정주여건 개선

가좌공원 기반조성 사업

❍2020년 7월 1일 해제된 도시공원을 조성하여 낙후된 원도심 주민들의 건강과 정서 함양에 기여

❍ 장기미집행 공원구역 내 주민 민원 해소 및 난개발 방지

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 가좌동 산87-1번지 일원

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2023년

❍ 사 업 량 : 718,203㎡

❍ 총사업비 : 48,000백만원 *토지매입비 40,000, 공사비 6,000, 기타 용역비 등 2,000

□ 추진상황

❍ 2018.  8. : 가좌공원 민간공원특례사업 우선협상대상자 선정

❍ 2019. 10. : 가좌공원 민간공원특례사업 도시공원위원회 심의(부결)

❍ 2020.  3. ~ 6. : 토지매입비 추경예산 편성(200억원)·실시계획 인가 고시

❍ 2020. 11. : 가좌공원 기반조성 기본계획수립 용역 시행

❍ 2021.  4. ~ 8. : 감정평가 시행 및 보상 협의(경남개발공사)

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 가좌공원 기본 계획 수립

❍ 2022.  5. : 공원조성계획 수립 및 실시설계 시행

❍ 2022. 12. ~ 2023. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

❍장기미집행 도시계획시설 해소에 따라 도시공원을 조성하여 시민들의 삶의 질을 증진시키고 쾌적한 도시환경 조성 유도

소망진산 테마공원 조성사업

❍낙후된 원도심 주민의 건강과 정서생활의 향상 및 남강변 주요 경관지 정비를 통한 지역 명소 제공, 관광 기반 구축

❍ 장기미집행공원 일몰제 시행에 따른 공원 실효 예방 및 난개발 방지

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 망경동 163-5번지 일원

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2022년

❍ 사 업 량 : 33,398㎡

❍ 총사업비 : 15,180백만원 *토지매입비 11,000, 공사 및 용역비 등 4,180

□ 추진상황

❍ 2019. 10. : 도시공원위원회 심의(공원조성계획 변경)

❍ 2020.  1. : 공원조성계획 변경 고시 및 실시계획 인가 신청

❍ 2020.  4. : 공사 착공

❍ 2021.  3. : 공원조성계획 변경(유등전시관 반영)
수용재결 위원회 심의(경남지방토지수용위원회) 및 결과통보

❍ 2021.  5. ~ 8. : 보상금 공탁 및 수용 개시 및 실시계획 인가 변경

□ 추진계획

❍ 2022.  3. : 준공(유등전시관 건립과 병행)

□ 기대효과

❍낙후된 원도심 주민의 건강과 정서생활의 향상 및 시가지 주요 경관지 장기미집행 도시계획시설 정비

망경공원 조성사업

❍도시공원 일몰제에 대비한 망경공원 조성사업과 연계하여 망진산 일원 관광인프라 구축을 통한 관광산업육성 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 망경동 산29-3번지 일원

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2023년

❍ 사 업 량 : 1,012,233㎡

❍ 총사업비 : 123,500백만원 정도(시비 76,500, 민간자본 47,000)

□ 추진상황

❍ 2019.  3. : 망경공원 기본구상 및 타당성 검토

❍ 2019.  7. : 일몰제 대비 실시계획 인가 용역 및 1단계 보상시행

❍ 2019. 11. : 망경공원 조성사업 기본계획 수립 용역 시행

❍ 2020.  6. ~ 8. : 실시계획 인가 고시 및 타당성 조사 의뢰

❍ 2021.  3. : 보상(2단계) 계획공고

❍ 2021.  7. ~ 8. : 타당성조사 통보 및 자체 투자심사 의뢰, 실시설계 시행

❍ 2021. 11. : 보상완료 구간 지장물 철거

□ 추진계획

❍ 2021. 11. : 민간사업자 공모

❍ 2023. 12. : 관광시설 분야 사업완료

□ 기대효과

❍남강의 역사문화권역과 연계한 망진산 일원 관광인프라 구축을 통한 관광산업 육성

상봉동 문화(역사)공원 조성사업

❍상봉동 삼선암 주변(황새등) 일대 재해위험에 대한 사전예방과 삼선암 고려동종의 역사성을 널리 알리고, 산림복원 및 시민 휴식공간 제공함과 동시에 문화역사가 있는 공원 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 상봉동 651번지 일원

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2023년

❍ 사 업 량 : 8,800㎡

❍ 총사업비 : 3,500백만원 *토지매입비 2,550, 공사비 800, 기타 용역비 등 150

□ 추진상황

❍ 2020.  9. : 상봉동 대롱골 황새등 역사공원 결정 계획 추진

❍ 2021.  4. : 진주도시관리계획(재정비 : 시장결정사항) 결정(변경) 및 지형도면 고시

□ 추진계획

❍ 2021. 11. : 문화재 지표조사 및 지장물 조사 용역

❍ 2022.  1. : 토지 및 지장물 보상 계획 공고
공원조성계획 실시설계 용역

❍ 2022.  2. : 보상협의

❍ 2022.  3. : 실시계획인가 신청 및 협의

❍ 2022.  6. : 보상완료 구간 지장물 철거(이사완료 후)

❍ 2022. 10. ~ 2023. 6. : 사업 착공 및 준공

□ 기대효과

❍도시공원을 조성하여 재해위험에 대한 사전예방 및 산림복원과 지역문화 공간 활성화와 지역민의 건강하고 쾌적한 삶의 질 향상에 기여

진주시 민간공원조성 특례사업

❍도시공원 일몰제(2020. 7. 1.) 도래에 따라 막대한 재원이 필요한 장재공원에 대해 민간자본을 유치하여 도시공원 확충에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 장재동 산2번지 일원

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2024년

❍ 사 업 량 : 231,959㎡

❍ 총사업비 : 356,300백만원 *토지매입비 : 33,000(진주시 시행)

□ 추진상황

❍ 2018.  8. : 우선협상대상자 선정

❍ 2019.  8. ~ 10. : 도시공원위원회 및 도시계획위원회 심의

❍ 2020.  2. : 실시협약 체결(사업시행자 지정 - 예치금 납부 230억원)

❍ 2020.  6. ~ 7. : 실시계획 인가 고시 및 보상계획 공고

❍ 2021.  6. ~ 7. : 주택건설사업 승인(798세대) 및 수용 재결 신청 완료

❍ 2021.  9. : 수용 재결 공탁 및 아파트 분양

❍ 2021. 10. : 도로확장 및 회전교차로 공사 착공, 공원공사 시행

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 도로 확장 공사 준공

❍ 2022.  1. : 아파트 공사 시행

❍ 2024. 12. : 사업 준공

□ 기대효과

❍도시공원 일몰제(2020. 7. 1.) 시행에 따라 시민이용도가 높음에도 불구하고 막대한 재원이 필요하여 공원조성이 어려운 장재공원에 대해 민간자본을 유치하여 시민들에게 정서생활 함양 등 기여

진양호 친환경 레저 힐링공간 조성 추진

❍장기미집행공원 일몰제 시행(2020. 7. 1.)됨에 따라 사유지 매입하지 않을 경우 공원 결정 실효토록 되어 있어 진양호 수변 난개발 우려, 체계적 관리 필요

❍시설 노후 등으로 이용객 감소가 가속화되고 있는 진양호 일원을 남강의 역사문화와 연계한 관광인프라 구축을 통해 관광산업육성, 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 판문동 진양호 일원

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2026년

❍ 사 업 량 : 1,426,680㎡(진양호근린공원, 가족공원 구역 면적), 둘레길 38㎞

❍ 사업내용: 진양호 복합전망타워, 힐링숲, 아트센터(소공연장), 다목적 광장, 공원편익시설, 레저/문화시설, 진양호반 둘레길 등

❍ 총사업비 : 150,000백만원 정도(보상 58,000, 공사 및 용역(보상지 철거 포함) 92,000)

□ 추진상황

❍ 2018.  8. : 투자심사 및 공유재산 심의(자체), 편입 토지 손실보상 협의

❍ 2019.  4. : 진양호공원 활성화 계획 및 관리 운영 방안 수립 용역 완료

❍ 2019.  5. : 진양호 르네상스 프로젝트 추진 관련 공공기관 업무협약(MOU)

❍ 2020.  6. : 어린이 물놀이터 준공, 진양호반 둘레길 착공

❍ 2020. 11. : 진양호 근린공원 조성사업 중앙투자심사 승인

❍ 2020. 12. : 진양호반 둘레길(양마산지구) 준공, 귀곡지구 착공

❍ 2021.  5. : 진양호공원 숲 복원 및 도시숲 조성 시행

❍ 2021.  7. : 보상지 철거 및 정비 시행

❍ 2021.  9. : 꿈키움동산 다이나믹 광장 조성 시행

❍ 2021. 11. : 작은 도서관, 소규모 카페갤러리(리모델링) 시행

□ 추진계획

❍ 2021. 11. : 진양호반 둘레길(귀곡지구) 준공

❍ 2021. 12. : 다이나믹광장·진양호반 둘레길 조성사업 준공

❍ 2022.  2. : 진양호 가족공원 조성사업 시행

❍ 2022.  6. : 진양호 친환경 레저 힐링공간 조성(1단계:공원/문화시설 등) 준공

□ 기대효과

❍장기미집행공원 일몰제 시행(2020. 7. 1.)에 따른 난개발 방지 및 진양호 수변 경관 요충지 보전, 수자원 보호에 기여

❍ 진양호 일원 정비를 통한 관광기반 구축 및 지역 경제 활성화 기여

매 립 장 사 업 소

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황(2개 팀 : 관리, 시설)	(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	11	1	4	2	2	2	청원경찰 3 환경공무직 4 공 무 직 5
현 원	10	1	4	3	1	1
증 감	△1	-	-	1	△1	△1

□ 위 원 회	(2021. 11. 1. 현재)

구 분 위원회수	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여 성 위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
기금운영 심의위원회	9	5	4	-	-	4	100	2	50

□ 예산규모	(단위 : 억원)

구 분	2020년	2021년	증 감	비 고
총 계	83	129	46
일반회계	79	125	46
기 금	4	4	-

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄                                                     (단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	8	4	4	-	-
예산사업	8	4	4	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업  ---  4건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주 요 성 과
쓰레기매립장 주변지역 주민지원사업	❍ 사업내용 - 내동면 가호마을 용수관 정비공사 외 5건 ❍ 사업비 : 150백만원	□ 추진사항 ❍ 착공 : 2021. 2. 24. ❍ 준공 : 2021. 6. 28. □ 향후계획 ❍ 2022. 1. : 2022년 주민지원 사업 추진	❍주민 복지증진 및 쾌적한 환경 제공
매립장내 CCTV 설치사업	❍ 사업내용 - CCTV 설치 : 5개소 ❍ 사업비 : 100백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 8. ~ 2021. 10.	□ 추진사항 ❍ 착공 : 2021. 8. 24. ❍ 준공 : 2021. 10. 21.	❍매립장 효율적 관리 및 안전사고 예방
재활용품 선별장 파봉정량공급기 설치	❍ 사업내용 - 재활용품 선별장 파봉정량공급기 설치 ❍ 사업비 : 254백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 4. ~ 2021. 8. ❍ 시설용량 : 8톤/h	□ 추진사항 ❍ 착공 : 2021. 4. 9. ❍ 준공 : 2021. 8. 27.	❍ 재활용품의 효율적 관리
재활용품 선별장 압축기 교체	❍ 사업내용 - 노후 압축기 교체 ❍ 사업비 : 127백만원 ❍ 사업기간 - 2021. 5. ~ 2021. 8. ❍ 시설용량 : 3톤/h	□ 추진사항 ❍ 착공 : 2021. 5. 7. ❍ 준공 : 2021. 8. 5.	❍ 재활용품의 효율적 관리

□ 추진중 사업  ---  4건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
쓰레기매립장 유지관리	❍ 사업내용 - 복토작업 10,000㎥ - 침출수 배제 L=2.0km - 우수 배제 L=1.0km - 차수시트 보호 1식 - 제방 구축 1식 - 우수박스 정비 1식 - 매립장 내 가로등 설치 1식 ❍ 사업비 : 390백만원 ❍ 기 간 - 2021. 1. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 복토작업 : 수시 ❍ 내부진입로 및 배수로 정비공사, 시트정비 : 수시 ❍ 침출수 배제시설 정비 : 수시 ❍ 가로등 설치 : 완료 □ 향후계획 ❍ 지속적인 매립장 유지관리 및 수시 점검으로 시설물의 효율적이 고 체계적 관리
진주권 광역 쓰레기매립장 사후환경영향 조사 용역	❍ 사업내용 - 환경영향평가 협의에 따른 조사 및 보고서 작성 ❍ 사업비 : 180백만원 ❍ 기 간 - 2021. 1. ~ 12. ❍ 용역사 : ㈜한성개발공사	□ 추진사항 ❍ 2021. 1. : 용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2021. 12. : 용역 완료 ❍ 2022. 1. : 보고서 승인기관 제출 (낙동강유역환경청, 경상남도)
음식물류 폐 기 물 공공처리시설 민간위탁 운영	❍ 사업내용 - 음식물류폐기물 처리 ❍ 용역비 : 2,352백만원 ❍ 시설용량 -음식물류폐기물 110톤/일 -음폐수 110톤/일 ❍ 운영기간 -2021. 2. 1. ~ 2022. 1. 31. ❍ 운영자 -㈜범한엔지니어링종합 건축사사무소	□ 추진사항 ❍ 2021. 2. 1. : 용역 착수 - 음식물류폐기물 : 22,847톤 (일평균 75톤) □ 향후계획 ❍ 2022. 1. : 용역 완료
재활용품 선별장 민간 위탁운영	❍ 사업내용 - 재활용품 선별 및 처리 ❍ 용역비 : 1,713백만원 ❍ 시설용량 : 50톤/일 ❍ 운영기간 -2021. 2. 1. ~ 2022. 1. 31. ❍ 운영자 : ㈜진사재활용	□ 추진사항 ❍ 2021. 2. 1. : 용역 착수 - 재활용품 처리량 : 4,795톤 (일평균 31.5톤) □ 향후계획 ❍ 2022. 1. : 용역 완료

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 매립장의 완벽한 관리·운영으로 생활폐기물의 안정적 처리

□ 재활용품선별장 및 음식물류폐기물 공공처리시설의 내실 있는 운영

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	6	15,422	6	-	-	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	6	15,422	6	-	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

쓰레기매립장 유지관리

❍매립장의 완벽한 관리와 운영으로 생활폐기물을 안정적으로 처리하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 내동면 유수길75번길 63

❍ 면    적 : 793,909㎡(매립지 261,500㎡)

❍ 매 립 량(2021. 10월 말) : 3,031,605㎥(일평균 : 204㎥)

❍ 매립기간 : 1995년 ~ 사용 종료 시 [매립완료 : 2056년(추정)]

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업내용	사업비	비 고
매립장유지관리	- 복토재 구입(V=9,000㎥) - 침출수 및 우수 배제 - 내부 진입로 및 배수로 정비 - 매립장 휀스 설치	300

□ 기대효과

❍ 지속적인 매립장 유지관리로 안정적인 쓰레기 처리

진주권 광역쓰레기매립시설 증설사업(10차)

❍ 매립장 증설공사 추진으로 매립공간을 확보하여 폐기물의 안정적 처리

※기 차수시설 2022년 매립완료 예정(증설사업으로 2030년까지 매립용량 확보)

□ 사업개요

❍ 대    상 : 진주권 광역쓰레기매립장

❍ 위    치 : 내동면 유수길75번길 63(매립장 내)

❍ 사 업 량 : 부지조성 및 시트부설 A=19,000㎡, 우수배제시설 L=1.5km, 유량조정조 설치 V=3,000㎥

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 5.(5년)

❍ 사 업 비 : 5,998백만원[국비 18억(30%), 시비 42억(70%)]

□ 추진상황

❍ 2019.  7. ~ 2020. 2. : 기본계획 용역 시행

❍ 2019. 11. : 지방재정투자사업 심사(자체)

❍ 2020.  3. ~ 2020. 9. : 기본 및 실시설계 용역 시행

❍ 2021.  5. : 사업 착공

□ 추진계획

❍ 2023.  5. : 사업 준공

❍ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022	2023	비 고
계	5,998	3,200	2,798
국 비	1,799	900	899
시 비	4,199	2,300	1,899

□ 기대효과

❍ 매립공간 확보로 안정적인 쓰레기 처리 및 매립환경 개선

매립장 침출수처리시설 개선사업

❍폐기물관리법에 따른 배출허용기준 및 하수처리시설의 연계수질을 준수하고,     장기간 사용으로 노후된 처리시설을 정비하여 침출수처리시설 운영에

만전을 기하고자 함

□ 사업개요

❍ 대    상 : 매립장사업소 내 침출수처리시설

❍ 사 업 량 : 색도제거 및 탈취설비 설치 1식

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2022년(3년)

❍ 사 업 비 : 3,000백만원

□ 추진상황

❍ 2019.  9. : 매립장 침출수처리시설 설치사업 기본계획 용역 완료

❍ 2019. 10. : 지방재정투자사업 심사(자체)

❍ 2020.  2. ~ 2020. 12. : 기본 및 실시설계 용역 시행

❍ 2020. 11. : 지방재정투자사업 재심사(자체)

❍ 2021.  3. : 사업 착공

□ 추진계획

❍ 2022.  1. : 시운전

❍ 2022.  2. : 사업 준공

❍ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기 투자	2022	2023	비 고
계	3,000	3,000
국 비
도 비
시비(기금)	3,000	3,000
기 타

□ 기대효과

❍ 침출수 배출허용 기준 및 하수처리시설 방류수질 개선

음식물류폐기물 공공처리시설 개선사업

❍음식물류폐기물 공공처리시설 기술진단에 따른 개선방안과 처리시설 노후화에 따른 교체계획을 시행하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

❍ 대    상 : 음식물류폐기물 공공처리시설

❍ 위    치 : 내동면 유수길75번길 63(매립장 내)

❍ 사 업 량 : 후숙시설 증설, 악취저감시설 설치, 발효조·후숙조 보수,
소화조 개선 등

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2023년(3년)

❍ 사 업 비 : 10,000백만원(폐기물처리시설사업 특별회계 100%)

□ 추진계획

❍ 2021. 1. ~ 2022.  2. : 기본 및 실시설계 용역 시행

❍ 2022. 5. ~ 2023.  4. : 공사 시행

❍ 2023. 5. ~ 2023. 12. : 시운전 및 준공

❍ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기 투자	2022	2023	비 고
계	10,000	500	6,500	3,000
국 비
도 비
시비(기금)	10,000	500	6,500	3,000
기 타

※ 폐기물처리시설 국고보조금 업무처리지침에 따른
□폐촉법 제6조 (폐기물처리시설 설치부담금)□을 사업비로 사용

□ 기대효과

❍ 시설물 개선 및 후숙시설 추가 설치 등으로 음식물류폐기물의 안정적 처리

❍ 인근지역 주민의 악취 등 생활불편 해소

음식물류폐기물 공공처리시설 및 침출수처리시설 민간위탁 운영

❍음식물류폐기물 및 침출수의 원활한 처리와 안정적인 시설운영을 위하여     음식물류폐기물 공공처리시설 및 침출수처리시설 민간위탁 운영

□ 시설현황

❍ 시설용량 : 퇴비화시설(110톤/일), 음폐수바이오가스화시설(110톤/일)
침출수처리시설(400톤/일), 삼계중계펌프장(75HP×2대)

❍ 주요공정

- 퇴비화시설 : 음식물류폐기물 유입 → 파쇄･선별 → 발효･후숙 → 퇴비

- 음폐수바이오가스화시설 : 음폐수 투입 → 혐기성소화 → 가스저장 → 발전

- 침출수처리시설 : 화학적처리(펜톤산화법)

□ 사업개요

❍ 대    상 : 음식물류폐기물 공공처리시설 및 침출수처리시설

❍ 위탁기간 : 2022. 2. 1. ~ 2025. 1. 31.(3년)

❍ 사 업 량 : 음식물류폐기물 처리(110톤/일) 및 침출수 처리(400톤/일)

❍ 위 탁 비 : 10,350백만원(2022년분 3,450백만원)

□ 추진상황

❍ 2021.  7. ~ 2021.  9. : 원가산정 및 위탁운영방안 용역 시행

❍ 2021. 10. : 계약심의위원회 심의

□ 추진계획

❍ 2021. 12. : 입찰 공고 및 계약

❍ 2022.  2. : 용역 착수

□ 기대효과

❍음식물류폐기물 공공처리시설 및 침출수처리시설을 전문업체에 위탁운영하여 음식물류폐기물 및 침출수의 안정적 처리

재활용품선별장 민간위탁 운영

❍재활용품의 원활한 처리와 안정적인 시설운영을 위하여 재활용품선별장      민간위탁 운영

□ 시설현황

❍ 위    치 : 내동면 유수길75번길 27

❍ 시설용량 : 50톤/일

❍ 처 리 량 : 32톤/일

❍ 주요공정 : 재활용품 선별·압축·감용

□ 사업개요

❍ 위탁기간 : 2022. 2. 1. ~ 2024. 1. 31.(2년)

❍ 사 업 량 : 재활용품 처리(32톤/일)

❍ 용 역 비 : 4,784백만원(2022년분 2,374백만원)

❍ 운 영 자 : ㈜진사재활용

□ 추진상황

❍ 2021.  7. : 민간위탁 운영 수수료 산정 용역 착수

❍ 2021.  9. : 민간위탁 운영 수수료 산정 용역 완료

❍ 2021. 10. : 계약심의위원회 심의

□ 추진계획

❍ 2022.  1. : 위탁용역 계약

❍ 2022.  2. : 용역 착수

차량등록사업소

목       차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총 괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	19	1	4	5	5	4
현 원	16	1	9	2	4	-
증 감	△3	-	5	△3	△1	△4

□ 자동차 등록현황

(2021. 10. 31. 현재, 단위 : 대)

구 분	계	승용차	승합차	화물차	특수차
계	174,010	139,418	4,953	28,857	782
관 용	642	213	176	234	19
자가용	166,880	136,479	3,744	26,306	351
영업용	6,488	2,726	1,033	2,317	412

※ 건설기계 : 5,378대 / 이륜자동차 : 11,710대

□ 예산규모

(단위 : 억원)

구 분	2020년	2021년	증 감	비 고
계	4.3	5.3	1
일반회계	1.1	1.0	△0.1
특별회계	3.2	4.3	1.1

Ⅱ. 2021년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진중	시기 미도래	미착공	비고
계	2	-	2	-	-
예산사업	-	-	-	-	-
비예산사업	2	-	2	-	-

2. 추진실적

□ 추진중 사업  ---  2건

사  업  명

사  업  개  요

추  진  상  황

문제점 및 대책

차량관리

업무의

원활한 추진

❍ 관련 법규에 따른 차량

소유자 이행사항 안내

❍ 자동차 소유자 이행사항 안내

- 종합검사 사전 안내 : 77,138건

- 검사기간 경과 안내 :  9,889건

- 검사 명령          :  3,423건

- 의무보험 가입 촉구 :  2,985건

❍ 건설기계 소유자 이행사항 안내

- 정기검사 사전 안내 : 2,382건

- 정기검사 최고      :  160건

- 부적합 정비명령    :   48건

❍ 법규 위반 과태료 고지

및 독촉 적기 이행

❍ 과태료 고지 및 독촉

(단위 : 건)

구 분	사전 통지	고지서 발송	독촉장 발송
계	13,201	4,931	3,490
자동차관리법	4,642	2,336	1,569
자동차손해배상 보장법	8,173	2,332	1,862
건설기계관리법	386	263	59

차량관리

업무의

원활한 추진

❍ 과태료 체납자 차량

압류

❍ 과태료 체납자 차량 압류

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	금 액
계	3,010	630
자동차관리법	1,316	261
자동차손해배상 보장법	1,625	345
건설기계관리법	69	24

❍ 과태료 징수 철저

❍ 법규 위반 과태료 징수 실적

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	금 액
계	9,659	992
자동차관리법	4,848	507
자동차손해배상 보장법	4,548	429
건설기계관리법	263	56

❍의무보험 미가입 운행

차량 범칙금 부과/징수

및 송치

❍ 피의자 조사 및 조치

- 출석요구서 통지 : 139건

- 범칙금 징수 : 25건 / 10백만원

- 검찰청 송치 : 4건

신속･정확하고

친절한

민원 처리

❍ 차량 등록 민원처리

❍ 민원처리 현황

(단위 : 건)

구 분	종 류	건 수
계		329,199
자동차	신규	9,258
	이전	16,242
	변경/말소	29,294
	저당/압류	91,686
	제증명	163,873
이륜 자동차	사용신고	1,865
	변경신고	1,150
	폐지신고	2,049
	제증명	469
건설기계	신규	185
	변경/말소	901
	저당/압류	1,000
	제증명	11,227

신속･정확하고

친절한

민원 처리

❍ 차량 취･등록면허세

부과

❍ 취득세, 등록면허세 부과 현황

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	금 액
계	70,831	34,292
취득세	31,097	24,381
등록면허세	28,026	817
전국 무관할	11,708	9,094

*신용카드 수납 : 8,962건 / 7,274천원

❍ 민원인 편의 제공

❍ 자동차등록번호 사전예고제 시행

- 배정 예정 자동차등록번호를 매주

시 홈페이지 사전예고

❍ 효율적인 시스템 구비

- 고객 순번대기 시스템 운용

-자동차등록번호 선택을 위한 양방향

모니터 운용(3대)

❍ 민원인 전용 비품 비치

- 복사기, 팩스기, 컴퓨터,

문서세단기, 휴대폰 충전기 등

❍직원 친절도 및 서비스

향상을 위한 고객 의견

수렴

❍ 직원 친절교육 실시

- 교 육 일 : 매주 월요일

- 민원인 응대 요령, 전화 예절 등

❍ 직원 청렴교육 실시

- 교 육 일 : 분기별 1회

- 청렴 교육을 통한 일상생활 속

청렴 분위기 조성

❍ 민원인 만족도 설문조사 실시

- 기    간 : 상·하반기(2회)

- 설문인원 : 100명

Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 차량관리업무의 원활한 추진

❍ 관련 법규에 따른 차량 소유자의 이행사항 적기 안내

❍ 법규 위반자에 대한 과태료 고지, 독촉 등 조치 철저

❍ 과태료 체납자 차량 압류 및 과태료 징수 철저

□ 신속·정확하고 친절한 민원 처리

❍ 부단한 업무 연찬에 의한 신속·정확한 민원 처리

❍ 정기적인 직원 친절교육 실시로 친절도 향상

❍ 고객 만족도 설문조사 실시로 보다 나은 행정서비스 제공

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	2	-	2	-	-	-
일반시책사업	2	-	2	-	-	-
주요예산사업	-	-	-	-	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

차량관리업무의 원활한 추진

❍ 자동차 및 건설기계 소유자의 이행사항 적기 안내

❍ 자동차 관련 법규 위반자에 대한 조치 철저

□ 사업개요

❍ 자동차·건설기계 관련 법규 숙지로 시민에게 정확한 정보 제공

❍ 자동차·건설기계 정기(종합)검사 안내 및 의무보험 가입 촉구 철저

❍ 법규 위반자에 대한 과태료 부과 및 독촉 등 행정절차 이행

□ 추진계획

❍ 자동차 및 건설기계 정기(종합)검사 사전 안내 및 명령, 최고

❍ 의무보험 가입 명령(사전 안내 : 보험회사)

❍ 법규 위반자에 대한 행정절차 이행 : 과태료 부과 및 압류

❍ 의무보험 미가입 자동차 운행 방지를 위한 사건조사 및 검찰 송치

□ 기대효과

❍ 차량 소유자 의무사항의 적기 안내로 행정 신뢰도 제고

❍ 적극적인 징수 활동으로 체납액 감소를 통한 세입 증대

신속·정확하고 친절한 민원 처리

❍ 빠르고 정확한 차량 등록 관련 업무처리로 고객 욕구 충족

❍ 정성을 다하는 친절한 민원 응대로 봉사행정 구현

□ 사업개요

❍ 자동차, 건설기계 등록 관련 업무 추진

❍ 다양한 행정서비스 제공으로 고객 만족도 향상

□ 추진계획

❍ 차량 관련 민원 처리

- 자동차, 건설기계 신규·변경·이전·말소등록 신청 수리

- 이륜자동차 사용·변경·폐지 신고 수리

- 차량 관련 제증명 발급 등

❍ 업무 연찬 및 친절교육 실시 : 매주 월요일

❍ 민원 편의를 위한 시책 추진

- 자동차등록번호 사전예고제 시행

- 민원실 순번대기 번호표제 운영

- 민원전용 복사기, 팩스기, 컴퓨터, 휴대폰 충전기 등 비치

- 민원만족도 설문조사 실시 : 상·하반기 각 1회

- 차량 관련 홍보물 비치 및 고객이 원하는 정확한 정보 제공

□ 기대효과

❍ 정확하고 공정한 업무처리 및 신속한 민원처리로 행정서비스 향상